АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 153022, 

<

...> http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А17-8277/2024

г. Иваново

24 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2025 года 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Калюжного А.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Камышанским А.П.,  

рассмотрев в судебном заседании дело № А17-8277/2024  

по иску акционерного общества «Дельта» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:153012, 

<

...>)  

к акционерному обществу «Ивгортеплоэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>),  

при участии в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»  

об обязании заключить договор на замену и установку узлов учета тепловой энергии, теплоносителя (с учётом принятых судом уточнений в порядке статьи 49 АПК РФ),  

при участии представителей сторон: от истца – не явился, извещен; от ответчика – не явился, извещен; от третьего лица – не явился, извещен; 

руководствуясь статьями 64, 65, 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

урегулировать разногласия, возникшие между акционерным обществом  

«Дельта» (ИНН 

<

***>) и акционерным обществом «Ивгортеплоэнерго» (ИНН  

<

***>) при заключении договора на установку и замену узлов учета тепловой  

энергии, теплоносителя, изложить в следующей редакции: 

пункт 2.1.1 договора: «Завершить работы по установке коммерческих узлов  

учета тепловой энергии, теплоносителя в срок не позднее 01.09.2026;» пункт 3.1 договора: «Срок окончания работ - не позднее 01.09.2026.»; 

пункт 4.1 договора: «Цена настоящего договора включает в себя стоимость  

приобретенного оборудования, работ по проектированию, монтажу, пуско-наладке  

узлов учета тепловой энергии, теплоносителя. Ориентировочная стоимость работ указана в Приложении № 1 к настоящему договору. Окончательная стоимость работ будет определена сторонами с учетом фактически выполненным объемом работ на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также стоимостью приобретенных Исполнителем приборов учета тепловой энергии, теплоносителя, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.»;  

пункт 4.2.1 договора: «Оплата осуществляется равными долями в течение пяти лет с даты установки (замены) приборов учёта.»;  

пункт 4.2.2 договора: «В случае, если собственники помещений многоквартирных жилых домов приняли решение оплатить цену работ единовременно или с меньшим периодом рассрочки, а также при наличии в многоквартирном доме нежилых помещений и помещений, принадлежащих муниципальному образованию, оплата производится единовременно в течение 30 календарных дней с момента подписания между сторонами акта выполненных работ.»;  

пункт 4.4 из договора не исключать; 

включить пункт 6.7 договора: «За просрочку исполнения обязательства по установке (замене) Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пени), определяемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, но не более чем в размере цены выполнения работ, оказания услуг по договору.»;  

Взыскать с акционерного общества Ивгортеплоэнерго» (ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Дельта» (ИНН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Заявление ФИО1 о процессуальном правопреемстве в части взыскания судебных расходов удовлетворить.  

Заявление ФИО2 о взыскании с АО «Ивгортеплоэнерго» судебных расходов удовлетворить частично.  

 Взыскать с акционерного общества «Ивгортеплоэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) в пользу ФИО2 (ИНН 

<

***>) 49 000 руб. судебных расходов.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

Судья: А.Н. Калюжный