﻿

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-163028/20-134-1071

30 марта 2021 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения суда изготовлена 17 марта 2021 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 30 марта 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У.Г. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ СЕРВИС" (109431 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ ДОМ 70КОРПУС 1 ЭТ 2 ПОМ XII КОМ 3Т, ОГРН: 1147746306982, Дата присвоения ОГРН: 21.03.2014, ИНН: 7721826540)

к ответчику АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ВНЕШСТРОЙИМПОРТ" (125466, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СОКОЛОВО-МЕЩЕРСКАЯ, 25, 2, ОГРН: 1117746209690, Дата присвоения ОГРН: 22.03.2011, ИНН: 7710885368)

о взыскании задолженности по договору № Кун13 09-06/2016 от 09.06.2016 г. в размере 370 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Подорожная А.Ф. (паспорт, доверенность № б/н   от  30.06.2020  г., диплом);

от ответчика: Лаврова И.Г. (паспорт, доверенность №  34   от 15.03.2021  г., диплом);

УСТАНОВИЛ:

ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с АО "ВНЕШСТРОЙИМПОРТ" (далее – ответчик) в пользу общества задолженности по договору № Кун13 09-06/2016 от 09.06.2016 г. в размере 370 000 руб.

Заявление мотивировано тем, что ответчиком не были исполнены встречные обязательства по договору.

Представитель истца требования поддержал в полном объема.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что в соответствии с условиями договора от 09.06.2016 № Кун13 09-06/2016 с учетом дополнительных соглашений выполнял строительные работы на объекте заказчика стоимостью 3700000 рублей, что подтверждается актами о приемке выполненных работ.

Ответчик работы принял, мотивированный отказ не заявил, осуществил частичную оплату. Задолженность за выполненные работы составила 370 000 рублей.

На основании изложенного истец обратился с иском в суд.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Доводы, изложенные в исковом заявлении, не приняты судом во внимание и отклонены ввиду несоответствия их фактическим материалам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением истцом норм материального права.

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

Согласно п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При этом, согласно требованиям ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с нормой ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода, при этом, п. 2 названной статьи предусмотрено, что если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 2.1. Договора Субподрядчик обязуется выполнить подрядные Работы, указанные в Протоколе твердой договорной цены по строительству объекта: жилого дома по адресу: г. Москва, район Кунцево, кв. 20, корп. 13 (г. Москва. Истринская ул., вл. 5), именуемый в дальнейшем Объект, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией выданной в производство работ, за Цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства Объекта, установленные Графиком производства работ и стоимостью этапов, а Подрядчик - принять и оплатить Работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно п. 2.3 Договора, результатом выполненных Работ по Договору является выполненный вид работ по Договору, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, по которому подписан Итоговый акт выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

В соответствии с подпунктом 4.4.1. п. 4.4 Договора оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за отчетный месяц, при условии подтверждения работ Подрядчиком (пп. 6.1.1. - 6.1.2. настоящего Договора) в размере 90% от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за минусом суммы удержания авансового платежа в размере 100% объема выполненных работ в отчетном периоде. Оплата выполненных Работ осуществляется Подрядчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий год.

При этом денежная сумма в размере 10% от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) удерживается Подрядчиком в качестве обеспечения выполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания).

В первую очередь удерживается соответствующая сумма гарантийного удержания, во вторую очередь соответствующая сумма аванса.

В соответствии с подпунктом 4.4.2. п. 4.4 Договора сумма гарантийного удержания в размере 10% от стоимости Работ выплачивается Субподрядчику в течение 120 календарных дней после предоставления Подрядчику всей исполнительной документации, принятия исполнительной документации КП «УГС» и подписания Акта о приемки результатов выполненных работ (итоговый акт).

Согласно подпункту 4.4.7.1. п. 4.4.7. акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и любые иные аналогичные документы, используемые Сторонами, никоим образом не ограничивают, не уменьшают или не отменяют обязательства или ответственность Субподрядчика по настоящему Договору.

По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) к Подрядчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения подтвержденных Работ (абз.2. п. 1.11. Договора).

В соответствии с п. 6.2. Договора приемка результатов Работ, выполненных С\ бпо.чря.1чиком в полном объеме, осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы в следующем порядке:

6.2.1. Субподрядчик не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дня до даты окончания Работ согласно Графику производства работ (Приложение № 1) в полном объеме обязан письменно известить Подрядчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Договору.

Комиссия, созданная Подрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала работы проводит проверку качества и объемов выполненных Субподрядчиком Работ, а также их соответствие действующему на территории Российской Федерации и города Москвы законодательству.

В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут выявлены Недостатки (дефекты) Работ, невыполненные Работы, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результатов выполненных Работ и Объекта, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных Недостатков (дефектов), объем Работ, подлежащий выполнению Субподрядчиком, а также срок, необходимый Субподрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней. Субподрядчик должен принять все меры по устранению Недостатков (дефектов), выявленных Комиссией в ходе приемки результатов выполненных в полном объеме работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

В случае если при проведении процедуры приемки результатов Работ, выполненных в полном объеме, Комиссией будут выявлены Недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Субподрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Субподрядчиком в указанный в п.6.2.3 Договора срок, Подрядчик вправе отказаться от подписания Акта о приемки результатов выполненных работ (итоговый акт). В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в пункте 6.2.3 Договора.

В случае отказа Субподрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных Комиссией, Подрядчик самостоятельно составляет такой Протокол, в котором указывается срок устранения выявленных Недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами Комиссии. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Субподрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Протокола о Недостатках (дефектах) не предоставит Подрядчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Субподрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Субподрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных Работ, содержащимися в представленном Подрядчиком Протоколе о Недостатках (дефектах), и в этом случае Субподрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Подрядчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Подрядчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору, а также нарушением Срока окончания Работ, установленного п. 3.3 Договора.

При отказе Субподрядчика исправить выявленные Недостатки (дефекты), либо неполучения Подрядчиком письменного ответа Субподрядчика в течение срока, установленного в пункте 6.2.4 Договора, Подрядчик вправе удержать стоимость данных Работ из причитающихся Субподрядчику платежей.

В случае не устранения Субподрядчиком выявленных Недостатков (дефектов) в сроки, указанные в настоящем разделе Договора, Подрядчик вправе привлечь к устранению Недостатков (дефектов) третье лицо. В этом случае Субподрядчик также обязан возместить

Подрядчику понесенные последним расходы, связанные с устранением Недостатков (дефектов) третьим лицом.

Повторная процедура сдачи-приемки Работ проводится в порядке, установленном в п. 6.2. Договора, по письменному извещению Подрядчика Субподрядчиком об ус гранении выявленных в ходе приемки Работ Недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат Работ Подрядчику.

После устранения всех замечаний Субподрядчиком, предоставления всей исполнительной документации Субподрядчиком, Стороны подписывают Акта о приемки результатов выполненных работ (итоговый акт), составленный в произвольной форме.

Согласно п. 6.3. Договора Право собственности на результат Работ, включая строительные/отдел очные материалы и оборудование, используемые для выполнения Работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по Договору Работ, строительных/отделочных материалов и оборудования, переходит от Субподрядчика к Подрядчику с даты подписания Сторонами Акта о приемки результатов выполненных работ (итоговый акт), а в случае досрочного расторжения Договора - с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных до даты расторжения Договора Работ.

Согласно п. 8.26 Договора Субподрядчик обязан к моменту приемки выполненных работ передать Подрядчику по Акту приема-передачи, полный пакет Исполнительной документации в 5-ти экземплярах (оригинала) и иных документов, относящихся к деятельности Субподрядчика, необходимый для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе оригиналы: исполнительных чертежей и Актов на скрытые работы, а также 5-ть экземпляров копий, заверенных Субподрядчиком, сертификатов качества на материалы, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции. Количество предоставляемой документации может быть изменено по усмотрению Подрядчика.

В соответствии с п. 8.26 Договора Субподрядчик обязан при проведении приемки результатов Работ, выполненных в полном объеме, в порядке, предусмотренном Договором, Субподрядчик обязан представить Подрядчику Акт приема-передачи (п.8,26), в подлинном экземпляре.

Ответчик указал, что Истец (Субподрядчик по Договору) в нарушение вышеуказанных положений Договора и норм ГК РФ письменно не извещал Подрядчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Договору, сдачу результатов Работ, выполненных в полном объеме в порядке, предусмотренном Договором не осуществлял, полный пакет исполнительной документации в количестве экземпляров, предусмотренном Договором по Акту приема-передачи Подрядчику не передал, сам Акт приема-передачи в подлинном экземпляре Подрядчику не предоставил, на подписание Итогового акта Подрядчик не приглашался, Итоговый акт Субподрядчиком в адрес Подрядчика не направлялся, Итоговый акт между Подрядчиком и Субподрядчиком не подписан по настоящее время.

При таких обстоятельствах ввод объекта строительства в эксплуатацию 30.09.2016г. не является подтверждением сдачи Работ Субподрядчиком Подрядчику, наличие Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №77-145000-007501-2016 не является Итоговым актом, подписанным Подрядчиком и Субподрядчиком, тем более, что отчетные периоды, указанные в Акте о приемке выполненных работ № 1 от 19.10.2016 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 19.10.2016 (отчетный период с 20.09.2016 по 19.10.2016) и в Акте о приемке выполненных работ № 2 от 19.11.2016 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 19.11.2016 (отчетный период с 20.10.2016 по 19.11.2016), являются более поздними, чем дата Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №77-145000-007501-2016. То что КП «УГС» составлен Итоговый акт не подтвержден материалами дела, при этом составление и подписание Итогового акта КП «УГС» не предусмотрено Договором, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не составляется КП «УГС», а выдается в нашем случае органами исполнительной власти согласно п. 2.1. ч. 2 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не является событием, с которым подпункт 4.4.2. п. 4.4 Договора связывает возврат суммы гарантийного удержания.

Довод Истца о том, что расчёт 120 календарных дней нужно производить от даты подписания Ответчиком Акта о приемке выполненных работ последнего этапа, т.е. с 19.11.2016 года противоречит подпункту 4.4.2. п. 4.4 Договора, согласно которому расчет следует производить от даты подписания Акта о приемки результатов выполненных работ (итоговый акт). При этом обязательность подписания Акта о приемки результатов выполненных работ (итоговый акт) между Подрядчиком и Субподрядчиком для сдачи результатов Работ по Договору и выплаты суммы гарантийного удержания прямо следует из положений п. 2.3., подп. 4.4.2. п. 4.4 Договора, п. 6.2., 6.3. Договора.

Вопреки мнению Истца, подписывая Акт сверки взаимных расчетов, Ответчик подтверждает текущее состояние взаимных расчетов между хозяйствующими субъектами за определенный период времени, при этом акт сверки рассматривается как технический документ бухгалтерского характера, он не является правоустанавливающим документом, порождающим права и обязанности сторон, а лишь подтверждает размер перечисленных платежей Истцу, а также размер принятых работ Ответчиком за соответствующий период времени и не свидетельствует о признании ответчиком долга, т.к. основные обязательства Ответчика перед Истцом определяются условиями договора.

Так в соответствии с подпунктом 4.4.1. п. 4.4 Договора денежная сумма в размере 10% от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) удерживается Подрядчиком в качестве обеспечения выполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания). Исходя из этого в Акте сверки взаимных расчетов, с учетом первичных документов, приложенных к материалам дела, указанная сумма в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей, составляет 10% от стоимости Работ отраженных в Акте о приемке выполненных работ № 1 от 19.10.2016 (а также соответственно в Справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 19.10.2016) и в Акте о приемке выполненных работ № 2 от 19.11.2016 (а также соответственно в Справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 19.11.2016), которая является суммой гарантийного удержания.

Истец не произвел сдачу-приемку работ в полном объеме в порядке предусмотренном Договором с подписанием Итогового акта, в следствии чего ООО «СТРОЙ СЕРВИС» не имеет законного основания требовать от АО «ВСИ» выплаты гарантийного удержания в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.

Доказательства подписания Акта о приемки результатов выполненных работ (итоговый акт) между Подрядчиком и Субподрядчиком в арбитражный суд и Ответчику не представлены.

Представленные в Иске доводы опровергаются представленными Ответчиком документами по Делу.

Таким образом, истцом не доказан факт наличия задолженности со стороны ответчика, а также факт нарушения со стороны ответчика условий договора.

В соответствии со статьями 65, 66, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле, и каждое лицо должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Между тем, истцом не представлено обоснование взыскания заявленной суммы, отсутствует расчет заявленной суммы, а также доказательства понесенных издержек.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, истцом доказательств, подтверждающих нарушение его прав, суду не представлено.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений. Истец не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны его исковые требования.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на истца.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 309, 310, 314, 708, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1, 2, 4, 65, 71, 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья:

Е.В. Титова