ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-37480/23-67-305

г. Москва

31 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 18 мая 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 31 мая 2023 г.

Арбитражный суд в составе:

Судьи: В.Г.Джиоева (единолично)

при ведении протокола помощником судьи Н.С. Сидоровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 5072

дело по исковому заявлению ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (129090, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

129515, 

<

...>, ПОМ II К 2Б ОФ 4, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.10.2013, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 1 629 275,99 руб.,

при участии:

от истца: неявка, извещено

от ответчика: ФИО1 по дов-ти от 01.03.2023 

 

УСТАНОВИЛ:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (далее – ответчик) о взыскании неустойки по договору от 13.09.2019 № ПКР-003090-19 в размере 1 308 624 руб. 33 коп., неустойки по договору от 19.11.2020 № ПКР-005858-20 в размере 320 651 руб. 66 коп.

Представители истца в судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора в порядке ст.ст. 121-123 АПК РФ.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, 13.09.2019 между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - Заказчик) и ООО «Центр качества строительства и проектирования» (далее - ООО «ЦКСиП», Генподрядчик) заключен договор № ПКР-003090-19 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу(-ам): г. Москва, САО, ул. Масловка Нижн., д.6, корп.1 (далее - Договор).

В соответствии с п.2.1 Договора, по настоящему Договору Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 11 к настоящему Договору) своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Работы) в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу(ам), предусмотренному(ым) Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору), (далее -Объект/Объекты).

Генподрядчик нарушил сроки выполнения работ по Договору.

В соответствии со ст. 708 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В силу ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу пункта 12.6. Договора, за невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте (-ах) в соответствии с Графиком производства и стоимости работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере:

0,1 % от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью от 1 до 10 дней);

0,2% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью свыше 10 дней).

Неустойка взимается со следующего дня, после дня, на который в соответствии с графиком выполнения работ приходится завершение выполнения работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания.

В соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору) по адресу: ул. Масловка Нижн., д.6, корп.1 окончание срока работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -20.08.2021.

Фактическая сдача работ системы - 01.10.2021, просрочка выполнения работ по системе составила 42 дня.

В соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору) по адресу: ул. Масловка Нижн., д.6, корп.1 окончание срока работ по ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений - 02.02.2021.

Фактическая сдача работ системы - 01.10.2021, с учетом приостановки работ с 01.05.2021 по 11.05.2021, с 21.09.2020 по 19.01.2021 и праздничных дней, просрочка выполнения работ по системе составила 237 дней.

19.11.2020 между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - Заказчик) и ООО «Центр качества строительства и проектирования» (далее - ООО «ЦКСиП», Генподрядчик) заключен договор № ПКР-005858-20 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу(-ам): г. Москва, САО, ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп.1 (далее - Договор).

В соответствии с п.2.1 Договора, по настоящему Договору Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 11 к настоящему Договору) своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Работы) в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу(ам), предусмотренному(ым) Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору), (далее -Объект/Объекты).

Генподрядчик нарушил сроки выполнения работ по Договору.

В соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору) по адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп. 1 окончание срока работ по ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений - 20.09.2021.

Фактическая сдача работ системы - 19.10.2021, с учетом приостановки работ с 01.05.2021 по 11.05.2021 и праздничных дней, просрочка выполнения работ по системе составила 29 дней.

В соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору) по адресу: ул. 800-летия Москвы, д.11, корп.1 окончание срока работ по ремонту или замене мусоропровода - 10.08.2021.

Фактическая сдача работ системы - 19.10.2021, с учетом приостановки работ с 01.05.2021 по 11.05.2021 и праздничных дней, просрочка выполнения работ по системе составила 70 дней.

В соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору) по адресу: ул. 800-летия Москвы, д.П, корп.1 окончание срока работ по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -20.07.2021.

Фактическая сдача работ системы - 19.10.2021, с учетом приостановки работ с 01.05.2021 по 11.05.2021 и праздничных дней, просрочка выполнения работ по системе составила 91 день.

В соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору) по адресу: ул. 800-летия Москвы, д.П, корп.1 окончание срока работ по ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) -20.07.2021.

Фактическая сдача работ системы - 19.10.2021, с учетом приостановки работ с 01.05.2021 по 11.05.2021 и праздничных дней, просрочка выполнения работ по системе составила 91 день.

В соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору) по адресу: ул. 800-летия Москвы, д.П, корп.1 окончание срока работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -07.10.2021.

Фактическая сдача работ системы - 19.10.2021, с учетом приостановки работ с 01.05.2021 по 11.05.2021, с 30.09.2020 по 20.04.2021, с 01.10.2021 по 19.10.2021 и праздничных дней, просрочка выполнения работ по системе составила 12 дней.

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами строительного подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Возражая по доводам иска, ответчик указал, что вина в просрочке выполнения работ по Договорам со стороны Ответчика (ООО «ЦКСиП») отсутствует по следующим основания:

Истцом было направлено письмо в адрес Ответчика о том, что в соответствии с указом мэра Москвы от 05.03.2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», приказом ФКР Москвы от 27.03.2020 г. №ФКР-14-91/20 «О приостановке работ по капитальному ремонту систем многоквартирных домов на период действия режима готовности» выполнение работ по Договору приостановлено с 28.03.2020 г. по 06.07.2020 г. включительно.

Также, по мимо приостановки работ с 28.03.2020 г. по 06.07.2020 г., были составлены следующие акты:

Акт от 21.09.2020 г. об отказе собственников в допуске представителей Генподрядчика для производства работ в жилое помещение (квартиру/комнату) по Договору №ПКР-003090-19 от 13.09.2019 г. по адресу: г.Москва, САО, Масловка Нижн. ул.б к.1 для проведения работ по ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений. В допуске в помещения было отказано по причине отсутствия доступа к помещениям подвала. Акт о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, Масловка Нижн. ул.6 к.1 был подписан представителем Заказчика ФИО2, представителем строительного контроля ФИО3, представителем Генподрядчика ФИО4, представителем управы района ФИО5, представителем эксплуатирующей организации ФИО6, представителем собственников помещений многоквартирного дома ФИО7 21.09.2020 г.;

Акт от 20.01.2021 г. об отказе собственников в допуске представителей Генподрядчика для производства работ в жилое помещение (квартиру/комнату) по Договору №ПКР-003090-19 от 13.09.2019 г. по адресу: г.Москва, САО, Масловка Нижн. ул.6 к.1 для проведения работ по ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений. В допуске в помещения было отказано по причине согласования с управляющей компанией сроков допуска для производства работ. Акт о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, Масловка Нижн. ул.6 к.1 был подписан представителем Заказчика ФИО2, представителем строительного контроля ФИО8, представителем Генподрядчика ФИО4, представителем управы района ФИО9, представителем эксплуатирующей организации ФИО10, представителем собственников помещений многоквартирного дома ФИО7 20.01.2021 г.;

Акт от 30.04.2021 г. об отказе собственников в допуске представителей Генподрядчика для производства работ в жилое помещение (квартиру/комнату) по Договору №ПКР-003090-19 от 13.09.2019 г. по адресу: г.Москва, САО, Масловка Нижн. ул.6 к.1 для проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали). В допуске в помещения было отказано в связи со сложной эпидимилогической обстановкой в доме. Акт о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, Масловка Нижн. ул.6 к.1 был подписан представителем Заказчика ФИО2, представителем строительного контроля ФИО8, представителем Генподрядчика ФИО4, представителем управы района ФИО9, представителем эксплуатирующей организации ФИО10, представителем собственников помещений многоквартирного дома ФИО7 30.04.2021 г.;

Указанные акты были подписаны представителем Заказчика, законным представителем Генподрядчика, представителями управы района, представителями управляющей организации, представителями собственников.

В те же дни соответственно были составлены акты о приостановке работ по адресу : г.Москва, САО, Масловка Нижн. ул.6 к.1. Данные акты были подписаны в составе комиссии. Работы были приостановлены по причине воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту в форме недопуска контрагента в помещения в многоквартирном доме. Комиссия постановила возобновить работы не ранее устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки.

Также были приостановки работ в Новогодние праздники с 01.01.2020 г. по 10.01.2021 г. и с 30.05.2019 по 05.01.2020 г., таким образом, окончание срока работ должно продлеваться на все действующие дни приостановок, нарушений сроков выполнения работ, со стороны Ответчика, нету.

Истцом производилась консервация объекта по капитальному ремонту МКД и строительно-бытового городка с 30 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г.

Также, по мимо консервации работ с 30.04.2021 г. по 11.05.2021 г., были составлены следующие акты:

Акт от 21.05.2021 г. об отказе собственников в допуске представителей Генподрядчика для производства работ в жилое помещение (квартиру/комнату) по Договору №ПКР-005858-20 от 19.11.2020 г. по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 для проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали). В допуске в помещения было отказано по причине недопуска представителей Генподрядчика для производства работ в подвальные помещения. Акт о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 был подписан представителем строительного контроля ФИО11, представителем Генподрядчика ФИО12, представителем управляющей компании ФИО13, представителем собственников помещений многоквартирного дома ФИО14 21.05.2021 г.;

Акт от 21.05.2021 г. об отказе собственников в допуске представителей Генподрядчика для производства работ в жилое помещение (квартиру/комнату) по Договору №ПКР-005858-20 от 19.11.2020 г. по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 для проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали). В допуске в помещения было отказано по причине недопуска представителей Генподрядчика для производства работ в подвальные помещения. Акт о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 был подписан представителем строительного контроля ФИО11, представителем Генподрядчика ФИО12, представителем управляющей компании ФИО13, представителем собственников помещений многоквартирного дома ФИО14 21.05.2021 г.;

Акт от 01.06.2021 г. об отказе собственников в допуске представителей Генподрядчика для производства работ в жилое помещение (квартиру/комнату) по Договору №ПКР-005858-20 от 19.11.2020 г. по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 для проведения работ по ремонту или замене мусоропровода В допуске в помещения было отказано по причине недопуска представителей Генподрядчика для производства работ по ремонту или замене мусоропровода. Акт о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 был подписан представителем строительного контроля ФИО11, представителем Генподрядчика ФИО12, представителем управляющей компании ФИО13, представителем собственников помещений многоквартирного дома ФИО14 01.06.2021 г.;

Акт от 01.06.2021 г. об отказе собственников в допуске представителей Генподрядчика для производства работ в жилое помещение (квартиру/комнату) по Договору №ПКР-005858-20 от 19.11.2020 г. по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 для проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали). В допуске в помещения было отказано по причине недопуска представителей Генподрядчика для производства работ в подвальные помещения. Акт о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 был подписан представителем строительного контроля ФИО11, представителем Генподрядчика ФИО12, представителем управляющей компании ФИО13, представителем собственников помещений многоквартирного дома ФИО14 01.06.2021 г.;

Акт от 23.08.2021 г. об отказе собственников в допуске представителей Генподрядчика для производства работ в жилое помещение (квартиру/комнату) по Договору №ПКР-005858-20 от 19.11.2020 г. по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 для проведения работ по ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений. В допуске в помещения было отказано по причине недопуска представителей Генподрядчика для производства работ в подвальные помещения. Акт о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 был подписан представителем строительного контроля ФИО11, представителем Генподрядчика ФИО12, представителем управляющей компании ФИО13, представителем собственников помещений многоквартирного дома ФИО14 23.08.2021 г.;

Указанные акты были подписаны представителем Заказчика, законным представителем Генподрядчика, представителями управы района, представителями управляющей организации, представителями собственников.

В те же дни соответственно были составлены акты о приостановке работ по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 Данные акты были подписаны в составе комиссии. Работы были приостановлены по причине воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту в форме недопуска контрагента в помещения в многоквартирном доме. Комиссия постановила возобновить работы не ранее устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки.

Также были приостановки работ в Новогодние праздники с 01.01.2020 г. по 10.01.2021 г. таким образом, окончание срока работ должно продлеваться на все действующие дни приостановок, нарушений сроков выполнения работ, со стороны Ответчика, нету.

Акт об открытия работ по Договору №ПКР-003090-19 от 13.09.2019 г. по адресу: г.Москва, САО, Масловка Нижн. ул.6 к.1 подписан 28.07.2020 г., данный акт, согласно условиям Договора, определяет дату начала исполнения обязательств по выполнению работ, согласно условиям Договора, срок выполнения работ должен быть скорректирован на срок просрочки кредитора по выполнению обязательств по Договору.

Акт об открытия работ Договору №ПКР-005858-20 от 19.11.2020 г. по адресу: г.Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 11 к.1 подписан 30.11.2020 г., данный акт, согласно условиям Договора, определяет дату начала исполнения обязательств по выполнению работ, согласно условиям Договора, срок выполнения работ должен быть скорректирован на срок просрочки кредитора по выполнению обязательств по Договору.

Согласно п. 1.6. Договоров Акт открытия работ по Объекту - документ, оформляемый согласно п. 7.1 настоящего Договора, для открытия работ по каждому Объекту и начала выполнения работ. Открытие работ по Объекту осуществляется комиссией.

В соответствии со статьей 5.1.3. Заказчик обязан организовать комиссионное открытие работ по Объекту по конкретному адресу с оформлением Акта открытия работ согласно п.1.6. настоящего Договора.

Изначально сроки выполнения работ согласно графику выполнения был определен одни, однако фактически акт открытия работ по Объекту был оформлен сторонами только по прошествии определенного времени, следовательно, на срок неисполнения обязательств со стороны Истца (Заказчика) по открытию Объекта должны быть увеличены сроки исполнения обязательств Генподрядчика.

В силу допущенного нарушения обязательств в части своевременного открытия Объекта, из числа дней просрочки также подлежит исключению период, связанный с ненадлежащим исполнением обязательств кредитора по Договору.

Учитывая изложенное, Истцом не предоставлены объективные и документально подтвержденные доказательства в части нарушения сроков выполнения работ по вышеуказанным Договорам в заявленном объеме по вине Генподрядчика.

В соответствии со ст.718 ГК РФ Заказчик обязан в случаях, в объеме и порядке, предусмотренных Договором подряда, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать перенесения сроков исполнения работы.

Таким образом ООО «ЦКСиП» не имело возможности исполнить обязательства в установленные Договором сроки, так как приостановление выполнения работ являлось вынужденной мерой и не зависело от воли Ответчика.

Согласно ч.1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Согласно пункту 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Также в соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей

В соответствии со ст. 328, 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации на ответчика не может быть возложена обязанность по уплате неустойки за просрочку выполнения обязательств по договору, поскольку она произошла по вине заказчика, не исполнившего свои встречные обязательства по договору.

В соответствии с п.3 ст.405 и ст.406 Гражданского Кодекса РФ, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом или договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, а также представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что причиной просрочки выполнения работ по спорному договору явилось ненадлежащее исполнение истцом своих обязательств (просрочка кредитора), в части создания необходимых условий для выполнения ответчиком своих обязательств по договору. Следовательно, правовые основания для начисления ответчику неустойки за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных условиями договора, отсутствуют.

Каких-либо бесспорных доказательств наличия вины ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" в задержке выполнения работ в рамках спорного договора истцом не представлено, судом не установлено.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" не может быть возложена обязанность по уплате неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев