1 2111264_6949829  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-11277/2023

г. Уфа

14 декабря 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного казенного  учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 308027802100051), обществу с  ограниченной ответственностью «Уралспецстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

- об обязании индивидуального предпринимателя ФИО2 устранить  недостатки монтажных работ сидений трибунных по государственному контракту от  14.09.2020 № 06/2020 - 435 по объекту «Реконструкция Нефтекамского  стадиона «Торос» ГО г. Нефтекамск Республика Башкортостан», а именно устранить  протечки воды в подтрибунное пространство;  

- об обязании ООО «Уралспецстрой» устранить недостатки выполненных работ в  рамках исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту 18.12.2018   № 04/2018-285 по объекту «Реконструкция Нефтекамского стадиона «Торос» ГО г.  Нефтекамск Республика Башкортостан», а именно устранить продольные трещины и  отслоения цементной стяжки, устранить отслоение финишных покрытий поверхности  труб, выполнить плотное примыкание (проклейку) гидроизоляционного покрытия к  железобетонным конструкциям;  

- о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу истца  пени в размер 63 465 руб. 98 коп. с 10.12.2022 с дальнейшим начислением до даты  фактического устранения недостатков ответчиком и штраф в размере 1 000 руб.;  

- о взыскании с ООО «Уралспецстрой» в пользу истца пени в размер 16 649 326 руб.  40 коп. с 01.09.2022 с дальнейшим начислением до даты фактического устранения  недостатков ответчиком и штраф в размере 1 527 461 руб. 14 коп.  

третье лицо Администрация городского округа город Нефтекамск Республики  Башкортостан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении уточненных исковых требований Государственного казенного  учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан отказать.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме)  через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П. Кузнецов