83/2021-28059(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020 г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-1531/2020

20 апреля 2021 года

г. Тамбов

  Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Н.Ю. Макаровой  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи О.И. Долгополовым  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  

ООО «Ресурс», Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель (ОГРН  

1176820005284, ИНН 

<

***>) 

к ООО «Военно-Строительная Компания», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании 4 917 420 руб. 70 коп. при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, доверенность № 02/19 от 01.07.2019г. (до 01.07.2021г.);  от ответчика: ФИО2, доверенность от 19.11.2020г.  

 Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

СУД РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Военно-Строительная  

Компания», 

<

...>  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 07.03.2018) в пользу Общества  

с ограниченной ответственностью «Ресурс», Тамбовская область, Тамбовский район,  

п.Строитель, зона Промышленная, здание 72, корпус Г, помещение 3 (ОГРН  

1176820005284, ИНН 

<

***>, дата регистрации 13.04.2017)  

- авансовые платежи, перечисленные Обществу с ограниченной ответственностью  

«Военно-Строительная Компания» по договору в сумме 1 998 127 руб.,  

- убытки, понесенные Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс» в  

связи с выполнением работ, не выполненных Обществом с ограниченной  

ответственностью «Военно-Строительная Компания» в сумме 1 240 680 руб.; 

- убытки на выполнение работ в связи с устранением недостатков ненадлежащего  

исполнения обязательств строительного контракта Обществом с ограниченной  

ответственностью «Военно-Строительная Компания» в размере 1 283 212 руб.,  

- договорную неустойку в сумме 296 015,40 руб. по п. 6.2 размере 10% от  

стоимости работ, 

- неустойку за пользование чужими денежными средствами за период с  

04.04.2019г. по 09.12.2019г. в сумме 99 386 руб. 30 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Военно-Строительная  

Компания», 

<

...>  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 07.03.2018) в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в размере 47587 руб.  

22 апреля 2021 года 

Истцу по заявлению и налоговому органу выдать исполнительные листы после  вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской  области.  

Судья Макарова Н.Ю. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.02.2021 6:46:03

Кому выдана Макарова Наталия Юрьевна