АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

 

21 октября 2024 года

 

Дело № А33-25249/2024

 

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВТР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Новосибирск, дата регистрации 23.05.2014) в пользу муниципального учреждения "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Новосибирск, дата регистрации 12.04.2001) 54 759,81 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту №210554 от 03.09.2021, в том числе: 50 214,53 руб. за период с 23.11.2021 по 20.12.2021 (дата окончания работ согласно акту экспертизы от 21.12.2021) (6 329 562,75 руб. х 8,5%/300 х 28 дней) + 4 545,28 руб. за период с 21.12.2021 по 24.12.2021 (4 010 541,98 руб. (6 329 562,75 руб. – 2 319 020,77 руб.) х 8,5%/300 х 4 дня).

В удовлетворении требований в оставшейся части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВТР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Новосибирск, дата регистрации 23.05.2014) в доход федерального бюджета 2 190,85 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

 

Судья

ФИО1