Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-62745/2020

16 декабря 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  09 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  16 декабря 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Ульяновой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Алексеевой В.С.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец:  Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (адрес:  Россия 196247, Санкт  -  Петербург, площадь Конституции дом 1, ОГРН:  1027809170300);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Золотой пляж» (адрес:  Россия 188760, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД. ПРИОЗЕРСК, УЛИЦА. КАЛИНИНА, ДОМ 11, ОФИС 209, ОГРН: 1134712000774);

о расторжении договора 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 08.09.2020; 

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Золотой пляж» (далее – ответчик) о расторжении договора №ОД-ВЭС-11990-18/15144-Э-18 от 23.04.2018, а также о взыскании  неустойки в размере 34 097 руб. 21 коп., начисленной с 02.04.2019 по 02.04.2020.

В судебном заседании 07.10.2020 на основании ст. 124 АПК РФ изменил наименование истца на публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго».

В настоящем судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

 Надлежащим образом извещенный по всем представленным в арбитражный суд адресам ответчик в судебное заседание не явился, что не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие по имеющимся в материалах дела доказательствам в соответствии со ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ ввиду отсутствия возражений сторон против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд установил следующее.

23.04.2018 года между ПАО «Ленэнерго» (далее - Истец, Сетевая организация) и Обществом с ограниченной ответственностью «Золотой пляж» (далее - Ответчик, Заявитель) заключен Договор № ОД-ВЭС-11990-18/15144-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта Заявителя: «коттеджный поселок», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское сельское поселение, вблизи нос. Плодовое, кадастровый номер: 47:03:0610002:318.

В соответствии с п. 1 Договора, Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность Заявителя исполнить надлежащим образом определенный договором срок мероприятия по технологическому присоединению, в том числе, по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимаюпще устройства Заявителя.

В соответствии с Дополнительным соглашением б/н от 10.09.2019 к Договору размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и цеповой политике Правительства Ленинградской области от 26.12,2017 №648-п и составил 37 366, 80 руб. (тридцать семь тысяч триста шестьдесят шесть рублей 02 копейки), включая НДС 18% - 6 227, 80 руб.

Внесение платы за технологическое присоединение в соответствии с п. 11 Договора осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 1-й платеж в размере 15% в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 2-й платеж в размере 30%  в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 3-й платеж в  размере 45% в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 4-й платеж в размере 10% в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения;

Обязанность Ответчика по внесению платежа в установленный договором срок исполнена.

Сетевой организацией были выполнены со своей стороны технические условия к Договору, о чем в адрес Ответчика было направлено Уведомление № ВЭС/031/7368/46 от 26.10.2018.

Срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 01.04.2019 в соответствии с Дополнительным соглашением б/н от 01.10.2018 к Договору.

Заявителем технические условия не выполнены, уведомление о готовности по настоящий момент в адрес Сетевой организации не направлено.

Согласно пункту 16(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее - Правила ТП) , срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

б)заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки вьшолнения технических условий;

в)заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г)заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены заявителем в срок до 02.04.2019 г., таким образом, 02.04.2020  наступил 12-ти месячный срок с даты просрочки выполнения мероприятий.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В установленные Договором сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя исполнены не были.

Документы, подтверждающие выполнение технических условий ответчиком, в материалы дела не представлены.

В соответствии с п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила) одним из существенных условий договора на осуществление технологического присоединения является срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон. Следовательно, стороны по договору обязаны выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению в указанный срок.

Неисполнение ответчиком своих обязанностей по договору исключает возможность других заявителей воспользоваться зарезервированной за ответчиком мощностью и, соответственно, влечет ограничение возможности получения прибыли сетевой организацией. Согласно ч. 1 п. 1 ст. 26 Федерального закона №35- ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-Ф3 (далее - ФЗ «Об электроэнергетике») технологическое присоединение - это присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. Потребители электрической энергии - это лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

Согласно ч. 2 п. 1 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», п. 3, 4 и 6 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, но только:

1. при условии соблюдения им Правил;

2. при наличии технической возможности технологического присоединения (п. 3 Правил).

Следовательно, стороны обязаны выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению в указанный срок.

Как следует из материалов дела, 27.02.2020 истец направил в адрес ответчика претензию исх. №ГтЭС/031/1247, в которой просил представить в адрес сетевой организации уведомление о выполнении со своей стороны технических условий.

Ответ в адрес истца не поступал.

Требования истца в предложенный срок не были удовлетворены, мотивированный отказ в адрес истца также не поступал, в связи с чем истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно представленному в материалы дела расчету сумма неустойки, подлежащей уплате ответчиком в соответствии с условиями договора, за период неисполнения обязательств за период с 02.04.2019 по 02.04.2020 составила 34097 руб. 21 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», п. 6 Правил и ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заключение договора технологического присоединения в отношении каждого обратившегося лица с надлежащей заявкой на технологическое присоединение для истца обязательно.

Согласно части 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен.

Поскольку документы, подтверждающие выполнение технических условий ответчиком не представлены истцу и суду, имеется основание для признания существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

В свою очередь, указанное существенное изменение является основанием для расторжения договора в соответствии с частью 1 статьи 451 ГК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не представил допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования.

Представленный истцом расчет неустойки проверен судом и признан не противоречащим действующему законодательству и условиям рассматриваемого договора.

Оценив в совокупности и взаимной связи документы, представленные в материалы дела, суд считает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Расторгнуть договор №ОД-ВЭС-11990-18/15144-Э-18 от 23.04.2018.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Золотой пляж» в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» 34097 руб. 21 коп. неустойки, 8000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Ульянова М.Н.