ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г.Москва                                                                                                  А40-166241/22-113-1247

17 ноября 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2022 г.

Решение в полном объёме изготовлено 17 ноября 2022 г.

Арбитражный суд г.Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г.Алексеева

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ООО «Техремстрой-2» (ОГРН 

<

***>)

к ФКР москвы (ОГРН 

<

***>),

об признании недействительным одностороннего отказа от договора,

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 30 июня 2022 г.;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 7 октября 2020 г. № ФКР-11-304/20;

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о признании недействительным одностороннего отказа ответчика от исполнения договора от 19 марта 2021 г. № ПКР-006606-21 (далее – Договор), заключённого между истцом (генподрядчик) и ответчиком (заказчик).

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска.

Ответчик по иску возражал по доводам отзыва на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришёл следующим выводам.

Как следует из материалов дела, Договор заключён на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах) по адресу(-ам): г. москва, ЮВАО, ул. Лефортовский вал, д. 24, в соответствии с пунктом 2.1 которого истец принял на себя обязательство в соответствии с техническим заданием (приложение № 10 к Договору) своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ул. Лефортовский вал, д. 24, по адресу, предусмотренному адресным перечнем (приложение № 2 к Договору), включая разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ на объекте, поставку материалов, изделий, конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу объекта по акту приемки выполненных работ.

Комиссионным актом открытия работ по объекту от 31 марта 2021 г. заказчик передал, а генподрядчик принял объект для производства работ.

Согласно п. 7.1 Договора заказчиком обеспечивается начало выполнения работ по разработке проектной документации и оформляется акт открытия работ по объекту. После подписания акта открытия работ по объекту генподрядчик должен приступить к разработке технического заключения в сроки, определённые в соответствии с графиком производства и стоимости работ.

В соответствии с разделом 4 Договора, работы генподрядчик выполняет в соответствии с графиком производства и стоимости работ:

-выполнение обследования технического состояния конструктивных элементов в многоквартирном доме с выпуском технического заключения в срок до 30  апреля 2021 г.;

-работы по разработке и согласованию проектной документации в срок до 10 июня 2021 г.;

-работы по сопровождению прохождения экспертизы проектной документации в срок до 20 июля 2021 г.;

-работы по оформлению результатов приемки работ по разработке проектной документации в срок до 31 июля 2021 г.

В соответствии с п. 7.1 Договора после выполнения работ по разработке технического заключения в соответствии с графиком производства и стоимости работ (приложение № 1 к Договору) генподрядчик размещает его в ИС РСКР. Организация обеспечивает проверку технического заключения в течение 7 дней.

Основанием для отказа в приемке Технического заключения является несоответствие технического заключения, разработанного генподрядчиком, требованиям Договора, фактическому состоянию конструктивных элементов, требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям заказчика.

Согласно п. 6.1.5 Договора генподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненной проектной документации и за срыв сроков в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 17.1 Договора акт фиксации договорных нарушений оформляется в случае обнаружения недостатков (дефектов) при выполнении работ по разработке технического заключения, проектной документации.

Как указывает заказчик, в ходе проверки установлено, что работы по разработке проектной документации не выполнены надлежащим образом, о чем составлен акт фиксации нарушений от 30 августа 2021 г.. Кроме того, указанным актом зафиксировано нарушение генподрядчиком сроков выполнения работ по Договору.

В ходе проверки повторно установлено, что работы по разработке проектной документации не выполнены надлежащим образом, о чем составлен акт фиксации нарушений от 8 сентября 2021 г. Кроме того, указанным актом зафиксировано нарушение генподрядчиком сроков выполнения работ по договору.

В ходе проверки установлено, что работы по разработке проектной документации не выполнены надлежащим образом, о чем составлен акт фиксации нарушений от 21 января 2022 г., подписанный сторонами.

Указанным актом фиксации, подписанным сторонами, установлено, что по проектной документации получено два отрицательных заключения ГАУ города Москвы «Мосгорэкспертиза» от 19 августа 2021 г. № 3708-21/МГЭ/5718-3/5 и№ 5600-21/МГЭ/5718-4/5.

Нарушение срока разработки технического заключения, установленного графиком производства и стоимости работ, явилось основанием для расторжения Договора.

В силу 14.7.3 Договора заказчик вправе расторгнуть договор в случае неоднократного (2 и более раз в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступления от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) генподрядчиком требований к качеству работ и/или технологии проведения работ.

Несоблюдение генподрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ фиксируется в журнале производства работ, а также в акте фиксации договорных нарушений.

Согласно п. 14.11 Договора заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора и в письменной форме уведомляет об этом генподрядчика. заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора не позднее чем за 15 дней (без учета выходных и праздничных дней) до предполагаемой даты расторжения договора. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы их подтверждающие.

В силу п. 14.12 Договора решение заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 15 дней (без учета выходных и праздничных дней) с даты направления уведомления о расторжении договора.

Как указывает истец, им получено уведомление от 30 марта 2022 г.№ ФКР-ПИР-1957/22 об одностороннем отказе заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением генподрядчиком срока выполнения работ

По мнению истца, причиной просрочки явился недопуск жителей МКД, что препятствовало выполнению работ в срок.

Истец не пояснил, каким образом, воспрепятствование жителей повлияло на разработку проектной документации, тогда как Договор заключён не на выполнение работ, а только на разработку проекта.

Статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

Односторонний отказ от исполнения договора в силу положений статей 153, 450.1 Гражданского кодекса является односторонней сделкой, к которой в полной мере применимы положения § 2 главы 9 Гражданского кодекса.

В пункте 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что по смыслу статьи 153 Гражданского кодекса при решении вопроса о правовой квалификации действий участника (участников) гражданского оборота в качестве сделки для целей применения правил о недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачёте, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие физического или юридического лица на совершение сделки).

Как указано в пункте 51 вышеуказанного постановления Пленума, согласно пункту 2 статьи 154 Гражданского кодекса односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Если односторонняя сделка совершена, когда законом, иным правовым актом или соглашением сторон ее совершение не предусмотрено или не соблюдены требования к ее совершению, то по общему правилу такая сделка не влечет юридических последствий, на которые она была направлена.

Истцом правовых доводов о признании сделки незаконной не заявлено. Также не указано о недействительности односторонней сделки по заявлению Отказа.

Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия (абзац второй пункта 2 статьи 166 Гражданского кодекса). За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 166 Гражданского кодекса или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 23 июня 2015 г. № 25 указывает, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Ввиду того, что материальное право на отказ от Договора предоставлено ответчику в силу закона, отсутствия правовой позиции истца относительно оснований недействительности сделки, суд не усматривает оснований для удовлетворения иска.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс) суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса).

В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса судебные расходы относятся на сторон пропорционально удовлетворенных требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 12, 15, 16 Гражданского кодекса, статьями 4, 9, 65, 67, 71, 110, 156, 167-171, 176, 217-219 Арбитражного процессуального кодекса, суд,

Р Е Ш И Л :

1.В удовлетворении исковых требований отказать полностью.

2.Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                                   А.Г.Алексеев