Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 20.08.2020 года Дело № А50-32789/19 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального казенного учреждения "Пермблагоустройство" (614000,  

<

...>, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

к ответчику открытому акционерному обществу "Межрегиональная  распределительная сетевая компания Урала" (620026, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

об урегулировании преддоговорных разногласий 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройград Плюс"  (614058, 

<

...>, кабинет 5,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

2. УФНС России по Пермскому краю. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.  

Урегулировать преддоговорные разногласия, возникшие между МКУ  

«Пермблагоустройство» и ОАО «МРСК Урала» при заключении соглашения  

о компенсации на выполнение работ по выносу сетей электроснабжения ВЛ  0,4 кВ в рамках капитального ремонта ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина  до дома № 53 по ул. Маяковского, а именно:  

1.1.  Изложить п. 3.1 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «3.1. В целях осуществления предусмотренных настоящим  Соглашением мероприятий по сносу Имущества и восстановлению  бесперебойного электроснабжения Заявитель в течение 1 (одного) месяца с  момента подписания договора проводит комплекс изыскательских работ по  разработке проектно-сметной документации в том числе при необходимости  получения положительного заключения государственной  (негосударственной) экспертизы».  

1.2.  Изложить п. 3.2 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «3.2. Комплекс строительно-монтажных работ по сносу  Имущества и восстановлению бесперебойного электроснабжения проводится  с даты исполнения Заказчиком п.3.10.1.5 настоящего Соглашения».  

1.3.  Изложить п. 3.3 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «3.3. Размер денежной компенсации стоимости проводимых  Собственником работ по сносу Имущества и восстановлению  бесперебойного электроснабжения составляет 268 787 (двести шестьдесят  восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей, НДС не облагается.».  

1.4. Изложить п. 3.4 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «3.4.Заявитель обязуется уплатить компенсацию Собственнику в  сумме, указанной в п.3.3. Договора в следующем порядке и в сроках:  

3.4.1. В размере 100% от суммы, указанной в п.3.3. настоящего  Соглашения, что составляет 268 787 (двести шестьдесят восемь тысяч  семьсот восемьдесят семь) рублей, НДС не облагается. Заявитель оплачивает  Собственнику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания  «Акта о взаимном исполнении обязательств», указанного в п.3.8. настоящего  Соглашения».  

1.5. П. 3.5 соглашения о компенсации исключить. 

1.6. Изложить п. 3.7 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «3.7. Собственник обязуется осуществить работы по сносу  Имущества и восстановлению бесперебойного электроснабжения (включая  формирование исполнительно-технической документации и ввод в  эксплуатацию) в течение 6 (шести) месяцев с момента исполнения  Заявителем п.3.10.1.5. настоящего Соглашения в полном объеме».  

1.7.  Изложить п. 3.10.1.2 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «3.10.1.2. Разработать проектную документацию на  переустройство Имущества Собственника по титулу «Реконструкция (вынос)  

участков ВЛ 0,4 кВ от ТП-5272 в связи со строительством автодороги в  охранной зоне ВЛ 0,4 кВ по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.  Маяковского» на основании Задания на проектирование, согласованного с  Собственником, и согласовать ее с Собственником в течение 30 (тридцати)  дней с даты разработки проектно-сметной и рабочей документации».  

1.8.  Изложить п. 3.10.2.1 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «3.10.2.1. Приступить к выполнению мероприятий, указанных в  настоящем Соглашении, с момента исполнения Заявителем п.3.10.1.5  настоящего Соглашения в полном объеме».  

1.9.  Изложить п. 4.2 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «4.2. В случае просрочки исполнения обязательств,  предусмотренных п.3.4. настоящего Соглашения в установленный срок,  Плательщик уплачивает Собственнику пени в размере 1/300 ставки  рефинансирования, установленной банком России и действующей на день  фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день  просрочки начиная со следующего дня наступления установленного срока  оплаты по день фактической оплаты».  

1.10. Изложить п. 7.2 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «7.2. В части, не урегулированной настоящим соглашением,  стороны руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации».  

1.11. Пункт 7.3 соглашения о компенсации исключить. 

1.12. Изложить п. 7.5 соглашения о компенсации в следующей  редакции: «7.5. В случае нарушения Заявителем полностью или частично  п.3.10.1.5 настоящего Соглашения Собственник вправе приостановить  исполнение своих обязательств и сроки, установленные в п.3.7., продляются  на период времени с даты указанной в п.3.10.1.5 настоящего Соглашения до  момента фактического исполнения Заявителем в полном Объеме п.п.3.10.1.5.  настоящего Соглашения.  

Собственник вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения  в одностороннем (внесудебном) порядке и потребовать возмещения убытков  в случае нарушения Заявителем срока передачи проектно-сметной и рабочей  документации более чем на 30 дней. В этом случае Соглашение считается  расторгнутым через 7 (семь) календарных дней со дня получения Заявителем  соответствующего уведомления от Собственника в случае исполнения  Заявителем п. 3.10.1.5 настоящего Соглашения в полном объеме.  

В случае неполучения Собственником разрешения филиала АО  «Системный оператор Единой энергетической системы» на проведение  отключения Имущества Собственника срок переустройства Имущества  

Собственника продлевается на тот же период времени, на который было  отложено получение указанного разрешения».  

1.13. Дополнить соглашение о компенсации п. 3.10.1.6 следующего  содержания: «3.10.1.6. Заявитель в процессе выполненных работ  осуществляет промежуточную приемку работ, выполненных Собственником,  освидетельствование скрытых работ при наличии документов,  подтверждающих объем, качество выполненных работ, материалов».  

1.14. Дополнить соглашение о компенсации п. 3.10.2.4 следующего  содержания: «3.10.2.4. Собственник за 5 дней до даты освидетельствования  скрытых работ официально в письменной форме информирует Заявителя о  готовности к такому освидетельствованию. Собственник приступает к  выполнению последующих работ только после приемки  (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и  составлении соответствующих актов. Если Заявитель не был информирован о  готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с  опозданием, по его требованию Собственник обязан за свой счет вскрыть  любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет в сроки,  установленные Заявителем».  

1.15. Дополнить соглашение о компенсации п. 3.10.2.5 следующего  содержания: «3.10.2.5. Собственник передает Заявителю за 10 дней до начала  приемки законченного Объекта экземпляр оригинала исполнительной  документации с письменным подтверждением соответствия переданной  документации фактически выполненным работам. Документация в  машинописном и графическом исполнении передается Компании в  сброшюрированном виде в твердом переплете. Кроме того 2 экземпляр  документации передается на электронном носителе в формате файлов  PortableDocumentFormat(PDF)».  

 1.16 Дополнить соглашение о компенсации п. 4.3 следующего  содержания: «4.3. В случае просрочки исполнения Собственником  обязательств, предусмотренных п.3.7. настоящего Соглашения в  установленный срок, собственник уплачивает Заявителю пени за каждый  день просрочки исполнения Собственником обязательств в размере одной  трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской  Федерации, действующей на дату уплаты пени, от стоимости компенсации по  настоящему Соглашению, уменьшенной на сумму, пропорциональную  объему обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением и  фактически исполненных Собственником».  

 Взыскать с открытого акционерного общества "Межрегиональная  распределительная сетевая компания Урала" (ОГРН: 1056604000970, ИНН:  6671163413) расходы по оплате госпошлины в сумме 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  Е.Ю. Дрондина