АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-3843/2020

г. Архангельск

11 марта 2021 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2021 года  

Полный текст решения изготовлен 11 марта 2021 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Вахловой Н.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании 01-04 марта 2021 года (с объявлением перерыва) дело по иску государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия, 163002, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Константа" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия 163001, г.Архангельск, Архангельская область, пр.Троицкий, дом 145, офис 7)

с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- общество с ограниченной ответственностью "Альянс-проект" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия 163069, г.Архангельск, Архангельская область, ул.Попова, дом 14, помещение 2)

об обязании устранить недостатки,

 при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО2 (доверенность от 01.12.2020),

от ответчика – ФИО3 (доверенность от 01.03.2021),

установил:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Константа" об обязании в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу устранить недостатки в работах по ремонту приемного отделения ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" по адресу: 

<

...>, выполненные по контракту №316-К-18 от 29.12.2018, а именно:

- в гардеробе площадью 18,2 кв.м. (помещение № 1 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой, окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в кабинете старшей медицинской сестры площадью 15,8 кв.м. (помещение № 3 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому   каркасу   из   ПН   и   ПС   профилей   листами   в   один   слой;   окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в санузле площадью 1,4 кв.м. (помещение № 3а плана) произвести: замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в кабинете сестры-хозяйки (кастелянши) площадью 18,5 кв. м. (помещение № 2 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в сестринской площадью 18,5 кв.м. (помещение № 4 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в ординаторской площадью 26,5 кв.м. (помещение № 24 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в приемно-смотровом боксе № 1 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 5 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;

- в приемно-смотровом боксе № 2 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 5а плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;

- в шлюзе между боксами № 1 и 2 площадью 5,9 кв.м. (помещение № 5г плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в кабинете заведующего отделением площадью 13,2 кв.м. (помещение № 21 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в приемно-смотровом боксе № 3 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 6 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;

-в приемно-смотровом боксе № 4 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 6а плана)произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическомукаркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен,подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: излинолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна икоробки;

- в шлюзе между боксами № 3 и 4 площадью 5,9 кв.м. (помещение № 6г плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- на посту медицинской сестры площадью 18,5 кв.м. (помещение № 7 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в тамбуре соматического отделения площадью 14,5 кв.м. (помещение № 8 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов;

- в инфекционном боксе № 1 площадью 19,8 кв.м. (помещение № 9 плана) произвести: замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен; замену дверного полотна и коробки;

- в шлюзе площадью 3,9 кв.м. (помещение № 9а) произвести замену дверного полотна и коробки;

- в инфекционном боксе № 2 площадью 19,8 кв.м. (помещение № 10 плана) произвести замену дверного полотна и коробки;

- в шлюзе площадью 3,9 кв.м. (помещение № 10а) произвести замену дверного полотна и коробки;

- в шлюзе площадью 3,6 кв.м. (помещение № 9в) произвести замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в процедурной площадью 20 кв.м. (помещение № 20) произвести: замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в санитарной комнате площадью 15,3 кв.м. (помещение №11) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в клизменной площадью 13 кв.м. (помещение № 12) произвести замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

-  в коридоре общей площадь 111,7 кв.м. (помещения №№ 13,15,25,26,27) произвести: замену облицовки стен но системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в тамбуре инфекционного отделения площадью 4,5 кв.м, (помещение № 13а) произвести замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен; замену дверного полотна и коробки;

- в тамбуре - шлюзе площадью 2,4 кв.м. (помещение № 29) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в кабинете сестры-хозяйки площадью 12,9 кв.м. (помещение № 17) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (с учетом заявления об уточнении требований от 02.03.2021).

Истец в судебном заседании уточненные требования поддержала.

Ответчик иск не признает по основаниям, изложенным в отзыве, ссылается на то, что ненадлежащая подготовка поверхности СМЛ к нанесению шпатлевочного состава исключена, так как каждый этап произведенных работ тщательно осматривался и принимался представителем Учреждения; примененный способ укладки линолеума был указан в проектно-сметной документации; появление дефектов на стенах вызвано проектной ошибкой, листы СМЛ марки «Стандарт», использованные для отделки и монтаже перегородок, являются самыми низкокачественными, технология «КНАУФ», предложенная в проектно-сметной документации, не применима для отделки при использовании СМЛ.

Третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "Альянс-проект" в заседание своего представителя не направило, мнения на иск не представило.

Дело рассмотрено в отсутствие третьего лица в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Заслушав стороны, исследовав имеющиеся материалы дела, суд пришел к следующему.

По итогам электронного аукциона между ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» (заказчик) и ООО Строительная компания «Константа» (подрядчик) заключен контракт № 316-К-18 от 29.12.2018.

По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы по ремонту приемного отделения  Больницы, расположенного по адресу: 163002, 

<

...> в соответствии с условиями настоящего контракта, СНиПами, техническим заданием (приложение № 1), локальными сметными расчетами (приложение № 2), рабочей и проектной документацией.

В пункт 1.2 договора определены сроки выполнения работ: в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Цена контракта, согласно пункту 3.1, составила 11 689 800 руб.

Пунктом 2.8 контракта установлен гарантийный срок выполнения работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Пунктом 5.2.7 контракта предусмотрена обязанность подрядчика по требованию заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с заказчиком, устранять выявленные недостатки (дефекты) работ.

30.04.2019 стороны подписали акты о приемке выполненных работ формы КС-2  №№1-10   на общую сумму 12 858 775 руб.

В процессе эксплуатации помещений проявились следующие недостатки: в коридоре зафиксировано вздутие и отклеивание линолеума, частичное отклеивание линолеума в местах заведения на стену, трещины на стенах и над дверными проемами, дефекты в работе доводчиков входных дверей.

Письмом от 28.10.2019 № 02-03/4554/1 истец обратился к ответчику с требованием об исполнении гарантийных обязательств путем устранения выявленных недостатков. 

Письмом от 21.11.2019 № 5-11/19 ответчик уведомил истца об отказе в удовлетворении его требования, указав на то, что появление большинства дефектов произошло в результате недоработок в проектно-сметной документации, на основании которой был произведен монтаж конструкций.

Для установления причин возникновения дефектов, Учреждение обратилось в ООО «Норд Эксперт» с просьбой провести обследование помещений, в которых был выполнен ремонт.

По заключению эксперта № 5420 от 27.12.2019, составленного ООО «Норд Эксперт»,  причинами образования трещин на поверхности окрасочного и шпатлевочного слоя стен являются: некачественный монтаж СМЛ, применение материалов, не предусмотренных для монтажа СМЛ; несоблюдение температурных параметров и параметров влажности при монтаже СМЛ, нарушение технологии монтажа, нанесение шпатлевочного состава на неочищенную и влажную  поверхность.

Причиной образования волн и вздутий на поверхности линолеума является приклейка линолеума к нижележащему слою не по всей поверхности, применение материалов, не предусмотренных для использования в помещениях больницы. ФИО4 на поверхности керамической плитки образовалась из-за плохо подготовленного основания, некачественного клеевого состава, некачественного монтажа обшивки стен.

Письмом № 02-03/78 от 13.01.2019 (видимо в указании года допущена опечатка, следует читать «2020») Учреждение направило Обществу копию данного заключения и потребовало устранить недостатки.

ООО «СК Константа»  в ответе от 05.03.2020 №  1-03/20 отказало Учреждению в устранении недостатков, сославшись на несогласие с направленным в его адрес экспертным заключением.

Отказ подрядчика от устранения недостатков явился основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Правоотношения сторон вытекают из государственного контракта на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, правовое регулирование которого осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

В силу пункта 1 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Статьей 722 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

По смыслу названных правовых норм в пределах гарантийного срока устанавливается презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока, и безвозмездное устранение недостатков при выполнении подрядчиком работ с отступлениями от договора подряда.

Взяв на себя гарантийные обязательства по качеству выполненной работы в течение 5 лет (пункт 2.8 контракта), подрядчик в силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В рассматриваемой ситуации заказчик (истец) в пределах установленного контрактом гарантийного срока обнаружил проявившиеся недостатки и обратился к подрядчику (ответчику) с требованиями об их устранении. 

Ответчик с результатом внесудебной экспертизы не согласился, заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы на предмет определения причин возникновения недостатков.

Определением от 03 сентября 2020 года в рамках настоящего дела  была назначена судебная строительно-техническая экспертиза на предмет определения качества ремонтно-отделочных работ, выполненных подрядчиком в  приемном отделении ГБУЗ АО «АОДКБ» по контракту №316-К-18 от 29.12.2018. Проведение экспертизы поручено экспертам ООО «Конструктивные решения» ФИО5, ФИО6, ФИО7.

По результатам экспертизы получено заключение от 18.01.2021, согласно которому эксперты пришли к выводу, что  применение листов СМЛ марки «Стандарт», являющихся по категории горючести марки НГ, было продиктовано пожаробезопасностью приемного отделения, их применение не является проектной ошибкой.  Экспертами установлено, что при использовании стекло-магнезитовых листов марки «Стандарт» в помещениях приемного отделения больницы была нарушена технология их  установки и отделки.

Причинами возникновения недостатков, по мнению экспертов, является ненадлежащее качество выполненных подрядчиком работ.

1. Экспертизой установлено, что причиной отслоения и вспучивания шпатлевочного и окрасочного слоя от листов СМЛ в отдельных местах является ненадлежащая подготовка поверхности листов СМЛ к нанесению шпатлевочного состава:  поверхность листов СМЛ была пыльной, грязной, влажной.

2. Причинами образования трещин на шпатлевочном и окрасочном слое стен являются:

2.1. некачественный монтаж листов СМЛ. Применение материалов, не предусмотренных для монтажа листов СМЛ;

2.2. листы СМЛ не выдержаны при температуре помещения, в котором должен производиться их монтаж, достаточное количество времени (не менее 72 часов);

2.3. листы СМЛ, подверженные долгому воздействию влаги, не были просушены естественным путем до проведения монтажа в том же помещении, где должен производиться монтаж;

2.4. не обеспечен зазор между листами СМЛ для свободной циркуляции воздуха в процессе их сушки;

2.5. после закрепления листов СМЛ на каркасе, до начала обработки листов СМЛ или покрытия их какими-либо материалами, листам не было дано время для усадки;

3.Причинами отслоения и обрушения кафельной плитки от стены являются:

3.1. некачественно подготовленное основание;

3.2. неквалифицированное выполнение облицовочных работ;

3.3.использование некачественных материалов в процессе производства работ, некачественный клеевой состав;

3.4.толщина клеевой прослойки не соответствует показателям производителей плитки.

4.Причинами вспучивания и разрушения линолеума являются:

4.1.приклейка линолеума к нижележащему слою не по всей площади;

4.2.применение материалов, не предусмотренных для использования в помещениях объектов здравоохранения;

4.3.деформация листов СМЛ.

5.Причинами неплотного притвора дверей являются:

5.1. применение материалов, не предусмотренных проектом;

5.2. низкое качество изготовления установленных дверей.

У суда отсутствуют объективные основания не доверять выводам, содержащимся в экспертном заключении, поскольку оно получено по результатам назначенной судом экспертизы, заключение мотивированно, дано специалистами, обладающими специальными познаниями в области обследования строительных конструкций зданий и сооружений, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи заключения либо за дачу ложного заключения.

Суд отказал ответчику в удовлетворении ходатайства о назначении повторной  экспертизы, так как не возникло сомнений в обоснованности заключения экспертов ООО «Конструктивные решения». Противоречий в заключении экспертов суд также не усмотрел.

Согласно пункту 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Учитывая, что доказательств, достоверно свидетельствующих о проектных ошибках, допущенных при выборе строительных материалов для ремонта и технологии их установки, ответчик не представил, у суда отсутствуют основания для освобождения ООО «СК Константа» от ответственности за недостатки, возникшие в период гарантийного срока.

Последствия обнаружения недостатков в результате работ установлены статьёй 723 ГК РФ, в соответствии с которой, если иное не установлено законом или договором, заказчик вправе потребовать от подрядчика, в том числе, и  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

Таким образом, материалами дела подтверждается, что работы, выполненные ответчиком, не соответствуют предъявляемым к данным работам требованиям, в связи с чем требования истца законны, обоснованны и подлежат удовлетворению в полном объёме.  

В соответствии с требованиями части 3 статьи 174 АПК РФ суд устанавливает срок для устранения выявленных недостатков в течение 30 дней с момента вступления решения суда в силу. С учётом объема работ по устранению недостатков, 30-дневный срок, по мнению суда, является необходимым и достаточным. 

В соответствии с частью 1 статьи 110  АПК РФ расходы по государственной пошлине относятся на ответчика в полном объёме. 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном  суде.

В связи с указанной нормой права по результатам рассмотрения дела понесенные истцом расходы на оплату экспертизы в размере 62 382 руб. также относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Константа" (ОГРН  

<

***>)  в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу устранить недостатки в работах по ремонту приемного отделения ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" по адресу: 

<

...>, выполненные по контракту №316-К-18 от 29.12.2018, а именно:

- в гардеробе площадью 18,2 кв.м. (помещение № 1 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой, окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в кабинете старшей медицинской сестры площадью 15,8 кв.м. (помещение № 3 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому   каркасу   из   ПН   и   ПС   профилей   листами   в   один   слой;   окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в санузле площадью 1,4 кв.м. (помещение № За плана) произвести: замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в кабинете сестры-хозяйки (кастелянши) площадью 18,5 кв. м. (помещение № 2 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в сестринской площадью 18,5 кв.м. (помещение № 4 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в ординаторской площадью 26,5 кв.м. (помещение № 24 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в приемно-смотровом боксе № 1 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 5 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;

- в приемно-смотровом боксе № 2 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 5а плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;

- в шлюзе между боксами № 1 и 2 площадью 5,9 кв.м. (помещение № 5г плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в кабинете заведующего отделением площадью 13,2 кв.м. (помещение № 21 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в приемно-смотровом боксе № 3 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 6 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;

-в приемно-смотровом боксе № 4 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 6а плана)произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическомукаркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен,подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: излинолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна икоробки;

- в шлюзе между боксами № 3 и 4 площадью 5,9 кв.м. (помещение № 6г плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- на посту медицинской сестры площадью 18,5 кв.м. (помещение № 7 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в тамбуре соматического отделения площадью 14,5 кв.м. (помещение № 8 плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов;

- в инфекционном боксе № 1 площадью 19,8 кв.м. (помещение № 9 плана) произвести: замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен; замену дверного полотна и коробки;

- в шлюзе площадью 3,9 кв.м. (помещение № 9а) произвести замену дверного полотна и коробки;

- в инфекционном боксе № 2 площадью 19,8 кв.м. (помещение № 10 плана) произвести замену дверного полотна и коробки;

- в шлюзе площадью 3,9 кв.м. (помещение № 10а) произвести замену дверного полотна и коробки;

- в шлюзе площадью 3,6 кв.м. (помещение № 9в) произвести замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в процедурной площадью 20 кв.м. (помещение № 20) произвести: замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в санитарной комнате площадью 15,3 кв.м. (помещение №11) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- в клизменной площадью 13 кв.м. (помещение № 12) произвести замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

-  в коридоре общей площадь 111,7 кв.м. (помещения №№ 13,15,25,26,27) произвести: замену облицовки стен но системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в тамбуре инфекционного отделения площадью 4,5 кв.м, (помещение № 13а) произвести замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен; замену дверного полотна и коробки;

- в тамбуре - шлюзе площадью 2,4 кв.м. (помещение № 29) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- в кабинете сестры-хозяйки площадью 12,9 кв.м. (помещение № 17) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Константа" (ОГРН  

<

***>)   в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" (ОГРН 

<

***>) 62 382 руб. расходов по экспертизе и 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья

Н.Ю. Вахлова