АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

го род Саратов Дело № А57-18011/2024 227 марта 20256 года марта 2025 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковое заявление Комитета культурного наследия Саратовской области удовлетворить.  

Обязать Администрацию муниципального образования «Город Саратов», г. Саратов (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>):  

1. В течение 2 (Двух) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда получить задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: 

<

...>.  

В случае неисполнения данных обязательств, возложенных решением суда, взыскать с администрации муниципального образования «Город Саратов» в доход бюджета Саратовской области судебную неустойку в сумме 100 (Сто) рублей за каждый день неисполнения данной обязанности, начиная с 61-го календарного дня со дня вступления в законную силу решения суда.  

2. В течение 6 (Шести) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда провести комплексное инженерно-техническое исследование состояния объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: 

<

...>, и представить его результат в комитет культурного наследия Саратовской области.  

В случае неисполнения данных обязательств, возложенных решением суда, взыскать с администрации муниципального образования «Город Саратов» в доход бюджета Саратовской области судебную неустойку в сумме 100 (Сто) рублей за каждый день неисполнения данной обязанности, начиная со 181-го календарного дня со дня вступления в законную силу решения суда.  

3. В течение 6 (Шести) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда выполнить устройство водосточной системы и устройство отмостки на боковых и дворовом фасадах.  

В случае неисполнения данных обязательств, возложенных решением суда, взыскать с администрации муниципального образования «Город Саратов» в доход бюджета Саратовской области судебную неустойку в сумме 100 (Сто) рублей за каждый день неисполнения данной обязанности, начиная со 181-го календарного дня со дня вступления в законную силу решения суда.  

4. В течение 6 (Шести) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда разработать и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: 

<

...>, и представить его результат в комитет культурного наследия Саратовской области.  

В случае неисполнения данных обязательств, возложенных решением суда, взыскать с администрации муниципального образования «Город Саратов» в доход бюджета Саратовской области судебную неустойку в сумме 100 (Сто) рублей за каждый день неисполнения данной обязанности, начиная со 181-го календарного дня со дня вступления в законную силу решения суда.  

5. В течение 12 (Двенадцати) месяцев провести работы по сохранению (на основании согласованной документации) на объекте культурного наследия регионального значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: 

<

...>, в порядке, установленном действующим законодательством, силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

В случае неисполнения данных обязательств, возложенных решением суда, взыскать с администрации муниципального образования «Город Саратов» в доход бюджета Саратовской области судебную неустойку в сумме 100 (Сто) рублей за каждый день неисполнения данной обязанности, начиная с 366-го календарного дня со дня вступления в законную силу решения суда.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в порядке статей 257-259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи через Арбитражный суд Саратовской области апелляционной жалобы в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента принятия решения.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1