АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                                     Дело  № А19-25384/2021 

10.03.2022

Резолютивная часть решения суда объявлена в судебном заседании 02.03.2022.

Решение суда в полном объеме изготовлено 10.03.2022. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Пенюшова Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макаровой Н.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 28.12.2007, адрес: 664003, 

<

...>)

к ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 15 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 30.08.2002, адрес: 665800, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСК ГОРОД, 40 (ВТОРОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ ТЕР.) КВАРТАЛ, СТРОЕНИЕ 2)

об обязании выполнить лесовосстановительные мероприятия,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились;

от ответчика: не явились;

установил:

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Министерство) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к к ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 15 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (далее - ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) об обязании выполнить лесовосстановительные мероприятия на площади 109,8 га в вегетационный период с 15.05.2022 по 15.10.2022, а именно: 

Уч лесничество/ Дача/ТУ

Квартал

Выдел

Площадь подлежащая л/в

Год вырубки

Проектируемый способ лесовосстановления

Малобельское, Малоиретская

171

12

5,2

2017

искусственное

Малобельское, Малоиретская

282

14

6,3

2017

комбинированное

Малобельское, Малоиретская

282

13

0,4

2017

минерализация

Малобельское, Малобельская

170

15

4

2017

минерализация

Малобельское, Малобельская

170

26

4,7

2017

уход за подростом

Малобельское, Малоиретская

171

21

5,5

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

171

7

6,9

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

282

12

5,7

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

282

13

39,4

2018

уход за подростом

Голуметское, Черемховская

39

14

16

2018

уход за подростом

Голуметское, Черемховская

39

27

15,7

минерализация

 

В обоснование исковых требований истец сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по проведению лесовосстановительных мероприятий, предусмотренных проектом освоения лесов. 

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения спора извещены надлежащим образом в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Истец направил заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя Министерства, пояснив, что исковые требования поддерживает в полном объеме.

Ответчик отзыв на иск не представил, направил ходатайство об отложении судебного разбирательства, в обоснование которого указал, что колония не имеет возможности обеспечить явку представителя в судебное заседание в связи с занятостью представителя в другом судебном процессе.

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Согласно части 3 статьи 158 АПК РФ в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Из содержания приведённых положений статьи 158 АПК РФ следует, что отложение судебного разбирательства является правом суда, а не обязанностью.

В обоснование необходимости отложения судебного разбирательства ответчик сослался на отсутствие у представителя ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ возможности обеспечить явку представителя в настоящее судебное заседание, поскольку представитель занят в ином судебном процессе.

Поскольку неявка ответчика в судебное заседание, извещенного надлежащим образом, не является препятствием для рассмотрения дела по существу, с учетом процессуальных сроков рассмотрения дела, суд полагает, что отложение судебного разбирательства приведет к необоснованному затягиванию судебного процесса, находит возможным рассмотреть дело в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя                                                     ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Судебные акты по рассматриваемому делу опубликованы на официальном портале арбитражных судов «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Дело рассматривается в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей истца и ответчика.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2016 № 178-пп                              с 15 июня 2016 года агентство лесного хозяйства Иркутской области переименовано в министерство лесного комплекса Иркутской области.

На основании распоряжения агентства лесного хозяйства Иркутской области (в настоящее время Министерство лесного комплекса Иркутской области) от 02.11.2011 № 2764-ра «О предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в Черемховском лесничестве» ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен лесной участок в пределах земель лесного фонда в границах, определенных планом лесного участка с номером учетной записи в государственном лесном реестре                623-2011-10, общей площадью 30515 га, имеющий местоположения: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское лесничество, в эксплуатационных лесах, Алтае-Саянский горно-таежный лесной район, Малобельское участковое лесничество, Малоиретская дача, кварталы №№ 49, 50, 78, 79, 84ч, 87ч, 96, 148, 154ч, 166ч, 167ч, 171, 178ч, 192, 280-285, 297-299, Малобельская дача, кварталы №№ 168, 169, 170ч, 178ч, Среднесибирский  подтоежно-лесостепной лесной район Голуметское участковое лесничество, Черемховская дача, кварталы №№ 26, 34, 39-41, защитные леса, Малобельское участковое лесничество Малоиретская дача, кварталы №№ 91-93, 117-121, 143, 154ч, 156-161, 189-191, 242-248, Малобельская дача, кварталы №№ 170ч, 178ч, 208, 215.

Право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано в установленном законом порядке 22.12.2011 за номером государственной регистрации                                               38-38-15/025/2011-587 (свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2011).

Лесной участок передан в пользование ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ на основании акта приема-передачи от 23.11.2011.

Согласно пункту «е» Условий использования лесного участка (приложение № 3 к распоряжению от 02.11.2011 № 2764-ра) ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ при использовании лесного участка обязано осуществлять за свой счет санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные мероприятия и уход за лесом на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов.

В соответствии с разделом 5.9 проекта освоения лесов, разработанного ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, на 01.01.2019 на лесном участке фонд лесовосстановления составляет 38 га, которые представлены вырубками 2017-2018 годов. На площади вырубок 22,3 га проведены мероприятия по содействию естественному возобновлению. Площадь не покрытых лесом земель, нуждающихся в лесовосстановлении составляет 15,7 га (содействие естественному лесовосстановлению: минерализация почвы). Сведения об указанных лесных участках приведены в ведомости лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению (приложение № 21 к составу проекта освоения лесов).

Согласно приложению № 22 к Составу проекта освоения лесов и порядку его разработки, на лесосеках сплошных рубок предстоящего периода намечаются следующие объемы лесовосстановительных мероприятий: искусственное лесовосстановление - 15%, комбинированное – 2%, содействие естественному лесовосстановлению – 83%, в том числе: сохранение подроста и агротехнический уходза ним – 54%, минерализация поверхности почвы – 46 %. Способы и объемы лесовосстановления на вырубках и лесосеках сплошных рубок при рубке спелых и перестойных лесных насаждений предстоящего периода рекомендовано к натурному обследованию данных площадей, при которых в зависимости от количества подроста будут определены способы лесовосстановления на каждой конкретной лесосеке.

В материалы дела представлены отчеты об использовании лесов за 2016, 2017, 2018 годы, в подтверждающие факт проведения рубок на соответствующих лесных участках, а также невыполнение лесовосстановительных мероприятий. 

В целях своевременного выполнения мероприятий по лесовосстановлению истцом в адрес ответчика направлено уведомление от 01.06.2020 о необходимости проведения в 2020 году лесовосстановительных мероприятий, предусмотренным проектом освоения лесов на площади 118,8 га.

Из отчета о воспроизводстве лесов за 2020 год усматривается, что ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ лесовосстановительные мероприятия подлежавшие выполнению в 2020 году не выполнены.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 09.04.2021 № 02-91-4636/21 о необходимости в срок до 02.07.2021 выполнить лесовосстановительных мероприятий на площади 118,70 га, а именно: искусственное лесовосстановление методом посадки – 14,2 га, комбинированное лесовосстановление методом посадки – 6,3 га, содействие естественному лесовосстановлению методом сохранения подроста – 45,2 га, содействие естественному лесовосстановлению методом минерализации – 38,2 га.

Требования истца ответчиком в добровольном порядке и в установленный срок не исполнены, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском о понуждении выполнить лесовосстановительные мероприятия на лесном участке.         

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями                     статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в судебном порядке с использованием способов защиты, предусмотренных статьей 12 ГК РФ, либо иными способами, установленными законом.

Как следует из заявленных требований, истцом избран способ защиты гражданского права – понуждение к исполнению обязанности в натуре. 

В соответствии со статьей 1 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) одним из основных принципов лесного законодательства является обеспечение охраны и защиты лесов.

В силу статьи 12 ЛК РФ освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются: организация использования лесов; создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Часть 1 статьи 29.1 ЛК РФ устанавливает, что в случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование.

Частью 5 статьи 17 ЛК РФ предусмотрено, что осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках.

Согласно частям 1, 2 статьи 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов включает в себя: 1) лесное семеноводство; 2) лесовосстановление; 3) уход за лесами; 4) осуществление отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов (пункты 2, 3 Правил лесовосстановления утвержденных Приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375, Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений, утвержденных Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188, Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений, утвержденных Приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014).

Согласно пункту 2 Правил лесовосстановления утвержденных Приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375 "Об утверждении Правил лесовосстановления", утвержденных Приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 лесовосстановление состоит из комплекса природных процессов, в том числе обусловленных специальными технологическими и организационными мероприятиями, по образованию молодых сомкнутых лесных насаждений (молодняков) главных лесных древесных пород на землях, предназначенных для лесовосстановления.

К главным лесным древесным породам относятся древесные породы, которые наилучшим образом отвечают условиям произрастания, экосистемным и социально-экономическим целям освоения лесов. Критерии и требования к лесовосстановлению главными лесными древесными породами установлены в настоящих Правилах, приложениях к Правилам, и лесохозяйственных регламентах лесничеств.

Лесовосстановление включает в себя: планирование - определение местоположения и ежегодный учет площадей земель для лесовосстановления; обследование участков земель; проектирование; выполнение работ; приемку выполненных работ; инвентаризацию мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению.

Завершающим этапом лесовосстановления является обследование с целью отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса и подготовка акта об изменении документированной информации государственного лесного реестра.

В силу части 4 статьи 61 ЛК РФ невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного срочного пользования лесными участками.

Исходя части 4 статьи 61 ЛК РФ, приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 "Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки", пункта 8 Правила лесовосстановления объем соответствующих лесовосстановительных мероприятий на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, определяется проектом освоения лесов.

В соответствии с уведомлением от 01.06.2020 о необходимости выполнения мероприятий по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, проектом освоения лесов ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ в 2020 году подлежали выполнению лесовосстановительные мероприятия на площади 118,70 га.

В соответствии с отчетом о воспроизводстве лесов и лесоразведения за период                        с января 2020 по декабрь 2020 лесовосстановительные мероприятия в полном объеме не выполнены.

Как следует из материалов дела, и подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, ответчиком в полном объеме не исполнены обязанности по проведению лесовосстановительных мероприятий на вырубках прошлых лет, предусмотренных на 2019-2020 годы на площади 109,8 га, а именно:

Уч лесничество/ Дача/ТУ

Квартал

Выдел

Площадь

подлежащая

л/в

Год

вырубки

Проектируемый способ лесовосстановления

Малобельское, Малоиретская

171

12

5,2

2017

искусственное

Малобельское, Малоиретская

282

14

6,3

2017

комбинированное

Малобельское, Малоиретская

282

13

0,4

2017

минерализация

Малобельское, Малобельская

170

15

4

2017

минерализация

Малобельское, Малобельская

170

26

4,7

2017

уход за подростом

Малобельское, Малоиретская

171

21

5,5

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

171

7

6,9

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

282

12

5,7

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

282

13

39,4

2018

уход за подростом

Голуметское, Черемховская

39

14

16

2018

уход за подростом

Голуметское, Черемховская

39

27

15,7

минерализация

 

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ документальных доказательств, подтверждающих проведение лесовосстановительных работ на площади 109,8 га                                     (объем 2020 годов на вырубках 2017-2018 годов), ответчиком не представлено, требование истца в указанной части в добровольном порядке не исполнено, в ходе судебного разбирательства по существу не оспорено.      

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Поскольку материалы дела не содержат доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязанности по проведению лесовосстановительных мероприятий на площади               109,8 га, а именно: 

Уч лесничество/ Дача/ТУ

Квартал

Выдел

Площадь

подлежащая

л/в

Год

вырубки

Проектируемый способ лесовосстановления

Малобельское, Малоиретская

171

12

5,2

2017

искусственное

Малобельское, Малоиретская

282

14

6,3

2017

комбинированное

Малобельское, Малоиретская

282

13

0,4

2017

минерализация

Малобельское, Малобельская

170

15

4

2017

минерализация

Малобельское, Малобельская

170

26

4,7

2017

уход за подростом

Малобельское, Малоиретская

171

21

5,5

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

171

7

6,9

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

282

12

5,7

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

282

13

39,4

2018

уход за подростом

Голуметское, Черемховская

39

14

16

2018

уход за подростом

Голуметское, Черемховская

39

27

15,7

минерализация

 

Факт неисполнения обязательств в указанной части ответчиком не оспорен, следовательно, доказательства выполнения лесовосстановительных мероприятий, а равно и отзыв на исковое заявление в материалы дела не представлено, ввиду чего  требования истца о понуждении ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ выполнить лесовосстановительные мероприятия  являются правомерными, обоснованными и подлежат удовлетворению на основании статей 17, 61 ЛК РФ, Правил лесовосстановления утвержденных Приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375, Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений, утвержденных Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188, Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений, утвержденных Приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014.  

Основания и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах                                (статья 102 АПК РФ, глава 25.3 НК РФ).

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или ответчиков.

Из положений части 3 статьи 110 АПК РФ следует, что государственная пошлина,                   от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти", пунктам 4, 13 Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" Федеральная служба исполнения наказаний (далее - ФСИН России) входит в систему федеральных органов исполнительной власти и осуществляет публичные функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний, содержанию подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стражей, этапированию, конвоированию, а также контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Данные государственные полномочия в силу пункта 5 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации о 13.10.2004 № 1314, ФСИН России осуществляет как непосредственно, так и через учреждения, исполняющие наказания.

Для предоставления льготы по уплате государственной пошлины по подпункту 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ необходимо и достаточно подтвердить два признака: организационно-правовой статус лица (государственный орган, орган местного самоуправления) и его процессуальное положение (истец, ответчик).

ФКУ ИК-15 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ реализует указанные публичные полномочия, относится к числу органов исполнения наказания, входящих в структуру ФСИН России, является ответчиком по арбитражному делу, а, следовательно, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ имеет право на освобождение от уплаты государственной пошлины.

При таких обстоятельствах, учитывая, что как истец, так и ответчик освобождены                    от уплаты государственной пошлины, взыскание государственной пошлины в доход федерального бюджета в рамках настоящего спора не производится.  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 15 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" выполнить лесовосстановительные мероприятия на площади 109,8 га в вегетационный период с 15.05.2022 по 15.10.2022, а именно:

Уч лесничество/ Дача/ТУ

Квартал

Выдел

Площадь

подлежащая

л/в

Год

вырубки

Проектируемый способ лесовосстановления

Малобельское, Малоиретская

171

12

5,2

2017

искусственное

Малобельское, Малоиретская

282

14

6,3

2017

комбинированное

Малобельское, Малоиретская

282

13

0,4

2017

минерализация

Малобельское, Малобельская

170

15

4

2017

минерализация

Малобельское, Малобельская

170

26

4,7

2017

уход за подростом

Малобельское, Малоиретская

171

21

5,5

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

171

7

6,9

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

282

12

5,7

2017

минерализация

Малобельское, Малоиретская

282

13

39,4

2018

уход за подростом

Голуметское, Черемховская

39

14

16

2018

уход за подростом

Голуметское, Черемховская

39

27

15,7

минерализация

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд             в течение месяца со дня его принятия. 

Судья                                                                                                                        Е.С. Пенюшов