10/2023-55558(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  

http://novgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Великий Новгород Дело № А44-6284/2022  05 октября 2023 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления  решения суда в законную силу выполнить работы по контракту № 419/3108-19 от  14.06.2019 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и разработку рабочей  документации по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение АО «123 АРЗ»  в 2015-2020 годах. Реконструкция и техническое перевооружение объектов  инфраструктуры аэродрома и производственно-технического центра», 1 этап, а именно:  

- выполнить комплексное опробование ВИСП-97 установленного  технологического оборудования;  

- выполнить пусконаладочные работы комплекса видеонаблюдения ТБИС.463349  ИВПП: радиолокационного оптического комплекса ТБИС.463349.003 системы  

видеонаблюдения и комплекса технического наблюдения ТБИС.463349.003-07,  предназначенного для автоматизированного видеоконтроля за воздушными судами,  выполняющими взлет и посадку в районе аэродрома Старая Русса согласно техническим  условиям заказчика;  

- выполнить комплексное опробование комплекса системы  видеонаблюдения при выполнении полетов в целях демонстрации работы  комплекса, в том числе - программного обеспечения в реальных условиях  эксплуатации;  

- представить документы на правообладание аппаратно-программным  комплексом ТБИС.463349, включая активное и коммутационное оборудование  различных производителей в составе комплекса ТБИС.463349 (паспорта на  оборудование, администрирование системы, документация оператора системы,  спецификация сервера);  

- представить отчеты по выполнению пуско-наладочных работ технологического  оборудования;  

- представить результаты лабораторных исследований сточных вод после  очистки;  

- передать исполнительную документацию, предусмотренную сводом правил СП  68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.  Основные положения» и СП 48 13330. 2019 «Организация строительства».  

Взыскать с акционерного общества «Челябинский радиозавод «Полет» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «123 авиационный  ремонтный завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать по вступлении решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Соколова Е.А.