Арбитражный суд Амурской области 675023, 

<

...> тел. 

<

***>, факс 

<

***> http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А04-4879/2025

г. Благовещенск

17 декабря 2025 г.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна

рассмотрев исковое заявление Администрации Сковородинского муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Славянское" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о возложении обязанности, установил:

В Арбитражный суд Амурской области обратилась Администрация Сковородинского муниципального округа с исковым заявлением к обществу с ограниченной

ответственностью "Славянское" о возложении обязанности в соответствии с условиями муниципальных контрактов от 16.06.2021, 21.06.2021, 16.07.2021, 25.08.2021, 27.08.2021,

11.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 09.08.2021 осуществить благоустройство территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

На детской площадке и площадке для отдыха площадью 62 + 170 кв. м.: закрепить искусственную траву на детской площадке на площади 62 кв. м.; закрепить опорную

металлическую плиту стоек размером (200 х 200 х10) мм всех спортивных снарядов путем монтажа в бетонную поверхность площадки металлических анкерных болтов диаметром не менее 12 мм.- 12 штук; закрепить стойки качелей к опорной металлической плите размером

(200 х 200 х10) мм путем электросварки общая площадь 0,1 кв. м.; зачистить от следов коррозии и осуществить покраску масляной краской металлического ограждения детской

площадки и площадки для отдыха и металлической ступеньки входа на площадку- площадь 118 кв. м.

На контейнерной площадке для сбора ТКО площадью 11 кв. м.: осуществить

устройство ограждения контейнерной площадки профилированными металлическими листами высотой 1,5 метра, длина ограждения 10,14 метров, стойки из труб диаметром не

менее 100 мм, высотой не менее 1,8 метров в количестве 6 единиц- 1 комплект;

осуществить устройство перекрытия контейнерной площадки профилированными

металлическими листами. Квадратные трубы сечением не менее (80 х80)мм, длиной 7,5 метров, 3 единицы площадью 12 кв. м.

На спортивной площадке: осуществить очистку от растении, корней деревьев и

камней, планировку и утрамбовку грунта на площади 170 кв. м.; осуществить установку типового паркового дивана- 2 шт.

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными

подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:

На площадке для сушки белья: осуществить очистку от растений, корней деревьев и камней, планировку и утрамбовку грунта на площади 42 кв. м.; осуществить монтаж металлических т-образных стоек из металлических труб диаметром не мене 76 мм, высотой над грунтом не менее 1,7 метров.

Ответчик указал, что приступил к осуществлению расположения спортивной площадки и площадки для отдыха, в соответствии с проектной документацией на строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>; в остальной части против требований возразил, указал, что малые

архитектурные формы и искусственная трава повреждены в результате ненадлежащей эксплуатации и выявленные недостатки не относятся к гарантийному случаю; установка ограждения и крыши контейнерной площадки для сбора ТКО не были предусмотрены проектом.

Истец заявил о проведении экспертизы, производство которой просит поручить автономной некоммерческой организации "Бюро независимых экспертиз 2.0"

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (675000, 

<

...>, литер А 1) эксперт ФИО1, срок проведения экспертизы 30 дней, стоимость экспертизы 95 000 руб. оплачена Администрацией Сковородинского муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пл. пор. № 5731 от 24.09.2025.

На разрешение эксперта предлагает поставить следующие вопросы:

1. Соответствует ли выполненное ООО «Славянское» благоустройство территории, многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> проекту, а именно:

1.1. Соответствует ли расположение спортивной площадки и площадки для отдыха?

1.2. Необходимо ли установление ограждения контейнерной площадки для ТКО в случае, если нормами действующего законодательства и проектом данное ограждение предусмотрено? Выполнено ли оно ответчиком?

1.3. Правильно ли закреплены малые архитектурные формы и искусственная трава?

Суд назначил по делу экспертизу, производство которой поручил заявленному эксперту.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1. Соответствует ли объем и качество выполненных обществом с ограниченной ответственностью "Славянское" (благоустройство территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>) во исполнение условий муниципальных контрактов от 16.06.2021, 21.06.2021, 16.07.2021, 25.08.2021, 27.08.2021, 11.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 09.08.2021 условиям договоров и требованиям проектно-сметной и нормативной документации.

2, В случае выявления недостатков установить причину таких недостатков и указать объем, виды и стоимость работ, необходимых для их устранения.

От АНО "Бюро независимых экспертиз 2.0" поступило заключение № 16-01-25 в котором даны следующие ответы на поставленные вопросы:

Ответ на вопрос № 1: объем и качество выполненных обществом ограниченной ответственностью «Славянское» (благоустройство территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>) во исполнение условии муниципальных контрактов от 16.06.2021, 21.06.2021, 16.07.2021, 25.08.2021, 27.08.2021, 11.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021 и 09.08.2021 не соответствуют условиям договоров и требованиям проектно-сметной и нормативной документации.

Имеет место множество недоделок, отступлений от нормативной документации, которые эксперт подробно изложил в разделе III настоящего заключения эксперта.

Ответ на вопрос № 2: причиной выявленных недостатков является строительный брак и низкая квалификация строительных работников.

Объем, виды и стоимость работ необходимых для их устранения изложены в разделе IV настоящего заключения эксперта.

Стоимость работ необходимых для устранения недостатков составляет: 572 270,41 руб.

В связи с выполнением работы экспертом автономной некоммерческой организацией "Бюро независимых экспертиз 2.0" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) имеются

основания для выплаты вознаграждения эксперту.

Руководствуясь статьями 43, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Произвести выплату с депозитного счета Арбитражного суда Амурской области: автономной некоммерческой организации "Бюро независимых экспертиз 2.0"

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (675000, 

<

...>, литер А 1) стоимость экспертизы 95 000 руб. на основании счета № 14 от

03.12.2025 (сумма оплачена Администрацией Сковородинского муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пл. пор. № 5731 от 24.09.2025).

Судья А.А.Стовбун.