АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-2511/2024

г. Магадан

24 февраля 2025 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи А.М. Марчевской, 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания А.Ф. Кушниренко,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» (ОГРН 1134900000290, ИНН 4909997742, адрес: 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 55)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Строй» (ОГРН 1134911000443, ИНН 4902001680, адрес: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, пгт. Омсукчан, ул. Октябрьская, зд. 3)  

об устранении недостатков работ, выполненных по договору подряда, обнаруженных в пределах гарантийного срока  

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа (ОГРН 1144911000101, ИНН 4902001987, адрес: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, пгт. Омсукчан, ул. Ленина, д. 13), индивидуального предпринимателя Бойко Людмилы Владимировны (ОГРНИП 320491000001435, ИНН 490200683200)  

при участии в заседании представителей: 

от истца – К.И. Гонина, представитель, доверенность от 09 января 2025 г. № 05/25, паспорт, диплом;  

от ответчика, от третьих лиц – не явились; 

Руководствуясь статьями 41, 49, 110, 156, 159, 167-170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Принять уточнение исковых требований в части конкретизации объёмов  

утепления вентиляционных шахт в чердачном помещении, перечня дефектов в  

примыканиях к вертикальным элементам крыши многоквартирного дома, расположенного  

по адресу: 

<

...> (кв. 3160), изложенное в ходатайстве от 06 февраля 2025 г. без номера.  

2. Обязать ответчика, общество с ограниченной ответственностью «Лидер Строй»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в течение трёх месяцев с даты вступления в  

законную силу решения суда устранить недостатки капитального ремонта крыши  

многоквартирного дома № 21 (кв. 31-60) по адресу: Магаданская область, Омсукчанский  

район, 

<

...> в рамках гарантийного обязательства по договору  

подряда от 13 июля 2015 г. № 31-КР/2015, в виде: - замены двери выхода на кровлю; 

- утепления вентиляционных шахт в чердачном помещении в объёме 16,03 м3  

(1. 3,78 м3 (5,9*0,8*0,8), 2. 3,78 м3 (5,9*0,8*0,8), 3. 2,90 м3 (4,54*0,8*0,8), 4. 2,67 м3  

(4,17*0,8*0,8), 5. 2,90 м3 (4,54*0,8*0,8)); 

- устранения дефектов (растрескиваний) кровельного покрытия по всей площади  

крыши, трещин в цементно-песчаной стяжке по всей площади крыши;  

- устранения дефектов в примыканиях к вертикальным элементам крыши, путём  

обеспечения в основном слое гидроизоляции: устройства примыканий к вентиляционным шахтам в объёме 22,8 м.п.; 

устройства примыканий к фановым трубам в объёме 1,88 м.п.; устройства примыканий к помещению выхода на кровлю в объеме 7,72 м.п.;  

устройства примыканий деформационных швов в объёме 13,2 м.п.; устройства примыканий к опорам связи в объёме 0,5 м.п.; устройства примыканий к парапету в объёме 13,2 м.п.; 

а также путём обеспечения в дополнительном слое гидроизоляции (верхнем):  

дополнительного защитного слоя примыканий вентиляционных шахт в объёме  

24,63 кв.м; дополнительного защитного слоя примыканий фановых труб в объёме 2,34 кв.м; 

дополнительного защитного слоя примыканий помещения выхода на кровлю в  

объёме 9,2 кв.м; 

дополнительного защитного слоя примыканий парапета в объёме 14,26 куб.м; дополнительного защитного слоя примыканий опор связи в объёме 0,62 кв.м;  

дополнительного защитного слоя примыканий деформационных швов в объёме 14,26 кв.м.  

Выдать исполнительный лист истцу по его ходатайству после вступления решения в законную силу.  

3. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Лидер Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу истца, некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 рублей 00 копеек, о чём выдать исполнительный лист истцу после вступления решения в законную силу.  

4. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

5. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.М. Марчевская