АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.(3852) 29-88-01, http://www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-2439/2017

г. Барнаул

03 августа 2017 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Городова А.В., при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению по иску  Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, г.  Барнаул (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), к строительно-проектно-промышленному  открытому акционерному обществу «СТРОЙГАЗ», г. Барнаул (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), об обязании устранить недостатки,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество  «Барнаулкапстрой», г. Барнаул (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, по доверенности от 24.07.2017 № 24, от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом; 

от третьего лица – ФИО3, по доверенности от 05.10.2016 № 55,  

Руководствуясь ст.ст. 65, 110, 123, 156, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать строительно-проектно-промышленному открытому акционерному обществу  «СТРОЙГАЗ», г. Барнаул (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),безвозмездно устранить  недостатки выполненной работы по муниципальному контракту от 21.03.2011 № 06-11 на  объект: Детский ясли-сад на 330 мест в квартале 2001:  

1) Выполнить демонтаж, монтаж новых оконных сливов по фасадам оси 6-15/Ф; 3-5/К  L=68M.  

2)  Теневые навесы большие навесы тип-2-4 шт, малые навесы тип-1-2 шт:  

-  выполнить демонтаж и монтаж резинополимерного покрытия без стоимости - 435,6  м2 толщиной до 30 мм;  

-  выполнить очистку стен, антигрибковую обработку и известковую прокраску S  =62,53 м2;  

-  выполнить вскрытие пазух 85 м3, обратную засыпку с послойным трамбованием -  85м3;  

-  выполнить устройство отмостки шириной 1,5 м S=38 м2. 

4)  Нарушение отделки в помещении подвала в осях 13-16/ К-Д:  

-  выполнить очистку стен и водоэмульсионную покраску S=42, 54 м2,  гидроизоляционные работы.  

5)  В помещении спальни на втором этаже группы № 14 выполнить очистку потолков,  обработку, штукатурку гипсовыми смесями и водоэмульсионную прокраску S= 4,9 м2.  

6)  Выполнить работы по восстановлению отслоенной керамической плитки 20*30 на  стенах туалетов и буфетных групп №№ 1,2,4,5,6,7,8,10.11,12,13,14,17,18 - общей площадью  S= 124,55 м2.  

7)  Протекание тамбура и нарушение его отделки в осх 6-7/Ф-Х:  -  выполнить очистку стен и водоэмульсионную покраску S -4,5 м2;  

-  выполнить устройство верхнего слоя наплавляемой кровли из техноэласта с  примыканиями S = 9.4 м2;  

-  выполнить очистку потолков, обработку, штукатурку гипсовыми смесями и  водоэмульсионную покраску S = 4,95 м2.  

8)  Выполнить демонтаж и устройство асфальтобетонной стяжки на внутренних  проездах и тротуарах t= 50 мм S =1327 м2 (тротуары), S=850 м2 (проезды).  

9)  Выполнить устройство асфальтобетонной стяжки вокруг здания детского сада вдоль  осей 21/Р-Ж, 20/К-Р, К/13-20, Ж/13-18, 13/Ж-Л, 18/В-Ж, Н/А-В (t=50 мм, S=480 м2).  

10)  Выполнить очистку стен фасада в осях 14-16/Ж и водоэмульсионную покраску  S=12,5 м2;  

11) Устраненить контруклона площадки металлической противопожарной эвакуационной  лестницы S=3,2 м2.  

12)  Выполнить очистку стен приямки в осях 17-18/К и известковую покраску S=4,5 м2. 13)  Осадка входа в осях 7-8/В-Г: 

-выполнить расчеканку растворного шва, устройство упругой прокладки из жгута Велатерм,  герметизация шва герметиком Созиласт 8.8 м.п.  

14)  Устранить разломы и трещины бетонных водоотводных лотков по периметру здания.  

Взыскать со строительно-проектно-промышленного открытого акционерного  общества «СТРОЙГАЗ», г. Барнаул (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),в доход  федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г.Томск в течение  месяца со дня принятия решения. Лицо, обжаловавшее решение в апелляционном порядке,  вправе обжаловать вступившее в законную силу решение суда в кассационную инстанцию –  

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, г.Тюмень в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

Судья А.В. Городов