АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-5639/2023

05 июля 2023 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 июня 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 05 июля 2023 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Дергачева Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «БЭМ-2» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств,

представители лиц, участвующих в деле не явились, 

 

УСТАНОВИЛ:

некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (далее – НО «РФ КРМД РК», истец) обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с иском к обществу с ограниченной ответственностью «БЭМ-2» (далее – ООО «БЭМ-2», ответчик) о взыскании 7 636,29 руб. пени, предусмотренной условиями договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (кровли) многоквартирных домов от 14.08.2017 № FKR17061700024.

Определением суда от 09.03.2023 исковое заявление принято к производству согласно пункта 1 части 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в порядке упрощенного производства. Сторонам установлены сроки для предоставления дополнительных документов, отзыва на исковое заявление соответственно до 05.04.2023 и 26.04.2023.

В связи с необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств по делу, суд определением от 28.04.2023 перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначив предварительное судебное заседание.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по срокам выполнения работ по договору от 14.08.2017 № FKR17061700024.

Ответчик отзыв на исковое заявление, а также доказательств надлежащего исполнения договорных обязательств на дату рассмотрения дела по существу в суд не представил.

Стороны, в соответствии со статьей 123 АПК РФ надлежащим образом извещены о дате, времени и месте проведения судебного заседания. 

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствии представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав представленные истцом в подтверждение своих доводов доказательства, суд находит заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Между НО «РФ КРМД РК» (далее – Заказчик) и ООО «БЭМ-2» (далее – Генподрядчик) заключен договор FKR17061700024 от 14.08.201 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (кровли) многоквартирных домов, предметом которого является отпуск (оказание услуг по передаче электроэнергии и поставке электроэнергии) гарантирующим поставщиком электроэнергии (мощности) потребителю (далее – договор) по которому Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает па себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 9 к настоящему Договору) и проектной документацией своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного (-ых) дома(-ов) (далее «Работы»), по адресу(ам): Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д.95 (далее - «Объект»), включая выполнение строительно-монтажных работ на Объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта (-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором, после приемки выполненных работ на Объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

Согласно пункту 2.2.2. договора закреплено, что Генподрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта (-ов), климатическими условиями средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами, пожарной безопасности и .охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

Цена Договора определяется на основании Расчета (-ов) стоимости работ с приложением локальных смет по объектам/системам (Приложение № 8.1 - 8) с учетом процента снижения, установленного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол № 0067-2017 от «24» июля 2017г.) составляет 843 611рублен (восемьсот сорок три тысячи шестьсот одиннадцать рублей 00 копеек), без НДС (основание ст. 346.11 НК РФ), и включает все затраты Генподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте(-ах).

Пунктом 4.2. предусмотрено продолжительность, производства работ на Объекте (-ах) определяется Графиком производства и стоимости работ (Приложение №1 к Договору). 

Начальный срок выполнения работ - согласно Графика производства и стоимости работ (Приложение №. 1 к Договору). Конечный срок выполнения работ - последний день установленного срока выполнения работ согласно Графика производства и стоимости работ (Приложение №1 к Договору) (пункты 4.2.1-4.2.2 договора).

В соответствии с пунктом 4.4. договора изменение сроков выполнения работ возможно по основаниям, предусмотренным действующей на момент возникновения необходимости корректировки сроков редакции постановления Правительства РФ № 615-ПП.

Разделом 7 договора определён порядок приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Согласно п. 7.2. договора работы по договору по каждому объекту считаются выполненными окончательно и в полном объёме только после комиссионной приёмки выполненных в полном объёме работ на объекте по акту приёмки выполненных работ по объекту и подписания сторонами оформленных актов приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Генподрядчик гарантирует выполнение всех работ по каждому из объектов выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора ( пункт 10.1 договора).

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2017. Окончательный срок действия договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторонами по договору (пункты 13.1, 13.2 договора).

Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью (пункт 17.9 Договора).

В дальнейшем, между Заказчиком и Генподрядчиком, заключены дополнительное соглашение №2 от 25.10.2018 (далее – соглашение), которым внесли изменения в абз. 1 п. 3.1. договора изложив его в следящей редакции:

«п.3.1. Цена Договора определяется на основании Расчетов (-ов) стоимости работ с приложением локальных смет по объектам/системам (Приложение №8.1 Расчет стоимости работ) составляет: 954 536,22 рублей (девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть рублей 22 копейки), без НДС (основание ст. 346.11 НК РФ), и включает все затраты Генподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте (-ах)» 

В соответствии с пунктом 12.1. договора при нарушении условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором.

Согласно графику производства работ по объекту работы по капитальному ремонту общего имущества (кровли) многоквартирного дома должны быть выполнены в следующие сроки:        .

- начало выполнения работ - со дня заключения договора (14.08.2017);

- окончание выполнения работ - до 30.11.2017.

В соответствии с актом приёмки выполненных работ по объекту, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) работы сданы 08.12.2017 (с пропуском срока - 8 дней).

Стоимость работ составила 954 536, 22 руб.

Заказчиком выполненные работы оплачены в полном объёме.

В связи с ненадлежащие исполнение договора ответчиком истцом в его адрес направлена претензия о выплате неустойки по факту нарушения условий договора от 18.02.2020 №1271 с требованием оплатить 7 636 руб. 29 коп. неустойку.

Поскольку ООО БЭМ-2» добровольно требования претензии удовлетворены не были, НО «РФ КРМД РК» обратился с данным иском в арбитражный суд.

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Согласно пункту 12.3.1. за невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте (-ах) в соответствии с Графиком производства и стоимости работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1. % от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания пли этапа работ по отдельному элементу (системе) здания за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью от 1 до 10 дней).

Представленный истцом расчёт неустойки судом проверен и признан арифметически верным на сумму 7 636 руб. 29 коп.

В соответствии с положениями части 1 статьи 110 АПК РФ судом на ответчика относятся также расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 3 487,39 руб. пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (95 270,17х5 542:151 398,63).

Учитывая, что в результате уменьшения истцом размера исковых требований уплате в федеральный бюджет подлежит государственная пошлина в размере 5 542 руб., при этом истцом при обращении в арбитражный суд уплачено 5 626 руб. государственной пошлины, 84 руб. из федерального бюджета подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БЭМ-2» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 7 636 руб. 29 коп. пени и 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме).

 

Судья                                                                                                                      Е.А. Дергачев