АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-1050/24

г. Уфа

23 мая 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 20.05.2024

Полный текст решения изготовлен 23.05.2024

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р. Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рияновой Л.З.  рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-424" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Башкирская торгово-строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 844 281 руб. 90 коп. сумму задолженности, 589 583 руб. 75 коп. сумму пени

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-424" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Башкирская торгово-строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 844 281 руб. 90 коп., пени в размере 418 182 руб. 67 коп.

Определением от 22.01.2024 суд перешел к рассмотрению по общим правилам искового производства.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил, каких-либо ходатайств не заявил.

Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном указанным Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

В соответствии с частью 4 данной статьи судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица, которое в свою очередь определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц местом нахождения ответчика является: 453126, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. СТЕРЛИТАМАК, УЛ. 7 НОЯБРЯ, Д. 3, ОФИС 3. Этот же адрес ответчика указан в исковом заявлении и подписанном сторонами КС-2.

Конверты с копиями судебных актов по делу, направленные по юридическому адресу ответчика, возвращены в суд с отметкой органов связи об истечении срока хранения. При этом основания полагать, что организацией почтовой связи нарушен порядок их доставки, у суда отсутствуют.

При таких обстоятельствах суд на основании пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ признает ответчика надлежащим образом извещенным о начавшемся процессе, времени и месте рассмотрения дела.

По смыслу статей 9, 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" организация несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу его регистрации, даже если оно фактически не находится по указанному адресу.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" тексты судебных актов по делу в установленный срок размещены на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет".

Принимая во внимание, что ответчик получение корреспонденции по юридическому адресу не обеспечивает, почтовые отправления возвращаются за истечением срока хранения, суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Дело рассмотрено в отсутствие сторон в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ:

3 марта 2022 года между Обществом «Строительно-монтажное управление-424» (Генподрядчик) и Обществом «Башкирская Торгово-строительная Компания» (Субподрядчик) заключен Договор на выполнение строительно-монтажных работ №43В/-ОТК.

Согласно п.1.1 Договора Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство качественно (согласно действующим нормативным документом), из готовых конструкций предоставленных Генподрядчиком, собственными силами и средствами, с применением своих механизмов и монтажных материалов, в срок установленный настоящим Договором, на объекте «Многоквартирный жилой дом полу л. ФИО1, д. 43 в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ (Секция В)» выполнить полный комплекс работ по монтажу ПВХ оконных и балконных конструкций.

Объем работ: 638,2 (шестьсот тридцать восемь целых и две десятых) кв.м. (пункт 1.2 договора).

Согласно п. 2.1. Договора стоимость комплекса работ по настоящему договору: 1300 руб./кв.м, (тысяча триста), итого: 829 660 (Восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп., (с НДС).

Согласно п. 2.2. настоящий договор предусматривает предоплату в размере 60% от стоимости работ по Договору.

В силу п. 4.1. Договора Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в срок до 15.05.2022г.

Согласно п. 3.4. Договора Генподрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента сообщения субподрядчиком Генподрядчику о готовности приемки —сдачи работ (в т.ч. промежуточный), должен подписать Акты приемки выполненных работ в установленном порядке, либо дает мотивированный отказ.

В соответствии с п. 3.1. Договора все расчеты между Генподрядчиком и Субподрядчиком по настоящему договору производятся в рублях на основании законодательства РФ в безналичной форме по реквизитам, указанным на основании счетов, выставленных Субподрядчиком.

В соответствии с п. 4.2. настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления авансового платежа Генподрядчиком Подрядчику и действует до исполнения Договора обеими Сторонами.

В соответствии с Дополнительным соглашением от 3.06.2022 года к Договору №43/В-ОТК от 03.03.2022г. на выполнение строительно-монтажных работ (подряда) Подрядчик обязался выполнить дополнительные работы на Объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. ФИО1, д. 43 в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ (Секция В. 1й этаж)» полный комплекс работ по демонтажу и монтажу (замене) оконных конструкций ПВХ профиля, из готовых конструкций предоставленных генподрядчиком, собственными силами и средствами, с применением своих механизмов и монтажных материалов, в срок с 06.06.2022г. по 08.06.2022г.

Стоимость указанных работ составляет:

- демонтаж 500 рублей за квадратный метр;

- монтаж 900 (девятьсот) рублен за квадратный метр;

- стоимость материалов - 500 (пятьсот) рублей за квадратный метр;

Объем выполняемых работ: 55.11 (пятьдесят пять целых одиннадцать сотых) квадратных метров.

Итого: демонтаж - 27 555 руб.; монтаж - 49 599 руб.; стоимость материалов - 27 555 руб.: всего: 104 709 (сто четыре тысячи семьсот девять) рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 15.06.2022 года к Договору №43/В-ОТК от 03.03.2022 на выполнение строительно-монтажных работ (подряда) Подрядчик обязался выполнить дополнительные работы на Объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. ФИО1, д. 43 в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ (лестничный пролет)» полный комплекс работ по демонтажу и монтажу (замене) оконных конструкций ПВХ профиля, из готовых конструкций предоставленных генподрядчиком, собственными силами и средствами, с применением своих механизмов и монтажных материалов, в срок с 15.06.2022г. по 30.06.2022г.

Стоимость указанных работ составляет:

-                           монтаж - 900 (девятьсот) рублей за квадратный метр;

-                           стоимость материалов - 500 (пятьсот) рублей за квадратный метр;

Объем выполняемых работ: 22,67 (двадцать две целых шестьдесят семь сотых) квадратных метров.

Итого: монтаж - 20 403 руб.; стоимость материалов - 11 335 руб.; всего: 31 738 (тридцать одна тысяча семьсот тридцать восемь) рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением №4 от 19.07.2022 года к Договору №43/В-ОТК от 03.03.2022 на выполнение строительно-монтажных работ (подряда) 11одрядчик обязался выполнить дополнительные работы на Объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. ФИО1, д. 43 в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ» полный комплекс работ по монтажу оконных конструкций, из готовых конструкций предоставленных генподрядчиком, собственными силами и средствами, с применением своих механизмов и монтажных материалов, в срок с 19.07.2022г. по 15.09.2022г.

Стоимость указанных работ составляет:

-                                                 монтаж - 550 рублей за квадратный метр;

-                                                 стоимость материалов - 280 рублей за квадратный метр.

Объем выполняемых работ: 1 107,92 (одна тысяча сто семь целых девяносто две сотых) квадратных метров.

Итого: монтаж - 608 850 руб.; стоимость материалов - 310 217 руб.; всего: 919573.60 (девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) рубля.

Предоплата 60 % до 22.07.2022 г.

Общая стоимость Договора составила 1 888 680 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20%.

Как указывает истец, во исполнение условий договора им перечислены ответчику в качестве предоплаты по договору денежные средства в сумме 1 594 221,02 руб. платежными поручениями:

1.     №198 от 03.03.2022 на сумму 500 000,00 руб.

2.      №402 от 29.04.2022 на сумму 100 000,00 руб.

3.      №480 от 27.05.2022 на сумму 43 899,00 руб.

4.      №486 от 30.05.2022 на сумму 150 000,00 руб.

5.      №557 от 09.06.2022 на сумму 104 709,00 руб.

6.      №642 от 15.07.2022 на сумму 65 770,00 руб.

7.      №673 от 27.07.2022 на сумму 600 000,00 руб.

8.      №85 от 16.08.2022 на сумму 29 843,02 руб.

Вместе с тем, обязательства по выполнению подрядных работ со стороны ответчика по настоящее время исполнены не в полном объеме.

Работы, выполненные в отчетном месяце, подлежат оплате Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Генподрядчиком от Субподрядчика документов.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-2 №1 от 31.03.2022, КС-3 №1 от 31.03.2022 за отчетный период с 03.03.2022 по 31.03.2022, на сумму 311 896,00 руб., подписанные сторонами без возражений и скрепленные их печатями.

Таким образом, по состоянию на 17.01.2024 задолженность ответчика составляет 629 843 руб. 02 коп.

10 марта 2022 года между Обществом «Строительно-монтажное управление-424» и Обществом «Башкирская Торгово-строительная Компания» был заключен Договор на выполнение строительно-монтажных работ №11-ДП/2022. 

В соответствии с п. 1.1. Договора Генподрядчик пор) чает, а Подрядчик принимает на себя обязательство качественно (согласно СНиП), из собственных материалов, собственными силами и средствами, с применением своих механизмов и монтажных материалов, в срок, установленный настоящим Договором, на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. ФИО1, д. 43 в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ (Секция Аи Б)» (далее- Объект), выполнить полный комплекс работ по установке и закупке Оконных приточных клапанов Air-Box Comfort на оконные конструкции ПВХ.

Согласно п.1.2. Объем работ: секция А: 99 (девяносто девять) штук; секция Б: 132 (сто тридцать две) штуки, итого: 231 (Двести тридцать одна) штука.

В соответствии с п. 2.1. Договора Стоимость комплекса работ по настоящему договору: закупка: 585 (Пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 шт., монтаж: 420 (четыреста двадцать) рублей 00 копеек за 1 шт. Итого (закупка + установка) (135 135+ 97 020) 232 155 (двести тридцать две тысячи сто пятьдесят пять) руб. 00 коп., с НДС.

Настоящий договор предусматривает предоплату в размере 100% от стоимости работ по Договору (п.2.2.Договора).

Согласно п. 3.4. Договора Генподрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента сообщения субподрядчиком Генподрядчику о готовности приемки -сдачи работ (в т.ч. промежуточных), должен подписать Акты приемки выполненных работ в установленном порядке, либо дает мотивированный отказ.

В соответствии с п. 4.2. настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления авансового платежа Генподрядчиком Подрядчику и действует до исполнения Договора обеими Сторонами.

В силу п. 4.1. Договора Подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы в срок равный 30 календарным дням со дня, следующего за днем перечисления Генподрядчику предоплаты Подрядчику.

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 19.07.2022 к Договору №11- ДП/2022 на выполнение строительно-монтажных работ (подряда) от 10.03.2022 года Подрядчик обязался выполнить дополнительные работы на Объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. ФИО1, д. 43 в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ» полный комплекс работ по монтажу алюминиевых конструкций ПВХ профиля, из готовых конструкций предоставленных генподрядчиком, собственными силами и средствами, с применением своих механизмов и монтажных материалов, в срок с 19.07.2022г. по 31.07.2022г.

Стоимость указанных работ составляет:

-                 монтаж - 2200 (две тысячи двести) рублей за квадратный метр;

Объем выполняемых работ: 47,2 (сорок семь целых две десятые) квадратных метров. Итого: 103 840 (сто три тысячи восемьсот сорок) рублей.

Предоплата 60 % до 22.07.2022 г.

Как указывает истец, во исполнение условий договора им произведена оплата оборудования путем перечисления денежных средств Поставщику в общей сумме 294 459 руб., в том числе НДС 20% следующими платежными поручениями:

1.      №245 от 17.03.2022 по счету № 5 от 14.03.2022 на сумму 19 630,00 руб.

2.       №440 от 17.05.2022 на сумму 100 000,00 руб.

3.       №447 от 18.05.2022 на сумму 100 000,00 руб.

4.       №479 от 27.05.2022 на сумму 12 525,00 руб.

5.       №678 от 28.07.2022 на сумму 62 304,00 руб.

Работы, выполненные в отчетном месяце, подлежат оплате Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Генподрядчиком от Подрядчика следующих документов:

- Подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в т.ч. промежуточного результата;

- Подписанной Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), в т.ч. промежуточного результата;

            В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-2 №1 от 25.04.2022, КС-3 №1 от 25.04.2022 за отчетный период с 10.03.2022 по 25.04.2022 на сумму 97 020,00 руб., в том числе НДС 20%; УПД №11 от 25.04.2022 на сумму 135 135,00 руб., КС-2 №2 от 22.07.2022, КС-3 №2 от 22.07.2022 - за отчетный период с 19.07.2022 по 22.07.2022 на сумму 45 100,00 руб., в т. ч. НДС (20%) (ДС №1 от 19.07.2022);

По данным истца, по состоянию на 17.01.2024 задолженность ответчика составляет 17 204 руб. 

13.07.2022         года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - 424» (Генподрядчик), и Обществом «Башкирская Торгово-строительная Компания» (Подрядчик) заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ (подряда) №17-ДП/2022.

В соответствии с п. 1.1. Договора Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство качественно (согласно СНиП), из собственных материалов, собственными силами и средствами, с применением своих механизмов и монтажных материалов, в срок, установленный настоящим Договором, на объекте: «Многоквартирный жилой дом по ул. ФИО1, д. 43 в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ (Секции А)» (далее-Объект), выполнить полный комплекс работ по установке и закупке отливов на оконные конструкции ПВХ.

Согласно п. 1.2 Договора Объем и Стоимость работ:

установка одного отлива 1 погонный метр —262,5 рублей,

246 погонных метров; 246 х 262,5 = 64 575 стоимость с НДС

Отлив Коричневый (окрас с 1-й стороны) 230 х 700 = 96 шт. / 14 877.45 руб.

Отлив Коричневый (окрас с 1-й стороны) 230 х 1500 = 64 шт./ 21148.05 руб.

Отлив Коричневый (окрас с 1-й стороны) 230 х 1450 = 8 шт. / 2555.7 руб.

Отлив Коричневый (окрас с 1-й стороны) 230 х 1100 = 36 шт. / 8737. 57 руб.

Отлив Коричневый (окрас с 1-й стороны) 230 х 1300 = 9 шт. / 2579,32 руб.

Отлив Коричневый (окрас с 1-й стороны) 230 х 1350 = 18 шт. / 5355, 52 руб.

Отливы 54.73 квадратных метров стоимость 56 645. 55 рублей с НДС

Шуруп с буром 4.2x16 корич 1400 (шт.) цена 1881, 6 рублей

Пена монтажная для шумоизоляции Голди фам - 18 баллонов 1 баллон 600 руб. 18 х 600=10 800 р.            

Силикон для герметизации отливов 4 шт. 1 шт. х 700 рублей

4x700= 2800 руб.

Доставка 1000.00 руб.

Стоимость материалов 69 813. 61 рублей

Итого 134 388 (Сто тридцать четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 61 коп. (с НДС).

Настоящий договор предусматривает предоплату в размере 70% от стоимости работ по Договору (п.1.3. Договора).

Согласно раздела 1.3. Договора Генподрядчик произвел предоплату по счету №25 от 13.07.2022 путем перечисления денежных средств Подрядчику в сумме 94 072 (Девяносто четыре тысячи семьдесят два) рубля 03 коп., в том числе НДС 20%, что подтверждается платежным поручением № 653 от 20.07.2022.

Согласно п. 2.4. Договора Генподрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента сообщения субподрядчиком Генподрядчику о готовности приемки -сдачи работ (в т.ч. промежуточных), должен подписать Акты приемки выполненных работ в установленном порядке, либо дает мотивированный отказ.

В силу п. 3.1. Договора Подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы в срок равный 15 календарным дням со дня, следующего за днем перечисления Генподрядчику предоплаты Подрядчику.

Следовательно, началом срока исполнения Ответчиком Договора является 04.08.2022.

В силу п. 3.2. Договора он вступает в силу с момента перечисления авансового платежа Генподрядчиком Подрядчику и действует до исполнения Договора обеими Сторонами.

По условиям п. 4.1. Договора Подрядчик обязуется своими и/или привлеченными силами и материально-техническим средствами выполнить все виды работ в объемах и стоимости, указанных в настоящем договоре, в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Генподрядчику полностью законченный и готовый к эксплуатации результат Работ.

Как указывает истец, во исполнение условий договора им перечислены ответчику в качестве предоплаты по договору денежные средства в сумме 94 072 руб. 03 коп. платежным поручением от 13.07.2022 №25.

Вместе с тем, обязательства по выполнению подрядных работ со стороны ответчика по настоящее время не исполнены надлежащим образом и в полном объеме.

13.07.2022       года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-424» (далее-Генподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Башкирская Торгово-строительная Компания» (далее- Подрядчик) был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ (подряда) №18-ДП/2022 (далее по тексту - Договор).

В соответствии с п.1.1 Договора Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство качественно (согласно СНиП), из собственных материалов, собственными силами и средствами, с применением своих механизмов и монтажных материалов, в срок, установленный настоящим Договором, на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. ФИО1, д. 43 в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ (Секции В)» (далее- Объект), выполнить полный комплекс работ по установке и закупке отливов на оконные конструкции ПВХ.

Согласно                п.              1.2 Договора Объем и Стоимость

работ:

установка одного отлива, 1 погонный метр — 262,5 рублей; 270 погонных метров;

270 х 262,5 = 70 875 рублей (с НДС)

Отливы 54.73 квадратных метров, стоимость 58 684. 5 рублей (с НДС)

Шуруп с буром 4.2x16, коричн. 1500 (шт.) цена-2016 рублей

Пена монтажная для шумоизоляции «Голди фам» - 20 баллонов; 1 баллон 600 руб.

20 х 600=12 000 р.

Силикон для герметизации отливов 4 шт. 1 шт. х 700 рублей 4x700= 2800 руб.

Доставка 1000.00 руб.

Стоимость материалов 76 500,5 рублей Итого 147 375 ,5 рублей цена с НДС.

Согласно п.1.3. Договора настоящий договор предусматривает предоплату в размере 70% от стоимости работ по Договору.

Все расчеты между Генподрядчиком и Субподрядчиком по настоящему договору производятся в рублях на основании законодательства РФ в безналичной форме по реквизитам, указанным на основании счетов, выставленных Субподрядчиком (п. 2.1. Договора).

Согласно п. 2.4. Договора Генподрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента сообщения субподрядчиком Генподрядчику о готовности приемки -сдачи работ (в т.ч. промежуточных), должен подписать Акты приемки выполненных работ в установленном порядке, либо дает мотивированный отказ.

В силу п. 3.1. Договора Подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы в срок равный 15 календарным дням со дня, следующего за днем перечисления Генподрядчику предоплаты Подрядчику.

В силу п. 3.2. Договора он вступает в силу с момента перечисления авансового платежа Генподрядчиком Подрядчику и действует до исполнения Договора обеими Сторонами.

По условиям п.4.1. Договора Подрядчик обязуется своими и /или привлеченными силами и материально-техническим средствами выполнить все виды работ в объемах и стоимости, указанных в настоящем договоре, в сроки, предусмотренные настоящим доювором, и сдать Генподрядчику полностью законченный и готовый к эксплуатации результат Работ.

Как указывает истец, во исполнение условий договора им перечислены ответчику в качестве предоплаты по договору денежные средства в сумме 103 162 руб. 03 коп. платежным поручением от 20.07.2022 №653.

Вместе с тем, обязательства по выполнению подрядных работ со стороны ответчика по настоящее время не исполнены надлежащим образом и в полном объеме.

Таким образом, по состоянию на 17.01.2024 задолженность ответчика составляет 103 162 руб. 85 коп.

В связи с тем, что в согласованный сторонами срок работы по договору выполнены не в полном объеме, истец направил ответчику претензию с требованием возврата неотработанного аванса.

Неисполнение ответчиком обязательства по возврату аванса послужило основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Проанализировав условия договоров, суд квалифицирует их как договоры подряда и приходит к выводу, что правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Статьей 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее.

В силу положений статей 702, 711 ГК РФ сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном порядке является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, законами или иными правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Каких-либо доказательств встречного предоставления на предъявленную к взысканию истцом сумму предоплаты ответчиком в материалы дела не представлено, как и доказательств выполнения каких-либо работ по договору полностью или в части.

При этом бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на ответчике как подрядчике и исполнителе услуг.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу закрепленного в АПК РФ принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции.

Арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств, не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения.

В ходе разрешения спора суд предоставил ответчику достаточно времени для подготовки позиции по делу, представления доказательств в обоснование требований и возражений.

Суд неоднократно откладывал судебное разбирательство по делу в связи с непредставлением ответчиком отзыва на иск, требовал исполнить указанную процессуальную обязанность (часть 1 статьи 131 АПК РФ), предлагал ответчику представить в материалы дела доказательства фактического оказания услуг и выполнения работ по договору, привести перечень конкретных действий, совершенных во исполнение обязательств по договору.

Ответчиком указанные требования и предложения суда проигнорированы.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статьи 65 АПК РФ, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

Кроме того, в соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

С учетом изложенного, исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договоры, платежные поручения, досудебную претензию и доказательства ее направления, пояснения истца, суд установил факт заключения между сторонами договоров, факт перечисления истцом денежных средств в счет оплаты работ по договорам.

В материалы дела не представлены доказательства того, что на момент вынесения решения согласованные в договорах работы в полном объеме и надлежащим образом выполнены ответчиком, их результат передан, либо готов к передаче истцу. Доказательства того, что ответчик извещал истца об выполненных им работ, а последний уклонился от их принятия, в материалы дела также не представлены (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Учитывая отсутствие оснований полагать, что ответчиком, получившим денежные средства от истца, обеспечено встречное предоставление на сумму произведенных последним платежей, суд приходит к выводу о том, что денежные средства в сумме 844 281 руб. 90 коп. подлежат взысканию с ответчика на основании статьи 1102 ГК РФ, поскольку при ином подходе на стороне последнего имела бы место необоснованная выгода.

Доказательства наличия оснований для удержания перечисленных истцом денежных средств ответчиком не представлены, как и доказательства их возврата.

С учетом изложенного требование истца о взыскании с ответчика 844 281 руб. 90 коп. подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки, начисленной за нарушение сроков выполнения работ.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу п. 7.5. Договора от 03.03.2022 №43В/-ОТК, в случае нарушения сроков сдачи результатов работ со стороны Подрядчика в нарушение сроков, установленных разделом 3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих сдаче работ за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, исходя из расчета:

Сумма

задолженности,

руб.

Срок

выполнения работ по Договору

Период

просрочки

Кол-во

дней

просрочки

Размер пени за просрочку оплаты (% от суммы

задолженности стоимости в день)

Сумма пени за период

просрочки, руб

919 573,60

19.07.2022 -

15.09.2022

16.09.2022

28.11.2023

439

0,1%

403 692,81

 

В силу п. 8.5. Договора от 10.03.2022 №11-ДП/2022, в случае нарушения сроков сдачи результатов работ со стороны Подрядчика в нарушение сроков, установленных разделом 3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих сдаче работ за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, исходя из расчета:

Сумма задолженн ости, руб.

Срок

выполнения работ по Договору

 

Период

просрочки

Кол-во

дней

просрочки

Размер пени (% от стоимости подлежащих сдаче работ)

Сумма пени за период

просрочки, руб.

103 840

19.07.2022

31.07.2022

 

01.08.2022 – 28.11.2023

485

0,1%

50 362,40 руб.

 

В силу п. 7.5. Договора от 13.07.2022 №17-ДП/2022, в случае нарушения сроков сдачи результатов работ со стороны Подрядчика в нарушение сроков, установленных разделом 3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих сдаче работ за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, исходя из расчета:

 

Сумма

задолженности,

руб.

Срок выполнения работ по

Договору

Период

просрочки

Кол-во

дней

просрочки

Размер пени (% от стоимости подлежащих сдаче работ)

Сумма пени за период

просрочки, руб.

134 388,61

04.08.2022

05.08.2022 – 28.11.2023

481

0,1%

64 640,92 руб.

 

В силу п. 7.5. Договора от 13.07.2022 №18-ДП/2022, в случае нарушения сроков сдачи результатов работ со стороны Подрядчика в нарушение сроков, установленных разделом 3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих сдаче работ за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, исходя из расчета:

Сумма

задолженности

Срок

выполнения работ по Договору

Период

просрочки

Кол-во

дней

просрочки

Размер пени (% от стоимости подлежащих сдаче работ)

Сумма пени за период

просрочки, руб.

143 375,50

04.08.2022

05.08.2022

28.11.2023

481

0,1%

70 887,62 руб.

 

Проверив расчет пени, представленный истцом в материалы дела, суд признает его верным.

Контррасчет пени ответчиком в материалы дела не представлен, методика начисления пени не оспорена, ходатайство о снижении неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ в связи с ее явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства не представлено.

С учетом изложенного, исковые требования в части взыскания пени по договорам подлежат удовлетворению в полном объеме в размере 589 583 руб. 75 коп.

Оснований для снижения суммы пени в порядке статьи 333 ГК РФ суд не усмотрел с учетом отсутствия в материалах дела как заявления ответчика о ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства, так и доказательств такой несоразмерности (пункты 71, 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Истец также просит взыскать с ответчика 92 руб. в возмещение почтовых расходов.

Согласно статьям 101, 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.

В материалы дела истцом представлены почтовые квитанции.

Суд приходит к выводу, что почтовые расходы истца подтверждены документально и подлежат компенсации за счет ответчика в сумме 92 руб.

 В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. Поскольку истцу при подаче иска была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины, она подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Башкирская торгово-строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-424" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 844 281 руб. 90 коп. сумму задолженности, 589 583 руб. 75 коп. сумму пени, 92 руб. сумму почтовых расходов.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Башкирская торгово-строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 27 339 руб.

Исполнительный лист в доход федерального бюджета выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                        Р.Ф. Ганеев