АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-23693/2022

07 марта 2024 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев дело по исковому заявлению  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА  ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (295000, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ ГОРОД,  ТОЛСТОГО УЛИЦА, ДОМ 15, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 06.12.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНАЯ  КАЧЕСТВЕННАЯ МАГИСТРАЛЬ" (297534, РЕСПУБЛИКА КРЫМ,  СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, СТРОГОНОВКА СЕЛО, НУРЛУ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2020, ИНН: 

<

***>,  КПП: 910901001)  

при участии к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельные требований относительно предмета спора, арбитражного управляющего  ФИО2  

о взыскании денежных средств в отсутствие участников процесса 

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение департамент городского хозяйства  администрации города Симферополя Республики Крым (далее – истец, ДГХ  администрации Симферополя, Департамент) с исковым заявлением к обществу с  ограниченной ответственностью "Безопасная качественная магистраль" (далее – ответчик,  ООО «БК Магистраль, общество), в соответствии с которым истец просит взыскать с  ответчика в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному  контракту № 105-08 от 22.02.2022:  

- штраф в размере 566 104,50 руб.; - неустойку (пени) в размере 186 262,67 руб.; 

- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 104 597,40  руб.;  

- неосновательное обогащение в размере 3 396 624,00 руб. в виде возврата  авансового платежа по муниципальному контракту.  

Определением от 28.11.2022 суд (судья Радвановская Ю.А.) принял исковое  заявление к производству, возбудил производство по делу и назначил предварительное  судебное заседание на 26.01.2023.  

Определением от 26.01.2023 суд в порядке, предусмотренном статьей 137  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ),  перешел к судебному разбирательству и отложил судебное заседание по делу на  23.03.2023 в связи с необходимостью предоставления сторонами дополнительных  доказательств.  

Далее судебные заседания неоднократно откладывались. 

Определением от 25.09.2023 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  арбитражного управляющего ФИО2.  

02.11.2023 от истца поступило заявление о частичном отказе от исковых требований  в части взыскания пени в сумме 186 262,67 руб., а также процентов в сумме 104 597,40  руб.  

Определением от 21.11.2023 суд принял отказ истца от исковых требований в части  взыскания пени в сумме 186 262,67 руб., процентов в сумме 104 597,40 руб. и  производство по делу в данной части прекратил.  

Определением от 29.01.2024 произведена замена судьи Радвановской Ю.А. и дело  передано на рассмотрение судьи Можаровой М.Е.  

Определением от 02.02.2024 судебное заседание назначено на 07.03.2024. 

Представители сторон, а также третьего лица явку в судебное заседание не  обеспечили.  

В соответствии с ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле и иные участники  судебного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу  судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия, арбитражный  суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии  искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной  ему в порядке, установленном АПК РФ, или иными доказательствами получения лицами,  участвующими в деле, информации о начавшемся процессе.  

В пункте 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от  27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс  Российской Федерации» разъяснено, что извещение является надлежащим, если в  материалах дела имеются документы, подтверждающие направление арбитражным судом  лицу, участвующему в деле, копии первого судебного акта по делу в порядке,  установленном статьей 122 АПК РФ, и ее получение адресатом (уведомление о вручении,  расписка, иные документы согласно части 5 статьи 122 АПК РФ), либо иные  доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся  процессе (часть 1 статьи 123 АПК РФ), либо документы, подтверждающие соблюдение  одного или нескольких условий части 4 статьи 123 АПК РФ.  

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 АПК РФ, суд разместил  информацию о совершении процессуальных действий по делу на сервисе «Картотека  арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», а так же на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу:  http://crimea.arbitr.ru.  

Согласно части 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного  суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте  судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.  

Таким образом, суд определил возможным рассмотреть исковое заявление по  существу в судебном заседании при явке сторон.  

Истцом неоднократно заявлялось об уточнении исковых требований.  

Так, окончательно истец просит взыскать с ответчика штраф в сумме 566 104,00 руб.  и неосновательное обогащение в сумме 2 568 215,43 руб.  

Ответчиком заявлялось о признании исковых требований. 

Суд, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные  доказательства в совокупности, установил следующие обстоятельства.  

22.02.2022 на основании ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), постановления Совета  Министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка  осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и  муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Главы Республики Крым от  14.02.2022 № 105-рг «Об определении единственного подрядчика», между ДГХ  администрации Симферополя (Заказчик) и ООО «БК Магистраль» (Подрядчик) заключен  муниципальный контракт № 105-08 (далее - Контракт), в соответствии с которым  Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по благоустройству  территорий по объекту «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий  муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу:  

<

...>» (далее - объект) в соответствии с прилагаемыми Техническим  заданием (Приложение № 1 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение №  2 к Контракту) и Проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту) (далее  - работы), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а  Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке,  которые установлены Контрактом.  

Согласно п. 2.1 Контракта, цена Контракта составляет 11 322 080,00 руб., в том  числе НДС 20% - 1 887 013,00 руб. и включает в себя все расходы, связанные с  выполнением работ в соответствии с условиями Контракта.  

Авансовый платеж по Контракту составляет 3 396 624,00 руб. (пункт 2.4 Контракта).  

В соответствии с п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет:   Начало выполнения работ - с момента заключения Контракта;  

 Срок завершения работ на объекте: - строительно-монтажные работы - до 01.07.2022 года; - работы по озеленению территории - до 10.10.2022 года. 

Разделом 5 Контракта установлены права и обязанности сторон по Контракту. Так,  пунктом 5.1.11 Контракта предусмотрена обязанность Подрядчика немедленно  предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при  обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его  указаний о способе исполнения работ, либо иных, не зависящих от Подрядчика  обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ  либо создают невозможность их завершения в срок.  

В соответствии с п. 6.7 Контракта ненадлежащим исполнением обязательств по  Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо  не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент  выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон  считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.  

Ответственность сторон по Контракту установлена в разделе 8 Контракта. 

Ответственность за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, установлена пп. 8.6. Контракта  и составляет 5 (пять) процентов от цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта  (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).  

Согласно пункту 8.9. Контракта предусмотрено, что пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня  следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Право на односторонний отказ от исполнения Договора установлено пунктами 8.2,  12.7 Контракта.  

Платежным поручением от 25.03.2022 № 371233 Заказчиком в адрес Подрядчика  переведена сумма аванса в размере 3 396 624,00 руб.  

Вместе с тем, как следует из текста искового заявления, ответчик работы на объекте  исполнял с нарушением сроков выполнения работ.  

Письмом от 14.06.2022 исх. № 14/06-007 ответчик уведомлял истца о невозможности  выполнения работ ввиду плохих погодных условий.  

Вместе с тем, ООО «БК Магистраль» просило истца согласовать замену  оборудования для устройства системы видеонаблюдения на обусловленном контрактом  объекте, поскольку закупить предусмотренное технической и сметной документацией  контракта оборудование приобрести и установить е представлялось возможным (письмо  от 14.06.2022 исх. № 14/06-001).  

Так, претензией от 01.07.2022 Департамент потребовал от ООО «БК Магистраль»  закончить выполнение работ по Контракту.  

15.07.2022 за № 15/07-005 в адрес заказчика поступил ответ, однако требования  заказчика исполнены не были.  

В этой связи, 15.07.2022 Департаментом принято решение № 1371/03/01-10 об  одностороннем отказе от исполнения Контракта. Данное решение было направлено в  адрес Подрядчика 16.07.2022 (29500073654445, 29500073656166).  

Департаментом, как заказчиком, было организовано проведение экспертизы в целях  определения стоимости качественно выполненных ООО «БК Магистраль» работ по  Контракту до принятия Заказчиком одностороннего отказа от него.  

Согласно Заключению строительно-технической экспертизы ООО «ПРО- М- ЭКСПЕРТ» по объекту «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий  муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу:  

<

...>» стоимость фактически выполненных работ по объекту  благоустройства в соответствии со строительными нормами и правилами,  соответствующих условиям контракта и проекту составляет 828 408,57 руб.  

Ответчик, указывает, что поскольку стоимость фактически выполненных работ по  Контракту составляет 828 408,57 руб., ввиду чего возврату истцу подлежит сумма в  размере 2 568 215,43 руб. (аванс 3 396 624,00 руб. – 828 408,57 руб.). В этой связи,  ответчиком представлено заявление о признании иска на сумму неосновательного  обогащения в размере 2 568 215,43 руб. и сумму штрафа в размере 566 104,00 руб.  

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, участвующих  в деле, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих  начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и  обязанности.  

Спорные правоотношения сторон возникли в рамках исполнения контракта,  соответствующего признакам муниципального контракта на выполнение подрядных работ  для муниципальных нужд, правовое регулирование которого предусмотрено главой 37 ГК  РФ и Законом № 44-ФЗ.  

В соответствии с положениями статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную  работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

В силу положений статье 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на  строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома),  сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и  иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре  строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и  сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

Согласно статье 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с  согласия заказчика досрочно.  

Аналогичные по сути положения содержатся в статье 746 ГК РФ. 

Согласно статье 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно  соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий  договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если  иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат  выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами,  указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в  пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования,  а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования  результата работы такого рода.  

Пунктом 2 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что заказчик организует и  осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено  договором строительного подряда.  

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его  заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В соответствии со  статьей 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и  изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения  государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного  или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или  муниципальных нужд.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных  работ является сдача результата работ заказчику (Информационное письмо Президиума  ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору  строительного подряда").  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и перед муниципальный  заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В  соответствии со статьей 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

Как следует из положений статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим  Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на  односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть  осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от  договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного  уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами,  иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора  (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор  считается расторгнутым или измененным.  

Как указано в статье 715 ГК РФ, заказчик вправе во всякое время проверять ход и  качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если  подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет  работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,  заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена  надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для  устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого  требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому  лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.  

Договор изменяется или прекращается с момента, когда данное уведомление  доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ, если иное не  предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или условиями  сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях  сторон.  

Как уже указывалось судом выше, в силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления,  уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с  которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого  лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего  сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех  случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по  обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с  ним.  

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства  сторон прекращаются.  

Так, судом установлено, что Департаментом принято решение об одностороннем  отказе от исполнения Контракта. Указанный односторонний отказ Обществом не оспорен  и вступил в законную силу.  

Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное  удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его  предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (п. 1  информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с  применением норм о неосновательном обогащении», пункт 5 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях  расторжения договора»).  

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом,  иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего  Кодекса.  

Из-за нарушения ответчиком условий договора истец отказался от договора в  одностороннем порядке.  

Также как уже указывалось судом выше, Департаментом на счет Подрядчика был  перечислен аванс в сумме 3 396 624,00 руб. Указанные обстоятельства ответчиком не  оспариваются.  

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ неосновательное обогащение можно  констатировать, если у лица отсутствуют основания (юридические факты), дающие ему  право на получение имущества (договоры, сделки, иные предусмотренные ст. 8 ГК РФ  основания возникновения гражданских прав и обязанностей).  

Соответствующая позиция подтверждена, в том числе Определением Судебной  коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.12.2018 № 5-КГ18-260,  Определением Верховного Суда РФ от 22.12.2015 по делу № 306-ЭС15-12164, А555313/2014, Постановлениями Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11524/12 по делу №  А51-15943/2011, от 03.07.2001 № 9261/00 по делу № А32-5399/2000-4/177.  

По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается  обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на  ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или  сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное  обогащение в силу закона не подлежит возврату (пункт 7 Обзора судебной практики  Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утвержденного Президиумом  Верховного Суда РФ 17.07.2019).  

Оценивая, представленные сторонами доказательства, суд отмечает, что как указано  в статье 64 АПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном  настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на  основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие  обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а  также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.  

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства,  объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов,  показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.  

В соответствии с положениями статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в  деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия  государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами,  должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий  (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.  Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются  арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в  соответствии с подлежащими применению нормами материального права.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 статьи 9 АПК РФ).  

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (статья 66 АПК РФ).  

Как следует из положений частей 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд  оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на  всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле  

доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь  доказательств в их совокупности.  

 Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его  проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют  действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с  другими доказательствами (части 3, 4 статьи 71 АПК РФ).  

В качестве доказательств объема выполненных Подрядчиком работ до принятия  решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Департаментом было  организовано проведение экспертизы. Экспертиза была проведена экспертом Общества с  ограниченной ответственностью «Про-М-Эксперт» ФИО3.  

Так, перед экспертом были поставлены следующие вопросы:  

1. Определить фактический объем и стоимость работ выполненных в рамках  муниципального контракта по объекту: «Выполнение работ по благоустройству  (Капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской  округ Симферополь, Республики Крым».  

2. Определить соответствуют ли работы, выполненные в рамках муниципального  контракта по объекту: «Выполнение работ по благоустройству (Капитальный  ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ  Симферополь, Республики Крым» условиям контракта и проекту.  

3. Определить объем и стоимость работ выполненных в рамках муниципального  контракта по объекту: «Выполнение работ по благоустройству (Капитальный  ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ  Симферополь, Республики Крым» с нарушениями строительных норм и правил,  несоответствующих условиям контракта и проекту.  

Осмотр объекта исследования «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых  территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных  по адресу: 

<

...> проведен 03.09.2022.  

Как следует из текста экспертного заключения, для проведения экспертизы  предоставлены сметная документация по объекту «Благоустройство (капитальный  ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ  Симферополь, расположенных по адресу: 

<

...>» , акты о приемке  выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 1 650 820,17 руб. (348 035,00 + 1 291  062,00 + 11 723,17) с учетом НДС, в том числе:  

- Акт о приемке выполненных работ № 02-01-01.1 от 20.05.2022 на сумму 348 035,00  руб.;  

- Акт о приемке выполненных работ № 02-02-02.1 от 20.05.2022 на сумму 443 524,00  1 291 062,00 руб.;  

- Акт о приемке выполненных работ № 3 от 20.05.2022 на сумму 11 723,17 руб.; 

Как следует из текста экспертного заключения, стоимость фактически выполненных  строительно-монтажных работ определена на основании сметных расчетов, составленных  в программном комплексе «ГРАНД-Смета 2020». Стоимость строительно-монтажных  работ фактически выполненных на объекте капитального ремонта составляет: 828 408,57  руб. с учетом НДС (348 035,00 + 1 291 062,00 + 11 723,17), согласно сметным расчетам:  

- 348 035,00 руб. – стоимость работ по демонтажу поребриков и бордюров, согласно  акту;  

- 11 723,17 руб. – стоимость работ по размещению отходов;  

- 468 650,40 руб. – стоимость работ по демонтажу бетонных площадок, бетонных  плит, асфальтобетонного покрытия, установке железобетонных опор освещения.  

Так, эксперт пришел к следующим выводам: 

По первому вопросу: 

На основании проведенного исследования результатов работ, выполненных в рамках  муниципального контракта № 105-08 от 22.02.2022 на объекте: «Благоустройство  (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской  округ Симферополь, расположенных по адресу: 

<

...>»  определено, что фактически частично выполнены работы, предусмотренные проектно-сметной документацией:  

Виды и объемы фактически выполненных строительно-монтажных работ на объекте  капитального ремонта по демонтажу бетонных площадок, демонтажу бетонных плит,  демонтажу асфальтобетонного покрытия, установке железобетонных опор освещения  приведены в приложении № 1 (см. столбцы 3, 4, 7), стоимость данных работ составляет  468 650,40 рублей.  

- В ходе проведенных расчетов и визуально-инструментального осмотра  установлено, что стоимость, а также виды и объемы работ по демонтажу поребриков и  бордюров, соответствует предоставленному акту приемки по форме КС-2, подписанному  в одностороннем порядке подрядчиком, и составляет 348 035,00 руб.;  

- В ходе проведенных расчетов и визуально-инструментального осмотра  установлено, что стоимость работ, а также виды и объемы работ по размещению отходов,  соответствует предоставленному акту приемки по форме КС-2, подписанному в  одностороннем порядке подрядчиком, и составляет 11 723,17 рублей.  

 Общая стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ на  объекте капитального ремонта с учетом НДС составляет 828 408,57 руб. (468 650,40 + 348  035,00 + 11 723,17).  

Данные виды и объемы работ общей стоимостью 828 408,57 руб. соответствует  условиям контракта и проекту.  

По второму вопросу: 

Виды и объемы работ, выполненных в рамках муниципального контракта № 8 от  22.02.2022 на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий  муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу:  

<

...>», частично не соответствуют условиям контракта, в том  числе: пункту 1.1, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  обязательства выполнения работ в соответствии с прилагаемой проектно-сметной  документацией (определены виды и объемы, предусмотренные проектно-сметной  документацией, но фактически не выполненные).  

По третьему вопросу: 

По результатам экспертного осмотра определены следующие объемы работ,  выполненные с нарушениями строительных норм и правил:  

1) Установка бордюров и поребриков (в соответствии с протоколами испытаний,  проведенными в ходе визуально - инструментального осмотра, прочность на сжатие для  бетонных бордюров составляет 15 МПА вместо 30, что не соответствует строительным  нормам и правилам)  

Стоимость работ с нарушениями строительных норм и правил, несоответствующих  условиям контракта и проекту составляет 1 291 062,00 руб. (Акт о приемке выполненных  работ № 02-02-02.1 от 20.05.2022 на сумму 1 291 062,00 руб.).  

В отзыве на иск ответчик указал, что признает задолженность в сумме 2 568 215,43  руб.  

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования  истца в части взыскания неосновательного обогащения в размере 2 568 215,43 руб.  подлежат удовлетворению.  

Также Департамент просит взыскать с общества штраф за ненадлежащее исполнение  

обязательств по Контракту.  

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты  нарушенного гражданского права.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться в том числе неустойкой.  

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что  на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при  просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность  должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер  которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически  начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).  

Согласно части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное  условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

В части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что штрафы начисляются за  неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного  обязательства), предусмотренных контрактом.  

Ответственность за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, установлена пп. 8.6. Контракта  и составляет 5 (пять) процентов от цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта  (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).  

Так, размер штрафа за неисполнение обязательств Подрядчиком составляет 566  104,00 руб.  

Размер штрафа, установленный контрактом и заявленный истцом ко взысканию,  соответствует порядку определения размера неустойки (штрафа, пени), установленному  Правительством Российской Федерации Постановлением от 30.08.2017 г. N 1042.  

Учитывая, что материалами дела подтверждается нарушение ответчиком  обязательств по контракту, что повлекло за собой односторонний отказ от исполнения  Контракта, заявленные последствия неисполнения обязательств в виде взыскания  неустойки являются правомерными.  

Принимая решение относительно взыскания штрафа, суд также учитывает  следующие обстоятельства.  

В отзыве на иск ответчик указал, что признает задолженность в сумме 566 104,00  руб.  

Согласно части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в  арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.  

Как указано в ч. 5 ст. 49 АПК РФ, арбитражный суд не принимает отказ истца от  иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не  утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает  права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.  

Вместе с тем, препятствий для принятия признания иска не установлено. В связи с  чем, суд принимает признание иска ответчиком.  

На основании абзаца 3 части 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска  ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание  иска ответчиком и принятие его судом.  

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению в полном  объеме.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные  расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру  удовлетворенных исковых требований.  

Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был  освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально  размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты  государственной пошлины.  

Истец, являясь органом местного самоуправления, в силу положений ст. 333.21  Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты государственной пошлины.  

Как следует из положений пункта 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении  издержек, связанных с рассмотрением дела» в случае изменения размера исковых  требований после возбуждения производства по делу при пропорциональном  распределении судебных издержек следует исходить из размера требований,  поддерживаемых истцом на момент принятия решения по делу.  

Так, истец на дату вынесения настоящего решения настаивает на взыскании  денежных средств в общей сумме 3 134 319,43 руб. (2 568 215,43 + 566 104,00).  

Размер государственной пошлины при такой сумме иска должен составлять 38  672,00 руб.  

В соответствии с абзацем 1 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса  РФ при признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения  примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу  подлежит 70% суммы уплаченной им государственной пошлины.  

Как уже говорилось выше, ответчиком заявлено о признании исковых требований в  размере 3 134 319,43 руб., которое принято судом.  

Соответственно с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию  государственная пошлина в сумме 11 601,60 руб. (38 672,00 * 30%).  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Принять признание ответчиком суммы требований в размере 3 134 319,43 руб. 

2. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Безопасная  качественная магистраль" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  муниципального казенного учреждения департамента городского хозяйства  администрации города Симферополя Республики Крым (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 2 568 215,4 руб., а также штраф в  сумме 566 104,00 руб.  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Безопасная  качественная магистраль" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 11 601,60 руб.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  

суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда  апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья М.Е. Можарова