РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

по делу А33-4184/2025 Красноярск 

26 июня 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить в течение 60 дней со дня вступления в законную силу решения суда, учитывая время года (работы выполнить в теплый период – с мая по октябрь) выполнить комплекс работ по ремонту крыши дома по адресу: 

<

...>, произвести работы по замене разрушенного мастичного покрытия крыши на гидроизоляционное покрытие из наплавляемого материала, а именно:  

 № п/п 

Наименование работ 

Количество 

1. Демонтажные работы 

1.1. 

Расчистка поверхностей от старого мастичного покрытия 

1724,64 м2 

2. Строительно-монтажные работы 

2.1. 

Ремонт продольных ребер 

160 м2 

3. Покрытие кровли 

3.1. 

Железнение цементных покрытий раствором 

1446 м2 

3.2. 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под  

1446 м2 

водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  

«Технониколь» 

3.3. 

Устройство кровли в один слой Унифлекс, ТКП  

1446 м2 

3.4. 

Восстановление разрушенных концов плит покрытийс 

121 м2 

армированием и устройством опалубки 

3.5. 

Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов в 

265 м2 

один слой для усиления плит покрытия (заделка межпанельных  

швов плит, ложные люки) 

4. Ремонт вентшахт 

4.1. 

Ремонт штукатурки вентшахт 

12 м2 

4.2. 

Покрытие поверхностей вентшахт грунтовкой 

12 м2 

4.3. 

Окраска вентшахт поливинилацетатными  

12 м2 

водоэмульсионными составами 

4.4 

Устройство примыкания к вентшахтам из наплавляемого материала  

12 м2 

5.  

Устройство примыканий к парапету 

5.1. 

Огрунтовка оснований по торцам здания готовой эмульсией  

16,8 м2 

5.2. 

бУисттурмойнсотйв о примыканий кровель из наплавляемых материалов к  

34 м. п. 

стенам и парапетам высотой: до 600мм без фартуков  

5.3. 

Устройство мелких покрытий (рейка прижимная алюминиевая)  

0,0033 м2 

6. Устройство примыканий к вентблокам, мусоропроводам, люкам  

6.1. 

Огрунтовка оснований готовой эмульсией битумной  

37,9 м2 

6.2. 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  

67,2 м. п. 

стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  

6.3. 

Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов в  

11,98м2 

один слой для усиления примыкания к мусоропроводам, люкам  

6.4. 

Устройство мелких покрытий (рейка прижимная алюминиевая)  

0,0063 м2 

7. Ремонт лотка 

7.2. 

Огрунтовка оснований готовой эмульсией битумной  

209,04 м2 

7.3. 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два  

129,6 м2 

слоя 

7.4. 

Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов в  

10,24 м2 

один слой для усиления лотков у воронок 

7.5. 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  

288 м. п. 

стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  

7.6. 

Устройство мелких покрытий (рейка прижимная алюминиевая)  

0,0276 м2 

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на  

территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Вера» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 50 000руб. судебных расходов по государственной пошлине.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.А. Коженков