АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-38498/22

г. Уфа

09 сентября 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хазиахметовой  З.Р., при ведении протокола секретарем судебного заседания Рияновой Л.З.,  рассмотрев исковое заявление Муниципального бюджетного учреждения  "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА КИОКУСИНКАЙ" городского округа город Уфа  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее - школа)  к обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее - общество) об обязании безвозмездно  устранить недостатки выполненных работ отраженные в акте от 05.08.2022 в  течение 30 дней с момента вынесения решения с последующим начислением  неустойки 500 руб. за каждый день просрочки.  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  

"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30  

календарных дней с даты вступления в силу решения суда в рамках исполнения  гарантийных обязательств по контракту от 18.08.2021 N 0301300247621000714  устранить недостатки выполненных работ, а именно:  

 № 

Наименование дефекта  

Описание работ 

Площадь  

примечание  

кв.м.  

1 

Цоколь фасада здания имеет  

Наружняя облицовка по бетонной  

19,5 

дефекты, отклонение от сметы  

поверхности из камня; чистка и заделка  

Выборочный  

швов 

ремонт по  

фасаду пом.46  

2 

Краска фасада имеет трещины,  

Ремонт штукатурки фасадной - демонтаж  

846,0  

Полностью,  

деформации, вздутие, местами  

согласно  

облазит. 

ЛСР 

Штукатурка влагостойкая и 

морозостойкая weber stuk cement  

Окраска красками по подготовленной  

поверхности фасадов за 2 раза с земли и  

лесов 

3 

Изменена конструкция пандуса,  

Демонтаж и монтаж в соответствии с СП 

 10,5  

Входная  

не соответствует ГОСТ,  

59.13330.2020. Свод правил. Доступность 

группа  

отсутствует часть перил  

зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. СНиП 35-01-2001 и 

ГОСТ Р 51261-2017 

4 

Дверные замки у входной и  

Замена 

2 шт.  

запасных выходов не  

соответствуют пожарным  

требованиям 

5 

Установлены сломанные замки в  

Замена 

4 шт. 

Пом.56,65,  

туалетах 

59,60 

6 

Дверь в туалет установлена с  

Демонтаж, монтаж 2-ух дверей ПВХ  

2 шт. 

Помещение  

дефектом, пустоты в полотне,  

согласно ЛСР 

59,60 

замазки шпаклевкой, дверная  

коробка не закреплена  

7 

Зачистка, промазка швов, шпатлевка, в/э  

95,5 

Помещение  

Потолок имеет пустоты, вздулся,  

окраска согласно ЛСР 

50,63,47  

имеет трещины, расслоение  

8 

Протечка труб отопления после  

Ремонт трубы ГВС из напорных стальных 

 выборочно 

монтажа в спортивном зале  

труб наружным диаметром 108 мм,  

Точечная  

стенка 4 мм. 

сварка в местах 

протечки  

Пом.63  

9 

Некачественный монтаж пола:  

Выборочный ремонт паркетной доски  

66,5 

Пом.63  

паркетная доска не закреплена,  

путем демонтажа и нового монтажа,  

зазоры между досками, лак  

стяжки доски, крепления, под покраску  

частично сошел, образование  

лаком 

плесени и грибка 

10 

Трубы канализационные в  

требуется монтаж подвесов для труб  

6 шт. 

Пом.7  

подвале не закреплены, имеют  

провисание 

11 

Монтаж ГВС и ХВС выполнен с  

Демонтаж, монтаж труб ГВС ХВС  

58 м. 

Пом.7  

отклонением от проектной  

согласной ЛСР 

документации 

12 

Расслоение и осыпание потолка  

87,7 

Пом.7  

Зачистка, промазка швов, шпатлевка, в/э  

окраска согласно ЛСР, (с применением  

хлорсодержащих средств) 

13 

Отсутствую вентиляционные  

Монтаж вент.решеток по ЛСР  

6шт 

Пом.63,47,62  

решетки 

14 

В «тренерской» при демонтаже  

Устранить 

2,5 

Пом.73  

труб не нанесли шпаклевку, нет  

покраски, брак линолеума  

15 

Монтаж тротуарной плитки с  

63,0 

Вход в пом.85  

дефектом на крыльце входа  

Ремонт ступеней бетонных; устройство  

стяжки, устройство бетонных плит (плита 

фигурная тротуарная) согласно ЛСР  

16 

3 шт 

Монтаж отливов на подоконник  

17 

Отсутствует вывод трубы  

Монтаж труб канализационных  

1,5 м. 

ливневой канализации  

18 

Стеновая керамическая плитка в  

Полностью демонтаж и монтаж новой  

69,0 

душевые  

душевых имеет пустоты, сколы,  

керамической плитки на основе клея  

отваливается, неравномерность  

межплиточного шва  

19 

Уборка и вывоз мусора с  

До 1 т. 

территории 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Муниципального бюджетного учреждения "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  КИОКУСИНКАЙ" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 15 000 рублей за  неисполнение решения суда в течение 30 календарных дней с даты вступления в  

силу решения суда, с последующим взысканием 500 рублей за каждый день  неисполнения судебного акта, 105 000 руб. расходов за проведение экспертизы, 6  000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Р. Хазиахметова