Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А59-4529/2023

18 сентября 2023 года

город Южно-Сахалинск

Резолютивная часть решения объявлена 15.09.2023.

Полный текст решения изготовлен 18.09.2023.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 694240, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью  «МонтажЭлектроСпецСервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 693012, 

<

...>)  о взыскании 1 240 430 рулей задолженности по договору субподряда № 0254-2019/95 от 25.03.2019 года и 152 021 рублей неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «МонтажЭлектроСпецСервис» о взыскании 1 240 430 рулей задолженности по договору субподряда № 0254-2019/95 от 25.03.2019 года и 152 021 рублей неустойки.

В обосновании иска указано на неисполнение договорных обязательств в части оплаты выполненных работ.

14 июля 2023 года судом вынесено определение о принятии искового заявления к производству, назначено предварительное судебное заседание.

15 августа 2023 года вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству на 12.09.2023.

12 сентября 2023 года, в порядке ст. 163 АПК РФ, объявлен перерыв в судебном заседании до 15.09.2023.

Представитель истца требования поддержала в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ходатайств не заявил.

Суд, руководствуясь ст. 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело без участия неявившегося ответчика.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд удовлетворяет иск исходя из следующего.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, 25 марта 2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» (далее – истец, субподрядчик, ООО «Авангард») и обществом с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектроСпецСервис» (далее – ответчик, подрядчик, ООО МЭСС») заключен договор субподряда № 0254-2019/95, согласно которому субподрядчик обязуется выполнить по заданию подрядчика работы:

- реконструкция ВЛ-10кВ 32Л-з3-10 (инв.31162) с заменой А-обр. деревянной опоры № 362 на А-обр. с подкосом ответвительную деревянную на ж/б приставках опору; 

- строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах с ж/б приставками проводом СИПЗ 1*70 от опоры № 362 ВЛ-10кВ 23Л-з3-10 (инв.31162) до проектируемой СТП-10/0.4кВ. В точке подключения отпайки установить комутациопиый аппарат -Реклоузер в комплекте с разъединителем;

- Строительство СТП-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-25кВЛ с монтажом оборудования па ж/б стойке;

- Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП4 4*50 от проектируемой СТП-10/0,4кВ до границ объекта;

в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4), а Подрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену (п. 1.1).

Настоящий договор заключен для выполнения работ в рамках Договора Подряда № САХ-19/0254 от 25.03.2019 г., заключенного между Подрядчиком и ПАО  «Сахалинэнерго» (п. 1.4).

В соответствии с п. 2.1 ориентировочная стоимость работ на момент его заключения в соответствии с Укрупненным сметным расчетом (приложение № 1) составляет сумму в размере 3 233 575 рублей, в том числе:

-Реконструкция ВЛ-10В 23Л-зЗ-10(инв.31162) с заменой А-обр деревянной опоры №362 на Л-обр с подкосом ответвительную  деревянную на ж/б приставках опору - 64080,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением УСНО;

- Строительство ВЛ-10кВ на деревянных опорах с ж/б приставками проводом СИНЗ 1*70 от опоры №362 ВЛ-10кВ 23Л-зЗ-10 (ипв.31162) до проектируемой СТП-10/0,4кВ. В точке подключения отпайки установить комутационный аппарат -Реклоузер в комплекте с разъединителем - 2 850 757,00 руб. (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением УСНО;

-Строительство СТП-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-25кВА с монтажом оборудования на ж/б стойке - 148157,00 руб. (Сто сорок восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублен 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением УСНО;

-Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП4 4*50 от проектируемой СТП-10/0,4кВ до границ объекта - 170581,00 руб. (Сто семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят один) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением УСНО;

Окончательная стоимость настоящего Договора, будет определена в соответствии с подписанными сторонами справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), но не превышающей указанной стоимости договора, и является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п. 1.1. и н.1.2 настоящего Договора.

Срок выполнения работ: начало - 01 марта 2019 года, окончание - 29 марта 2019 года (п. 4.1).

Подрядчик в течение 60 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, производит оплату в размере 97 % от стоимости выполненных работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету, выставленному Субподрядчиком Подрядчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным (п. 5.1).

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По правилам статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьями 702, 740 Гражданского кодекса РФ, договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

При этом в силу требований ст.706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Согласно требованиям статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

В соответствии со статьей 709 ГК РФ, в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

В силу п.1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 746 ГК РФ положения статьи 711 ГК РФ конкретизированы и определено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Как установлено судом, работы истцом сданы ответчику на сумму 3 040 430 рублей согласно актам КС-2 от 15.10.2019 №№ 1, 2, 3, 4 и актом КС-3 от 15.10.2019 № 1, подписанные обеими сторонами.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 1 800 000 рублей, платежными поручениями №№ 1080, 410 от 31.12.2019 и 22.07.2020.

Поскольку, сумма в размере 1 240 430 рублей ответчиком не оплачена, истец направил 11 мая 2023 претензию об уплате образовавшейся задолженности в течение десяти дней со дня получения данной претензии.

Ответчик на претензию ответ не предоставил, задолженность в сумме 1 240 430 рублей не погасил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Как следует из вышеприведенного договора, в разделе 5 определен следующий порядок оплаты выполненных работ: 

Подрядчик в течение 60 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, производит оплату в размере 97 % от стоимости выполненных работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету, выставленному Субподрядчиком Подрядчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным (п.5.1).

Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по договору на сумму не менее 10 % от цены договора/объекта, срок действия которой истекает не ранее 70 календарных дней с даты подписания сторонами акта КС-11 по соответствующему объекту. В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения сторон об ином Общество вправе удерживать 10% от цены договора/объекта при выплате каждого платежа, причитающегося поставщику (субподрядчику) за поставленный товар выполненные работы/оказанные услуги, предоставленные исключительные (неисключительные) права в качестве гарантийного удержания до истечения 70 календарных дней с даты подписания сторонами акта КС-11 по соответствующему объекту. В этом случае в счетах на оплату поставщика (субподрядчика) должна быть отдельно выделена сумма гарантийного удержания. Указанная банковская гарантия должна быть предоставлена Обществу (покупателю, подрядчику) не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты выплаты первого авансового платежа по договору или, в случае отсутствия авансов, не позднее 3 рабочих дней до даты первого платежа по договору (п.5.2).

Субподрядчик обязан представить подрядчику счет, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения субподрядчиком данного требования он обязан произвести замену счета в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования подрядчика (п.5.3).

Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ (п.5.4).

В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен субподрядчиком независимо от его фактического вручения Подрядчику. В случае выставления субподрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Подрядчиком (п.5.5).

Оставшиеся 3 % в качестве обеспечения гарантийных обязательств Субподрядчика, подлежат выплате Подрядчику в качестве компенсации за любые убытки, которые Подрядчик понесет вследствие неполного или некачественного выполнения Субподрядчиком своих обязательств в течение гарантийного срока (п.5.7).

В случае отсутствия дефектов в течение гарантийного срока, повлекших за собой убытки у Подрядчика, обеспечение гарантийных обязательств возвращается Субподрядчику не позднее 30 дней после окончания гарантийного срока (п.5.8).

Закрытие выполненных работ производится согласно локальным сметным расчетам составленным по федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 в редакции Минстроя России 2014 г, с перерасчетом в текущий уровень цен по ежеквартальному региональному сборнику цен в ценах 1 кв. 2018 г. (п.5.10).

Таким образом, из условий договора следует, что после сдачи выполненных работ заказчик обязан произвести оплату в размере 97% от стоимости выполненных работ в течение 60 календарных дней.

С учетом данных условий договора, истцом произведен расчет стоимости неоплаченного объема выполненных им и принятых подрядчиком работ, задолженность ответчика составила 1 240 430 рублей.

Ответчик с требованиям истца не согласен, полагает, что истцом пропущен срок исковой давности, поскольку согласно п. 5.1 договора подрядчик производит оплату в течении 60 календарных дней  с даты подписания акта выполненных работ (акт подписан 15.10.2019) и с учетом данного пункта срок предъявления требований истек в 2022 году.

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 196 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 199 ГК РФ определено, что истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Вопреки заявлению ответчика, положениями статьи 203 ГК РФ предусмотрено, что течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга; после перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Данный довод ответчика не принимается судом, поскольку работы оплачены частично 31.12.2019 и 22.07.2020, в этой связи срок исковой давности следует исчислять с даты последней оплаты долга, то есть с 22.07.2020, в связи с чем срок исковой давности на момент подачи иска (13.07.2023) истом не пропущен.

При отсутствии сведений о наличии у сторон иных отношений, в рамках которых могла быть произведена указанная оплата, а также с учетом отсутствия в договоре сторон условий об авансировании работ, принимая во внимание, что платежи совершены ответчиком после сдачи результата работ, суд приходит к выводу о том, что оплата по указанным платежным поручениям, при отсутствии иных обязательств ответчика перед истцом, является оплатой по спорному договору, о чем указано в платежных поручениях, и представляет собой оплату выполненных работ, поэтому отсутствие в платежных поручениях указаний на КС-акт выполненных работ не свидетельствует о том, что оплата произведена за иные работы.

Указанная оплата свидетельствует о признании ответчиком долга.

Истом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 152 021 рубля за период с 17.12.2019 по 17.12.2019 по 07.07.2023.

Разделом 12 договора субподряда стороны определили ответственность за нарушение обязательств.

Согласно пункту 12.4 данных договоров, стороны установили, что в случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты результатов выполненных работ Субподрядчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,2 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.

Истцом произведен расчет неустойки за нарушение срока оплаты выполненных работ, согласно которому неустойка исчислена истцом за период с 17.12.2019 по 07.07.2023 в размере 152 021 рубль с учетом 5%-ного  ограничения.

Ответчиком, в случае удовлетворения иска, заявлено применение положения ст. 333 ГК РФ, поскольку полагает, что сумма неустойки чрезмерная.

Суд отказывает ответчику в применении к неустойке положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, не усмотрев оснований для ее уменьшения, поскольку истцом применено максимальное значение пени - 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.

Представленный уточненный расчет истца судом проверен и с учетом п. 12.4 договора признан верным.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 152 021 рубля по состоянию на 07.07.2023 года.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию понесенные судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 26 925 рублей.

В соответствии со ст. 177 АПК РФ в редакции, действующей с 19.06.2020, решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

В случае, если решение выполнено только на бумажном носителе, арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает им под расписку.

Настоящее решение изготовлено в форме электронного документа, стороны о возбуждении производства по настоящему делу уведомлены, информация о движении дела размещена на сайте суда, в связи с чем настоящее решение суда подлежит размещению на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия и направлению сторонам не подлежит.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «МонтажЭлектроСпецСервис» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Авангард»:

1 240 430 рулей задолженности по договору субподряда № 0254-2019/95 от 25.03.2019 года, 

152 021 рублей неустойки, начисленной за просрочку оплаты по состоянию на 07.07.2023 года,

26 925 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины, 

а всего 1 419 376 (один миллион четыреста девятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Решение сторонам не направлять.

Судья

О.А. Портнова