АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952) 24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

Дополнительное здание суда по адресу: 

 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А; тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

Е-mail: info@irkutsk.arbitr.ru; http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-19984/2019  

«17» сентября 2019 года Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Липатовой Ю.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БРАТСКА (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу:  Иркутская обл., жр Центральный, 

<

...>) к ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙКОМИНВЕСТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: Иркутская обл., Падун,  

<

...>/1, оф. 24)  

об обязании устранить недостатки, 

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙКОМИНВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрированное по  адресу: Иркутская обл., Падун, г. Братск) в срок до 01.12.2019 в рамках выполнения  гарантийных обязательств по муниципальным контрактам № Ф.2016.167706,   № Ф.2016.167584 и № Ф.2016.167573 от 18.07.2016 устранить недостатки и дефекты  результата работ на объекте, расположенного по адресу: Иркутская область г.Братск, ж.р.  Энергетик, ул. Гиндина, д.30, а именно:  

1 

Квартира № 1  

Заменить лопнувший стеклопакет на кухне. 

 2 

Квартира № 5  

Устранить промерзание стен в большой комнате.  

3 

Отрегулировать примыкание створок стеклопакетов во всей  

Квартира № 7  

квартире.  

4 

Отрегулировать механизм работы межкомнатной кухонной  двери.   

Заменить стеклопакеты кухонного и балконного окна,  испорченные следами сварки.   

Квартира № 9  

Заменить раму нижней форточки балконного окна в большой комнате. 

Осуществить заделку трещин в ванной комнате на стенах с  последующей покраской стен.   

Устранить дыры под подоконником в большой комнате трещины.  

5 

Отремонтировать либо заменить ободранные межкомнатные  

Квартира № 18  

двери во всей квартире. 

6 

Квартира № 26  

Отрегулировать оконный механизм во всей квартире и  утеплить окнные проемы.   

Устранить на балконе в большой комнате трещину на полу.   

Заменить лопнувший сливной бачок в санузле. 

Заменить взудый линолеум после затопления во всей 

квартире, кроме детской комнаты. 

7 

Заменить в кухне на радиаторе не работающий регулятор  

Квартира № 38  

температуры. 

8 

Отрегулировать механизм межкомнатных дверей во всей  

Квартира № 46  

9 

Устранить отсутствие штукатурно-побелочного слоя туалете  

за фановой трубой дыра в потолке путем его нового  

нанесения. 

Квартира № 60  

Заменить в комнатах во всей квартире стекла со следами от 

сварки и поцарапанные оконные откосы. 

Провести работы по заделке балконного порога большой 

комнаты в бетоне. 

10  

Квартира № 61  

Устранить промерзание окон во всей квартире.  

11  

Квартира № 63  

Заменить испорченные после работы прибором «Болгаркой»  стеклопакеты в квартире.  

Заменить ванну в санузле. 

12  

Заменить поцарапанные стекла в стеклопакетах во всей  

квартире. 

Квартира № 65  

Устранить трещины верхнего слоя балконной плиты.  

Произвести демонтаж отслоившегося слоя краски и  произвести покраску стен в ванной комнате.  

13  

Квартира № 66  

Устранить промерзание окон во всей квартире.  

14  

Квартира № 75  

Заменить лопнувший унитаз в санузле. 

15  

Квартира № 80  

Заменить лопнувший сливной бачок в санузле.  

16  

Квартира № 84  

Заменить лопнувший сливной бачок в санузле.  

17  

Заменить оконные стекла балкона и зала со следами от  

прибора «Болгарка». 

Квартира № 85  

Осуществить ремонт потолка в ванной комнате вокруг  канализационного стояка.  

19  

Отделка 

Осуществить отделку стен керамической плиткой,  предусмотренных проектной документацией, вместо  

окрашенных краской. 

20  

Подъезд 

Устранить неисправность освещения мест общего  пользования на 3-м этаже. Перевесить почтовые ящики  

расположенные высоко, ниже с учетом их доступности для 

использования жильцами. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙКОМИНВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрированное по  адресу: Иркутская обл., Падун, г. Братск) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.  

 Судья Ю.В. Липатова