Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-263533/20-1-1251

г. Москва

07 июня 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2021 года

Полный текст решения изготовлен 07 июня 2021 года

Арбитражный суд в составе судьи Коноваловой Е.В., 

при ведении протокола помощником ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСКОСМОС"(129110, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, 2, ОГРН: 

<

***>) к  АО "ФНПЦ"НИИ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ" (141313, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании штрафа в размере 1 434 962 руб. по договору №417-Д367/17/149 от 04.08.2017

при участии представителей от истца – ФИО2 по дов. от 29.12.20, от ответчика – ФИО3 по дов. от 19.02.21

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании штрафа в размере 1 434 962 руб. по договору №417-Д367/17/149 от 04.08.2017. Требования основаны на том, что ответчиком нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию, в связи с чем истец начислил штраф по условиям пункта 5.6 договора. 

В судебном заседании истец требования поддержал. Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по изложенным в отзыве мотивам, указывая на отсутствие нарушения, за которое истец требует взыскания штрафа.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения сторон, суд приходи к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор № 417-Д367/17/149, согласно которому Российская Федерация в лице Госкорпорации «Роскосмос» предоставляет Застройщику бюджетные инвестиции на условиях, установленных Договором (на строительство объекта ЗК 30, п.3.1 договора), путем перечисления денежных средств в сумме бюджетных инвестиций на открытый Застройщику лицевой счет. Застройщик в счет указанных денежных средств передает в собственность Российской Федерации в лице Росимущества 26 512 штук акций Застройщика, которые Российская Федерация в лице Росимущества принимает.

В соответствии с подпунктом 4.1.2 Договора Госкорпорация «Роскосмос» после подписания Договора в течение 20 рабочих дней обязуется перечислить бюджетные инвестиции в размере, установленном пунктом 2.3 Договора, на лицевой счет Застройщика. Пунктом 2.3 Договора определена общая сумма сделки по Договору, которая составляет 57 398 480  рублей. Во исполнение подпункта 4.1.2 Договора платежным поручением от 18.08.2017 № 193398 бюджетные инвестиции в размере, установленном пунктом 2.3. Договора, перечислены Госкорпорацией «Роскосмос» на лицевой счет АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» в полном объеме.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора бюджетные инвестиции предоставляются Застройщику на осуществление работ по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий ЗЛ-98.1.00.ООО и ЗД-30.16.00.000 для комплекса «ЗК-30», предельная стоимость, мощность и срок ввода в эксплуатацию которого приведены в титульном списке вновь начинаемого или переходящего объекта капитального строительства.

Согласно условиям Договора, Застройщик обязуется обеспечить осуществление работ по Объекту в объеме, предусмотренном Титульным списком и планом-графиком выполнения работ по Объекту капитального строительства (подпункт 4.3.6 Договора), организовать ввод законченного строительством (реконструкцией) Объекта капитального строительства в эксплуатацию (подпункт 4.3.25 Договора) и ввести Объект в эксплуатацию в срок, предусмотренный Титульным списком (подпункт 4.3.24 Договора).

В соответствии с Титульным списком, являющимся неотъемлемой частью Договора, срок ввода в эксплуатацию Объекта - IV квартал 2017 года.

Истец указывает на то, что застройщик в срок, предусмотренный титульным списком, объект в эксплуатацию не ввел, в связи с чем, обязан уплатить штрафные санкции на основании п.5.6. договора.

Пунктом 5.6 договора предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 4.3.25 Договора, Застройщик уплачивает штраф в размере 2,5 % от суммы, указанной в пункте 2.3 Договора, в течение 30 дней с даты предъявления Госкорпорацией «Роскосмос» соответствующего требования.

Пунктом 4.3.25 договора, в свою очередь, предусмотрено, что застройщик обязан организовать ввод законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. Направить заверенную копию разрешения на ввод в эксплуатацию в Госкорпорацию «Роскосмос» в течение 15 дней с даты его получения, но не позднее трех месяцев с даты окончания работ по строительству (реконструкции) объекта, определённой договором строительного подряда.

Письмом АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» от 13.02.2019 № 62/1366 представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.02.2019 № RU50-5-12962-2019.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было направлено ответчиком своевременно.

Следовательно, ответчик не допустил нарушение условия, установленного п.4.3.25, в связи с чем предусмотренные пунктом 5.6 договора штрафные санкции начислены истцом неправомерно не подлежат взысканию.

Довод истца о том, что данным пунктом предусмотрена ответственность за нарушения сроков строительства, отклоняются судом как противоречащие буквальному толкованию содержания условий пунктов 5.6 и 4.3.25 договора.

За нарушение сроков завершения работ  ответственность предусмотрена п.5.4 договора в виде неустойке в размере 1/300 действующей ставки за каждый день просрочки до фактического завершения работ. Данные санкции истец не требует.

Основываясь на изложенном, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия  в порядке, установленном ст.ст.  257-260 АПК РФ.

Судья:

Е.В. Коновалова