Дело № А43-41916/2017

23 октября  2018 года

г. Владимир

Резолютивная часть постановления объявлена 19.10.2018.

Постановление

 изготовлено в полном объеме 23.10.2018.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Новиковой Л.П.,

судей Родиной Т.С., Тарасовой Т.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества  с ограниченной ответственностью «Альтаир» на  решение Арбитражного суда  Нижегородской области от 09.07.2018 по делу  № А43-41916/2017, принятое судьей  Трясковой Н.В., по  иску общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» (ИНН 

<

***>,                    ОГРН 

<

***>) о взыскании  30 804 593 руб. 51 коп. долга и                               2 751 581 руб. 04 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 29.04.2017 по 26.03.2018, и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект»  (ИНН 

<

***>,                      ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 12 786 033 руб. 91 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, при участии третьего лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «Гидрогеолог» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), 

при участии:

от заявителя  – общества  с ограниченной ответственностью «Альтаир – ФИО2 на основании доверенности от  09.10.2018 № 87 Д сроком действия до 30.11.2018, ФИО3 на основании доверенности от 09.10.2018 сроком действия до 30.11.2018, ФИО4 на основании доверенности от 15.10.2018 сроком действия до 31.12.2018;

от ответчика -  общества с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» - ФИО5 на основании доверенности № 10 Д от 17.01.2018 сроком действия один год;

от третьего лица - общества с ограниченной ответственностью «Гидрогеолог»                   - представитель не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещён надлежащим образом, установил:

общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» (далее -                   ООО «Альтаир», истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» (далее - ООО «ЭТС-Проект», ответчик)  о взыскании                            30 804 593 руб. 51 коп. долга и  2 751 581 руб. 04 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 29.04.2017 по 26.03.2018 (с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ООО «ЭТС-Проект» обратилось со встречным иском к ООО «Альтаир» о взыскании 12 786 033 руб. 91 коп. неустойки, начисленной за нарушение сроков выполнения работ с учетом проведенного зачета (с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением от 09.07.2018  Арбитражный суд  Нижегородской области  исковые требования ООО «Альтаир» удовлетворил частично: взыскал с                    ООО «ЭТС-Проект» в пользу ООО «Альтаир»  30 774 руб. 08 коп. долга и  177 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении встречного иска отказал. 

 Не согласившись с принятым судебным актом,   истец обратился в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит  решение отменить и принять по делу новый судебный акт.

В суде апелляционной инстанции стороны представили мировое соглашение о нижеследующем.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект»                      (ООО «ЭТС-Проект») в лице генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альтаир»                                       (ООО «Альтаир») в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, с другой стороны, являющиеся сторонами по делу № А43-41916/2017, именуемые   в   дальнейшем   по   тексту   настоящего   мирового соглашения совместно или по отдельности «Стороны» или «Сторона» соответственно,

руководствуясь положениями статей 138-142 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - «АПК РФ»), в целях мирного разрешения спора, явившегося причиной предъявления иска, по обоюдному согласию заключили между собой настоящее мировое соглашение (далее - «Соглашение») по делу № А43-41916/2017 на следующих условиях:

ООО «ЭТС-Проект» признает задолженность перед ООО «Альтаир» в сумме 30 804 593,51 (Тридцать миллионов восемьсот четыре тысячи пятьсот девяносто три рубля пятьдесят одна копейка) в том числе НДС 18% - размер основного долга, и обязуется оплатить ООО «Альтаир» долг в следующем порядке:

 26 875 000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей в том числе НДС 18% в срок не позднее 30.06.2019г. по следующему графику:

- 8 875 000 (Восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей в том числе НДС 18% в срок до 30.11.2018г.;

- 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%, равными платежами в сроки:

- не позднее 31.01.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 28.02.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 31.03.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 30.04.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 31.05.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 30.06.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%.

Оплата платежей, предусмотренных настоящим пунктом, производится на расчетный счет ООО «Альтаир» 40702810000454543983, Нижегородский Филиал АО Юникредит Банка, к/с 30101810500000000799, БИК 042202799, либо по иным реквизитам, письменно сообщенным ООО «Альтаир» в адрес ООО «ЭТС-Проект».

 В качестве оплаты оставшейся суммы долга в размере 3 929 593,51 руб. (Три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три рублей 51 копейка) ООО «Альтаир» принимает зачет встречного требования ООО «ЭТС-Проект» на указанную сумму по Соглашению от 11.10.2018 о компенсации части штрафных санкций в порядке регресса по договору 00000000350160090002/№24-11/16/РиМ537/16 от 15.12.2016 г.

На основании ст. 410 ГК РФ обязательства Сторон в данной части суммы долга в размере 3 929 593,51 руб. (Три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три рубля 51 копейка) прекращаются путем зачета встречных однородных требований по Соглашению о зачете встречных требований от 11.10.2018 г.

ООО «ЭТС-Проект» признает отсутствие долга ООО «Альтаир» в размере неустойки 43 590 627,42 (Сорок три миллиона пятьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать семь рублей 42 копейки), включающей в себя, в том числе, неустойку, заявленную во встречном исковом заявлении в размере 12 786 033 руб. 91 коп. (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать три рубля девяносто одна копейка).

 Стороны признают отсутствие каких-либо иных претензий друг к другу по Договору в части просрочки выполнения работ, просрочки приемки и (или) оплаты работ и отказываются от любых денежных прав требования в отношении друг друга, включая права требования убытков, неустоек (в том числе, от неустойки в размере 2 751 581 руб. 04 коп. в пользу ООО «Альтаир») и иных санкций, если такие права требования связаны с просрочкой выполнения, приемки и (или) оплаты работ по Договору.

Действие настоящего пункта в любом случае не распространяется на обязательство ООО «ЭТС-Проект» уплатить сумму, указанную в п.2 настоящего Соглашения:

Действие настоящего пункта в любом случае не распространяется на требования и претензии, связанные с качеством выполненных по Договору работ, и на обязательства ООО «Альтаир», относящиеся к качеству выполненных работ на дату подписания мирового соглашения.

 В соответствии с ч.3 ст.140 АПК РФ Стороны согласовали отнесение судебных расходов по делу А43-41916/2017 на ту Сторону, которая их понесла.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

В соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Согласно статье 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело.

Первый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев подписанное сторонами мировое соглашение, пришел к выводу о возможности его утверждения, так как оно не противоречит закону, иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В связи с утверждением мирового соглашения решение суда первой инстанции подлежит отмене, а производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при утверждении мирового соглашения истцу возвращается половина уплаченной им государственной пошлины. Аналогичный возврат судебных расходов производится и заявителю апелляционной жалобы.

С учетом указанных норм, подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина: ООО «Альтаир»  - в сумме 62 480 руб. 50 коп., уплаченная по платежному поручению от 22.11.2017 №5993, 1500 руб. уплаченная по платежному поручению от 20.07.2018 №4124; ООО «ЭТС-Проект» - в сумме 55 149 руб., уплаченная по платежному поручению от 17.01.2018 №63.

Руководствуясь статьями  49, 110, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 176, 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 09.07.2018 по делу № А43-41916/2017 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Альтаир»  и  обществом с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект», по условиям которого:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект»                      (ООО «ЭТС-Проект») в лице генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альтаир»                                       (ООО «Альтаир») в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, с другой стороны, являющиеся сторонами по делу № А43-41916/2017, именуемые   в   дальнейшем   по   тексту   настоящего   мирового соглашения совместно или по отдельности «Стороны» или «Сторона» соответственно,

руководствуясь положениями статей 138-142 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - «АПК РФ»), в целях мирного разрешения спора, явившегося причиной предъявления иска, по обоюдному согласию заключили между собой настоящее мировое соглашение (далее - «Соглашение») по делу № А43-41916/2017 на следующих условиях:

ООО «ЭТС-Проект» признает задолженность перед ООО «Альтаир» в сумме 30 804 593,51 (Тридцать миллионов восемьсот четыре тысячи пятьсот девяносто три рубля пятьдесят одна копейка) в том числе НДС 18% - размер основного долга, и обязуется оплатить ООО «Альтаир» долг в следующем порядке:

 26 875 000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей в том числе НДС 18% в срок не позднее 30.06.2019г. по следующему графику:

- 8 875 000 (Восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей в том числе НДС 18% в срок до 30.11.2018г.;

- 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%, равными платежами в сроки:

- не позднее 31.01.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 28.02.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 31.03.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 30.04.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 31.05.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%;

- не позднее 30.06.2019 года платеж в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%.

Оплата платежей, предусмотренных настоящим пунктом, производится на расчетный счет ООО «Альтаир» 40702810000454543983, Нижегородский Филиал АО Юникредит Банка, к/с 30101810500000000799, БИК 042202799, либо по иным реквизитам, письменно сообщенным ООО «Альтаир» в адрес ООО «ЭТС-Проект».

 В качестве оплаты оставшейся суммы долга в размере 3 929 593,51 руб. (Три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три рублей 51 копейка) ООО «Альтаир» принимает зачет встречного требования ООО «ЭТС-Проект» на указанную сумму по Соглашению от 11.10.2018 о компенсации части штрафных санкций в порядке регресса по договору 00000000350160090002/№24-11/16/РиМ537/16 от 15.12.2016 г.

На основании ст. 410 ГК РФ обязательства Сторон в данной части суммы долга в размере 3 929 593,51 руб. (Три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три рубля 51 копейка) прекращаются путем зачета встречных однородных требований по Соглашению о зачете встречных требований от 11.10.2018 г.

ООО «ЭТС-Проект» признает отсутствие долга ООО «Альтаир» в размере неустойки 43 590 627,42 (Сорок три миллиона пятьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать семь рублей 42 копейки), включающей в себя, в том числе, неустойку, заявленную во встречном исковом заявлении в размере 12 786 033 руб. 91 коп. (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать три рубля девяносто одна копейка).

 Стороны признают отсутствие каких-либо иных претензий друг к другу по Договору в части просрочки выполнения работ, просрочки приемки и (или) оплаты работ и отказываются от любых денежных прав требования в отношении друг друга, включая права требования убытков, неустоек (в том числе, от неустойки в размере 2 751 581 руб. 04 коп. в пользу ООО «Альтаир») и иных санкций, если такие права требования связаны с просрочкой выполнения, приемки и (или) оплаты работ по Договору.

Действие настоящего пункта в любом случае не распространяется на обязательство ООО «ЭТС-Проект» уплатить сумму, указанную в п.2 настоящего Соглашения:

Действие настоящего пункта в любом случае не распространяется на требования и претензии, связанные с качеством выполненных по Договору работ, и на обязательства ООО «Альтаир», относящиеся к качеству выполненных работ на дату подписания мирового соглашения.

 В соответствии с ч.3 ст.140 АПК РФ Стороны согласовали отнесение судебных расходов по делу А43-41916/2017 на ту Сторону, которая их понесла.

Производство по делу № А43-41916/2017 прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску и апелляционной жалобе в сумме                 63 980 руб. 50 коп., уплаченную по платежному поручению от 22.11.2017 №5993, платежному поручению от 20.07.2018 №4124.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  из федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 55 149 руб., уплаченную по платежному поручению от 17.01.2018 №63.

Настоящее постановление является основанием для возврата государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья           

 

            Л.П. Новикова

Судьи

           Т.И. Тарасова

           Т.С. Родина