РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 17 сентября 2025 года по делу А33-22133/2023 Красноярск  

17 сентября 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу провести работы по устранению выявленных нарушений в рамках гарантийных обязательств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края от 27.11.2017 № 826861 на выполнение капитального ремонта кровли в многоквартирном доме № 116 по ул. Академика Киренского в г. Красноярске, повлекших промерзание, образование конденсата, намокание теплоизоляционного слоя, а также дефекты, выявленные в ходе проведения вышеуказанного ремонта, а именно:  

- демонтировать дверные коробки в помещениях холодных чердаков в количестве 3 шт., суммарный объем 1,05*1,3*3=4,1 м2;  

- выполнить закладку проемов в кирпичных перегородках между теплым и холодным чердаками в объеме: 1,05*1,3*0,38*3=1,56 м3;  

- выполнить пароизоляцию и утепление перегородок со стороны холодного чердака в объеме: 1,4*1,6*3=6,72 м2;  

- демонтировать рулонную кровлю на всей площади: 367,59 м2; 

- демонтировать цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм на всей площади: 18,12 м3;  

- демонтировать насыпной керамзитовый гравий на всей площади: 16,64 м3; - выполнить утепление покрытия на всей площади кровли 367,59 м2;  

- выполнить вышерасположенные слои кровельного покрытия в соответствии с принятыми проектными решениями на всей площади 367,59 м2 включая места примыканий.  

Толщина утеплителя, характеристики слоев и наименование применяемых материалов должны быть определены при разработке проектной документации.  

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Жилищные системы Красноярска» (ИНН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.Ю. Фадеева