АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №

А55-30726/2019

23 марта 2020 года

г.Самара

Резолютивная часть    объявлена 16 марта 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 23 марта 2020 года 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,

 при ведении протокола судебного заседания до перерыва помощником ФИО1, после перерыва секретарем ФИО2,

 рассмотрев 10.03.2020 – 16.03.2020 в судебном заседании, в котором оглашена резолютивная часть решения, дело по иску

Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области  

к Федеральному государственному унитарному предприятию "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации"

о взыскании 2 168 458,76 руб.

третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой"

                       Общество с ограниченной ответственностью «Бранд-Сервис»

при участии в заседании представителей:

от истца - ФИО3, доверенность от 25.12.2019

от ответчика - ФИО4, доверенность от 09.01.2020

от третьих лиц - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации" (далее - отвтчик) о взыскании 2 529 868,55 руб. пени за просрочку выполнения работ по государственному контракту № 7-3/5/18 от 29.03.2018.

Определением от 11.12.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой". Также к рассмотрению дела в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Бранд-Сервис».

Истец заявил  об уточнении исковых требований. Просит взыскать с ответчика 2 168 458,76 рублей пени за просрочку выполнения работ по государственному контракту № 7-3/5/18 от 29.03.2018. Суд принял уточнение в порядке ст.49 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, между сторонами  был заключен государственный контракт от 29.03.2018 № 7-3/5/18 на выполнение работ по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры (далее - государственный контракт, Контракт).

В соответствии с пунктом 1.1. Контракта Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Контракта, проектной документацией и ведомостью объемов работ выполнить работы по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и сдать Заказчику выполненные работы на объекте, а Заказчик обязуется принять, оплатить выполненные работы на условиях Контракта.

В соответствии с пунктом 5.1 государственного контракта работы должны быть выполнены с момента заключения Контракта по 01.06.2018.

 Сроки выполнения работ по Контракту были нарушены, что не отрицает ответчик. Результат работ по Контракту был достигнут только 24.12.2018, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 24.12.2018.

Согласно пункту 9.3 государственного контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В соответствии с пунктом 3.1 государственного контракта (в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2018 № 3) цена Контракта составляет 56 974 583,24 рублей.

Согласно статье 191 Гражданского кодекса РФ начало срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Общий период просрочки исполнения обязательств по Контракту с 02 июня 2018 года по 23 декабря 2018 года составил 205 дней.

Истец произвел расчет пени за указанный период, размер пени составил 2 168 458,76 рублей (с учетом уточнений). Истец просит взыскать с ответчика данный размер пени в судебном порядке.

Ответчик исковые требования не признает, указывая, что просрочка исполнения контракта была, но не по вине ответчика.

Ответчик сослался на:

-отсутствие к началу работ проектной документации, имеющий штамп «К производству работ»;

- не готовность ОТИ к началу работ по оснащению средствами ОТБ; 

-действие ограничений на проведение работ в период проведения Чемпионата;

- приостановление работ вследствие: несоответствия элементов конструкции рабочей документации; отсутствия мощности для пуско-наладочных работ.

Рассмотрев исковые требования, суд находит их подлежащими удовлетворению частично.

Относительно отсутствия к началу работ проектной документации, имеющий штамп «К производству работ»,  не готовность ОТИ к началу работ по оснащению средствами ОТБ, суд считает следующее.

В силу статей 716 и 744 ГК РФ заказчик обязан предоставить подрядчику надлежащею техническую документацию для производства работ, а подрядчик приостановить производство работ при обнаружении непригодности технической документации.

Согласно условиям заключенного контракта подрядчик обязан выполнить все работы в соответствии с условиями контракта и утвержденным проектом производства работ. На основании и в соответствии с переданной заказчиком проектной документации, подрядчик должен разработать чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений и предоставить заказчику на утверждение в течение 3 (трех) дней с даты заключения контракта (п. 6.1,6.2 Контракта).

Подрядчик обязан в соответствии с п.7.3.4 Контракта получить у Заказчика утвержденную проектную документацию, имеющую штамп «К производству работ» и не позднее, чем 10 (десять) дней до начала производства работ согласовать с Заказчиком руководящие документы по организации работы геодезической и лабораторной служб Подрядчика.

Ответчиком  в адрес истца направлялся запрос от 12.04.2018 №708 о предоставлении проектной и рабочей документации со штампом «к производству работ» по оснащению категорированного объекта «Путепровод через ж/д на 8 км автомобильной дороги Волжский-аэропорт «Курумоч»». Однако, вопреки условия п. 7.3.4 Контракта, документы были переданы лишь 04.05.2018, что повлекло за собой отставание от графика производства работ.

Параллельно, в связи со срывом графика выполнения работ подрядчиками заказчика, объект «Путепровод на ПК 3+407 ул. Ташкентская в г.о. Самара» не был готов для производства работ по контракту «на выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры». На нем продолжались общестроительные работы, без завершения которых было невозможно приступить к работам по предмету обязательства. Это явилось объективным препятствием к выполнению контрактного обязательства, о чем заказчик надлежащим образом уведомлялся.

Письмами от 12.04.2018 №709, 14.05.2018 № 911 Ответчик сообщил Заказчику об обстоятельства, препятствующие началу выполнения работ на объекте - «Путепровод на ПК 3+407 ул. Ташкентская в г.о. Самара» ввиду производства окрасочных работ подмостового пространства и заделки деформационных швов, с извещением о приостановке работ на данном объекте. 

В полученном ответе от 23.05.2018 №28/3907 Министерством сообщалось - работы по покраске путепровода и устройству переходных зон вдоль деформационных швов имеют локальный характер и не препятствуют проведению монтажных и пуско-наладочных работ по оснащению средствами обеспечения транспортной безопасности. Кроме того, данные работы были полностью завершены 15.05.2018 года. 

Вышеуказанные обстоятельства истец фактически не отрицает, хотя и полагает, что они не препятствовали ответчику продолжать работы.

Суд считает, что в совокупности, оба фактора действительно объективно препятствовали производству работ, и не зависели от ответчика.

Совокупная задержка производства работ в связи с изложенным составила 34 дня (с 12.04.2018 по 15.05.2018).

Довод ответчика, что в реальности, общестроительные работы, на указанном объекте продолжились и после 15.05.2018 объективными доказательствами не подтверждаются, - в своей переписке истец сам указывает на окончание работ – 15.05.2018, в остальном заявления ответчика, о  присутствии на объекте спецтехники, установленные сооружения (леса, трапы, защитные покрытие на устоях), невозможность приступить к работам без ущерба качества, относятся к субъективной, бездоказательной позиции ответчика.

Относительно действий по ограничению на проведение работ в период проведения Чемпионата, суд считает следующее.

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года, протокол заседания Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года, было указано на необходимость приостановления всех видов ремонтно-дорожных и общестроительных работ на протокольных и туристических маршрутах в период с 25.05.2018 по 25.07.2018.

То, что объекты, на которых было необходимо произвести работы, находились   на протокольных и туристических маршрутах истец не отрицает.

Письмом №28/3913 от 23.05.2018, истец, со ссылкой на вышеуказанные подзаконные акты обратился к ответчику с требованием о приостановлении производства работ, что как указал ответчик он и выполнил.

Истец довод не признал, и заявил, что 29.05.2018, письмом обратился к ответчику с требованием возобновить работы, поскольку, считает работы которые производил ответчик безотлагательными.

Ответчик указал, что имея прямое указание вышестоящего органа, обязан был подчиниться и не производить работы до окончания запрета.

Суд полагает позицию ответчика обоснованной, ответчик в период с 23.05.2018 (получение письма истца) по 25.07.2018 обоснованно приостановил работы.

Обоснованная приостановка составила длительность 65 дней.

Относительно приостановления работ вследствие несоответствия элементов конструкции рабочей документации, суд считает следующее.

Ответчик указывает, что по причине отсутствия отверстий для прохода инженерных коммуникаций, отсутствовала возможность прокладки кабеля. Об этом Министерство уведомлялось письмом от 16.05.2018. Однако, работы выполнены, каким образом, это помешало ответчику, на сколько дней задержало работы, и имело ли место быть фактически, ответчик доказательно не раскрыл.

 Относительно приостановления работ отсутствия мощности для пуско-наладочных работ, суд считает следующее.

Под данным фактором ответчик полагает следующее.

Для окончания строительно-монтажных работ в т.ч. пуско-наладочных на объект необходимо поступление электроэнергии в соответствии с отведенными мощностями.

26.06.2018 в адрес Заказчика направлялось письмо № 1432 об отсутствии необходимого комплекта документов для осуществления технологического присоединения к запроектированным сетям.

Допуск в эксплуатацию приборов учета по договору энергоснабжения №06700 от 25.04.2018 произведен 28.03.2019 Акт №8163, согласно нормативной документации разрешение о включении потребителей к электрическим сетям (в нашем случае объекта по Контракту) выдается после оформления всех разрешительных документов в т.ч. вышеуказанного акта.

Также, для проведения опытного испытания смонтированной системы необходимо было подключить ее к сети Интернет, что сделано было истцом только в ноябре 2018 года, что также задержало строительство.

Суд считает следующее.

В соответствии с п.1 ст.704 ГК РФ, ели иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

То есть, по смыслу данной нормы, именно подрядчик, если иное не установлено договором, выбирает средства и способы достижения результата выполнения работ.

В случае касающейся электроэнергии, ответчик – подрядчик, как пояснил представитель ответчика, использовал передвижной генератор, и завершил работы, даже несмотря на то, что разрешение на включение потребителей к эдектроэнергии было получено значительно позже окончания выполнения работ.

Относительно интернета, в соответствии с п.1 ст.716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Суду не представлено доказательств, что ответчик информировал истца о проблемах с интернетом, а в соответствии с п.2 ст.716 ГК РФ, подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Истец проблемы с подключением к сети Интернет не подтверждает. Ответчик обосновывая свой довод ссылается на контракт истца с Публичным акционерным обществом "Ростелеком" № 77-3/28/18 (номер закупки 26315800523 18 000081 сведения из открытых источников - https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2631580052318000081) от 22.10.2018 (окончание исполнения 31.01.2020), заявляя, что данную закупку истец делал специально для обеспечения интернетом ответчика для испытания смонтированной ответчиком системы.  Однако из указанной информации не следует, что контракт заключался исключительно под ответчика.

 Кроме того, как указывалось выше, именно подрядчик, выбирает пути и способы выполнения работ, контракт подписан в марте 2018 года, ответчик, выполняя работы, обязан был учесть отсутствие интернета на объекте, и своевременно, к началу испытаний затребовать у истца соответствующий доступ и трафик.

Суд не находит заявленные возражения в данной части подтверждающие отсутствие вины ответчика в произошедшей задержке.

Как указано в п.10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017), при несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика.

Доводы ответчика от отсутствие к началу работ проектной документации, имеющий штамп «К производству работ», не готовности ОТИ к началу работ по оснащению средствами ОТБ, наличия  ограничений на проведение работ в период проведения Чемпионата, частично обоснованны. Суд считает, что просрочка общей длительностью 99 дней (34 дня с 12.04.2018 по 15.05.2018 + 65 дней с 23.05.2018  по 25.07.2018) произошла вследствие действий истца, а также обстоятельств, не зависящих от воли ответчика. По мнению суда, сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту должны быть продлены на соответствующий период просрочки – 99 дней, то есть последний день исполнения – 08.09.2018, но с учетом, что 08.09.2018 приходиться на выходной день, последний день срока переноситься на 10.09.2018. Период просрочки исполнения по контракту начинает течь с 11.09.2018.

В остальной части доводы ответчика не обоснованы.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности начисления истцом ответчику неустойки за период с 11.09.2018 по 24.12.2018.

С учетом того, что работы сдавались частями, суд произвел перерасчет начисленной истцом неустойки:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

56 974 583,24

11.09.2018

Новая задолженность на 56 974 583,24 руб.

56 974 583,24

11.09.2018

30.11.2018

82

6

56 974 583,24 × 82 × 1/300 × 6% 

934 383,17 р.

27 001 833,96

30.11.2018

Оплата задолженности на 29 972 749,28 руб.

27 001 833,96

01.12.2018

19.12.2018

19

6

27 001 833,96 × 19 × 1/300 × 6% 

102 606,97 р.

3 371 880,67

19.12.2018

Оплата задолженности на 23 629 953,29 руб.

3 371 880,67

20.12.2018

24.12.2018

5

6

3 371 880,67 × 5 × 1/300 × 6% 

3 371,88 р.

Сумма неустойки: 1 040 362,02 руб.

В данной части требование обоснованно и подлежит удовлетворению.

Ответчик, заявил о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, и просил снизить размер неустойки на основании ст.333 ГК РФ.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.  

По правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016  подлежащая уплате неустойка может быть уменьшена судом, если она явно несоразмерна последствиями нарушения обязательства.

Суд, с учетом длительности просрочки, процента по неустойки 1/300 ключевой ставки Банка России не усматривает заявленную неустойку несоразмерной последствиям нарушения обязательства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации"  в пользу Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 1 040 362,02 рублей пени.

В удовлетворении остальной части заявленного требования отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья              Лукин А.Г.