Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980  тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-2760/2024

23 мая 2024 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т.С.,  рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению  Акционерного общества "Сахаэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью "МастерСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 168 454,57 рублей,  

без вызова сторон, 

От истца в арбитражный суд поступило ходатайство об уменьшении размера  исковых требований до 161 975,50 руб.  

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд принял уменьшение размера исковых требований.  

Согласно пп.1.6.1-1.6.2 договора подряда от 26.12.2022 № РМ/КИИ/ОЭИРН-3-23  начало выполнения работ - с момента заключения договора, окончание выполнения работ  – в течение 260 календарных дней с даты заключения договора.  

Договор подписан электронно-цифровой подписью сторон: со стороны подрядчика  (ответчика) 23.12.2022, заказчика (истца) -26.12.2022, соответственно, по смыслу статей  432-434 Гражданского кодекса Российской Федерации является заключенным 26.12.2022.  

По завершении работ в отношении объекта и готовности последнего к  эксплуатации подрядчик в силу п.4.2 договора в течение 3 рабочих дней представляет  заказчику подписанные со своей стороны акт КС-2, справку КС-3 в отношении объекта на  весь объем выполненных работ по объекту в 2 экземплярах, акт о приеме-сдаче  реконструированных объектов основных средств по форме ОС-3 в 2 экземплярах с  приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации в 2 экземплярах.  

Сторонами подписаны акт формы КС-2, справка формы КС-3 от 01.11.2023 № 1 за  отчетный период с 26.12.2022 по 01.11.2023.  

Согласно п.п.6.4.1 договора в случае нарушения подрядчиком обязательств по  выполнению работ, в том числе срока выполнения работ, установленного п.1.6.2 договора,  а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результата работ,  заказчик вправе требовать уплаты подрядчиком штрафной неустойки в размере 0,1% от  цены договора за каждый день просрочки.  

Истцом расчет договорной неустойки произведен в размере 0,1% от цены договора  3 239 511,60 руб. (п.3.1 договора) за период с 13.09.2023 по 01.11.2023, судом проверен,  признан арифметически верным, соответствующим условиям договора, не  противоречащим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

Ответчик контррасчет неустойки не представил, заявление о снижении ее размера  не заявил.  

При доказанности нарушения срока выполнения работ со стороны ответчика,  требование истца о взыскании 161 975,50 руб. за период с 13.09.2023 по 01.11.2023 судом  удовлетворено.  

В связи с уточнением размера исковых требований, истцу на основании пп.3 п.1  ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату из федерального  бюджета 652 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от  09.02.2024 № 1699.  

В остальной части расходы истца по уплате государственной пошлины по  результатам рассмотрения дела, на основании ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации судом отнесены на ответчика.  

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 170, 228, 229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МастерСтрой"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Сахаэнерго"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 161 975,50 руб., а также  расходы по государственной пошлине 5 859 руб.  

2. Возвратить Акционерному обществу "Сахаэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 652 руб.  

3. 

Решение

 подлежит немедленному исполнению. 

4. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое  решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи  апелляционной жалобы.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней  со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда  - со дня принятия решения в полном объеме.  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха  (Якутия).  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru  

Судья Т. С. Шамаева