Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46081/2025

08 августа 2025 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аслановой А.Т.,   

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК-ТРЕСТ" (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "РУССТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) 

при участии

- от истца: ФИО1 

- от ответчика: не яв., изв. 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК-ТРЕСТ" (далее – Трест) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РУССТРОЙ" (далее – Общество) о взыскании 2 102 759,47 руб. задолженности по договорам от 27.12.2023 № 27/12/2023-ДОУ15 (далее – Договор 1), от 27.12.2023 № 27/12/2023-АПУ210 (далее – Договор 2), от 27.12.2023 № П-27/12/2023 (далее – Договор 3).

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил требования и просил взыскать 1 846 950,15 руб. задолженности по Договору 1, 177 316,32 руб. задолженности по Договору 2, 78 493 руб. задолженности по Договору 3. 

Уточнение принято судом. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие. 

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Трестом (подрядчиком) и Обществом (генеральным подрядчиком, заказчиком) заключены Договоры № 1-3.

Предмет Договора 1: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу оконных блоков и дверей из ПВХ профиля, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства «Дошкольное образовательное учреждение на ПО мест» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...> участок 15 (территория, ограниченная ул. Мосина, наб. Строителей, полосой отвода железной дороги, в Курортном районе, ФЗУ №22).

Цена Договора 3 346 950,15 руб. (п. 4.1. в редакции ДС от 19.07.2024 № 1). 

В силу п. 5.1.1. договора промежуточное финансирование производится ежемесячно, исходя из объемов работ, предъявленных Подрядчиком по состоянию на последнее число отчетного периода. Отчетным периодом считается календарный месяц.

Промежуточное финансирование производится на основании подписанных Сторонами документов по форме КС-2, КС-3, предъявленных в отчетном периоде, в следующем порядке:

-50% от стоимости строительно-монтажных работ, указанной в утвержденной Генеральным подрядчиком форме КС-3, включая 50 % от стоимости материалов, поставку которых осуществляет Генеральный подрядчик по договору поставки, Генеральный подрядчик оплачивает не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком форм КС-2, КС-3 за отчетный период и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случае выплаты Генеральным подрядчиком аванса, зачет аванса производится пропорционально объемам выполненных в отчетном периоде работ;

-50% от стоимости материалов, поставку которых осуществляет Генеральный подрядчик по договору поставки, указанной в утвержденной Генеральным подрядчиком форме КС-3, Генеральный подрядчик оплачивает не позднее 3 (трех) месяцев с даты подписания Генеральным подрядчиком форм КС-2, КС-3 за отчетный период и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ, если иной срок оплаты указанной суммы не предусмотрен дополнительным соглашением Сторон; Генеральный подрядчик вправе произвести оплату раньше срока, предусмотренного данным абзацем Договора, в случае обращения Подрядчика с обоснованием необходимости досрочной оплаты;

-40% от стоимости строительно-монтажных работ, указанной в утвержденной Генеральным подрядчиком форме КС-3, (без учёта стоимости материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком) Генеральный подрядчик оплачивает не позднее 3 (трех) месяцев с даты подписания Генеральным подрядчиком форм КС-2, КС-3 за отчетный период и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ, если иной срок оплаты указанной суммы не предусмотрен дополнительным соглашением Сторон. Генеральный подрядчик вправе произвести оплату раньше срока, предусмотренного данным абзацем Договора, в случае обращения Подрядчика с обоснованием необходимости досрочной оплаты;

-оплату 9% от стоимости строительно-монтажных работ, указанной в утвержденной Генеральным подрядчиком форме КС-3 (без учёта стоимости материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком) (далее «сумма резервирования»), Генеральный подрядчик производит в срок, предусмотренный пунктом 5.1.2 Договора;

-оплату 1% от стоимости строительно-монтажных работ, указанной в утвержденной Генеральным подрядчиком форме КС-3 (без учёта стоимости материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком) (далее «гарантийная сумма»), Генеральный подрядчик удерживает до истечения предусмотренного пунктом 11.2.1 Договора гарантийного срока на результат работ по Договору и оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты окончания указанного гарантийного срока.

При этом Стороны подтверждают, что сумма резервирования и гарантийная сумма являются гарантийным удержанием, выполняющим обеспечительную функцию, и является способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору. Генеральный подрядчик вправе за счет такого удержания удовлетворить свои требования к Подрядчику, в том числе, но не ограничиваясь: о соразмерном уменьшении цены работ, возмещении расходов на устранение недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), выплате штрафов и неустоек. Удержание Генеральный подрядчик вправе произвести в одностороннем порядке с обязательным направлением Подрядчику уведомления об удержании с расчетом удерживаемой суммы.

В случае прекращения Договора по любому основанию оплата суммы резервирования производится Генеральным подрядчиком не позднее 6 (Шести) месяцев с даты прекращения Договора, оплата гарантийной суммы производится не позднее 10-ти банковских дней с даты окончания гарантийного срока по Договору, предусмотренного п. 11.2.1 Договора.

В силу п. 5.1.2. договора окончательный расчет по Договору (включая выплату сумм резервирования, но не включая гарантийную сумму) производится Генеральным подрядчиком по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда (Приложение № 6), предусмотренного п. 6.3.7 Договора, при условии ввода Объекта в эксплуатацию, передачи всех жилых и нежилых помещений, входящих в состав Объекта, либо иным приобретателям помещений и эксплуатирующей организации.

В день подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда (Приложение № 6) Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику следующую документацию на все выполненные работы по Договору:

- Сертификаты и другую документацию, удостоверяющую качество использованных при проведении работ Материалов;

-Исполнительную документацию по выполненным работам в полном объеме согласно Приложению № 5 к Договору в соответствии со СНиП, РД, СП, ГОСТ (дополнительно к ранее переданному комплекту исполнительной документации).

В силу п. 11.2.1 договора гарантийный срок на результат работ составляет 5 лет и 6 мес. с даты подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ. 

По договору сторонами подписан акт о приемки выполненных работ от 30.09.2024 № 1 на сумму 3 346 950,15 руб., а также итоговый акт выполненных работ.

Предмет Договора 2: полный комплекс строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу оконных блоков из ПВХ профиля, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства "Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 210 посещений в смену" расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...> участок 2.

Цена договора 1 327 066,06 руб. (п. 4.1 договора).

К договору заключены ДС от 01.03.2024 № 1 на сумму 2 000 000 руб., от 01.07.2024 № 2 на сумму 2 119 313,02 руб., от 03.09.2024 № 4 на сумму 31 577,78 руб., от 04.09.2024 № 5 на сумму 16 800 руб. 

Порядок оплаты и гарантийный срок на результат работ аналогичны Договору 1. 

К договору подписаны акты о приемки выполненных работ от 15.07.2024 № 1 на сумму 2 119 313,02 руб., от 15.09.2024 № 1 на сумму 31 577,78 руб., от 15.09.2024 № 1 на сумму 16 800 руб., от 31.03.2024 № 1 на сумму 1 327 066,06 руб., итоговый акт выполненных работ от 13.09.2024. 

Предмет Договора 3: выполнение работ по доставке, разгрузке и монтажу оконных блоков и дверей из ПВХ профиля на объекте ДОУ № 24 по адресу: ул. Володарского, 44, г Сестрорецк. 

Цена договора 341 255 руб. 

По п. 3.5. договора остаток оплаты заказчик производит на основании выставленного счета, УПД, счета-фактуры, после подписания товарной накладной, акта сдачи-приемки.

К договору заключено ДС от 07.02.2024 № 1 на выполнение работ стоимостью 78 493 руб. Условия оплаты: после подписания ДС Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика Аванс в размере 78 493 руб. 

К договору подписаны акт сдачи-приемки от 11.01.2024 на сумму 341 255 руб., УПД от 14.03.2024 № 24 на сумму 78 493 руб. 

Претензия об оплате долга оставлена Компанией без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Общества в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты долга, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РУССТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК-ТРЕСТ" (ИНН: 

<

***>):

- 78493 руб. задолженности по договору от 27.12.2023 № П-27/12/2023; 

- 1846950,15 руб. задолженности по договору от 27.12.2023 № 27/12/2023-ДОУ15;  

- 177316,32 руб. задолженности по договору от 27.12.2023 № 27/12/2023-АПУ210;  

- 88083 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.