ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ульяновск                                                                                    Дело №А72-452/2020

«22» мая 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена «19» мая 2020 года

Полный текст решения изготовлен «22» мая 2020 года

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи П.Г.Юдина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                  ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317732500018365, ИНН 

<

***>),  г. Ульяновск

к Обществу с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск

о взыскании 2 471 272 руб. 08 коп.

при участии в заседании:

от  истца – ФИО3, доверенность от 09.01.2020;

от ответчика – ФИО4, доверенность от 02.12.2019;

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» о взыскании 2 471 272 руб. 08 коп., в том числе:  2 385 902 руб. 64 коп. – основной долг, 85 369 руб. 44 коп. – пени.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 23.01.2020 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

В предварительном судебном заседании 13.02.2020 представитель истца на исковых требованиях настаивал, не возражал против завершения подготовки по делу и назначении дела к судебному разбирательству.

Представитель ответчика возражал против исковых требований, представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, не возражал против завершения подготовки по делу и назначении дела к судебному разбирательству.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.02.2020 предварительное судебное заседание завершено, дело назначено к судебному разбирательству.

В судебном заседании 10.03.2020 представитель истца на исковых требованиях настаивал.

Представитель ответчика возражал против исковых требований, представил в материалы дела копии платежных поручений, подтверждающих оплату задолженности по договору в сумме 921 014 руб. 27 коп., оригинал письма от 20.02.2020.

Представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях уточнения исковых требований.

Представитель ответчика не возражал против ходатайства истца об отложении судебного разбирательства.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 10.03.2020 судебное разбирательство отложено.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.04.2020 судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании 19.05.2020 представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просил взыскать с ответчика основной долг в сумме 1 206 545 руб. 87 коп., пени в сумме 42 579 руб. 44 коп., на исковых требованиях настаивал с учетом уточнения.

Представитель ответчика возражал против исковых требований, не возражал против ходатайства истца об уточнении исковых требований. 

В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Рассмотрев ходатайство истца об уточнении исковых требований, суд считает, что его следует удовлетворить в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что исковые требования следует удовлетворить.

При этом суд руководствовался следующим. 

Как усматривается из материалов дела, 31.08.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» (Генподрядчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Субподрядчик) заключен договор подряда №2018-Б5.КОТ, согласно которому Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией электромонтажные работы на объекте: Комплексное освоение в целях многоэтажного жилищного строительства по адресу г.Ульяновск, Ленинский район, микрорайон "Искра, квартал "Б" (южная часть) (жилой дом №5) (Многоквартирный жилой дом) (Кабельная линия (питание котельной)) в установленные сроки и с надлежащим качеством. (п.1.2 договора)

Перечень, объем и стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии со сметой или расчетом стоимости работ (Приложение№1) и составляет на момент подписания договора 446 403 руб. 24 коп., в текущих ценах, НДС не облагается в соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК РФ. В стоимость работ входит выполнение полного комплекса, установленного техническими регламентами для данного вида работ, а также затраты связанные с поставкой и транспортировкой всех необходимых материалов, с эксплуатацией машин и механизмов, выплатой зарплаты, уплатой налогов. (п.2.1 договора)

В соответствии с  п.3.2 договора приёмка выполненных работ по настоящему договору производится ежемесячно путём подписания сторонами за соответствующий отчётный период акта о приёмке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Акт приёмки выполненных работ составляется по фактически выполненным объёмам работ с приложением исполнительной документации на предъявляемый к приёмке объём работ. Исправления и дополнения в подписываемых формах недопустимы.

Согласно п.3.7 договора, оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании выставленного счёта, подписанных сторонами актов и справок по формам №№КС-2 и КС-3, счёта-фактуры на суммы работ, выполненных в отчётном периоде, с учетом перечисленных авансов в размере 95% от стоимости выполненных работ в целях сохранения 5% в качестве гарантийного удержания с учетом п. 3.8 настоящего договора. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 60 дней с даты подписания актов и справок по формам №№ КС-2 и КС-3, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, а также по соглашению Сторон иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

В соответствии с п.4.1 договора календарные сроки выполнения работ определены сторонами в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3). Дата начала работ: 31.08.2018, дата окончания работ: 31.10.2018. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

07.03.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» (Генподрядчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Субподрядчик) заключен договор подряда №2018-Н4 (ИП), согласно которому Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией электромонтажные работы на объекте: утвержденной проектно-сметной документацией электромонтажные работы на объекте: Комплексное многоквартирное жилищное строительство с объектами социального и коммунально-бытового назначения г.Ульяновск, Заволжский район, севернее жилого дома №13 ул.Нахимова (Многоквартирный жилой дом №4) в установленные сроки и с надлежащим качеством. (п.1.1 договора)

 Перечень, объем и стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии со сметой или расчетом стоимости работ (ЛС-2018-Н4) и составляет на момент подписания договора 4 502 333 руб. 41 коп, в текущих ценах, НДС не облагается в соответствии с п. 3 ст.346.11 НК РФ. В стоимость работ входит выполнение полного комплекса строительных и монтажных работ, а также затраты связанные с поставкой и транспортировкой всех необходимых материалов, с эксплуатацией машин и механизмов, выплатой зарплаты, уплатой налогов. (п.2.1 договора)

В соответствии с  п.3.2 договора приёмка выполненных работ по настоящему договору производится ежемесячно путём подписания сторонами за соответствующий отчётный период акта о приёмке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Акт приёмки выполненных работ составляется по фактически выполненным объёмам работе приложением исполнительной документации на предъявляемый к приёмке объём работ. Исправления и дополнения в подписываемых формах не допустимы.

Согласно п.3.7 договора, оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Генподрядчиком на основании выставленного счёта, подписанных сторонами актов и справок по формам №№КС-2 и КС-3, счёта-фактуры на суммы работ, выполненных в отчётном периоде, с учетом перечисленных авансов в размере 95% от стоимости выполненных работ в целях сохранения 5% в качестве гарантийного удержания с учетом п. 3.8 настоящего договора. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится в течение 60 дней с даты подписания актов и справок по формам №№КС-2 и КС-3, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Субподрядчика, а также по соглашению сторон иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

В соответствии с п.4.1 договора календарные сроки выполнения работ определены сторонами в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2). Дата начала работ: 10.03.2018, дата окончания работ: 15.08.2018. Субподрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

15.08.2019 между Обществом с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» (Генподрядчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Субподрядчик) заключен договор подряда №2019-Б4.КЛНО, согласно которому  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией электромонтажные работы на объекте: утвержденной проектно-сметной документацией электромонтажные работы на объекте: Комплексное освоение в целях многоквартирного жилищного строительства по адресу: г.Ульяновск, Ленинской район, микрорайон "Искра", квартал "Б" (южная часть), многоквартирный жилой дом №4 (Наружное освещение, кабельная линия) в установленные сроки и с надлежащим качеством. (п.1.2 договора)

Перечень, объем и стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии со сметой или расчетом стоимости работ (Приложение №1) и составляет на момент подписания договора 2 077 963 руб. 44 коп., в текущих ценах, НДС не облагается в соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК РФ. В стоимость работ входит выполнение полного комплекса работ (выполнение СМР, выполнение пуско-наладочных работ с составлением отчета, оформление уведомления-разрешения на временное подключение к существующим сетям электроснабжения в Ростехнадзоре, проведение проверки правильности работы приборов учета с оформлением актов в сетевой энергоснабжающей организации, оформление пакета исполнительной документации в 2х экземплярах, осуществление технологического присоединения к существующим электрическим сетям), установленного техническими регламентами для данного вида работ, а также затраты связанные с поставкой и транспортировкой всех необходимых материалов и оборудования, с эксплуатацией машин и механизмов, выплатой зарплаты, уплатой всех налогов. (п.2.1 договора)

В соответствии с  п.3.2 договора приёмка выполненных работ по настоящему договору производится ежемесячно путём подписания сторонами за соответствующий отчётный период акта о приёмке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Акт приёмки выполненных работ составляется по фактически выполненным объёмам работ с приложением исполнительной документации на предъявляемый к приёмке объём работ. Исправления и дополнения в подписываемых формах не допустимы.

Согласно п.3.7 договора, оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании выставленного счёта, подписанных сторонами актов и справок по формам №№КС-2 и КС-3, счёта-фактуры на суммы работ, выполненных в отчётном периоде, с учетом перечисленных авансов в размере 95% от стоимости выполненных работ в целях сохранения 5% в качестве гарантийного удержания с учетом п. 3.8 настоящего договора. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 60 дней с даты подписания актов и справок по формам №№ КС-2 и КС-3, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, а также по соглашению сторон иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

В соответствии с п.4.1 договора календарные сроки выполнения работ определены сторонами в соответствии с графиком производства работ: дата начала работ 15.08.2019, дата окончания работ: 31.12.2019. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик в соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу ст.ст. 711, 746 ГК РФ основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Во исполнение условий договора подряда №2018-Б5.КОТ от 31.08.2018 истец выполнил работы, предусмотренные п.1.1 договора, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.10.2018, актом о приемке выполненных работ №1 от 25.10.2018, представленными в материалы дела и подписанными сторонами без разногласий.

Во исполнение условий договора подряда №2018-Н4 (ИП) от 07.03.2018 истец выполнил работы, предусмотренные п.1.1 договора, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 25.05.2018, актом о приемке выполненных работ №2 от 25.05.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 25.07.2018, актом о приемке выполненных работ №3 от 25.07.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 25.09.2018, актом о приемке выполненных работ №4 от 25.09.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 25.10.2018, актом о приемке выполненных работ №5 от 25.10.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 25.10.2018, актом о приемке выполненных работ №2018-Н4.ДОП от 28.09.2018, представленными в материалы дела и подписанными сторонами без разногласий.

Во исполнение условий договора подряда №2019-Б4.КЛНО от 15.08.2019 истец выполнил работы, предусмотренные п.1.1 договора, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.09.2019, актом о приемке выполненных работ №1 от 25.09.2019, представленными в материалы дела и подписанными сторонами без разногласий.

Работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний.

Ответчик обязательства по оплате выполненных работ по договору подряда надлежащим образом не исполнил. 

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием об оплате задолженности.

Поскольку ответчик обязательства по оплате надлежащим образом не исполнил, истец обратился с настоящим исковым заявлением о взыскании задолженности в судебном порядке.

После принятия искового заявления к производству ответчиком произведена частичная оплата задолженности.

С учетом ходатайства об уточнении исковых требований истец просит взыскать с ответчика основной долг в сумме 1 206 545  руб. 87 коп., в том числе: по договору подряда №2018-Б5.КОТ от 31.08.2018 в сумме 437 770 руб. 89 коп., по договору подряда №2018-Н4 (ИП) от 07.03.2018 в сумме 383 971 руб. 41 коп., по договору подряда №2019-Б4.КЛНО от 15.08.2019 в сумме 384 803 руб. 57 коп.

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Доводы ответчика о резервировании квартир №№32,33,37 в многоквартирном доме №4 в Ленинском районе г.Ульяновска, судом отклоняются, поскольку доказательства передачи указанных квартир истцу в счет оплаты задолженности по договорам №2018-Б5.КОТ от 31.08.2018, №2018-Н4 (ИП) от 07.03.2018, №2019-Б4.КЛНО от 15.08.2019 в материалы дела не представлены.

Доводы ответчика о нарушение срока выполнения работ не является основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании задолженности.

Поскольку ответчик доказательства оплаты задолженности суду не представил, размер задолженности не оспорил, исковые требования о взыскании суммы основного долга в размере 1 206 545 руб. 87 коп. законны, обоснованны и подлежат удовлетворению.

Кроме того, с учетом ходатайства об уточнении исковых требований истец просит взыскать с ответчика пени в сумме 42 579  руб. 44 коп., в том числе: по договору подряда №2018-Б5.КОТ от 31.08.2018 в сумме 13 133 руб. 13 коп., по договору подряда №2018-Н4 (ИП) от 07.03.2018 в сумме 14 711 руб. 03 коп., по договору подряда №2019-Б4.КЛНО от 15.08.2019 в сумме 14 735 руб. 28 коп.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными договором.

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п.10.2 договора подряда №2018-Б5.КОТ от 31.08.2018, за задержку расчетов за выполненные работы по вине Заказчика, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости неоплаченных работ.

Аналогичные положения предусмотрены пунктами 10.2 договоров подряда №2018-Н4 (ИП) от 07.03.2018, №2019-Б4.КЛНО от 15.08.2019.

Представленный истцом расчет пени проверен судом и признан соответствующим нормам действующего законодательства и не нарушающим права ответчика. 

Ответчик контррасчет пени в материалы дела не представил.

Суд отклоняет доводы ответчика, изложенные в отзыве в части периода начисления неустойки, поскольку расчет неустойки произведен истцом с учетом 60-дневного срока со дня подписания актов и справок по форме КС-2, КС-3.

Поскольку ответчик в установленный договорами срок не произвел оплату выполненных работ, требование истца о взыскании пени в сумме 42 579 руб. 44 коп. является законным,  обоснованным и подлежит удовлетворению.

При данных обстоятельствах, исковые требования следует удовлетворить. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине  возлагаются  на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 110, 159, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Ходатайство представителя истца об уточнении исковых требований удовлетворить.

Исковое заявление удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 основной долг в сумме 1 206 545 (один миллион двести шесть тысяч пятьсот сорок пять) руб. 87 коп.,  пени в сумме 42 579 (сорок две тысячи пятьсот семьдесят девять) руб. 44 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 25 491 (двадцать пять тысяч четыреста девяносто один) руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                            П.Г.Юдин