АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-19602/2023

г. Ставрополь

29 января 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2024 года 

                                                          Решение изготовлено в полном объеме 29 января 2024 года 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола помощником судьи Кухтиной С.С., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Геострой» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва, к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Пятигорск, о взыскании задолженности 1 407 934 руб. 10 коп. по муниципальному контракту № 0121300035322000118 от 26.09.2022, об обязании списать неустойку в размере 1 407 934 руб. 10 коп. в соответствии  с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783, при участии от истца – представителя ФИО1, дов. от 01.12.2023, от ответчика – представителя  ФИО2, дов. от 13.11.2023, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Геострой» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва (далее – истец, подрядчик), обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Пятигорск (далее – ответчик, заказчик), о взыскании задолженности 1 407 934 руб. 10 коп. по муниципальному контракту № 0121300035322000118 от 26.09.2022, об обязании списать неустойку в размере 1 407 934 руб. 10 коп. в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. 

Истец поддержал исковые требования. 

Ответчик возражал против исковых требований по доводам отзыва.

Изучив материалы дела и правовые позиции сторон, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 26.09.2022 сторонами по итогам электронного аукциона (протокол № 103 АЭФ (0121300035322000118) от 15.09.2022) был заключен муниципальный контракт № 0121300035322000118 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске.

Цена контракта составляет 32 305 945 руб., без НДС 20% (пункт 2.1 контракта в редакции дополнительного соглашения № 2 от 31.05.2023).

Пунктом 3.2 контракта в редакции дополнительного соглашения № 2 от 31.05.2023 стороны предусмотрели, что оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком на основании предъявленных подрядчиком и принятых лицом, осуществляющим строительный контроль, объемов выполненных работ.

Оплата по контракту осуществляется заказчиком поэтапно, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края (в ходе исполнения контракта возможно изменение источника доходов внутри источника финансирования) по безналичному расчету, в денежной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, без авансирования, за фактически выполненные объемы работ в течение не более 7 рабочих дней, с даты подписания заказчиком усиленной электронной подписью структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, а также предоставления подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета на оплату, счета-фактуры (при наличии) (в случаях, предусмотренных статьей 169 НК РФ). Оплата считается совершенной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Стоимость выполнения работ по контракту на первом этапе составляет 16 649 256 руб., без НДС.

Стоимость выполнения работ по контракту на втором этапе составляет 9 212 243,15 руб., без НДС.

Стоимость выполнения работ по контракту на третьем этапе составляет 2 089 528,80 руб., без НДС.

Окончательный расчет, в том числе по четвертому этапу, составляет 4 354 917,05 руб., без НДС, и производится заказчиком путем перечисления на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте, после выполнения последним всего предусмотренного контрактом объема работ.

Обязательство заказчика по оплате работ подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета заказчика.

Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. В указанном случае оплата по контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки. При этом исполнение обязательства подрядчика по перечислению неустойки в доход бюджета возлагается на заказчика (пункты 3.3 - 3.4 контракта).

Согласно пункту 4.2 контракта начало выполнения работ: с момента заключения контракта; срок окончания выполнения работ подрядчиком по контракту: не позднее 15 декабря 2022 года; срок исполнения контракта: не позднее 31 декабря 2022 года. 

Работы выполняются поэтапно, сроки исполнения отдельных этапов и выполнение работ по отдельным этапам:

- I этап: срок исполнения контракта – с момента заключения контракта до 27.10.2022, срок выполнения работ подрядчиком – с момента заключения контракта до 17.10.2022;

- II этап: срок исполнения контракта – с 16.10.2022 до 27.11.2022, срок выполнения работ подрядчиком – с 16.10.2022 до 10.11.2022;

- III этап: срок исполнения контракта – с 11.11.2022 до 12.12.2022, срок выполнения работ подрядчиком – с 11.11.2022 до 30.11.2022;

- IV этап: срок исполнения контракта – с 01.12.2022 до 31.12.2022, срок выполнения работ подрядчиком – с 01.12.2022 до 15.12.2022.

Приемка выполненных работ (отдельного этапа) осуществляется согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая проведение экспертизы выполненных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

Подрядчик извещает заказчика за 2 дня о дате и времени сдачи-приемки результатов выполненных работ, предоставляет заказчику все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством для осуществления приемки работ.

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от подрядчика документов указанных в пункте 3.5 контракта с результатами выполнения работ по каждому этапу, проверяет качество и объемы выполненных работ и затем: 

a) либо принимает работы и подписывает акт о приемке выполненных работ;

б) либо при наличии замечаний возвращает подрядчику, представленный для приемки работ акт о приемке выполненных работ для внесения изменений в соответствии с результатами приемки;

в) либо направляет подрядчику в письменном виде мотивированный отказ принять работы и подписать акт о приемке выполненных работ (пункты 6.2 - 6.4 контракта).

В соответствии с пунктами 9.6 - 9.7 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Работы подрядчиком выполнены в полном объеме, что подтверждается подписанными уполномоченными представителями обеих сторон актами выполненных работ по форме КС-2 №№ 1-15 от 26.05.2023 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №№ 1-4 от 26.05.2023, счетами-фактурами №№ 25-28 от 02.06.2023; подрядчиком выставлены счета на оплату №№ 25-28 от 02.06.2023

Письмами № 33 от 12.01.2023, № 420 от 17.03.2023, № 742 от 05.05.2023, №№ 990-993 от 08.06.2023, №№ 1064-1067 от 20.06.2023 ответчик начислил подрядчику пени за просрочку выполнения работ.

16 июня 2023 года подрядчик письмом № 3616/1 обратился к заказчику с просьбой произвести перерасчет суммы неустойки в связи с требованием АО «Пятигорскэнерго» от 29.09.2022 № 01/1-7574 о приостановлении работ в связи с проведением плановых работ электросетевыми компаниями края на период с 03.10.2022 по 24.10.2022. Требования подрядчика о пересчете суммы неустойки были удовлетворены (письмо № 1081 от 22.06.2023).

Платежными поручениями №№ 43052-43055 от 23.06.2023 заказчиком произведена частичная оплата выполненных работ на общую сумму 29 675 721,15 руб., оставшаяся часть в размере 1 407 394,10 руб. удержана заказчиком в качестве уплаты неустойки за просрочку выполнения работ.

Письмами № 3511/1 от 11.05.2023, № 369/2 от 09.06.2023 подрядчик просил заказчика произвести списание начисленной неустойки в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783, в связи с выполнением работ в полном объеме и не превышении размера неустойки 5% от цены контракта. Ответчик требования подрядчика оставил без удовлетворения.

Не урегулировав спорные правоотношения в досудебном порядке, подрядчик обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Оценивая представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются положениями главы 37 ГК РФ и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (статья 709 ГК РФ). 

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ). 

Из пункта 1 статьи 711 ГК РФ следует, что возникновение обязанности заказчика по оплате подрядных работ обусловлено их надлежащим выполнением подрядчиком и передачей их результата заказчику. 

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 702 и статьи 708 ГК РФ начальный и конечный срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.

Пунктом 2 статьи 763 ГК РФ предусмотрено, что по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Пунктом 1 статьи 766 ГК РФ предусмотрено, что государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. 

Под государственным (муниципальным) контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, который заключается в порядке, предусмотренном ГК РФ и федеральными законами.

Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Законом № 44-ФЗ регулируются отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (пункт 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ). 

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ закреплено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В силу части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. При этом заказчик самостоятельно устанавливает срок действия контракта (при необходимости) исходя из особенностей осуществления закупки. 

В соответствии с частями 6 - 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Аналогичный порядок привлечения подрядчика к ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту предусмотрен и пунктами 9.6 - 9.7 контракта.

Согласно пункту 2 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 (далее – Правила № 783), списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением перечисленных в данных Правилах контрактов.

Подпунктом «а» пункта 3 Правил № 783 определено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» данного пункта.

При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) основанием для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 3 Правил № 783, - исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом (подпункт «а» пункта 5 Правил № 783).

Пункт 11 Правил № 783 устанавливает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 Правил № 783 распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 Правил № 783, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как условие, препятствующее списанию или предоставлению отсрочки уплаты неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам (определение Верховного Суда Российской Федерации по делу от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712).

Применительно к пункту 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017) списание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика, в связи с чем, суд обязан проверить соблюдение им требований указанной нормы. Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки.

Подобный правовой подход соответствует сложившейся судебной практике (определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2022 № 302-ЭС21-25561). 

С учетом тенденции развития действующих норм правового регулирования в области списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек, принимая во внимание, что Правила № 783 направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности путем финансовой поддержки поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при этом предоставление отсрочки уплаты неустоек и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек является одной из мер поддержки, к спорным правоотношениям применимы положения Правил № 783 (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 340, от 23.03.2022 № 439).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 340 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, которым утверждены Правила № 783: из названия документа исключены фразы «в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах», что означает снятие ограничений во времени для списания неустоек.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (статья 71 АПК РФ).

Судом установлен факт исполнения подрядчиком контракта в полном объеме, который заказчиком не оспаривается и не опровергается.

Проверив представленный заказчиком расчет неустойки, суд установил, что при расчете неверно определено количество дней просрочки (пропущен 1 день).

Суд самостоятельно произвел расчет неустойки, что составило с учетом исключаемого из расчета периода с 03.10.2022 по 24.10.2022 (согласно письму заказчика от 22.06.2023 № 1081) 1 415 164,88 руб. из расчета:

- по первому этапу 828 300,49 руб. (16 649 256 руб. х 199 дн. х 7,5% х 1/300);

- по второму этапу 369 217,91 руб. (8 439 266,40 руб. х 175 дн. х 7,5% х 1/300);

- по третьему этапу 80 969,24 руб. (2 089 528,80 руб. х 155 дн. х 7,5% х 1/300);

- по четвертому этапу 136 677,24 руб. (3 905 065,05 руб. х 140 дн. х 7,5% х 1/300).

При этом неустойка в размере 1 415 164,88 руб. не превышает 5% ни от цены контракта, ни от стоимости фактически выполненного подрядчиком объема работ.

Перечень способов защиты гражданских прав содержится в статье 12 ГК РФ, согласно которой защита гражданских прав может осуществляться путем признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. 

В соответствии со статьей 12 ГК РФ помимо способов защиты права, перечисленных в данной статье, защита гражданских прав может быть осуществлена также иными способами, предусмотренными законом. Использование таких способов защиты права допускается только при наличии прямого указания на это в законе. 

ГК РФ не ограничивает управомоченное лицо в выборе способа защиты нарушенного права, поскольку в силу статьи 9 ГК РФ лицо вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению. 

Избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и существу спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права. 

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, доводы и возражения сторон, суд приходит к выводу, что истец имеет право на обращение в суд за защитой нарушенного права с соответствующим иском по причине отказа заказчика в списании неустойки.

Поскольку обязательства по контракту были исполнены подрядчиком в полном объеме, размер начисленной подрядчику неустойки не превышает 5% от цены контракта, а также от цены фактически выполненного объема работ, заказчик должен был рассмотреть возможность списания начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Отсутствие подписанного между сторонами акта сверки не является основанием для удержания заказчиком денежных средств, подлежащих перечислению подрядчику за выполнение работ по контракту, неустойка в любом случае подлежит списанию в соответствии с Правилами № 783.

С учетом изложенных обстоятельств, заявленные истцом требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Иные доводы лиц, участвующих в деле, не нашедшие отражения в настоящем решении, не имеют существенного значения и не могут повлиять на правильность изложенных в нем выводов.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Пятигорск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Геострой» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...> 407 934 руб. 10 коп. долга, 33 074 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Обязать муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Пятигорск, списать неустойку, начисленную обществу с ограниченной ответственностью «Геострой» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва, за период с 18.10.2022 по 26.05.2023 в размере 1 407 934 руб. 10 коп. в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 783 от 04.07.2018.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                  Н.В. Демкова