Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-20208/2023

г. Хабаровск

10 июля 2024 года

Резолютивная  часть  решения  объявлена  02 июля 2024 

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем  О.Г. Лисичкиной

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СЭМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 446200, 

<

...> зд. 1К)

к публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115035, 

<

...>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ИНН: 

<

***>, адрес: 681007, 

<

...>)

о взыскании 8 006 202 руб. 98 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – конкурсного управляющего ФИО1 (после перерыва),

от ответчика -  ФИО2, действующей по доверенности от 15.11.2021 б/н,

от третьего лица - ФИО2, действующей по доверенности от 01.01.2024 №2

 

Общество с ограниченной ответственностью «СЭМ» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» о взыскании 8 006 202 руб. 98 коп. на основании договоров от 09.06.2017 № 3005/2017, от 15.08.2017 № 1005/2017, от 15.09.2017 № 1016Д, от 25.12.2017 № 4005/2017, 15.03.2018 № К/01, от 23.03.2018 № К/02, от 16.06.2018 № ГРС-01.

Определением от 05 февраля 2024 судом привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ».

Определением от 05 марта 2024 судом принято уменьшение размера иска до 7 074 583 руб. 70 коп., составляющих основной долг в размере 6 490 431 руб. 41 коп. на основании договоров от 09.06.2017 № 3005/2017, от 15.08.2017 № 1005/2017, от 15.09.2017 № 1016Д, от 25.12.2017 № 4005/2017, 15.03.2018 № К/01, от 23.03.2018 № К/02, от 16.06.2018 № ГРС-01, пени в размере 521 121 руб. 29 коп. за периоды с 32.12.2021 по 23.11.2023.

Ответчик,  ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» представил в суд приложения № 5 «Техническое задание» к договорам от 09.06.2017 № 3005/2017, от 15.08.2017 № 1005/2017.

Определением от 26 марта 2024 судом  заявление публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» о выделении требований в отдельное производство удовлетворено.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СЭМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 446200, 

<

...> зд. 1К) к публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115035, 

<

...>) о взыскании 4 071 352 руб. 79 коп., составляющих по договору от 09.06.2017 № 3005/2017 основной долг в размере 2 087 951 руб. 42 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 127 365 руб. 02 коп., по договору от 15.08.2017 № 1005/2017 основной долг в размере 1 749 327 руб. 39 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 106 708 руб. 96 коп. выделены в отдельное производство, присвоен № А73-4847/2024.

Определением от 26 марта 2024 судом   дело № А73-4847/2024 передано на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Исковые требования по делу № А73-20208/2023 составили: взыскание 3 934 850 руб. 19 коп., составляющих по договору от 15.09.2017 № 1016Д основной долг в размере 1 137 166 руб. 28 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 69 367 руб. 13 коп., по договору от 25.12.2017 № 4005/2017 основной долг в размере 936 044 руб. 42 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  69 044 руб. 42 коп., по договору от 15.03.2018 № К/01 основной долг в размере 245 872 руб. 35 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 33 476 руб. 32 коп., по договору от 23.03.2018 № К/02 основной долг в размере 38 687 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 268 руб. 32 коп., по договору  от 16.06.2018 № ГРС-01 основной долг в размере 1 231 426 руб. 97 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 167 693 руб. 36 коп.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании 19.06.2024 объявлен перерыв до 16 часов 00 минут 02.07.2024.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования, просил взыскать 2 940 199 руб. 91 коп., составляющих по договору от 15.09.2017 № 1016Д основной долг в размере 1 137 166 руб. 28 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 69 367 руб. 13 коп., по договору от 25.12.2017 № 4005/2017 проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  11 242 руб. 18 коп., по договору от 15.03.2018 № К/01 основной долг в размере 245 872 руб. 35 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 33 476 руб. 32 коп., по договору от 23.03.2018 № К/02 основной долг в размере 38 687 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 268 руб. 32 коп., по договору  от 16.06.2018 № ГРС-01 основной долг в размере 1 231 426 руб. 97 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 167 693 руб. 36 коп.

Уменьшение размера иска судом принимается, так как данное распорядительное действие закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших на основании договоров от 15.09.2017 № 1016Д, от 25.12.2017 № 4005/2017, 15.03.2018 № К/01, от 23.03.2018 № К/02, от 16.06.2018 № ГРС-01, наличие основного долга в размере 2 653 152 руб. 60 коп., расторжение договоров от 15.09.2017 № 1016Д, от 25.12.2017 № 4005/2017, 15.03.2018 № К/01, от 23.03.2018 № К/02 по соглашению сторон, право на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 287 047 руб. 31 коп. за периоды с 01.01.2022 по 23.11.2023.

Ответчик, как следует из отзыва на исковое заявление, объяснений представителя в судебном заседании, возражал, указал на то, что требования о взыскании гарантийного удержания заявлено преждевременно, поскольку объект еще продолжает строиться, акт о введении объекта в эксплуатацию отсутствует, акт формы КС14 не подписан, срок выплаты гарантийного удержания не наступил.

Третье лицо, как следует из объяснений представителя в судебном заседании, возражало, указало на то, что требования о взыскании гарантийного удержания заявлено преждевременно.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

15.09.2017 между публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», заказчик и общества с ограниченной ответственностью «СЭМ», подрядчик, заключен договор подряда №1016Д, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Трансформаторные подстанции. Реконструкция трансформаторных подстанция ТП-10 и ТП-16», включая пуско-наладочные работы, в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, цена договора, в соответствии с расчетом цены договора (приложение №2) не превысит 221 040 734 руб. 56 коп., в т.ч. НДС (18%) 33 718 078 руб. 15 коп.

В соответствии с пунктом 4.1. договора, заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ в порядке, установленном ст. 6 договора.

Заказчик производит гарантийное удержание в размере 10% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2. договора (пункт 4.2. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком не позднее 30 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии с ст. 6 договора актов сдачи-приемки (пункт 4.3. договора).

В соответствии с пунктом 5.1. договора, установлены календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ – 01.10.2017, срок окончания выполнения работ – 31.12.2018.

Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графика производства работ (приложение №4) по законченным этапам и оперативному графику производства работ.

В соответствии с пунктом 6.1.1. договора, приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам работ по актам формы КС-2, КС-3. Этапность работ определяется сторонами в приложении №4.

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты утверждения акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) (пункт 22.3. договора).

Пунктом 27.8. договора установлено, что при расторжении договора по любому основанию заказчик уплачивает подрядчику только стоимость фактически выполненных и принятых работ, при этом убытки возмещению не подлежат.

30.04.2021 договор от 15.09.2017 №1016Д расторгнут на основании соглашения б/н, которое вступило в силу 30.04.2021.

Указанным соглашением сторонами признана задолженность заказчика перед подрядчиком в размере  1 137 166 руб. 28 коп.

25.12.2017 между публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», заказчик и общества с ограниченной ответственностью «СЭМ», подрядчик, заключен договор подряда № 4005/2017, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ Комплекса гидрокрекинга. ГПП 110/6 инв.№ 010097. Реконструкция» (3 этап)» в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, цена договора, в соответствии с расчетом цены договора (приложение №2) не превысит 47 976 933 руб. 78 коп., в т.ч. НДС (18%) 7 318 515 руб. 31 коп.

В соответствии с пунктом 4.1. договора, заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ в порядке установленном ст. 6 договора.

Заказчик производит гарантийное удержание в размере 10% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2. договора (пункт 4.2. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком не позднее 30 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии с ст. 6 договора актов сдачи-приемки (пункт 4.4. договора).

В соответствии с пунктом 5.1. договора, установлены календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ – февраль 2018, срок окончания выполнения работ – август 2019.

Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графика производства работ (приложение №4) по законченным этапам и оперативному графику производства работ.

В соответствии с пунктом 6.1.1. договора, приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам работ по актам формы КС-2, КС-3. Этапность работ определяется сторонами в приложении №4.

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты утверждения акта приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11) и  акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) (пункт 22.3. договора).

Пунктом 27.8. договора установлено, что при расторжении договора по любому основанию заказчик уплачивает подрядчику только стоимость фактически выполненных и принятых работ, при этом убытки возмещению не подлежат.

28.02.2021 договор от 25.12.2017 № 4005/2017 расторгнут на основании соглашения б/н, которое вступило в силу 28.02.2021.

Указанным соглашением сторонами признана задолженность заказчика перед подрядчиком в размере  936 848 руб. 04 коп. Данная сумма будет выплачена подрядчику по истечению гарантийного срока (24 месяца с даты расторжения договора №4005/2017 №25.12.2017).

Сумма гарантийных удержаний по договору от 25.12.2017 № 4005/2017 оплачена ответчиком в полном объеме 27.04.2023, что подтверждается материалами дела (платежные поручения от 27.04.2023 №№ 147986, 147985, 147987, 147988) и истцом не оспаривается.

Объект введен в эксплуатацию.

15.03.2018 между публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», заказчик и общества с ограниченной ответственностью «СЭМ», подрядчик, заключен договор подряда № К/01, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Участок РМЦ с АБК (1 этап)» в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, цена договора, в соответствии с расчетом цены договора (приложение №2) не превысит 145 047 961 руб. 29 коп., в т.ч. НДС (18%) 22 125 960 руб. 20 коп.

В соответствии с пунктом 4.1. договора, заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ в порядке установленном ст. 6 договора.

Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2. договора (пункт 4.2. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 15, но не позднее 30 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии с ст. 6 договора актов сдачи-приемки (пункт 4.4. договора).

В соответствии с пунктом 5.1. договора, установлены календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ – 01.05.2018, срок окончания выполнения работ – 30.03.2019.

Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графика производства работ (приложение №4) по законченным этапам и оперативному графику производства работ.

В соответствии с пунктом 6.1.1. договора, приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам работ по актам формы КС-2, КС-3. Этапность работ определяется сторонами в приложении №4.

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты утверждения акта приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11) и  акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) (пункт 22.3. договора).

Пунктом 27.8. договора установлено, что при расторжении договора по любому основанию заказчик уплачивает подрядчику только стоимость фактически выполненных и принятых работ, при этом убытки возмещению не подлежат.

31.12.2019 договор от 15.03.2018 № К/01 расторгнут на основании соглашения б/н, которое вступило в силу 12.03.2020 (с момента подписания уполномоченными представителями сторон).

Указанным соглашением сторонами признана задолженность заказчика перед подрядчиком в размере  245 872 руб. 35 коп.

23.03.2018 между публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», заказчик и общества с ограниченной ответственностью «СЭМ», подрядчик, заключен договор подряда № К/02, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ Комплекса гидрокрекинга. Участок РМЦ с АБК» (2 этап)» в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, цена договора, в соответствии с расчетом цены договора (приложение №2) не превысит 373 716 554 руб. 87 коп., в т.ч. НДС (18%) 57 007 610 руб. 07 коп.

В соответствии с пунктом 4.1. договора, заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ в порядке установленном ст. 6 договора.

Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2. договора (пункт 4.2. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 15, но не позднее 30 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии с ст. 6 договора актов сдачи-приемки (пункт 4.4. договора).

В соответствии с пунктом 5.1. договора, установлены календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ – 01.05.2018, срок окончания выполнения работ – 31.03.2019.

Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графика производства работ (приложение №4) по законченным этапам и оперативному графику производства работ.

В соответствии с пунктом 6.1.1. договора, приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам работ по актам формы КС-2, КС-3. Этапность работ определяется сторонами в приложении №4.

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты утверждения акта приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11) и  акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) (пункт 22.3. договора).

Пунктом 27.8. договора установлено, что при расторжении договора по любому основанию заказчик уплачивает подрядчику только стоимость фактически выполненных и принятых работ, при этом убытки возмещению не подлежат.

31.12.2019 договор от 23.03.2018 № К/02 расторгнут на основании соглашения б/н, которое вступило в силу 12.03.2020 (с момента подписания уполномоченными представителями сторон).

Указанным соглашением сторонами признана задолженность заказчика перед подрядчиком в размере  38 687 руб.

16.06.2018 между публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», заказчик и общества с ограниченной ответственностью «СЭМ», подрядчик, заключен договор подряда №ГРС-01, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Магистральный газопровод «Оха – Комсомольск-на-Амуре – отвод на Комсомольский НПЗ» в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1. договора, цена договора, в соответствии с расчетом стоимости объекта (приложение №2) не превысит 25 484 728 руб., в т.ч. НДС (18%) 3 887 500 руб. 88 коп.

В соответствии с пунктом 4.1. договора, заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ в порядке установленном ст. 6 договора.

Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2. договора (пункт 4.2. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 15, но не позднее 30 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии с ст. 6 договора актов сдачи-приемки (пункт 4.3. договора).

В соответствии с пунктом 5.1. договора, установлены календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ – 01.07.2018, срок окончания выполнения работ – 31.07.2018.

Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графика производства работ (приложение №4) по законченным этапам и оперативному графику производства работ.

В соответствии с пунктом 6.1.1. договора, приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам работ по актам формы КС-2, КС-3. Этапность работ определяется сторонами в приложении №4.

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты утверждения акта приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11)/акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) (пункт 22.3. договора).

Подрядчиком выполнены работы на сумму 24 628 539 руб. 45 коп., что подтверждается справками формы КС-3, актами формы КС-2 за периоды с 30.07.2018  по 30.10.2019, подписанными сторонами.

Из акта сверки взаимных расчетов за периоды январь 2018 – декабрь 2019 по договору от 16.06.2018 № ГРС-01, следует, что на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО «СЭМ» составляет 1 231 426 руб. 97 коп.

Истец и ответчик не оспаривают размер основного долга.

Истцом ответчику направлена претензия от 09.08.2023 б/н с требованием оплаты задолженности по спорным договорам.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращенияистца в арбитражный суд с настоящим иском.

Правоотношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 АПК РФ является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Оценив и исследовав представленные доказательства, суд установил, наличие обязанности по выплате гарантийного обязательства в размере 2 653 152 руб. 60 коп.

Доводы ответчика о преждевременности обращения с требованием о взыскании гарантийного удержания судом отклоняется ввиду следующего.

Судом установлено, что договор от 15.09.2019 № 1016Д расторгнут 30.04.2021 соглашением от 30.04.2021, договор от 15.03.2018 № К/01 расторгнут 12.03.2020 соглашением от 31.12.2019, договор от 23.03.2018 № К/02 расторгнут 12.03.2020 соглашением от 31.12.2019.

В соответствии с пунктом 6.1.1. договоров, приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам работ по актам формы КС-2, КС-3. Этапность работ определяется сторонами в приложении №4.

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты утверждения акта приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11)/акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) (пункт 22.3. договора).

Судом установлено, что с момента расторжения договоров от 15.09.2017 № 1016Д, от 25.12.2017 № 4005/2017, 15.03.2018 № К/01, от 23.03.2018 № К/02 и сдачи результатов работ заказчику прошло более 24 месяцев.

Работы по спорным договорам подрядчиком выполнены и приняты заказчиком без замечаний, что ответчиком не оспаривается.

С момента передачи результата работ по отдельным спорным договорам прошло более 5 лет.

До настоящего времени требований об устранении дефектов от заказчика не заявлено.

При таких обстоятельствах оснований для невыплаты суммы гарантийного удержания у ответчика не имеется.

Возникновение у истца права на получение основного долга в виде гарантийного удержания в данном случае зависит исключительно от действий третьих лиц, в том числе ответчика как заказчика строительства.

С учетом того, что с момента расторжения договора с ответчиком и до обращения с иском в суд прошло более двух лет, обязанность по выплате гарантийного удержания следует признать наступившей, в том числе по договору от 16.06.2018 № ГРС-01, поскольку с момента передачи результата работ и принятия их заказчиком без замечаний прошло также боле двух лет.

Исковое требование истца о взыскании основного долга подлежит удовлетворению в размере 2 653 152 руб. 60 коп.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 287 047 руб. 31 коп. за периоды с 01.01.2022 по 23.11.2023.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведен судом по договорам от  15.09.2017 № 1016Д, от 25.12.2017 № 4005/2017, 15.03.2018 № К/01, 23.03.2018 № К/02, 16.06.2018 № ГРС-01, исходя из количества дней просрочки  (периоды начисления с 01.01.2022 по 23.11.2023, за исключением периода моратория), суммы основного долга,  ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующей периоды, составляет 287 047 руб. 31 коп.

Исковое требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в размере 287 047 руб. 31 коп.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 37 701 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная истцом при обращении с исковым заявлением в суд государственная пошлина в размере 22 435 руб. подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Взыскать с публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115035, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СЭМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 446200, 

<

...> зд. 1К) 2 940 199 руб. 91 коп., составляющих основной долг в размере 2 653 152 руб. 60 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 287 047 руб. 31 коп., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере  37 701 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СЭМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 446200, 

<

...> зд. 1К) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 22 435 руб., перечисленную платежным поручением от 27.11.2023 № 3.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

    Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

    Судья                                                                                                               Л.А. Збарацкая