Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-10470/2023

20 октября 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Горобчук Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению казенного  учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Авалон» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) об обязании  устранить недостатки и о взыскании 5 000 руб.,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора,  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» (ИНН 

<

***>),  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры «Управление капитального строительства» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Авалон» в течение тридцати  рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно  произвести необходимые работы по устранению недостатков, допущенных при  выполнении работ в рамках государственного контракта от 09.08.2022 № 057/08.22 на  объекте «Фельдшерско- акушерский пункт» д. Ягурьях Ханты-Мансийского автономного  округа- Югры», а именно:  

 № 

Наименование работ 

Ед. 

Устранение замечания  

п/п 

измерения  

1 

Входная группа 

1 шт. 

Покрасить металлоконструкции  

(покрытие-просечка имеет следы 

ржавчины) 

2 

Электрощитовая 

Помещение № 

 Уложить кабеля в общий лоток.  

10 

Завершить пусконаладочные работы  

(ПНР). 

3 

Внутреннее электроснабжение 

система  

Заделать проходы кабеля через стены и 

перекрытия, закончить 

пусконаладочные работы (ПНР).  

4 

Электроосвещение наружное 

система  

Закончить пусконаладочные работы  

(ПНР). 

5 

Монтаж москитных сеток на окнах 

5 шт. 

Установить москитные сетки т на  

оконных проемах. 

6 

Внутренние двери и окна,  

Отрегулировать двери и замки, окна.  

замечания по зданию 

7 

Внутренняя вентиляция  

система  

Закончить пусконаладочные работы  

(ПНР), система в аварийном  

состоянии, при устройстве вентиляции 

нарушена герметичность кровли,  

заделать места проходов воздуховодов 

и питающих кабелей через 

перекрытия и стены здания.  

8 

Сантехприборы 

1 шт. 

Установить сливной бачок, который  

соответствует установленному  

унитазу. 

9 

Дверь на фронтоне здания  

1 шт. 

Установить на двери запирающее  

устройство. 

10  

Ограждение территории  

5 секций  

Покрасить стойки, установить  

заглушки. 

11  

Газонное озеленение 

330 м2  

Не окончено 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Авалон» в пользу  

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление  капитального строительства» 5 000 руб. штрафа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Авалон» в доход  федерального бюджета 8 000 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной  жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд  кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с  уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья Н.А. Горобчук