АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-5691/2025 

г.Нижний Новгород 08 октября 2025 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-99), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шишкиным А.В.,   

руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок не позднее двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 521095803 от 12.05.2022, заключенный с индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), а именно:  

10.1. Запроектировать и построить СТП — 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 25 кВА. На вводе 10 кВ установить вентильные разрядники или ОПН. Тип ТП определить проектом.  

10.2. Выполнить реконструкцию ЛЭП — 1204 ПС «Дальнее Константиново» в части монтажа ответвительной арматуры и ответвления на опоре № 177 (объем реконструкции уточнить при проектировании).  

10.3. Запроектировать и построить участок ВЛ — 10 кВ от опоры № 177 ЛЭП - 1204 ПС «Дальнее Константиново» до вновь проектируемой ТП. Строительство выполнить проводом марки СИП 3 1х70 кв.мм ориентировочной протяженностью 0,760 км.  

10.4. Запроектировать и построить участок ВЛ 0,4 кВ от вновь построенной ТП до границ участка заявителя. Строительство выполнить проводом марки СИП 2 4х50 кв.мм ориентировочной протяженностью 0,010 км.  

10.5. Для расчетного учета электрической энергии запроектировать и установить на границе балансовой принадлежности узел учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии прямого включения.  

10.6. Установить после прибора учета коммутационный аппарат, обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго». 10.7. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 29 886 руб. 79 коп. неустойки.  

В случае неисполнения решения суда взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  

пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в следующем размере:  

- с 1 по 30 день неисполнения судебного акта - 500 руб. за каждый день просрочки,  

- начиная с 31 дня неисполнения судебного акта - 1 000 руб. за каждый день просрочки.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 390 руб. 60 коп. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение Арбитражного суда Нижегородской области может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Решение Арбитражного суда Нижегородской области может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба, кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Нижегородской области.  

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение в полном объеме будет изготовлено в течение десяти дней. При этом дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.  

Судья Е.В.Белянина