АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Дело №А27-24000/2024

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

именем Российской Федерации

21 июля 2025 г.                                                                                                       г. Кемерово

Резолютивная часть объявлена 16 июля 2025 г.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе 

судьи

Ерохина Я.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем 

ФИО1,  

            рассмотрев в открытом судебном заседании

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (ИНН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>)

об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Региональная энергетическая комиссия Кузбасса (ИНН 

<

***>)

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (далее ООО «Горэлектросеть», истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковых заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее ПАО «Россети Сибирь», ответчик) об урегулировании разногласий при заключении договора об осуществлении технологического присоединения №20.4200.347.23.

Судом в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса (далее РЭК Кузбасса).

Стороны надлежащим образом извещены, явку представителей не обеспечили. Суд, руководствуясь положениями статьи 156 АПК РФ, провел судебное заседание в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав представленные доказательства, суд установил следующее.

Согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Кемеровской области от 11.12.2023 по делу № А27-17793/2023 суд обязал ПАО «Россети Сибирь» в течение 5 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу направить в адрес ООО «Горэлектросеть» проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия к нему в отношении объекта электросетевого хозяйства: КЛ-6кВ от РП-35 до ПС 110/6кВ Береговая, кабелем ААШв-10 (кадастровый номер: 42:30:0000000:5452), расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район.

Во исполнение вышеуказанного решения суда 04.10.2024 ПАО «Россети Сибирь» направило в адрес ООО «Горэлектросеть» проект договора об осуществлении технологического присоединения №20.4200.347.23.

17.10.2024 ООО «Горэлектросеть» направило в адрес ПАО «Россети Сибирь» протокол разногласий. В связи с отсутствие ответа на протокол разногласий истец обратился в суд с настоящим иском.

В ходе судебного разбирательства у сторон имеются разногласия относительно содержания положений пунктов 1.3, 2.1.1, 2.2.5, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.15, 2.3.16, 2.3.17, 2.4.2, 2.4.3, 3.1, 3.2, 4.4, 6.2, пунктов 1.2, 3.1, 3.2, 3.4 Приложения № 1.

В соответствии со статьей 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 ГК РФ либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно части 1 статьи 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила № 861).

Согласно пункту 9 Правил № 861 договор технологического присоединения к электрическим сетям является публичным.

Спорные положения договора подлежат изложению в следующей редакции.

Пункт 1.3 Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет 1 год с даты заключения договора.

Утверждение ответчика о том, что срок для осуществления мероприятий по технологическому присоединению в отношении объекта истца составляет 2 года несостоятелен ввиду того, что данный срок установлен пунктом 16 Правил № 861 только для двух случаев, а именно:

- для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии;

- для целей вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации.

Оба этих основания не относятся к случаю подключения объекта, принадлежащего истцу. Обратного со стороны ответчика представлено не было, в том числе наличие необходимости включения каких-либо работ в инвестиционные программы смежных сетевых организаций.

Указанное соответствует позиции Седьмого арбитражного апелляционного суда, изложенной в постановлении от 16.05.2025 по делу № А27-12960/2024.

Пункт. 2.1.1 Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору.

Суд исходит из того, что позиция ПАО «Россети Сибирь», согласно которой оно обязано исполнить свои обязательства только при выполнении ООО «Горэлектросеть» своих обязанностей, не основано на Правилах № 861. При этом ПАО «Россети Сибирь» не конкретизирует, без совершения каких именно действий со стороны ООО «Горэлектросеть» у ПАО «Россети Сибирь» будет отсутствовать возможность исполнить настоящий договор.

Пункт 2.2.5 подлежит исключению. Суд исходит из того, что предусмотренные данным пунктом случаи, при которых ПАО «Россети Сибирь» не будет осуществлять технологическое присоединение, в частности в случае несвоевременного внесения платы ООО «Горэлектросеть» за технологическое присоединение, не основано на положениях Правил № 861.

Пункт 2.3.3 подлежит исключению. Предложенная ПАО «Россети Сибирь» редакция не конкретизирует, какие именно сведения необходимо предоставить. Суд исходит из того, что сведения, которые необходимо представить в ходе технологического присоединения, регламентированы нормами права, в том числе Правилами № 861. Таким образом, при необходимости получения сведений, предусмотренных нормами права, они будут предоставлены на основании данных норм права.

Пункт 2.3.4 подлежит исключению. Суд исходит из того, что заявка подана на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства (кабельная линия, кадастровый номер: 42:30:0000000:5452, заявка представлена в электронном виде 26.05.2025), расположенных по адресу: Российская Федерация, Кемеровская-Кузбасс область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район, в границах кадастровых кварталов 42:30:0301067, 42:30:0301066. 

Объекты кабельная линия и РП-6 построены до обращения ООО «Горэлектросеть» с заявкой, что подтверждается выписками из ЕГРН и разрешением на допуск в эксплуатацию, выданным Сибирским управлением Ростехнадзора (представлены в электронном виде 26.05.2025). С учетом изложенного ПАО «Россети Сибирь» не конкретизировано какую именно необходимо разработать проектную документацию (фактически предложено разработать проектную документацию по строительству уже существующих объектов электросетевого хозяйства).

Пункт 2.3.5 На дату заключения настоящего Договора и ТУ проектирование и строительство объекта электросетевого хозяйства завершено Заявителем. Заявитель направляет уведомление об исполнении ТУ с его стороны (с целью предоставления технической документации, предусмотренной п.п. «а», «в», «г» п. 85 Правил технологического присоединения) способом, подтверждающим отправку и получение уведомления.

Суд исходит из того, что объекты кабельная линия и РП-6 на данный момент построены, что подтверждается выписками из ЕГРН и разрешением на допуск в эксплуатацию, выданным Сибирским управлением Ростехнадзора (представлены в электронном виде 26.05.2025).

Пункт 2.3.6 подлежит исключению. Предложения ПАО «Россети Сибирь» редакция не конкретизирована. Суд исходит из того, что мероприятия, которые необходимо осуществить в ходе технологического присоединения регламентированы нормами права. Таким образом, в случае неуказания конкретных действий в данном договоре будут действовать положения, регламентированные нормами права, в том числе Правилами № 861. 

2.3.7. Принять участие в техническом осмотре (обследовании) должностным лицом уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора при участии Сетевой организации, а также представителей АО «СО ЕЭС», в согласованный Сторонами срок.

Суд учитывает, что Правилами № 861 не предусмотрена обязанность заявителя организовать участие должностных лиц уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора в техническом осмотре объектов.

2.3.10. Надлежащим образом и своевременно исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, в том числе своевременно вносить промежуточные платежи, предусмотренные п.3.2. настоящего Договора.

Суд исходит из того, что нормами права не предусмотрена для заявителя законная неустойка 0,25 % от размера стоимости технологического присоединения за нарушения срока внесения платы. Таким образом, при наличии возражений со стороны ООО «Горэлектросеть» отсутствуют основания для установления неустойки непредусмотренной нормами права.

2.3.11. В течение 5 (пяти) дней со дня получения, подписать представленные Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического присоединения, либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую организацию.

Срок подписания акта об осуществлении технологического присоединения не регламентирован нормами права. С учетом необходимости проверки его содержания техническими специалистами, суд считает возможным определить срок 5 дней.

Пункт 2.3.15. подлежит исключению. Суд исходит из того, что предложенная ПАО «Россети Сибирь» редакция не предусмотрена Правилами № 861. Соответственно при наличии возражений со стороны ООО «Горэлектросеть» данное положение не подлежит включению в договор.

Пункт 2.3.16. подлежит исключению. Суд исходит из того, что предложенная ПАО «Россети Сибирь» редакция не предусмотрена Правилами № 861. Соответственно при наличии возражений со стороны ООО «Горэлектросеть» данное положение не подлежит включению в договор.

Пункт 2.3.17. подлежит исключению. Суд исходит из того, что предложенная ПАО «Россети Сибирь» редакция не предусмотрена Правилами № 861. Соответственно при наличии возражений со стороны ООО «Горэлектросеть» данное положение не подлежит включению в договор.

2.4.2 Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору до момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

Суд исходит из того, что нормами права не предусмотрено, что заявитель может отказаться от осуществления технологического присоединения, только в случае предварительного возмещения сетевой организации понесенных затрат в связи с исполнением договора. 

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Суд исходит из того, что заявитель вправе отказаться от осуществления технологического присоединения независимо от того нарушены сетевой организацией сроки технологического присоединения или нет.

3.1. Размер платы за технологическое присоединение составляет 1 675 963,47 руб., в том числе НДС.

Суд исходит из того, что стоимость технологического присоединения к электрическим сетям подлежит государственному регулированию. Стороны с учетом позиции РЭК Кузбасса, изложенной в пояснения от 20.02.2025 (представлены в электронном виде) представили расчеты (расчет истца представлен в электронном виде 04.06.2025, расчет ответчика представлен в электронном виде 27.05.2025). Расчеты сторон различаются, поскольку истец считает, что должны применяться стандартизированные ставки, действовавшие на момент подачи заявки (2023 год), исходя из срока технологического присоединения 1 года. ПАО «Россети Сибирь» считает, что должны применяться стандартизированные ставки, действующие на момент заключения договора (2025 год), исходя из срока технологического присоединения 2 года.

Суд считает, что настоящий договор считается заключенным с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 6.4 настоящего договора), соответственно должны применяться стандартизированные ставки 2025 года, при этом согласно пункт 1.3 настоящего договора срок технологического присоединения 1 год. Соответственно суд принимает расчет платы в размере 1 675 963,47 руб., в том числе НДС (представлен ПАО «Россети Сибирь» в электронном виде 27.05.2025, приложение 3). ООО «Горэлектросеть» арифметически данный расчет не оспорило.

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 60 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора.

При этом суд считает возможным применить положения пункта 16(4) Правил № 861.

Пункт 4.4 подлежит исключению.

Суд исходит из того, что нормами права не предусмотрена для заявителя законная неустойка 0,25 % от размера стоимости технологического присоединения за нарушения срока внесения платы. Таким образом, при наличии возражений со стороны ООО «Горэлектросеть» отсутствуют основания для установления неустойки непредусмотренной нормами права.

6.2. Акт об осуществлении технологического присоединения, мотивированные отказы от их подписания, а также уведомление об отказе от технологического присоединения направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

Из содержания данного пункта исключен «акт понесенных расходов». При этом суд исходит из того, что составление данного акта не предусмотрено Правилами № 861, также составление данного акта не предусмотрено настоящим договором.

6.4 Также суд считает необходимым изложить пункт 6.4 в следующей редакции. Настоящий договор считается заключенным с момента вступления в законную силу решения суда.

При этом суд учитывает положения пункта 4 статьи 445 ГК РФ.

Пункт 1.2 Приложения № 1 подлежит исключению, исходя из следующего.

Согласно проекту технических условий (представлен в электронном виде 13.05.2025) пунктом 1.2 предусмотрено Строительство РП 6 кВ № 35.

Вместе с тем РП-6 кВ № 35 построено до обращения ООО «Горэлектросеть» с заявкой и участвует в процессе передачи электроэнергии, что подтверждается выпиской из ЕГРН, актом разграничения балансовой принадлежности, принципиальной схемой, договором о порядке ликвидации аварий (представлены в электронном виде 26.05.2025).

Пункты 3.1, 3.2 Приложения № 1 подлежит изложению в редакции ООО «Горэлектросеть», исходя из следующего.

ПАО «Россети Сибирь» в технических условиях предусматривает строительство ООО «Горэлектросеть» двух ЛЭП 6 кВ и РП-6 кВ № 35

Вместе с тем объекты кабельная линия и РП-6 построены ООО «Горэлектросеть» до подачи заявки, что подтверждается выписками из ЕГРН и разрешением на допуск в эксплуатацию, выданным Сибирским управлением Ростехнадзора, актом разграничения балансовой принадлежности, принципиальной схемой, договором о порядке ликвидации аварий (представлены в электронном виде 26.05.2025). Таким образом, в пунктах 1.1 и 1.2 ПАО «Россети Сибирь» возлагает на ООО «Горэлектросеть» обязанность построить уже существующие объекты с заявкой о подключении которых и обратилось ООО «Горэлектросеть».

Пунктом 2.2 на ООО «Горэлектросеть» возложена обзяанность Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6 кВ, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

На запрос суда Сибирское управление Ростехнадзора сообщило, что при выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию кабельной линии Сибирским управлением Ростехнадзора проверено наличие микропроцессорных устройств РЗА (ответ размещен в электронном виде 23.06.2025). Таким образом, данное требование выполнено ООО «Горэлектросеть» до обращения с заявкой на технологическое присоединение.

Пунктом 2.4. на ООО «Горэлектросеть» возложена обязанность оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа привозникновении аварийных электроэнергетических режимов.

Суд исходит из того, что в заявке на осуществление технологического присоединения указана вторая категория надежности (заявка представлена в электронном виде 26.05.2025), что не предполагает наличие автономных источников питания. Кроме того, из ответа на запрос суда Сибирского управления Ростехнадзора следует, что проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 2.4., в данном случае не предусмотрено Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070.

Пункт 3.4 Приложения № 1 изложить в следующей редакции. Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» и Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. После проведения проверки получить от ПАО «Россети Сибирь» акт о выполнении настоящих технических условий, согласованный Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ

При этом суд исходит из положений подпункта «д» пункта 18 Правил № 861.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Исходя из установленной Налоговым кодексом РФ твердой суммы государственной пошлины, предусмотренной к уплате за требование о разрешении преддоговорного спора (независимо от количества спорных пунктов), признания судом обоснованными, по отдельным пунктам, позиции истца, расходы по оплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика (статья 110 АПК РФ). Отнесение уплаты государственной пошлины на ответчика в полном объеме не противоречит положениям пунктов 12, 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», абзацу 2 пункта 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично.

Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (ИНН 

<

***>) и публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) при заключении договора об осуществлении технологического присоединения №20.4200.347.23.

Изложить договор №20.4200.347.23 в следующей редакции:

«ДОГОВОР № 20.4200.347.23

об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям

г. Кемерово                                                                                    «___» _____________ 20___г.

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ПАО «Россети Сибирь»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице заместителя директора  по реализации и развитию услуг филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» ФИО2, действующего (-ей) на основании доверенности № 42/48 от 11.04.2024г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (ООО «ГЭС») (ОГРН 

<

***>), в лице генерального директора ООО «Управляющая компания «НовокузнецкЭнерго» (ООО «УК «НовокузнецкЭнерго») ФИО3, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ГЭС» Управляющей компании - ООО «УК «НовокузнецкЭнерго» от 20.05.2011 года № НЭ-6-11/ГЭС-71-11, именуемый (-ое, -ая) в дальнейшем  «Заявитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1.         Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя (далее – технологическое присоединение) объекта «Объекты электросетевого хозяйства» (кадастровый номер: 42:30:0000000:5452), расположенных по адресу: Российская Федерация, Кемеровская-Кузбасс область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район, в границах кадастровых кварталов 42:30:0301067, 42:30:0301066. со следующими характеристиками: 

?      максимальная мощность 8000 кВт; 

?      категория надежности вторая; 

?      класс напряжения в точках присоединения 6,00 кВ;

?      максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства).

Заявитель обязуется оплатить расходы (плату) на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (далее - ТУ) (приложение 1 к настоящему Договору).

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет 1 год с даты заключения договора.

1.4. Технические условия подлежат согласованию с Системным оператором, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего Договора.

1.5. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, Сетевая организация -до границ участка Заявителя.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная в документах о технологическом присоединении к электрической сети соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть.

При осуществлении  технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя.

Порядок оформления Акта об осуществлении технологического присоединения устанавливается в соответствии с пунктами 2.1.6 и 2.3.11 настоящего Договора.

1.6. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению Стороны составляют Акт об осуществлении технологического присоединения.

1.7. Право собственности на имущество, необходимое для реализации Сетевой организацией комплекса мероприятий по настоящему Договору, приобретенное и построенное в рамках выполнения Сетевой организацией ТУ, приобретает Сетевая организация.

2.         Права и обязанности Сторон

2.1. Сетевая организация обязуется:

2.1.1. Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору.

2.1.2. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления от ТУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Заявителя согласовать частичное отступление от ТУ.

2.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ принять участие в проверке выполнения Заявителем ТУ с привлечением представителей АО «СО ЕЭС».

2.1.4. В согласованный Сторонами срок принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора.

2.1.5. Осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подача) напряжения и мощности с соблюдением срока, установленного пунктом 1.3 настоящего Договора.

2.1.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение уведомления оригинал Акта об осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации.

2.1.7. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя 2 (двух) подписанных экземпляров проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони рассмотреть, подписать и направить 1 (один) экземпляр акта Заявителю.

В случае несогласия Сетевой организации с представленным Заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони, такой проект акта подписывается Сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если Акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан Сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях Сетевой организации.

2.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения направить письмо в адрес Заявителя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы (заверенные копии первичных учетных документов: договоры, платежные документы, акты и т.д.).

2.2. Сетевая организация имеет право:

2.2.1. Проверять ход выполнения Заявителем ТУ.

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему договору. В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации своих мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

2.2.4. При невыполнении заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения при письменном обращении Заявителя продлить срок действия ТУ.

2.2.5. Исключен.

2.2.6. Обратиться в суд с иском о расторжении Договора в случае нарушения Заявителем установленного пунктом 1.3 срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору наступает  ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

2.3. Заявитель обязуется:

2.3.1. Принять к исполнению утвержденные ТУ.

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по настоящему договору.

2.3.3. Исключен.

2.3.4. Исключен.

2.3.5. На дату заключения настоящего Договора и ТУ проектирование и строительство объекта электросетевого хозяйства завершено Заявителем. Заявитель направляет уведомление об исполнении ТУ с его стороны (с целью предоставления технической документации, предусмотренной п.п. «а», «в», «г» п. 85 Правил технологического присоединения) способом, подтверждающим отправку и получение уведомления.

2.3.6. Исключен.

2.3.7. Принять участие в техническом осмотре (обследовании) должностным лицом уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора при участии Сетевой организации, а также представителей АО «СО ЕЭС», в согласованный Сторонами срок.

2.3.8. Исключен.

2.3.9. Исключен.

2.3.10. Надлежащим образом и своевременно исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, в том числе своевременно вносить промежуточные платежи, предусмотренные п.3.2. настоящего Договора.

2.3.11. В течение 5 (пяти) дней со дня получения, подписать представленные Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического присоединения, либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую организацию.

2.3.12. Обеспечить соответствие технических характеристик, присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) требованиям регламентов, стандартов и иных нормативно технических документов.

2.3.13. Выполнять обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.

2.3.14. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору и не позднее момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации известить Сетевую организацию об отказе от исполнения настоящего договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления.

2.3.15. Исключен.

2.3.16. Исключен.

2.3.17. Исключен.

2.4. Заявитель имеет право:

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления от ТУ, обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений.

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору до момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

3.         Размер платы по Договору и порядок оплаты

3.1. Размер платы за технологическое присоединение составляет 1 675 963,47 руб., в том числе НДС.

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 60 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора.

3.3. Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего договора.

3.4. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

3.5. Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной Стороны в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

4.         Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 1 2 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока  осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию Сетевой организации по решению суда

4.3. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

4.4. Исключен.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

4.6. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

4.7. В случае неурегулирования Сторонами условий по оплате понесенных Сетевой организацией расходов, возмещение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.         Разрешение споров

5.1 Стороны устанавливают, что все споры и разногласия, возникающие по поводу заключения, исполнения, изменения или прекращения настоящего договора, будут разрешаться путем проведения переговоров. Возможные претензии по договору должны быть рассмотрены Сторонами не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения.

5.2. Если согласие не будет достигнуто, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области (по месту нахождения филиала ПАО «Россети Сибирь»).

6.         Заключительные положения

6.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя не может превышать величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

В случае если величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, предусмотренная заявкой и настоящим Договором, превышает величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на объект капитального строительства на момент подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения, Сетевая организация указывает в нем величину максимальной  мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя в соответствии с проектной документацией на объект капитального строительства. В данном случае Сетевой организацией вносятся соответствующие изменения в настоящий Договор и ТУ посредством заключения дополнительного соглашения к Договору и подготовки изменений в ТУ (в части уменьшения максимальной мощности).

6.2. Акт об осуществлении технологического присоединения, мотивированные отказы от их подписания, а также уведомление об отказе от технологического присоединения направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.3. Все письма, акты и прочие документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены по электронной почте, указанной в разделе 8 Договора, с последующим обязательным направлением указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.4. Настоящий договор считается заключенным с момента вступления в законную силу решения суда.

6.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.7. Обязательства Сторон по осуществлению технологического присоединения считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о технологическом присоединении и фактического приема (подачи) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.9. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменениях реквизитов, организационно-правовой формы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

7.         Перечень приложений к Договору

Приложение № 1 - Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)» 

8.      Местонахождения, реквизиты Сторон

Сетевая организация: 

ПАО «Россети Сибирь» 

Юр. адрес: 660021, 

<

...> 

Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго - РЭС» 

Факт. адрес: 650099, 

<

...>, 

ИНН 

<

***> 

Банк получателя: Красноярское отделение № 8646 Сбербанка России 

Р/сч.: 40702810831000011698 

Корр.сч 30101810800000000627 

БИК 040407627 

Получатель платежа: ПАО «Россети Сибирь» 

Адрес электронной почты: 

«Keinfo@ke.rosseti-sib.ru»

Заявитель: 

ООО «ГЭС» 

Факт. адрес: 654007, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Пионерский, д. 42 

Юр. адрес: 630099, 

<

...> зд. 80, офис 627 

ИНН 

<

***> 

КПП 540601001 

ОГРН 

<

***>

Адрес электронной почты: 

«gorsety@yandex.ru»

Приложение№1 к договору об осуществлении

технологического присоединения

№ 20.4200.347.23 от «_____» ___________ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000544499

на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства ООО «ГЭС» к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь»

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от 13.03.2023 №11000650794 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от «____» ______________ 20___г № 20.4200.347.23 объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Российская Федерация, Кемеровская-Кузбасс область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район, в границах кадастровых кварталов 42:30:0301067, 42:30:0301066, Общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (ООО «ГЭС»), именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь». 

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения ПАО «Россети Сибирь» при условии согласования Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ и действительны в течение 3 (трех) лет. 

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства Заявителя с обеспечением электроснабжения потребителей максимальной мощностью энергопринимающих устройств 8,0 МВт, присоединенных к электрическим сетям Заявителя, по 2 (второй) категории надежности электроснабжения, 

с образованием после выполнения настоящих технических условий 2 (двух) точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности: 

Для нормального режима (все точки присоединения в работе): 

?   1 точка присоединения: проектируемая ЛЭП 6 кВ от ячейки ф-6-107-Резерв РУ 6 кВ ПС 110 кВ Береговая с максимальной мощностью 4,0 МВт; 

?   2 точка присоединения: проектируемая ЛЭП 6 кВ от ячейки ф-6-208-Резерв РУ 6 кВ ПС 110 кВ Береговая с максимальной мощностью 4,0 МВт. 

(указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

Послеаварийный режим (ремонтная схема): 

Схема 1: 

1 точка присоединения: проектируемая ЛЭП 6 кВ от ячейки ф-6-107-Резерв РУ 6 кВ ПС 110 кВ Береговая с максимальной мощностью 0 МВт (в отключенном состоянии); 

2 точка присоединения: проектируемая ЛЭП 6 кВ от ячейки ф-6-208-Резерв РУ 6 кВ ПС 110 кВ Береговая с максимальной мощностью 8,0 МВт. 

Схема 2: 

1 точка присоединения: проектируемая ЛЭП 6 кВ от ячейки ф-6-107-Резерв РУ 6 кВ ПС 110 кВ Береговая с максимальной мощностью 8,0 МВт; 

2 точка присоединения: проектируемая ЛЭП 6 кВ от ячейки ф-6-208-Резерв РУ 6 кВ ПС 110 кВ Береговая с максимальной мощностью 0 МВт (в отключенном состоянии). 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ)

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается) следующие мероприятия: 

1.1. Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ячеек ф-6-107-Резерв и ф-6-208-Резерв РУ 6 кВ ПС 110 кВ Береговая до РП-35. Параметры ЛЭП уточнить при проектировании. 

1.2. Исключен.

1.3. Реконструкцию ПС 110 кВ Береговая в части замены трансформаторов тока с номинальным первичным током 600 А в ячейках ф-6-107-Резерв и ф-6-208-Резерв РУ 6 кВ ПС 110 кВ Береговая на трансформаторы тока с номинальным первичным током не менее 800 А. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования уточнить при проектировании. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 и требованиям к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. 

2.2. Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6 кВ, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. 

2.3. Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: 

?      в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; 

?      точки учета согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»; 

?      обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. 

2.4. Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

3.1. На дату заключения настоящего Договора и ТУ строительство объекта электросетевого хозяйства Заявителем завершено.

3.2. ПАО «Россети Сибирь» выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4 (мероприятия по пунктам 1.1., 2.2 и 2.4 выполняются ПАО «Россети Сибирь» до границ земельного участка, на котором будут располагаться объекты Заявителя), включая разработку проектной и рабочей документации.

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц затраты на такие работы должны быть разделены по соответствующим объектам, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет ПАО «Россети Сибирь».

3.3. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ с корректировкой утвержденных технических условий. 

3.4. Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» и Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. После проведения проверки получить от ПАО «Россети Сибирь» акт о выполнении настоящих технических условий, согласованный Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ

Приложение. Пояснительная схема присоединения объектов электросетевого хозяйства Заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» на 1 л. в 1 экз.

Приложение

к техническим условиям на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства ООО «Горэлектросеть» к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь»

»

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (ИНН 

<

***>) 50 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                                                                                                          Я.Н. Ерохин