АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 29.09.2016, 299011, 

<

...> 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛТК Групп», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 24.12.2015, 295021, 

<

...>

о взыскании штрафа,

по встречному иску

Общества с ограниченной ответственностью «ЛТК Групп», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 24.12.2015, 295021, 

<

...> 

к Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 29.09.2016, 299011, 

<

...> 

о взыскании задолженности и штрафа, признании отказа от контракта недействительным,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, АО «ПСК Групп», ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, адрес: 195197, 

<

...>, корпус, 5, стр. 1, оф. 415 и ООО НТЦ «Геопроект», ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, адрес: 350089, 

<

...>,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя (далее – департамент) 14.06.2018 обратился в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛТК Групп» (далее – общество) о взыскании штрафа в размере 965171,92 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 107282,43 руб., неустойки в размере 751748,86 рублей.

Определением от 01.08.2018 принят к рассмотрению встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «ЛТК Групп» к Департаменту  транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о  взыскании 2207280,94 рублей задолженности, 1447757,89 рублей штрафа. 

К участию в деле привлечены третьи лица - АО «ПСК Групп» и ООО НТЦ «Геопроект».

Определением от 09.11.2018 по делу назначена судебная экспертиза, производство по делу приостановлено.

Определением от 15.01.2019 производство по делу возобновлено.

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле,  и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.   

Как видно из материалов дела, департамент (заказчик) и общество (подрядчик) заключили государственный контракт № 59 на выполнение капитального ремонта участка автомобильной дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, км.54- км-55 для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера - опасного природного явления (оползня), восстановления дорожного полотна на разрушенном участке с обеспечением устойчивости и возобновлением движения, а истец - принять и оплатить выполненные работы.

В соответствии с пунктом 4.1. контракта срок выполнения работ - с момента вступления в силу контракта по 01.09.2017, согласно приложению №2 «календарный график производства работ» к контракту.

В пункте 10.5 Контракта стороны установили, что в случае неисполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание штрафа в размере 965 171 рубль 93 копейки.

В соответствии с пунктом 3.6 контракта истец произвел авансирование части в размере 1 816 027 рублей 17 копеек.

Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 04.05.2018.

Требование истца от 04.04.2018 № 1436/33-03/2-20/18 об уплате штрафа и пени ответчик оставил без ответа.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Нарушение ответчиком договорных обязательств послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить в части.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛТК Групп», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 24.12.2015, 295021, 

<

...>, в пользу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 29.09.2016, 299011, 

<

...> рублей пени за просрочку исполнения обязательств и 965 171,92 рублей штрафа.

В удовлетворении первоначального иска в остальной части отказать.

Встречный иск удовлетворить в части.

Взыскать с Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 29.09.2016, 299011, 

<

...> в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «ЛТК Групп», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 24.12.2015, 295021, 

<

...> 207 280 рублей 94 копейки задолженности и 34 036 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

В удовлетворении требования о признании недействительным отказа от государственного контракта отказать. В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

В результате зачета встречных требований взыскать с Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 29.09.2016, 299011, 

<

...> в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «ЛТК Групп», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 24.12.2015, 295021, 

<

...>, денежную сумму в размере 524 396 рублей 16 копеек.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛТК Групп», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 24.12.2015, 295021, 

<

...>, в доход федерального бюджета 63 647 рублей государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.      

Судья 

А.Ю. Смоляков