Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-3519/2019

28 мая 2019 года

город Якутск

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СМП-27" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 203 621,11 руб.,

без вызова сторон.

Через канцелярию суда поступили ходатайство истца о приобщении дополнительных документов от 23.04.2019, отзыв ответчика от 24.04.2019 № 66, возражения истца на отзыв от 08.05.2019.

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщил документы в материалы дела.

Представленный истцом расчет пени произведен неверно по определению начала периода расчета неустойки.

Согласно п. 2 дополнительного соглашения № 1 от 10.12.2018 «несмотря на продление срока выполнения работ заказчик оставляет за собой право применять к подрядчику штрафные санкции, рассчитанные с даты первоначального срока выполнения работ по договору с 01.12.2018 по дату фактического выполнения работ».

Таким образом, начало периода расчета неустойки – 01.12.2018.

В соответствии с п. 8.5 договора при определении размера ключевой ставки банка России в целях исчисления неустойки принимается наибольшая ставка из действующих на дату выполнения работ (этапа работ) по договору или на дату фактического выполнения работ (этапа работ).

Согласно информации Центрального банка Российской Федерации наибольшая ставка из действующих на дату фактического выполнения работ (этапа работ) составляет 7,75% (с 17.12.2018).

Суд производит расчет неустойки по договору подряда № 6101029816 от 05.10.2018 за период с 01.12.2018 по 28.02.2019: 

5 370 227, 20 руб. * 90 дней * 7, 75% * 1/180 = 208 096, 30 рублей.

Поскольку применительно к статьям 8, 9, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не вправе выходить за пределы заявленных требований, в том числе в отношении их размера, требование подлежит удовлетворению в исчисленной истцом сумме.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки в размере 203 621,11 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СМП-27" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 06.02.2003, регистрирующий орган –инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, адрес (место нахождения): 620014, 

<

...>) в пользу Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 17.07.2002, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, 

<

...>) 203 621,11 руб. неустойки по договору подряда № 6101029816 от 05.10.2018 за период с 01.12.2018 по 28.02.2019, а также 7 072 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение

 подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

Судья

Семёнова У. Н.