Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А20-7510/2024

г. Нальчик

03 февраля 2025 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи Ю.Ж. Шокумова, при ведении протокола помощником судьи Шогенцуковой К.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Диск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нальчик,  

к государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нальчик,  

о признании недействительным отказа и обязании продлить срок исполнения государственного контракта  

третье лицо Министерство строительства и жилищного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Нальчик,  

в отсутствии лиц участвующих в деле, уведомленных должным образом о времени и месте судебного заседания  

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л :

1. Признать недействительным отказ государственного казенного учреждения  

Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строительства» в  

продлении сроков исполнения государственного контракта № 15 от 05.04.2023,  

выраженный в письме от 27.11.2024 № 03-502 как противоречащий положениям  

пункта 1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 (ред. от  

28.12.2024). 

2. Внести изменения в пункт 3.2 статьи 3 государственного контракта № 15 от  

05.04.2023, изложив его в следующей редакции «3.2. Работы по Контракту должны  

быть завершены до 28.03.2025 года». 

3. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течении месяца. 

Судья Ю.Ж. Шокумов