АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело  № А19-13811/2024

г. Иркутск

10 декабря 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2024 года. Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Швидко, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Д. Ширяевой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК"  (ОГ ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 660099, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, Д. 22/Д, ПОМЕЩ. 77) 

к ЗИМИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665390, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗИМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.5),

третьи лица: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665390, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗИМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.5), МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664022, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ИРКУТСК, УЛ.КРАСНЫХ МАДЬЯР, СТР. 41), ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 115088, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, УЛ. ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ, Д. 5),

о внесении изменений в муниципальные контракты,

при участии:

от истца: ФИО1 по доверенности; ФИО2 по доверенности;

от ответчика: ФИО3 по доверенности, 

от третьих лиц: от МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ФИО4 по доверенности (до перерыва);

от АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ": не явились, извещены;

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК"    обратилось в арбитражный суд к  ЗИМИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" с исковым заявлением о внесении изменений в муниципальные контракты № 3381401297022000007 от 19 сентября 2022, № 3381401297022000008   от 04.10.2022, № 3381401297023000009 от 29.05.2023.

Определением суда от 28.06.2024 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  Определением суда от 17.09.2024 в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ».

До рассмотрения дела по существу и принятия решения истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнял исковые требования, окончательно определив и требования в следующем виде:

I. Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297022000007 от 19 сентября 2022 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>, заключенный между Зиминским городским муниципальным казенным учреждением «Дирекция единого заказчика-застройщика» и ООО «Стройцентр-Иркутск», изложив п. 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:

«2.1 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 323 437 725  рублей (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов - 53 906 287 руб. 50 коп.

Цена первого этапа составляет 9 055 270 руб., в том числе НДС 20% 1 509 211 руб. 67 коп.;

Цена второго этапа составляет 314 382 455 руб., в том числе НДС 20% 52 397 075 руб. 83 коп.

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта, сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет: Не установлено.

2.1.1 Цена настоящего Контракта включает в себя:

2.1.1.1 Стоимость работ ПИР, что составляет: 9 055 270 руб., в том числе НДС 20% 1 509 211 руб. 67 коп.

2.1.1.2 Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет: 314 382 455 руб., в том числе НДС 20% 52 397 075 руб. 83 коп.»

II.Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297022000008 от 04.10.2022 г. на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>», заключенный между Зиминским городским муниципальным казенным учреждением «Дирекция единого заказчика-застройщика» и ООО «Стройцентр-Иркутск», изложив п. 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:

«2.1 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 456 389 037 руб., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 процентов 76 064 839 руб. 50 коп., а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается:

Цена первого этапа составляет 12 199 703 руб. 72 коп., в том числе НДС 20 % 2 033 283 руб.95 коп.;

Цена второго этапа составляет 444 189 333 руб. 28 коп., в том числе НДС 20 % 74 031 555 руб. 55 коп.

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта, сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет: Не установлено.

2.1.1. Цена настоящего Контракта включает в себя:

2.1.1.1   Стоимость работ ПИР, что составляет: 12 199 703 (Двенадцать миллионов сто девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 72 копейки, в том числе НДС по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 2 033 283 рубля 95 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то НДС не облагается.

2.1.1.2   Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет: 444 189 333 руб. 28 коп., в том числе НДС 20  % 74 031 555 руб. 55 коп., а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то НДС не облагается.

Ш. Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297023000009 от 29.05.2023 г. на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>», заключенный между Зиминским городским муниципальным казенным учреждением «Дирекция единого заказчика-застройщика» и ООО «Стройцентр-Иркутск», изложив п. 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет 428 737 929 руб.86 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 процентов, в сумме 71 456 321 руб. 64 коп.

Цена первого этапа составляет 12 165 302 руб. 09 коп., в том числе НДС 20% (2 027 550 руб. 35 коп.);

Цена второго этапа составляет 416 572 627 руб. 77 коп., в том числе НДС 20% в сумме 69 428 771 руб. 29 коп.

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта Сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта - не установлено.

2.1.1. Цена настоящего Контракта включает в себя:

2.1.1.1. Стоимость работ ПИР, что составляет 12 165 302 руб. 09 коп., в том числе НДС по налоговой ставке 20 процентов.

2.1.1.2. Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет 416 572 627 руб. 77 коп., в том числе НДС 20% в сумме 69 428 771 руб. 29 коп.

Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал. 

Третье лицо МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ в судебном заседании до перерыва дало пояснения по существу спора, представило отзыв, после перерыва в судебное заседание  не явилось, о дате и месте рассмотрения дела извещено надлежащим образом. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» в судебное заседание не явились, о дате и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие третьих лиц АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ».

Арбитражный суд,  выслушав истца и ответчика, исследовав материалы дела, установил следующее.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен муниципальный контракт № 3381401297022000007 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...> от 19.09.2022.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом и Графиком выполнения работ по этапам (Приложение 7 к Контракту) срок подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания, выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...> (далее-Работы).

Результатом Работ по Контракту является построенный объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...> (далее-Обьект), в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3.1 контракта Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: - начало выполнения Работ: с момента подписания Контракта; - окончание выполнения Работ: 31 декабря 2023 года в соответствии с Графиком выполнения работ по этапам (Приложение 7 к Контракту).

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 248 798 250 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее-НДС) по налоговой ставке20 процентов 41 466 375 рублей (пункт 2.1 контракта).

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен муниципальный контракт № 3381401297022000008 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: 

<

...>» от 04.10.2022.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом и Графиком выполнения работ по этапам (Приложение 7 к Контракту) срок подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания, выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>» (далее-Работы).

Результатом Работ по Контракту является построенный объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>» (далее-Обьект), в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3.1 контракта Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: - начало выполнения Работ: с момента подписания Контракта; - окончание выполнения Работ: 31 декабря 2023 года в соответствии с Графиком выполнения работ по этапам (Приложение 7 к Контракту).

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 351 068 490 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее-НДС) по налоговой ставке 20 процентов 58 511 415 рублей  (пункт 2.1 контракта).

 27.05.2023 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен муниципальный контракт № 3381401297023000009 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>».

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом и Графиком выполнения работ по этапам (Приложение 7 к Контракту) срок подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания, выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>» (далее-Работы).

Результатом Работ по Контракту является построенный объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>» (далее-Обьект), в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3.1 контракта Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: - начало выполнения Работ: с момента подписания Контракта; - окончание выполнения Работ: 15 ноября 2024 года в соответствии с Графиком выполнения работ по этапам (Приложение 7 к Контракту).

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 336 778 909 рублей 60 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее-НДС) по налоговой ставке 20 процентов 56 129 818 рублей 27 копеек (пункт 2.1 контракта).

Согласно пунктам 1.1. муниципальных контрактов истцом были приняты обязательства по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, а также выполнению работ по строительству вышеуказанных жилых домов.

В ходе выполнения работ по контрактам возникли обстоятельства, влекущие невозможность исполнения обязательств  по ценам, предусмотренными контрактами.

Заключенные муниципальные контракты предусматривали обязательства подрядчика по выполнению работ по подготовке проектной документации и выполнению работ по инженерным изысканиям (пункт 1.1.1. Контрактов), результатом которых является проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, а также разработанная рабочая документация.

В целях исполнения указанных обязательств, истцом результаты проведенных инженерных изысканий и разработанная проектная документация, в том числе сметная документация, были направлены в ГАУ Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области».

ГАУ Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» были выданы положительные заключения государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий, проектной документации требованиям технических регламентов и установленным требованиям, о достоверности определения сметной стоимости строительства жилых домов.

Согласно сметной документации, разработанной истцом в ходе исполнения муниципальных контрактов, и получившей положительное заключение ГАУ Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» стоимость строительства жилых домов существенно изменилась в сравнении со стоимостью, определенной в муниципальных контрактах.

Разработанная проектная документация, в том числе сметная, а также положительные заключения государственной экспертизы были переданы ответчику. 

Как указывает истец, заключениями государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства жилых домов подтверждается невозможность осуществить строительство жилых домов в г. Зима по цене, определенной в заключенных муниципальных контрактах, размер превышения сметной стоимости над стоимостью, установленной контрактами составляет более 30 %. Вышеназванные обстоятельства свидетельствуют о наличии объективных причин, независящих от сторон, обусловивших невозможность завершения обязательств по выполнению работ, ценам, установленными контрактами. 

В соответствии с пунктами  12.4., 12.4.1. муниципальных контрактов изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается: по соглашению сторон: 

а) если при исполнении Контракта сметная стоимость строительства, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого Контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов.

В силу пункта 12.4.2. муниципальных контрактов изменение цены Контракта осуществляется Заказчиком в случаях, если при исполнении Контракта:

а) сметная стоимость строительства, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену Контракта. Изменение цены Контракта осуществляется после выполнения обязательств по Контракту, связанных с подготовкой проектной документации и выполнением инженерных изысканий, а также получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства.

Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

Условиями заключенных муниципальных контрактов предусмотрена обязанность заказчика по изменению существенных условий муниципальных контрактов, в части их цены и сроков, при наступлении соответствующих обстоятельств, в частности, увеличения сметной стоимости строительства над стоимостью, установленной контрактами.

Письмами от 14 марта 2024 года №117, от 15.05.2024 № 192, от 17.06.2024 №  238, № 353 от 12.08.2024 истец обращался к ответчику с требованием о внесении изменений в контракты.

Вышеперечисленные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.   

Действия сторон по настоящему делу должны подчиняться требованиям главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации,  По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Судом установлено, что возникшие между сторонами правоотношения регулируются, в том числе, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Частью 1 указанного Федерального закона установлено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд помимо Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках начала и окончания работ является существенным для муниципального (государственного) контракта.

Оценив условия контрактов на соответствие требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о согласовании сторонами существенных условий контрактов, в связи, с чем суд приходит к выводу о том, что контракты являются заключенными – порождающими взаимные права и обязанности сторон.

По смыслу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей такой способ защиты права как понуждение в судебном порядке к исполнению обязанности в натуре, в предмет доказывания по данному спору входят следующие обстоятельства: наличие у ответчика обязанности, о понуждении к исполнению которой заявлен иск;  реальная возможность исполнения ответчиком этой обязанности; отказ ответчика от ее исполнения.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменений его условий не допускается (статья 310  Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на иск, дополнения к отзыву, в которых ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, указывая, что условия и размеры софинансирования определены сторонами в Соглашениях о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 24.04.2023 № 05-59-212/23-59, от 07.07.2021 № 05-59-385/21-59, от 27.02.2024 № 505. Учитывая, что решения об увеличении средств Фонда содействия реформированию ЖКХ областного бюджета в рамках соглашения до настоящего времени не принято, возложение обязанности на ответчика о внесении изменений в контракты только за счет средств местного бюджета не обоснованно. Ответчик согласен рассмотреть возможность выделения из бюджета  Зиминского городского муниципального образования дополнительного финансирования  строительства в объеме пропорционально доле участия муниципального образования согласно условиям соглашения – 2 626 511 рублей 80 копеек. В отзыве  МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ не гарантирует выделение дополнительных лимитов областного бюджета для увеличения стоимости по спорным контрактам. Представил в материалы дела  письма от 24.06.2024 № 129а, № (38-3)-1263/24 от 06.09.2024.

В ходе судебного разбирательства истцом и ответчиком согласованы расчеты новых цен муниципальных контрактов, в связи с чем, истцом уточнены исковые требования.

Расчеты новых цен контрактов в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр по каждому контракту представлены в материалы дела.

Третьим лицом в материалы дела представлены  письмо Губернатору Иркутской области от 27.04.2024 № 24513-КМ/06, письмо мэру Зиминского городского муниципального образования от 03.10.2024 № 02-59-5460/24, письмо мэру Зиминского городского муниципального образования от 23.04.2024 № 02-59-2274/24, письмо мэру Зиминского городского муниципального образования от 23.07.2024 № 02-59-4139/24, письмо Губернатору Иркутской области от 19.03.2024 № 15373-АЕ/06, письмо Министру строительства Иркутской области от 06.09.2024 № (38-3)-1263/24, письмо Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации от 05.07.2024 № 02-01-7875/24, письмо Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации от 28.03.2024 № 02-01-3734/24, письмо Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации от 13.02.2024 № 02-01-1638/24.

Ходатайство о выделении требований в отдельное производство судом не рассматривается, поскольку указанное ходатайство истцом не поддерживалось.

Ходатайство об оставлении требований без рассмотрения судом не рассматривается, поскольку указанное ходатайство ответчиком не поддерживалось.

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктом 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения или расторжения договора, если иное не предусмотрено им или не вытекает из его существа, в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. При этом, изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В силу пункта 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Согласно пункту 4 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

По мнению истца, цена Контракта подлежит изменению на основании пункта 11 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, согласно которому,  если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона, сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов;

С целью поддержки заказчиков и подрядных организаций в сложившихся экономических условиях в связи с ростом стоимости строительных ресурсов в 2021 году и 2022 годах постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 1812 и от 31.12.2021 № 2594) (далее –Постановление № 1315) установлена возможность изменять цену действующего контракта (не более чем на 30 %) стоимостью более 1 млн. руб., заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ для обеспечения федеральных нужд до 01.01.2022, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с ростом цен на строительные ресурсы, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительству Российской Федерации в 2022 году предоставлены полномочия по принятию решений по установлению порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капительного строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

 Согласно подпункту «ж» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2022 № 1344) «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» при возникновении в ходе исполнения выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022–2023 годах допускаются изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы в порядке, установленном Постановлением № 1315.

 Материалами дела подтверждается, что физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются, Контракты заключены до 31 декабря 2023 года и до 15 ноября 2024 года, обязательства по ним на дату рассмотрения дела не исполнены, то есть соблюдаются приведенные в вышеуказанных нормативных правовых актах условия, позволяющие увеличить цену контракта. Размер изменения (увеличения) цены Контракта определяется по результатам государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

В рассматриваемом деле истцом представлены положительные заключения государственной экспертизы, согласно которым признано обоснованным увеличение цены по контрактам.

Заключения государственной экспертизы проектной документации не были признаны недействительными в установленном законом порядке.

Общее увеличение стоимости работ по Контрактам не превышает 30% от их изначально согласованной стоимости.

Внесение изменений в цену контрактов вызвано изменением объективных обстоятельств в виде существенного увеличение стоимости строительных работ и материалов, которые стороны не могли предвидеть при всей заботливости и осмотрительности. При этом сохранение существующих условий контрактов нарушает соотношение имущественных интересов сторон, и в целях соблюдения баланса их интересов и стабильности гражданского оборота, с учетом предмета контрактов, необходимо внесение изменений в цену контрактов и смет, однако в размере, установленном государственной экспертизой.

При таких обстоятельствах, с учетом того, что увеличение стоимости Контрактов не превышает 30% -лимит, установленный Постановлением № 1315, принимая во внимание, что заключениями государственной экспертизы признано обоснованным увеличение стоимости работ, суд полагает обоснованным ссылку истца на необходимость применения положений Постановления № 1315.

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу об обоснованности позиции истца.

В силу пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации  соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. 

Исследовав материалы дела, суд на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Всем существенным доводам, пояснениям и возражениям сторон судом дана соответствующая оценка, что нашло отражение в данном решении; иные доводы и пояснения несущественны и на выводы суда не влияют.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

В соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны.

Платежным поручением № 1868 от 20.06.2024,  истцом уплачена государственная пошлина в размере 18 000 рублей. 

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   с ответчика в пользу истца  подлежит взысканию государственная пошлина в размере 18 000 рублей. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297022000007 от 19 сентября 2022 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>, заключенный между ЗИМИНСКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК", изложив пункт 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:

«2.1 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет:                      323 437 725 (триста двадцать три миллиона четыреста тридцать семь тысяч семьсот двадцать пять)  рублей (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов - 53 906 287 руб. 50 коп.

Цена первого этапа составляет 9 055 270 (девять миллионов пятьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей, в том числе НДС 20% 1 509 211 (один миллион пятьсот девять тысяч двести одиннадцать) рублей  67 копеек;

Цена второго этапа составляет 314 382 455 (триста четырнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС 20% 52 397 075 (пятьдесят два миллиона триста девяносто семь тысяч семьдесят пять) рублей  83 копейки.

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта, сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет: Не установлено.

2.1.1 Цена настоящего Контракта включает в себя:

2.1.1.1 Стоимость работ ПИР, что составляет: 9 055 270 (девять миллионов пятьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей, в том числе НДС 20% 1 509 211 (один миллион пятьсот девять тысяч двести одиннадцать) рублей  67 копеек.

2.1.1.2 Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет: 314 382 455 рублей (триста четырнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС 20%».

Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297022000008 от 04.10.2022 г. на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>», заключенный между ЗИМИНСКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК", изложив пункт 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:

«2.1 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 456 389 037 (четыреста пятьдесят шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч тридцать семь) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 76 064 839 (семьдесят шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 50 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается:

Цена первого этапа составляет 12 199 703 (двенадцать миллионов сто девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 72 копейки, в том числе НДС 20 (двадцать)  % 2 033 283 (два миллиона тридцать три тысячи двести восемьдесят три) рубля 95 копеек.

Цена второго этапа составляет 444 189 333 (четыреста сорок четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч триста тридцать три)  рубля 28 копеек, в том числе НДС 20 (двадцать) % 74 031 555 (семьдесят четыре миллиона тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 55 копеек.

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта, сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет: Не установлено.

2.1.1. Цена настоящего Контракта включает в себя:

2.1.1.1   Стоимость работ ПИР, что составляет: 12 199 703 (Двенадцать миллионов сто девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 72 копейки, в том числе НДС по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 2 033 283 (два миллиона тридцать три тысячи двести восемьдесят три) рубля  95 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то НДС не облагается.

2.1.1.2   Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет: 444 189 333 (четыреста сорок четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч триста тридцать три)  рубля 28 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 74 031 555 (семьдесят четыре миллиона тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 55 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то НДС не облагается.

Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297023000009 от 29.05.2023 г. на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>», заключенный между ЗИМИНСКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК", изложив пункт 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет 428 737 929 (четыреста двадцать восемь миллионов семьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 86 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, в сумме 71 456 321 (семьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть  тысяч триста двадцать один) рубль 64 копейки.

Цена первого этапа составляет 12 165 302 (Двенадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста два) рубля 09 копеек, в том числе НДС 20 % (2 027 550 рублей 35 копеек);

Цена второго этапа составляет 416 572 627 (четыреста шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 77 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 69 428 771 рубль 29 копеек.

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта Сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта - не установлено.

2.1.1. Цена настоящего Контракта включает в себя:

2.1.1.1. Стоимость работ ПИР, что составляет 12 165 302 (Двенадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста два) рубля 09 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 процентов.

2.1.1.2. Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет 416 572 627 (четыреста шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 77 копеек, в том числе НДС 20 процентов».

Взыскать с   ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665390, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗИМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.5)  в пользу   ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК"  (ОГ ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 660099, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, Д. 22/Д, ПОМЕЩ. 77)   18 000 рублей – расходов на оплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                                     С. Н. Швидко