АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-20963/2020

г. Тюмень

03 июня 2021 года

Резолютивная часть решения оглашена 27 мая 2021 года

Полный текст решения изготовлен 03 июня 2021 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Мингалевой Е.А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску ООО «СТРОЙТАНДЕМ» к ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» о взыскании задолженности по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.11.2018 № Ю-30-11, договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3, а также расходов на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей, а также по встречному иску ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» к ООО «СТРОЙТАНДЕМ» о взыскании неустойки по договору субподряда от 30.11.2018 № Ю-30-11, договору субподряда от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3, 

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 20.10.2020 № 26-20, личность удостоверена паспортом, диплом об образовании от 25.02.2009 № 5202,

от ответчика: представитель не явился, извещен,

установил:

ООО «СТРОЙТАНДЕМ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковыми заявлением к ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» (далее – ответчик) о взыскании задолженности: по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 210 721 рубль 06 копеек основного долга, 610 138 рублей 89 копеек неустойки за период с 22.03.2019 по 05.12.2020, 268 884 рубля 69 копеек основного долга по возмещению гарантийного удержания, 6 991 рубль неустойки по неоплаченному гарантийному удержанию за период с 10.11.2020 по 05.12.2020, по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 82 000 рублей 75 копеек основного долга, 27 374 рубля 07 копеек неустойки за период с 19.11.2019 по 05.12.2020, 43 010 рублей 55 копеек основного долга по возмещению гарантийного удержания, 1 118 рублей 27 копеек неустойки по неоплаченному гарантийному удержанию за период с 10.11.2020 по 05.12.2020, а также расходов на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей.

Исковые требования со ссылкой на ст.ст.309, 310, 330, 702, 711, 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ в рамках договора субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.11.2018 № Ю-30-11, договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3.

В процессе рассмотрения спора до принятия судебного акта по существу спора истец в порядке ст. 49 АПК РФ неоднократно уточнял исковые требования, согласно последним просит суд взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 210 721 рубль 06 копеек основного долга, 646 593 рубля 63 копейки неустойки за период с 22.03.2019 по 27.05.2021, 268 884 рубля 69 копеек основного долга по возмещению гарантийного удержания, 53 508 рублей 05 копеек неустойки по неоплаченному гарантийному удержанию за период с 10.11.2020 по 27.05.2021, по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 82 000 рублей 75 копеек основного долга, 41 560 рублей 20 копеек неустойки за период с 19.11.2019 по 27.05.2021, 43 010 рублей 55 копеек основного долга по возмещению гарантийного удержания, 8 559 рублей 10 копеек неустойки по неоплаченному гарантийному удержанию за период с 10.11.2020 по 27.05.2021, а также расходов на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей. Ходатайство об уточнении требований рассмотрено и принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ. 

ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» в порядке ст. 132 АПК РФ обратилось со встречным иском к ООО «СТРОЙТАНДЕМ» о взыскании неустойки по договору субподряда от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 888 305 рублей 23 копейки,  по договору субподряда от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 94 180 рублей.

Определением от 17.02.2021 встречное исковое заявление принято к производству для рассмотрения совместно с первоначальным иском.

В судебном заседании представитель истца на удовлетворении первоначального иска настаивает с учетом уточнений, во встречном иске просит отказать.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, согласно которому просит в первоначальных исковых требованиях отказать, встречный иск удовлетворить.

На основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассматривается в отсутствие не явившихся представителей ответчика, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу, заслушав пояснения представителей истца, суд приходит к следующим выводам.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что между ООО «СТРОЙТАНДЕМ» (далее - субподрядчик) и ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» (далее - генподрядчик) заключен ряд договоров субподряда.

Так, 30.11.2018 между ООО «СТРОЙТАНДЕМ» (далее - субподрядчик) и ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» (далее - генподрядчик) заключен договор субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» № Ю-30-11, по условиям которого субподрядчик обязуется в срок, установленный настоящим договором, выполнить из материала генподрядчика (заказчика) собственными и/или привлеченными силами внутренние электромонтажные работы на объекте: контур заземления по фасаду здания; контур заземления: кровля здания, внешний контур; скрытая прокладка п/э труб в монолите поэтажно; скрытая прокладка кабеля поэтажно; магистральный кабель по стоякам поэтажно и техпомещения на кровле; монтаж щитов в МОП и Электрощитовой; монтаж квартирных щитов; щитовая продукция в техпомещениях; электроснабжение подвала и машинного отделения; установка электроустановочной продукции поэтажно; молниезащита здания; пусконаладочные работы; а Генподрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (п. 2.1. договора).

Общая стоимость работ на момент заключения настоящего договора в соответствии с «Ведомостью договорной стоимости Работ» (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет 8 621 631 (восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать один) рублей, без стоимости НДС (п. 3.1. договора). Общая стоимость Работ по Договору является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора (п. 3.2. договора). 

Генподрядчик производит платежи по настоящему договору поэтапно в следующем порядке:

В виде авансов (в случае их дополнительного согласования Сторонами), на основании предоставленного Субподрядчиком и оформленного в соответствии с действующим законодательством оригинала счета. Сумма неотработанных авансов при этом может достигать до 20% от цены договора, установленной в п. 3.1. договора (п. 4.1 договора).

Оплата выполненных Работ производится Генподрядчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) на основании предоставленных Субподрядчиком и оформленных надлежащим образом оригинала счета (п. 4.2 договора).

При этом Генподрядчик оплачивает Субподрядчику 95% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных Работ (форма КС-3). Соответственно, Субподрядчик выставляет счет на оплату выполненных Работ в размере 95% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) с учетом вычета части авансового платежа согласно пункту 4.1 настоящего Договора (п. 4.3 договора).

Согласно п. 4.4 договора оставшаяся часть суммы в размере 5% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3), за все выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы по Договору, отраженные в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ (форма КС-3), являются гарантийным удержанием и уплачивается в следующем порядке: 

3% от суммы за все выполненные Субподрядчиком, за исключением стоимости давальческого материала, и принятые Генподрядчиком Работы по Договору оплачиваются в течение 25 (Двадцати пяти) Банковских дней с момента предоставления субподрядчиком подписанного сторонами акта окончательной приемки Работ по Договору и оформленного надлежащим образом оригинала счета (п. 4.4.1 договора).

2% от суммы за все выполненные Субподрядчиком, за исключением стоимости давальческого материала, и принятые Генподрядчиком Работы по Договору оплачиваются в течение 20 (Двадцати) Банковских дней с момента истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты выдачи Заказчику Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и предоставления Субподрядчиком оформленного надлежащим образом оригинала счета (п. 4.4.2 договора). При этом проценты на сумму гарантийных удержаний не начисляются.

В пункте 5.1. договора сторонами установлены сторонами следующие календарные сроки выполнения работ: дата начала работ - 30 ноября 2018 г. дата окончания этапов работ по договору - 30 октября 2019 г. дата подписания сторонами акта окончательной приемки работ по договору не позднее «30» октября 2019 г.

Пунктом 11.4. договора предусмотрено, что при нарушении генподрядчиком сроков оплаты, субподрядчик вправе начислить и взыскать с генподрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежавшей перечислению, за каждый день просрочки. При этом, сумма неустойки, предусмотренная настоящим пунктом договора, не может превышать 10 (Десять) % суммы, подлежащей перечислению.

Дополнительным соглашением от 19.06.2020 стороны договорились о том, что в соответствии с п. 3.3 договора стороны пришли к соглашению в связи с производственной необходимостью увеличить объем внутренних электромонтажных работ согласно сметному расчету согласованному с генподрядчиком. Стоимость дополнительного объема работ, указанного в п. 1 настоящего дополнительного соглашения, составляет по объекту: «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» ГП-1 - 296 467  рублей 00 копеек, без НДС. «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» ГП-2 - 44 725 рублей 00 копеек, без НДС. Изложен п.3.1. Договора в следующей редакции: «Общая стоимость Работ на момент заключения настоящего Договора в соответствии с «Ведомостью договорной стоимости Работ» (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет 8 962 823 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать три) рубля, без стоимости НДС.» Изложен п. 5.1.2. Договора в следующей редакции: «Дата окончания Этапов Работ по Договору - 31 июля 2020 г.» Изложен п. 5.1.3. Договора в следующей редакции: «Дата подписания Сторонами Акта окончательной приемки работ по Договору не позднее «31» июля 2020 г.».

Между сторонами подписаны сметные расчеты.

В рамках спорного договора между сторонами без каких-либо претензий и замечаний подписаны акты о приемке выполненных работ от 12.03.2019 № 1 на сумму 115 304 рубля 14 копеек, от 12.03.2019 № 2 на сумму 116 255 рубля 49 копеек, от 14.03.2019 № 1 на сумму 115 304 рубля 14 копеек, от 14.03.2019 № 2 на сумму 116 255 руб. 49 коп., от 30.04.2019 № 1 на сумму 257 738 рублей 66 копеек, от 30.04.2019 № 2 на сумму 259 865 руб. 23 коп., от 31.05.2019 № 2 на сумму 259 865 руб. 22 коп., от 31.05.2019 № 1 на сумму 257 738 руб. 66 коп., от 28.06.2019 № 2 на сумму 403 474 руб. 95 коп.,  от 28.06.2019 № 1 на сумму 400 173 руб.18 коп., от 31.07.2019 № 1 на сумму 115 304 руб. 14 коп., от 31.07.2019 № 2 на сумму 77 053 руб. 66 коп., от 07.08.2019 № 1 на сумму 142 434 руб. 52 коп., от 19.08.2019 № 1 на сумму 143 609 руб. 72 коп., от 28.08.2019 № 1 на сумму 115 304 руб. 12 коп., от 17.09.2019 № 1 на сумму 142 434 руб. 52 коп., от 07.10.2019 № 2 на сумму 382 959 руб. 28 коп.,  от 07.10.2019 № 1 на сумму 425 934 руб. 02 коп., от 23.10.2019 № 2 на сумму 116 255 руб. 49 коп., от 23.10.2019 № 1 на сумму 122 086 руб. 73 коп., от 16.12.2019 № 1 на сумму 1 736 344 руб. 64 коп., от 16.12.2019 № 2 на сумму 1 711 919 руб. 13 коп., от 16.03.2020 № 1 на сумму 108 521 руб. 55 коп., акт от 27.04.2020 № 1 на сумму 122 086 руб. 73 коп.,  от 06.05.2019 № 1 на сумму 515 477 руб. 35 коп.,  от 06.05.2020 № 2 на сумму 232 960 руб. 99 коп., от 17.06.2020 № 2 на сумму 54 708 руб. 47 коп., акт от 17.06.2020 № 1 на сумму 54 260 руб. 77 коп., от 24.07.2020 № 2 на сумму 44 725 руб., акт от 24.07.2020 № 1 на сумму 296 467 руб., справки о стоимости выполненных работ от 12.03.2019 № 1, от 14.03.2019 № 2, от 30.11.2019 № 3, от 31.05.2019 № 4, от 28.06.2019 № 5 на сумму 803 648 руб. 13 коп., от 31.07.2019 № 6 на сумму 192 357 руб. 80 коп., от 07.08.2019 № 7 на сумму 142 434 руб. 52 коп., от 19.08.2019 № 8 на сумму 143 609 руб. 72 коп., от 28.08.2019 № 9 на сумму 115 304 руб. 12 коп., от 17.09.2019 № 10 на сумму 142 434 руб. 52 коп., от 07.10.2019 № 11 на сумму 808 983 руб. 30 коп., от 23.10.2019 № 12 на сумму 238 342 руб. 22 коп., от 16.12.2019 № 13 на сумму 3 448 263 руб. 77 коп., от 16.03.2020 № 14 на сумму 108 521 руб. 55 коп., от 27.04.2020 № 15 на сумму 122 086 руб. 73 коп., от 06.05.2020 № 16 на сумму 748 438 руб. 34 коп., от 17.06.2020 № 17 на сумму 108 969 руб. 24 коп., от 24.07.2020 № 18 на сумму 341 192 руб., 

Также, 30.05.2019 между ООО «СТРОЙТАНДЕМ» (далее - субподрядчик) и ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» (далее - генподрядчик) заключен договор субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» № Ю-30-11-ГП-3, по условиям которого губподрядчик обязуется в срок, установленный настоящим договором, выполнить из материала генподрядчика (заказчика) собственными и/или привлеченными силами внутренние электромонтажные работы на объекте: контур заземления по фасаду здания; контур заземления: кровля здания, внешний контур; скрытая/открытая прокладка кабеля поэтажно; магистральный кабель по стоякам поэтажно и техпомещения, оборудования на кровле; монтаж щитов в МОП и Электрощитовой; щитовая продукция в техпомещениях; электроснабжение машинного отделения; установка электроустановочной продукции поэтажно; молниезащита здания; пусконаладочные работы; а Генподрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (п. 2.1. договора).

Общая стоимость работ на момент заключения настоящего договора в соответствии с «Ведомостью договорной стоимости работ» (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет 1 300 000 (восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать один) рублей, без стоимости НДС (п. 3.1. договора). Общая стоимость работ по договору является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора (п. 3.2. договора). 

Генподрядчик производит платежи по настоящему договору поэтапно в следующем порядке:

В виде авансов (в случае их дополнительного согласования сторонами), на основании предоставленного субподрядчиком и оформленного в соответствии с действующим законодательством оригинала счета. Сумма неотработанных авансов при этом может достигать до 20% от цены договора, установленной в п. 3.1. договора (п. 4.1 договора).

Оплата выполненных работ производится генподрядчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) на основании предоставленных субподрядчиком и оформленных надлежащим образом оригинала счета (п. 4.2 договора).

При этом генподрядчик оплачивает субподрядчику 95% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Соответственно, субподрядчик выставляет счет на оплату выполненных Работ в размере 95% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) с учетом вычета части авансового платежа согласно пункту 4.1 настоящего Договора (п. 4.3 договора).

Согласно п. 4.4 договора оставшаяся часть суммы в размере 5% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3), за все выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы по Договору, отраженные в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ (форма КС-3), являются гарантийным удержанием и уплачивается в следующем порядке: 3% от суммы за все выполненные субподрядчиком, за исключением стоимости давальческого материала, и принятые генподрядчиком работы по Договору оплачиваются в течение 25 (Двадцати пяти) банковских дней с момента предоставления субподрядчиком подписанного сторонами акта окончательной приемки Работ по Договору и оформленного надлежащим образом оригинала счета (п. 4.4.1 договора); 2% от суммы за все выполненные субподрядчиком, за исключением стоимости давальческого материала, и принятые генподрядчиком работы по договору оплачиваются в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты выдачи заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и предоставления субподрядчиком оформленного надлежащим образом оригинала счета (п. 4.4.2 договора). При этом проценты на сумму гарантийных удержаний не начисляются.

Пунктом 5.1. сторонами определены следующие календарные сроки выполнения работ: дата начала работ - 30 мая 2019 г. Дата окончания Этапов Работ по Договору - 30 октября 2019 г. дата подписания сторонами акта окончательной приемки работ по Договору не позднее «30» октября 2019 г.

В пункте 11.4. сторонами предусмотрено, что при нарушении Генподрядчиком сроков оплаты, Субподрядчик вправе начислить и взыскать с Генподрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежавшей перечислению, за каждый день просрочки. При этом, сумма неустойки, предусмотренная настоящим пунктом Договора, не может превышать 10 (Десять) % суммы, подлежащей перечислению.

Дополнительным соглашением от 19.06.2020 сторонами определено следующее: в соответствии с п. 3.3 Договора Стороны пришли к соглашению в связи с производственной необходимостью увеличить объем внутренних электромонтажных Работ согласно сметному расчету согласованному с Генподрядчиком. Стоимость дополнительного объема Работ, указанного в п.1 настоящего Дополнительного соглашения, составляет по объекту: «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» ГП-3 - 133 685  рублей 00 копеек, без НДС. Изложен п.3.1. Договора в следующей редакции: «Общая стоимость Работ на момент заключения настоящего Договора в соответствии с «Ведомостью договорной стоимости Работ» (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет 1433 685 (один миллион четыреста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей, без стоимости НДС.». Изложен п. 5.1.2. Договора в следующей редакции: «Дата окончания Этапов Работ по Договору - 31 июля 2020 г.». Изложен п. 5.1.3. Договора в следующей редакции: «Дата подписания Сторонами Акта окончательной приемки работ по Договору не позднее «31» июля 2020 г.».

В рамках настоящего договора сторонами подписаны без каких-либо претензий и замечаний акты о приемке выполненных работ от 07.10.2019 № 1 на сумму 1 100 000 рублей, от 07.11.2019 № 1 на сумму 50 000 рублей, от 28.11.2019 № 1 на сумму 50 000 рублей, акт от 21.01.2020 № 1 на сумму 100 000 рублей, от 24.07.2020 № 1 на сумму 133 658 руб., справки о стоимости выполненных работ от 07.10.2019 № 1 на сумму 1 100 000 рублей,  от 07.11.2019 № 2 на сумму 50 000 рублей, от 28.11.2019 № 3 на сумму 50 000 рублей, от 21.01.2020 № 4 на сумму 100 000 рублей, от 24.07.2020 № 5 на сумму 133 685 руб.

По утверждению истца, во исполнение условий договора, истец выполнил работы, предусмотренные договорами, что подтверждается представленными в материалы дела справками о стоимости выполненных работ и затрат, а также актами о приемке выполненных работ, которые ответчик принял без каких-либо претензий и замечаний, в свою очередь, ответчиком оплата выполненных работ не произведена, в связи с чем, у ответчика образовалась задолженность в общем размере 604 617 рублей 05 копеек, из них по договору № Ю-30-11 в размере 210 721 руб. 06 коп. основного долга, 268 884 руб. 69 коп. задолженность по возмещению гарантийного удержания, по договору № Ю-30-11-ГП-3 82 000 рублей 75 копеек основного долга, 43 010 руб. 55 коп. задолженность по возмещению гарантийного удержания. Между сторонами подписаны акты сверки взаимных расчетов. До настоящего времени задолженность ответчиком не погашена.

В порядке досудебного урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлена претензия от 18.06.2020 № 168 с требованием в добровольном порядке произвести оплату задолженности, а также претензионное письмо, что подтверждается квитанцией от 29.04.2020 и описью вложения от 29.04.2020. До настоящего времени претензия ответчиком оставлена без внимания и удовлетворения.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

По первоначальному иску.

Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Общая стоимость работ на момент заключения настоящего договора в соответствии с «Ведомостью договорной стоимости Работ» (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет 8 621 631 (восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать один) рублей, без стоимости НДС (п. 3.1. договора). Общая стоимость Работ по Договору является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора (п. 3.2. договора). 

Генподрядчик производит платежи по настоящему договору поэтапно в следующем порядке:

В виде авансов (в случае их дополнительного согласования Сторонами), на основании предоставленного Субподрядчиком и оформленного в соответствии с действующим законодательством оригинала счета. Сумма неотработанных авансов при этом может достигать до 20% от цены договора, установленной в п. 3.1. договора (п. 4.1 договора).

Оплата выполненных Работ производится Генподрядчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) на основании предоставленных Субподрядчиком и оформленных надлежащим образом оригинала счета (п. 4.2 договора).

При этом Генподрядчик оплачивает Субподрядчику 95% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных Работ (форма КС-3). Соответственно, Субподрядчик выставляет счет на оплату выполненных Работ в размере 95% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) с учетом вычета части авансового платежа согласно пункту 4.1 настоящего Договора (п. 4.3 договора).

Согласно п. 4.4 договора оставшаяся часть суммы в размере 5% от суммы, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3), за все выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы по договору, отраженные в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ (форма КС-3), являются гарантийным удержанием и уплачивается в следующем порядке: 3% от суммы за все выполненные Субподрядчиком, за исключением стоимости давальческого материала, и принятые Генподрядчиком Работы по Договору оплачиваются в течение 25 (Двадцати пяти) Банковских дней с момента предоставления субподрядчиком подписанного сторонами акта окончательной приемки Работ по Договору и оформленного надлежащим образом оригинала счета (п. 4.4.1 договора); 2 % от суммы за все выполненные субподрядчиком, за исключением стоимости давальческого материала, и принятые Генподрядчиком Работы по Договору оплачиваются в течение 20 (Двадцати) Банковских дней с момента истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты выдачи Заказчику Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и предоставления Субподрядчиком оформленного надлежащим образом оригинала счета (п. 4.4.2 договора). При этом проценты на сумму гарантийных удержаний не начисляются.

Во исполнение условий спорных договоров истцом выполнены работы по договору № Ю-30-11 от 30.11.2018 на сумму 210 721 руб. 06 коп. (с учетом частичных оплат), по договору от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 на сумму 82 000 руб. 75 коп. (с учетом частичных оплат), которые приняты ответчиком по двусторонним актам сдачи-приемки выполненных работ КС-2 без замечаний.

Сумма гарантийного удержания в соответствии с пунктами 4.4 договоров составляет 268 884 руб. 69 коп. по договору субподряда от 30.11.2018 № Ю-30-11, 43 010 руб. 55 коп. по договору от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3. 

Довод ответчика о несоблюдении претензионного порядка досудебного урегулирования спора отклоняется судом, поскольку опровергается представленными в материалы дела доказательствами.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая отсутствие возражений ответчика по существу спора, размера заявленных требований (ст. 9, 65 АКП РФ), а также то обстоятельство, что условие о возврате суммы гарантийного удержания не противоречит закону, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований  в полном объеме в общем размере 604 617 рублей 05 копеек.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки:- по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 646 593 рубля 63 копейки, начисленной за период с 22.03.2019 по 27.05.2021, по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 41 560 рублей 20 копеек за период с 19.11.2019 по 27.05.2021, на основании п. 11.4. договоров, в материалы дела представлен расчет.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки его исполнения. 

Следовательно, правовым основанием для взыскания неустойки является положение договора или закона, предусматривающие ответственность стороны за нарушение установленного обязательства.

В пункте 11.4. договоров сторонами предусмотрено, что при нарушении генподрядчиком сроков оплаты, субподрядчик вправе начислить и взыскать с генподрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежавшей перечислению, за каждый день просрочки. При этом, сумма неустойки, предусмотренная настоящим пунктом Договора, не может превышать 10 (Десять) % суммы, подлежащей перечислению.

Поскольку судом установлен факт доказанности просрочки исполнения ответчиком обязательства по оплате за выполненные работы, применение ответственности к ответчику в виде договорной неустойки обоснованно. При этом расчет неустойки проверен судом в порядке ст. 330 ГК РФ и признан правильным.

Учитывая, что ответчиком в суд не представлено заявление о снижении размера неустойки и доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка: по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 646 593 рубля 63 копейки, начисленной за период с 22.03.2019 по 27.05.2021, по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 41 560 рублей 20 копеек за период с 19.11.2019 по 27.05.2021.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков по неоплате гарантийного удержания: по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 53 508 рублей 05 копеек за период с 10.11.2020 по 27.05.2021, по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 8 559 рублей 10 копеек за период с 10.11.2020 по 27.05.2021.

В пункте 11.4. договоров сторонами предусмотрено, что при нарушении Генподрядчиком сроков оплаты, Субподрядчик вправе начислить и взыскать с Генподрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежавшей перечислению, за каждый день просрочки. При этом, сумма неустойки, предусмотренная настоящим пунктом Договора, не может превышать 10 (Десять) % суммы, подлежащей перечислению.

Поскольку судом установлен факт доказанности просрочки ответчиком возмещения гарантийного удержания, применение ответственности к ответчику в виде договорной неустойки обоснованно. При этом расчет неустойки проверен судом в порядке ст. 330 ГК РФ и признан правильным.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая, что ответчиком в суд не представлено заявление о снижении размера неустойки и доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 53 508 рублей 05 копеек за период с 10.11.2020 по 27.05.2021, по договору субподряда «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной надземной закрытой автостоянкой по улице Даудельная 46 в г. Тюмени» от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 8 559 рублей 10 копеек за период с 10.11.2020 по 27.05.2021.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей.

Согласно ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в суде.

В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Согласно ч. 1,2 ст. 110 АПК РФ расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.  Согласно п. 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" при определении разумных расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг, время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данными в п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 г. № 121, истец, требующий возмещения судебных расходов, обязан доказать размер данных расходов и факт их выплаты, а ответчик вправе доказывать их чрезмерность. 

В обоснование несения судебных расходов истец представил в материалы судебного дела следующие документы: договор оказания юридической помощи от 10.06.2020 № 01/20СТ, заключенный между ООО «СТРОЙТАНДЕМ» (заказчик) и ФИО2 (далее - исполнитель) по условиям которого, исполнитель принял на себя обязательства оказать заказчику услуги, перечисленные в Приложении № 1 к договору «Перечень оказываемых услуг», а заказчик  принял на себя обязательства оплатить эти услуги.

В соответствии с приложением № 1 к договору оказания юридической помощи сторонами согласован перечень оказываемых услуг, согласно которому исполнителю оказываются следующие услуги: консультационные услуги правового характера, разработка документов правового характера, подготовка запросов, предложений, претензий и обоснованных ответов на претензии, исковых заявлений, отзывов на исковое заявление, ходатайств, участие в судебных заседаниях, получение копий решений, определений, постановлений  судебных органов.

Общая стоимость оказываемых услуг 60 000 рублей, без учета налога на доходы физических лиц и иных сборов, исчисляемых в установленном порядке.

Согласно п. 4.1 договора общая стоимость услуг составляет 60 000 рублей, без учета налога на доходы физических лиц и иных сборов, исчисленных в установленном порядке.  

В подтверждении факта несения расходов в материалы дела представлен расходный кассовый ордер от 16.10.2020 № 3 на сумму 60 000 рублей.

Таким образом, суд считает доказанным факт несения истцом судебных расходов на оплату услуг представителя на сумму 60 000 рублей. 

Доводов о чрезмерности заявленных к взысканию судебных расходов на оплату услуг представителя ответчиком не заявлено, доказательств чрезмерности в суд не представлено (ст. 9, 65 АПК РФ). 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. ст. 65, 67, 68 и 71 АПК РФ представленные истцом по первоначальному иску в материалы дела доказательства в обоснование понесенных расходов, сопоставив их с фактическими обстоятельствами дела, с учетом небольшой сложности конкретного дела (иск о взыскании задолженности по договору субподряда), объем подготовленных и представленных исполнителем в материалы дела документов, подготовка искового заявления, соблюдение претензионного порядка, ходатайство о приобщении дополнительных документов во исполнение определения суда, ознакомление с материалами дела, участие в судебных заседаниях, учитывая необходимость соблюдения баланса процессуальных прав и обязанностей сторон, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика по первоначальному иску судебных расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах – в размере 60 000 рублей.

По встречному иску.

ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» в порядке ст. 132 АПК РФ предъявлен встречный иск ООО «СТРОЙТАНДЕМ» о взыскании неустойки по договору субподряда от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 888 305 рублей 23 копейки,  по договору субподряда от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 94 180 рублей.

По утверждению истца, ответчиком, в нарушение графика производства работ (приложение № 4 к договорам) нарушены сроки выполнения работ, в связи с чем, истцом ответчику начислена неустойка в размере 888 305 рублей 23 копейки по договору субподряда от 30.11.2018 № Ю-30-11 и 94 180 рублей по договору субподряда от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3.

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия от 24.12.2020 № 366 с требованием произвести оплату неустойки в течение 7 календарных дней с момента получения настоящей претензии. В ответ на претензию, письмом от 29.12.2020 № 494 ответчик сообщил о том, что требование об уплате неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ удовлетворению не подлежит.

Рассмотрев доводы истца и ответчика по встречному иску в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки его исполнения.

Следовательно, правовым основанием для взыскания неустойки является положение договора или закона, предусматривающие ответственность стороны за нарушение установленного обязательства. 

Пунктом 11.2. договоров предусмотрено, что при нарушении субподрядчиком сроков производства работ по конкретным этапам, установленных в графике производства работ (Приложение № 4 к Договору) генподрядчик вправе начислить и взыскать с субподрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от общей стоимости соответствующего этапа по договору за каждый день просрочки. При нарушении субподрядчиком срока окончания Работ, согласно п.5.1.3 договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Генподрядчик вправе начислить и взыскать с генподрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При этом, сумма неустойки, предусмотренная настоящим пунктом договора, не может превышать 10 (Десять) % общей стоимости работ по договору. 

Таким образом, условиями договора предусмотрена ответственность ответчика по встречному иску за нарушение срока выполнения работ. 

Поскольку судом установлен факт доказанности просрочки исполнения ответчиком по сдаче работ, с нарушением установленного срока, ответчиком данный факт не оспорен, применение ответственности к ответчику в виде договорной неустойки обоснованно. При этом расчет неустойки проверен судом в порядке ст. 330 ГК РФ и признан правильным.

Учитывая, что ответчиком по встречному иску в суд не представлено заявление о снижении размера неустойки и доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по договору субподряда от 30.11.2018 № Ю-30-11 в размере 888 305 рублей 23 копейки, по договору субподряда от 30.05.2019 № Ю-30-11-ГП-3 в размере 94 180 рублей, итого в общем размере 982 485 рублей 29 копеек.

Согласно части 5 статьи 170 АПК РФ при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

В результате произведенного зачета первоначального и встречного исковых требований взыскать с ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» в пользу ООО «СТРОЙТАНДЕМ» 435 204 рубля 74 копеек долга. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ в связи с удовлетворением первоначального иска в полном объеме, расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 502 рубля относятся на ответчика. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ в связи с удовлетворением встречного иска в полном объеме, расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 650 рублей относятся на ответчика по встречному иску.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» в пользу ООО «СТРОЙТАНДЕМ» 604 617 рублей 05 копеек долга, 750 220 рублей 98 копеек неустойки, 60 000 рублей расходов на оплату услуг представителя, 25 502 рубля государственной пошлины. 

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «СТРОЙТАНДЕМ» в пользу ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т»  982 485 рублей 29 копеек неустойки, а также 22 650 рублей государственной пошлины.

По результатам произведенного зачета первоначального и встречного исковых требований взыскать с ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Т» в пользу ООО «СТРОЙТАНДЕМ» 435 204 рубля 74 копеек долга. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.

Судья

Мингалева Е.А.