Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-182069/23-80-1459

г. Москва

05 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола помощником судьи Остроушко В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

истец КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" (129223, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.10.2002, ИНН: 

<

***>)

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПАМИР" (123100, 

<

...>, ПОМ III КОМ 1 ПОДВАЛ, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.02.2003, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 4 296 484 руб. 76 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО1 по доверенности №КП-18-49/23 от 29.05.2023 г.

от ответчика: не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ:

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПАМИР" о взыскании неустойки в размере 4 296 484 руб. 76 коп.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в заседание не явился. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между казенным предприятием города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альпамир» (подрядчик) был заключен гражданско-правовой договор от 24.08.2020 г. № Ф.2020.764 (КПВДНХ/634/20/12 от 25.08.2020) на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения: «Портик Павильона «Транспорт СССР» (бывший Земледелие), 1935-1954 гг., архитекторы: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5.», расположенном на территории достопримечательного места «ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» по адресу: 129223, Москва, проспект Мира, дом 119, строение 26.

В соответствии с п. 1.1 контракта подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения: «Портик Павильона «Транспорт СССР» (бывший земледелие), 1935-1954 гг., архитекторы: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5.», расположенном на территории достопримечательного места «ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» по адресу: 129223, Москва, проспект Мира, дом 119, строение 26 (далее - работы) в объеме, установленном в техническом задании (приложение 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Цена контракта согласно п. 2.1 составляет 76 646 968 руб. 20 коп.

Согласно п. 3.1 контракта в редакции дополнительного соглашения от 31.12.2020 г. № 3 сроки выполнения работ по каждому этапу утверждены календарным планом (приложение 1 к дополнительному соглашению) и составляют 155 (сто пятьдесят пять) дней с момента заключения контракта, т.е. не позднее 26.01.2021 г.

В соответствии с п. 12.1 контракта в редакции дополнительного соглашения от 31.12.2020 № 3 контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 28.02.2021 г.

В период действия контракта подрядчиком были выполнены работы, предусмотренные 2-м, 3-м и 5-м этапами календарного плана, на сумму 63 083 404 руб. 82 коп., что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ от 06.10.2020 г., 30.12.2020 г., 19.01.2021 г., 24.01.2021 г.

Вместе с тем, в нарушение условий контракта, ООО «Альпамир» не выполнило работы, предусмотренные 1-м, 4-м и 6-м этапами календарного плана, в связи с чем заказчик 20.07.2022 г. принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № Исх-КП-11-3852/22, которое вступило в силу 05.08.2022 г.

Согласно п. 9.4 контракта, исполнение контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии.

По условиям п. 3 дополнительного соглашения подрядчик в течение 20 дней после заключения соглашения обязуется продлить срок действия банковской гарантии до 31.03.2021 г. и не позднее 20.01.2021 г. представить оригинал подтверждающего документа.

Вместе с тем, по состоянию на 20.01.2021 г., как и по состоянию на 05.08.2023 г., ООО «Альпамир» не представило продленную банковскую гарантию, что является нарушением сроков исполнения обязательств по контракту.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 7.3 контракта установлена ответственность подрядчика в виде пеней, которые начисляются за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма пени за нарушение сроков исполнения обязательства по выполнению работ составила 2 136 713 руб. 36 коп. за период с 27.01.2021 г. по 05.08.2022 г.

Однако судом в части расчета неустойки принято во внимание постановление Правительства РФ от 28.03.2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с учетом положений которого размер заявленных ко взысканию пени не может превышать 1 648 651 руб. 13 коп.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма пени за нарушение срока представления обеспечения (банковской гарантии) составила 2 159 771 руб. 41 коп. за период с 21.01.2021 г. по 05.08.2022 г.

Однако судом в части расчета неустойки принято во внимание постановление Правительства РФ от 28.03.2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с учетом положений которого размер заявленных ко взысканию пени не может превышать 1 671 709 руб. 19 коп.

Ответчик в судебное заседание не явился, требование истца документально не опроверг, поэтому исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению частично.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 330 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПАМИР" в пользу КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" неустойку в размере 3 320 360 (Три миллиона триста двадцать тысяч триста шестьдесят) руб. 32 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 39 602 (Тридцать девять тысяч шестьсот два) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                   Пронин А.П.