АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А10-4671/2023

26 июня 2024 года

г. Улан-Удэ

Резолютивная часть решения объявлена 17 июня 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 26  июня 2024 года.

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Богдановой А.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цыбиковой Э.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по уточненному исковому заявлению жилищно-строительного кооператива «Изумруд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 609 625 рублей 13 копеек,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Цагис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

при участии в заседании: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 11.01.2024,

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 06.05.2022 № 03/151;

от третьего лица ООО «Цагис»: не явился, извещен,

установил:

жилищно-строительный кооператив «Изумруд» (далее также – ЖСК «Изумруд», истец) обратился в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее также – ПАО «Россети Сибирь», ответчик) о взыскании части сумы неосновательного обогащения в размере 45000 рублей, части процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 5 000 рублей, начисленных за период с 15.11.2022 по 06.07.2023 с последующим начислением по день фактической оплаты суммы 615 662 рубля 44 копейки.

В представленном отзыве ответчик возражал относительно требований истца, просил в их удовлетворении отказать. По утверждению ответчика, с истцом заключен договор на осуществление технологического присоединения от 15.11.2022 № 20.0300.7113.22, который является действующим и заключенным. Истец не доказал факт наличия на стороне ответчика неосновательного обогащения. 

Определением суда от 21 июля 2023 года исковое заявление принято к рассмотрению в упрощенном порядке искового производства.

Определением суда от 11 августа 2023 года принято уточнение исковых требований до суммы неосновательного обогащения в размере 615 662 рубля 44 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 29 602 рубля 40 копеек, начисленных за период с 15.11.2022 по 06.07.2023 с последующим начислением, начиная с 07.07.2023 по день оплаты.

Определением от 18 сентября 2023 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании представитель истца представил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит суд взыскать с ответчика 609 625 рублей 13 копеек неосновательного обогащения. Поддержал исковые требования с учетом уточнения  в полном объеме, пояснил, что основание исковых требований в ходе рассмотрения настоящего дела изменено истцом,  исходя из подписанного сторонами соглашения, срок  возврата денежной суммы наступил, однако  обязательство ответчиком по возврату денежной суммы  в размере 609 625 рулей 13 копеек  так и не исполнено ответчиком.

Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял заявленное уточнение исковых требований как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.

Суд приобщил поступившие документы к материалам дела.

Представитель ответчика в судебном заседании против обязанности по возврату денежной суммы на основании заключенного сторонами соглашения не возражал, пояснил, что вопрос о перечислении денежной суммы находится на согласовании, денежных средств у ответчика нет.

В судебном заседании объявлен непродолжительный перерыв.

После объявленного перерыва суд возобновил судебное заседание в том же составе, в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Информация о движении дела и определения суда опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда Республики Бурятия в сети Интернет http://buryatia.arbitr.ru и сайте http://kad.arbitr.ru.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд приходит к следующим выводам.

В целях энергоснабжения жилой застройки в 2021 году выполнено строительство линии электропередач протяженностью 284 метров, кадастровый номер сооружения 03:24:000000:70752.

ЖСК «Изумруд» через портал электросетевых услуг «портал-тп.рф» обратилось в ПАО «Россети Сибирь» с заявкой от 10.05.2022 № 4664256 на технологическое присоединение «ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4» для электроснабжения жилой застройки, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.144 (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт).

Впоследствии 27.09.2022 сотрудник ПАО «Россети Сибирь» со служебной электронной почты: zakharova tm@ul.rosseti-sib.ru направил на электронную почту 443274@inhox.ru письмо с приложением технических условий № 8000525468, условий типового договора № 20.0300.5788.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и счет от 20.09.2022 № 1600011221 на сумму 550 рублей. При этом в письме было указано о технической ошибке на портале, в связи с чем отправить проект договора, технические условия и счет возможным не представляется, также сообщалось о необходимости оплатить счет, после чего договор будет заключен.

ЖСК «Изумруд» платежным поручением от 06.10.2022 № 1839 на сумму 550 рублей оплатил вышеуказанный счет от 20.09.2022 № 1600011221.

Как пояснил истец, на портале указано, что первоначальная заявка № 4664256 30.09.2022 аннулирована без указания причин. При этом сотрудники ПАО «Россети Сибирь» сославшись на технические неполадки на портале электросетевых услуг, устно по телефону сообщили ЖСК «Изумруд» о необходимости подачи новой заявки.

В этой связи 03.10.2022 ЖСК «Изумруд» подана новая заявка № 6030424 на технологическое присоединение объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу г. Улан-Удэ, мкр.144. 

15.11.2022 сторонами заключен договор № 20.0300.7113.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно договору объект электросетевого хозяйства – г. Улан-Удэ, мкр.144 (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт).

По условиям договора (пункт 10) стоимость технологического присоединения составляет 615 652 рубля 45 копеек.

Платежным поручением от 15.11.2022 № 332 общество «Цагис» оплатило ответчику 615 652 рубля 45 копеек с указанием в назначении платежа: «оплата по счету № 1600013273 от 09.11.2022 за технологическое присоединение ЖСК «Изумруд» по договору № 20.0300.7113.22.».

Ссылаясь на то, что в отношении одного и того же объекта были заключены два договора, произведена двойная оплата за технологическое присоединение, при этом ПАО «Россети Сибирь» нарушило права и интересы ЖСК «Изумруд», необоснованно аннулировав первую заявку и введя в заблуждение о технических ошибках, истец направил ответчику претензию от 07.02.2023 с требованием возвратить 615 652 рубля 45 копеек – сумму неосновательного обогащения. 

Оставление данной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Постановлением УФАС по Республике Бурятия от 08.06.2023 № 003/04/9.21-285/2023 ПАО «Россети Сибирь» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ (нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)) и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 рублей. 

Правоотношения сторон возникли в связи с обращением ЖСК «Изумруд» в ПАО «Россети Сибирь» с заявкой от 10.05.2022 № 4664256 на технологическое присоединение «ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4» для электроснабжения жилой застройки, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.144.

Договор технологического присоединения к электрическим сетям является публичным договором.

Нормы, регламентирующие порядок осуществления технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, а также заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств согласно статье 26 Закона об электроэнергетике содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения, в том числе в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), в которых установлены порядок и процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий.

Пунктом 3 Правил № 861 установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно пункту 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. Порядок заключения и выполнения договора на технологическое присоединение определен разделом II Правил № 861.

Порядок и сроки заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям установлены в пункте 15 Правил № 861.

Договор должен в обязательном порядке содержать перечень мероприятий по ТП и обязательства сторон по их выполнению, которые определяются в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора (пункт 16 Правил № 861).

В силу абзаца восьмого пункта 15 Правил № 861 сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения, и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил № 861.

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 названных Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов.

В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (абзац десятый пункта 15 Правил № 861).

При ненаправлении заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется (абзац тринадцатый пункта 15 Правил № 861).

Как указано выше, постановлением УФАС по Республике Бурятия от 08.06.2023 № 003/04/9.21-285/2023 ПАО «Россети Сибирь» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 рублей. 

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении антимонопольной службой установлено, что до 27.09.2022 ПАО «Россети Сибирь» в нарушение Правил № 861 бездействовало по своевременному направлению в адрес ЖСК «Изумруд» оферты договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий и 30.09.2022 необоснованно (в отсутствие оснований) аннулировало заявку ЖСК «Изумруд».

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи истцом новой заявки от 03.10.2022 № 6030424 на технологическое присоединение объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу г. Улан-Удэ, мкр.144. 

В ходе рассмотрения настоящего дела стороны пришли к соглашению о том, что между сторонами  заключен договор с 15.11.2022 – даты оплаты обществом «Цагис» за ЖСК «Изумруд» платежным поручением от 15.11.2022 № 332 на сумму 615 652 рубля 45 копеек. 

Впоследствии стороны заключили соглашение от 06.03.2024, согласно которому стороны расторгли договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.11.2022 № 20.0300.7113.22. При этом в пункте 4 стороны установили, что сетевой организацией выполнены мероприятия в части подготовки, выдаче, согласования технических условий на сумму 6 037 рублей 31 копейка, в пункте 5 – ЖСК «Изумруд» оплачена сумма 615 662 рубля 44 копейки. В пункте 6 стороны указали, что сетевая организация обязуется перечислить уплаченные по договору денежные средства в размере 609 625 рулей 13 копеек в течение 95 календарных дней с даты поступления в сетевую организацию подписанного экземпляра соглашения о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения и требования о возврате денежных средств с указанием банковских реквизитов. 

Сторонами подписан акт приема-передачи на выполнение сетевой организацией работ на сумму 6 037 рублей 71 копейку.

Поскольку ответчиком во исполнение принятого на себя обязательства по соглашению от 06.03.2024 денежные средства в размере 609 625 рулей 13 копеек в течение 95 календарных дней (срок истек 10.06.2024) не выплачены истцу, последний полагает, что на стороне ПАО «Россети Сибирь» возникло неосновательное обогащение на указанную сумму. 

С учетом изложенного, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 609 625 рулей 13 копеек неосновательного обогащения.

Суд принял заявленное уточнение исковых требований как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.

Положения, регулирующие обязательства вследствие неосновательного обогащения закреплены в главе 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого Кодекса.

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований такого приобретения или сбережения. При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Исходя из содержания указанной нормы права удовлетворение иска о возмещении неосновательного обогащения возможно при наличии следующих условий: приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для такого приобретения или сбережения.

Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что не возражает против обязанности по возврату денежной суммы, предусмотренной соглашением от 06.03.2024 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.11.2022 № 20.0300.7113.22, однако вопрос о перечислении спорной суммы находится на согласовании у руководства общества. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в материалах дела доказательств возврата ответчиком неосновательно удерживаемых денежных средств, при наличии документально подтвержденных требований истца, арбитражный суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца о взыскании с ответчика 609 625 рублей 13 копеек обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Иные доводы сторон существенного значения для рассмотрения дела не имеют и не могут повлиять на выводы суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины также подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р  Е  Ш  И Л:

Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу жилищно-строительного кооператива «Изумруд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 609 625 рублей 13 копеек неосновательного обогащения, 2000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 13193 рубля.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу  по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

 

Судья                                                                                                А.В. Богданова