Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-227286/24-83-894

г. Москва

03 декабря 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2024 года

Полный текст решения изготовлен 03 декабря 2024 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-894), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елпаевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "Главстрой" (ИНН 

<

***>) к ООО "Пересвет" (ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору № К/МИ-18 от 23.08.2022 в размере 7 694 748 руб., неустойки за период с 16.07.2023 по 05.09.2024 в размере 3 216 405 руб.,

при участии:

от истца –  ФИО1.(Приказ № 1 от 17.05.2021, паспорт).

от ответчика –  ФИО2 на основании доверенности № 1 от 23.07.2024

У С Т А Н О В И Л:

ООО "Главстрой" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО "Пересвет" о взыскании задолженности по договору № К/МИ-18 от 23.08.2022 в размере 7 694 748 руб., неустойки за период с 16.07.2023 по 05.09.2024 в размере 3 216 405 руб.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам отзыва.

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности,  заслушав представителей истца и ответчика, считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материала дела между ООО "Главстрой"  и ООО "Пересвет" 23 сентября 2022 года заключен договор подряда №К/МИ-18, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство по выполнению кровельных работ на объекте: 3-х секционный, 4-х этажный , 90-о квартирный жилой дом №18 и объектов инженерной инфраструктуры, расположенной по адресу: Московская область, Истринский район, Ивановское сельское поселение, д.Высоково (идентификатор объекта р-35034) в соответствии со сметой. Цена договора составляет 1 513 992 руб.      

23 сентября 2022 года между ООО "Главстрой"  и ООО "Пересвет" заключен договор подряда №К/ВИ-29, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство по выполнению кровельных работ на объекте; Пять жилых домов четвертой очереди: №29 (4-этажный, 40-квартирный), расположенный по адресу: 143500, 

<

...> (идентификатор объекта р-9403) в соответствии со сметой. Цена договора составляет 113 616 руб. 

23 сентября 2022 года между   ООО "Главстрой"  и ООО "Пересвет" заключен договор подряда №К/МИ-24, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство по выполнению кровельных работ на объекте:   3-х секционный, 4-х этажный, 90-о квартирный жилой дом №24 и объектов инженерной инфраструктуры, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ивановское сельское поселение, д.Высоково (идентификатор объекта р-40317) в соответствии со сметой.    Цена договора составляет 1 207 337,40 руб.  

23 сентября 2022 года между   ООО "Главстрой"  и ООО "Пересвет" заключен договор подряда №К/МИ-21, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство по выполнению кровельных работ на объекте:   3-х секционный, 4-х этажный, 97 квартирный жилой дом №21 и объектов инженерной инфраструктуры, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ивановское сельское поселение, д.Высоково (идентификатор объекта р-34833) в соответствии со сметой.  Цена договора составляет 37 740 руб.     

23 сентября 2022 года между   ООО "Главстрой"  и ООО "Пересвет" заключен договор подряда №К/МИ-14, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство по выполнению кровельных работ на объекте:   5-и секционный, 4-х этажный, 75-и квартирный жилой дом №14 и объектов инженерной инфраструктуры, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ивановское сельское поселение, д.Высоково (идентификатор объекта р-39742) в соответствии со сметой. Цена договора составляет 641 520 руб.      

23 сентября 2022 года между ООО "Главстрой"  и ООО "Пересвет" заключен договор подряда №К/ВИ-34, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство по выполнению кровельных работ на объекте; два жилых дома №34 по ГП (4-этажные, 40-квартирные), расположенный по адресу: 143500, 

<

...> (идентификатор объекта р-9230) в соответствии со сметой. Цена договора составляет 450 172,80 руб. 

23 сентября 2022 года между ООО "Главстрой"  и ООО "Пересвет" заключен договор подряда №К/ВИ-31, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство по выполнению кровельных работ на объекте; пять жилых домов четвертой очереди: №31 (4-этажный, 64-квартирный), расположенный по адресу: 143500, 

<

...> (идентификатор объекта р-9614) в соответствии со сметой. Цена договора составляет 245 246,40 руб. 

20 января 2023 года между ООО "Главстрой"  и ООО "Пересвет" заключен договор подряда №3-3МИ/29, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство по выполнению кровельных работ на объекте: два жилых дома №34 по ГП (4-этажные, 40-квартирные), расположенный по адресу: 143500, 

<

...> (идентификатор объекта р-9230) в соответствии со сметой. Цена договора составляет 317 380,80 руб. 

Согласно п.5.1 договоров работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.   

Ссылаясь на то, что сумма оплаченных денежных средств составляет 19 930 070 руб., а выполнено работ на сумму 27 624 818 руб., истец обратился в суд с настоящим иском.   

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ч.1 ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ч.1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 720 ГК РФ Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с ч. 2 ст. 720 ГК РФ Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Частью 3 ст. 720 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Согласно ч.1 ст.743 ГК РФ, Подрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним   требования, и со сметой, определяющей цену работ.  

В соответствии с ч. 3 ст. 753 ГК РФ Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.

На основании ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Согласно ч.3. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает их иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с ч.1 ст.424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В ходе исследования представленных и имеющихся в деле доказательств судом установлено, что истцом в материалы дела представлены сметы по каждому из договоров, которые содержат стоимость работ, налог и общую сумму, включающую налог. Факт оплаты заказчиком работ, указанных в сметах и выполненных подрядчиком, подтверждается представленными в дело платежными поручениями №574 от 06.06.2023, №328 от 27.04.2023, №271 от 14.04.2023, №137 от 06.02.2023, №26 от 13.01.2023, №25 от 13.01.2023, №24 от 13.01.2023, №387 от 30.12.2022, №238 от 09.12.2022, №1464 от 14.11.2022, №1463 от 14.11.2022, №1466 от 14.11.2022, №1461 от 14.11.2022, №1465 от 14.11.2022, №1462 от 14.11.2022, №1426 от 09.11.2022, №1352 от 01.11.2022, №46 от 11.10.2022, №952 от 27.09.2022, №985 от 12.09.2022, №937 от 05.09.2022, №388 от 17.08.2022, №389 от 17.08.2022. 

Надлежащих и достоверных доказательств, подтверждающих выполнение работ сверх указанных сумм, оплаченных ответчиком, истцом в нарушении ст. 65 АПК РФ суду не представлено.   

Таким образом, в связи отсутствием каких-либо соглашений, содержащих иной объём и стоимость работ по договорам, отсутствием доказательств выполнения работ сверх сумм оплаченных ответчиком, у суда отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на истца расходы по госпошлине.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 702, 711, 720, 748, 753 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 41,  65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                   В.П. Сорокин