Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-107269/24-107-723

18 сентября 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения изготовлена 10 сентября 2024 года.

Полный тест решения изготовлен 18 сентября 2024 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Маховых Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-107269/24-107-723 по иску ООО "ТСА" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы задолженности по договору № РВС-2023-03-17 от 11.04.2023 в размере 15 814 950,66 р., неустойки с 24.01.2024 в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день задержки, но не более 10%, по дату фактического исполнения обязательства, при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 09.01.2024, паспорт, диплом, представителей ответчика: ФИО2, доверенность от 20.06.2024, паспорт, диплом,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТСА"  обратилось в суд к ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" с требованием о взыскании суммы задолженности по договору № РВС-2023-03-17 от 11.04.2023 в размере 15 814 950,66 р., неустойки с 24.01.2024 в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день задержки, но не более 10%, по дату фактического исполнения обязательства ( с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ уточнения исковых требований).

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, пояснил, что требует задолженность только по подписанным актам КС-2, последний акт не подписан и не вошел в требование.  

Ответчик представил отзыв, указал на наличие замечаний к работам государственного заказчика, проведение внесудебной экспертизы качества работ.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца в виду следующего.

Как следует из материалов дела, между ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" и ООО "ТСА" заключен договор подряда №РВС-2023-03-17 от 11.04.2023 на выполнение работ по монтажу, пуско-наладке систем вентиляции, кондиционирования, автоматизации и диспетчеризации инженерных систем на объекте: «ГБУЗ «Детская поликлиника №81 ДЗМ» филиал №1 по адресу: 

<

...>. 

В соответствии с п.1.1 договора подрядчик обязуется в соответствии с локальной сметой, с применением давальческих материалов выполнить работы по завершению монтажа систем водоснабжения и водоотведения согласно Приложения №1 к договору на объекте: «ГБУЗ «Детская поликлиника №81 ДЗМ» филиал №1 по адресу: 

<

...>, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Стоимость работ составляет 81 873 550,95 руб. , включая коэффициент договорной цены (К-0,80) , в том числе НДС-20%. Срок начала работ не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения аванса. Окончание работ- не позднее 31 июля 2023 года при условии исполнения заказчиком п.3.3 договора.

В соответствии с п.3.3 договора заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в следующем порядке: 28 655 742,83 руб. до 20 апреля 2023 года, 7 000 000 руб. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Дополнительного соглашения №1 от 05.06.2023 при условии своевременного получения счета от подрядчика. 

ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"  оплатило в адрес ООО "ТСА" вышеуказанные денежные средства на сумму 28 655 742,83 руб.  и  7 000 000 руб. , что подтверждается платежными поручениями №364 от 18.04.2023, №405 от 07.06.2023.       

30.06.2023 между сторонами подписано Дополнительное соглашение №2, в соответствии с которым заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере 5 000 000 руб. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соглашения при условии своевременного получения счета от подрядчика. 

ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"  перечислило  ООО "ТСА"  денежные средства в размере 5 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №570 от 28.07.2023, №579 от 31.07.2023, №582 от 01.08.2023, №603 от 02.08.2023, №617 от 07.08.2023, №620 от 08.08.2023, №632 от 11.08.2023, №678 от 18.08.2023, №796 от 29.08.2023. 

Таким образом, ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"   в рамках договора оплатило аванс в размере 43 655 742,83 руб. Часть суммы в соответствии с условиями договора была отнесена сторонами в счет авансовых платежей  по подписанным КС-2,3 о выполнении работ по договору по КС-2,3 №1 от 10.08.2023 на сумму 3 723 021,35 руб. по КС-2,3 №2/1 от 11.12.2023 на 17 611 120,64 руб., по КС-2,3 №3/1 от 11.12.2023 на 1 685 365,83 руб. Оставшаяся сумма поступивших от ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"  денежных средств в качестве аванса в соответствии с условиями договора учтена сторонами в предъявленном в январе 2024 года окончательном выполнении работ по договору.

В соответствии с договором подряда №РВС-2023-03-17 ООО "ТСА"   выполнило работы на сумму: КС-3 №1 от 10.08.2023 на сумму 7 230 571,66 руб. (подписана сторонами без замечаний), гарантийное удержание 5%-361 528,58 руб.; по КС-3 №2/1 от 11.12.2023 на сумму 33 029 108,49 руб. (подписана сторонами без замечаний), гарантийное удержание 5%-1 651 455,42 руб.; по КС-3 №3/1 от 11.12.2023 на сумму 3 160 851,14 руб. (подписана сторонами без замечаний), гарантийное удержание 5%-158 042,56 руб.; КС-3 №4 от 04.03.2024 на сумму 19 180 198,69 руб. (направлено в адрес ответчика), гарантийное удержание 5%-959 009,93 руб. 

Согласно ч.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с ч.1 ст.753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В соответствии с условиями договора подряда   №РВС-2023-03-17 от 11.04.2023 мотивированного отказа в приемке выполненных работ от ответчика не поступало. Таким образом, работы считаются принятыми ответчиком в полном объеме.    

Сумма выполненных работ по договору составляет 62 600 729,98 руб. Сумма гарантийного удержания-3 130 036,49 руб. Сумма аванса 43 655 742,83 руб.    

Таким образом, сумма задолженности ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" перед ООО "ТСА"  с учетом зачетов аванса и гарантийного удержания составляет 15 814 950,66 руб. 

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 и 3 статьи 720 ГК РФ заказчик работ обязан в сроки и в порядке предусмотренном договором осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием подрядчика, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При принятии работы без проверки или при отсутствии возражений против качества работы заказчик не вправе ссылаться на ее недостатки.

Судом установлено, что истец свои обязательства по выполнению работ по договору полностью исполнил, ответчик свои обязательства по оплате за выполненные работы не исполнил, на дату рассмотрения дела долг в размере 15 814 950,66 руб.   ответчиком не оплачен, в связи с чем, в силу положений статей 309, 310, 720, 753 ГК РФ, требование истца о взыскании указанной суммы долга с ответчика подлежит удовлетворению.

Довод ответчика о сальдировании и учете авансовых платежей по подписанным КС, не принимается судом, поскольку  все работы истцом выполнены.

Ссылка на наличие недостатков в работе, является необоснованной и не принимается судом, поскольку отсутствует уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора и экспертиза.

Уведомление о расторжении договора от 09.09.2024 не принимается, поскольку является незаконным, с учетом установленного судом факта выполнения истцом всех работ по договору и закрытие всех авансов.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

Согласно пункта 7.11 договора, за нарушение заказчиком сроков оплаты, предусмотренных договором, более чем на 5 (пять) банковских дней заказчик оплачивает подрядчику неустойку в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день задержки, но не более 10% от общей стоимости работ по договору.

Пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Суд проанализировав расчеты и требования истца, признает их обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины понесенные истцом подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "РЕНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" в пользу ООО "ТСА" сумму задолженности по договору № РВС-2023-03-17 от 11.04.2023 в размере 15 814 950,66 р., неустойки с 24.01.2024 в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день задержки, но не более 10%, по дату фактического исполнения обязательства, государственную пошлину в размере 102 075 р.

Возвратить ООО "ТСА" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 075 р., уплаченную по платежному поручению № 2202 от 15.05.2024.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

СУДЬЯ

М.В. Ларин