Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-35647/18-159-264

10 апреля 2018г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 02 апреля 2018г.

Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2018г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судья Константиновская Н.А.,  единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску  Министерство обороны Российской Федерации (ИНН 

<

***>, дата регистрации 27.02.2003г., адрес: 119019, 

<

...>)

к ОАО «НПО «Стрела» (ИНН 

<

***>, дата регистрации 23.09.2002г., адрес: 300002, 

<

...>)

о взыскании 5 056 648руб. 36коп.

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 28.08.2017г.

от ответчика: неявка

У С Т А Н О В И Л:

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в арбитражный суд с иском   к ОАО «НПО «Стрела» о взыскании 5 056 648руб. 36коп. – неустойки. 

Исковые требования мотивированным тем, что ответчиком не исполнено надлежащим образом обязательство по договору, в связи, с чем истец обратился с настоящим иском в суд. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явился, отзыва на иск не представил. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.123,156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела между Министерством обороны Российской Федерации (далее - Заказчик) и ОАО «НПО «Стрела» (далее - Поставщик) заключен государственный контракт от 29.04.2015 №З/3/3/132-15-ДГОЗ на изготовление и поставку запасных частей и принадлежностей к средствам наземной артиллерийской разведки (ЗИП-Г к изделию 1JI260) (далее - Товар) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015-2017 годах.

Согласно п 2.1. и п.п. 3.2.2. Контракта Поставщик обязан изготовить и поставить Заказчику товар, предусмотренный к поставке в 2015 году, в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом в срок до 25.11.2015г.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии со ст. 526 ГК РФ «По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров».

В соответствии со ст. 525 ГК РФ, «К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса».

П. 1 ст. 516 ГК РФ предусмотрено, что «Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями».

В соответствии со ст. 485 ГК РФ «Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи».

Согласно ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Срок исполнения обязательства по Контракту составляет 210 дней. Поставщик нарушил условия Контракта, товар изготовлен и поставлен с просрочкой, что подтверждается актом приема - передачи № 3A-03/15 от 29 декабря 2015 г.

Просрочка исполнения обязательства по Контракту составляет 35 дней.

В соответствии ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом или соглашением сторон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пени), определенную законом или договором.

В соответствии с п. 11.2. Контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размерах, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки.

Согласно положениям части 3.1. статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При изучении представленных доказательств, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным, Ответчиком не оспорен.

Таким образом, наличие установленной и документально подтвержденной просрочки в поставке товара является основанием для  удовлетворения требований истца.

Госпошлина  по иску относится на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь  ст. ст. 8, 12, 307, 309, 310, 314, 395, 431, 454, 486 ГК РФ, ст. ст. 49, 67, 68, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Открытого акционерного общества «НПО «Стрела» (ИНН 

<

***>, дата регистрации 23.09.2002г., адрес: 300002, 

<

...>)  в пользу  Министерство обороны Российской Федерации (ИНН 

<

***>, дата регистрации 27.02.2003г., адрес: 119019, 

<

...>) 5 056 648 (пять млн. пятьдесят шесть тыс. шестьсот сорок восемь) руб. 36 коп.  – неустойки.

Взыскать с Открытого акционерного общества «НПО «Стрела» (ИНН 

<

***>, дата регистрации 23.09.2002г., адрес: 300002, 

<

...>)  в доход Федерального бюджета 48 283 (сорок восемь тыс. двести восемьдесят три) руб. – госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья             Н.А. Константиновская