ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994 Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 09АП-42768/2024

г. Москва

30 июля 2024 года

Дело № А40-31587/24

Резолютивная часть постановления оглашена: 16 июля 2024 года

Полный текст постановления изготовлен: 30 июля 2024 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семёновой А.Б.,

судей: Тетюка В.И., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Шаркс" на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2024 по делу № А40-31587/24

по иску (заявлению) ИП ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 16.05.2022) к ООО "Шаркс" (109386, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, Таганрогская ул., д. 10/21, помещ. III, помещ. 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.07.2008, ИНН: 

<

***>, КПП: 772301001)

о взыскании 9 170 497 руб. 67 коп.

При участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 07.02.2024,

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Шаркс" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда № 0801/23 от 08.01.2023 в размере 461 357 руб. 10 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 26 784 руб. 40 коп. за период с 26.09.2023 по 29.10.2023, задолженности по договору субподряда № 04-04/2023 от 04.04.2023 в размере 760 128 руб. 55 коп.,  процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 48 044 руб. 98 коп. за период с 11.09.2023 по 14.02.2024, задолженности по договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04.04.2023 в размере 574 184 руб. 86 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.09.2023 по 14.02.2024 в размере 35 914 руб. 59 коп., задолженности по договору субподряда № 26-04/23 от 26.04.2023 в размере 514 904 руб. 75 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 32 545 руб. 26 коп. за период с 11.09.2023 по 14.02.2024, задолженности по договору подряда № 2704/23 от 27.04.2023 в размере 2 686 989 руб. 84 коп.,  процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 206 827 руб. 01 коп. за период с 25.07.2023 по 14.02.2024, задолженности по договору субподряда № 05-05/2023 от 05.05.2023 в размере 1 555 240 руб. 51 коп.,    процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 64 426 руб. 71 коп. за период с 10.11.2023 по 14.02.2024, задолженности по договору субподряда № 06-05/2023 от 06.05.2023 в размере 1 537 849 руб. руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 63 706 руб. 25 коп. за период с 10.11.2023 по 14.02.2024, задолженности по договору субподряда № 01-08/2023 от 01.08.2023 в размере 565 829 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 35 764 руб. 03 коп. за период с 11.09.2023 по 14.02.2024.

Решением от 16.05.2024 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит суд назначить по арбитражному делу №А40-31587/2024 судебную экспертизу на предмет определения фактических выполненных работ по договору подряда, решение Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2024 по делу №А40-31587/2024 отменить и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований ИП ФИО1 к ООО «Шаркс» отказать.

В судебном заседании апелляционного суда истец по доводам апелляционной жалобы возражал, просил оставить решение без изменения. Ответчик явку представителя не обеспечил.

В апелляционной жалобе ответчик просил назначить судебную экспертизу.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены, в том числе, вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта. Согласно ч. 3 п. 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", при невнесении лицом, участвующим в деле, денежных сумм суд вправе отклонить такое ходатайство. В нарушение вышеуказанных разъяснений ответчиком в адрес суда не представлены согласие экспертного учреждения на производство экспертизы, сведения о размере вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, на депозитный счет суда не внесена денежная сумма. При изложенных обстоятельствах, оснований для удовлетворения ходатайства не имеется. Кроме того, совокупность собранных по делу доказательств позволяет рассмотреть спор без назначения судебной экспертизы.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, изучив материалы дела, судебная коллегия установила следующее. 

Как следует из материалов дела, 08.01.2023 между ООО «Шаркс» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО3, с одной стороны, и ИП ФИО4 (далее – подрядчик), с другой стороны, заключен договор подряда № 0801/23, в соответствии с п. 1.1. которого истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию ответчика выполнить работы по устройству фасада на объекте здравоохранения (ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 5) по адресу: 

<

...> поля, д. 2, стр. 1, а ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. договора стоимость вышеуказанных работ составляет 461 357 руб. 10 коп., НДС не облагается. Заказчик производит оплату аванса в размере 50% от суммы договора в течение 15 рабочих дней с даты получения от подрядчика счета на аванс. Расчет производится с подрядчиком по факту выполнения работ ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца, после подписания заказчиком акта приемки-передачи работ, акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением договора. Расчеты с подрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

14.09.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями договора, являющиеся основанием для исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ: акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 461 357 руб. 10 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 на сумму 461 357 руб. 10 коп., и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 14-1 от 14.09.2023 на сумму 461 357 руб. 10 коп., который ответчик был обязан оплатить не позднее 25.09.2023. Однако, денежные средства ответчик не перечислил.

04.04.2023 между ООО «Шаркс» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО3, с одной стороны, и ИП ФИО4 (далее – подрядчик), с другой стороны, заключен договор субподряда № 04-04/2023, в соответствии с п. 1.1. которого истец принял на себя   обязательство  в   установленный   срок  по  заданию   ответчика   выполнить   работы: монтаж кассет, отливов, парапетов, откосов, отливов на оконных и дверных проемах на объекте здравоохранения (ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 филиал № 5 Департамента здравоохранения г. Москвы» по адресу: 

<

...>, а ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 995 241 руб. 40 коп., НДС не облагается, генподрядчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от субподрядчика счета на аванс. Расчет производится с подрядчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки-передачи работ, акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением договора. Расчеты с субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 04.04.2023; окончание работ – 31.05.2023.

01.06.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение о продлении сроков к договору субподряда № 04-04/2023 от 04.04.2023, в соответствии с которым работы осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 04.04.2023; окончание работ – 05.09.2023. 

15.07.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 04-04/2023 от 04.04.2023, в соответствии с п. 5 которого стоимость работ по настоящему договору составляет 3 755 369 руб. 55 коп., НДС не облагается.

22.05.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 2 995 241 руб. 40 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 2 995 241 руб. 40 коп. и счет-фактура.

На основании указанных документом истцом выставлен счет № 6 от 22.05.2023 на сумму 2 995 241) руб. 40 коп. Ответчик был обязан оплатить счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 13.06.2023.

23.05.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 299 524 руб. 14 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 299 524 руб. 14 коп., и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 18 от 06.07.2023 на сумму 299 524 руб. 14 коп. Ответчик был обязан оплатить счет в течение 15 рабочих дней, то есть не позднее 27.07.2023.

21.08.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 760 128 руб. 55 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 760 128 руб. 55 коп., и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 21-2 от 21.08.2023 на сумму 760 128 руб. 55 коп. Ответчик обязан был произвести окончательный расчет в течение 15 рабочих дней, то есть не позднее 11.09.2023.

04.04.2023 между ООО «Шаркс» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО3, с одной стороны, и ИП ФИО4 (далее – подрядчик), с другой стороны, заключен договор субподряда № 04-04-1/2023, в соответствии с п. 1.1. которого истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию ответчика выполнить работы: монтаж кассет, отливов, парапетов, откосов, отливов на оконных и дверных проемах на объекте здравоохранения (ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ филиал № 2» по адресу: 

<

...>, стр. 1, а ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 995 241 руб. 40 коп., НДС не облагается. генподрядчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от субподрядчика счета на аванс. Расчет производится с подрядчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки-передачи работ, акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением договора. Расчеты с субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 04.04.2023; окончание работ – 31.05.2023.

01.06.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение №1 к договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04.04.2023, в соответствии с п. 1 которого работы осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 04.04.2023; окончание работ – 25.09.2023.

15.07.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04.04.2023, в соответствии с п. 5 которого стоимость работ по договору составляет 3 569 522 руб. 16 коп., НДС не облагается.

23.05.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 1 943 470 руб. 45 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 1 943 470 руб. 45 коп.,. и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 14 от 23.50.2023 на сумму 1 943 470 руб. 45 коп. Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть не позднее 14.06.2023.

24.05.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 1 051 770 руб. 94 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 1 051 770 руб. 94 коп., и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 16 от 06.07.2023 на сумму 1 051 770 руб. 94 коп. Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 27.07.2023.

23.08.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 574 184 руб. 76 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 574 184 руб. 76 коп. и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 23-2 от 23.08.2023 на сумму 574 184 руб. 76 коп. Ответчик обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 13.09.2023.

26.04.2023 между ООО «Шаркс» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО3, с одной стороны, и ИП ФИО4 (далее – подрядчик), с другой стороны, заключен договор подряда № 2604/23, в соответствии с п. 1.1. которого истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию ответчика выполнить работы по покраске фасада на объекте здравоохранения (ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 5) по адресу: 

<

...>, а ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 327 500 руб. 40 коп., НДС не облагается. Заказчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от подрядчика счета на аванс. Расчет с подрядчиком производится ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца, после подписания заказчиком акта приемки-передачи работ, акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением договора. Расчеты с подрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. договора, работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 26.04.2023; окончание работ – 31.05.2023.

01.06.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение к договору подряда № 2604/23 от 26.04.2023, в соответствии с п. 1 которого работы осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 26.04.2023; окончание работ – 05.09.2023.

15.07.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 2604/23 от 26.04.2023, в соответствии с п. 5 которого стоимость работ составляет 2 842 404 руб. 75 коп., НДС не облагается.

06.07.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 2 327 500 руб., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 2 327 500 руб. и счет-фактура. На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 19 от 06.07.2023.

21.08.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 514 904 руб. 75 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 514 904 руб. 75 коп., и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 21-1 от 21.08.2023 на сумму 514 904 руб. 75 коп. Ответчик обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 11.09.2023.

27.04.2023 между ООО «Шаркс» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО3, с одной стороны, и ИП ФИО4 (далее – подрядчик), с другой стороны, заключен договор подряда № 2704/23, в соответствии с п. 1.1. которого истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию ответчика выполнить работы по покраске фасада на объекте здравоохранения (ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 2) по адресу: 

<

...>, стр. 1, а ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 327 500 руб. 40 коп., НДС не облагается. Заказчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от подрядчика счета на аванс. Расчет с подрядчиком производится ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца, после подписания заказчиком акта приемки-передачи работ, акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением договора. Расчеты с подрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 27.04.2023; окончание работ – 31.05.2023.

01.06.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение к договору подряда № 2704/23 от 27.04.2023, в соответствии с п. 1 которого работы осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 26.04.2023; окончание работ – 25.09.2023.

15.07.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 2704/23 от 27.04.2023, в соответствии с п. 5 которого стоимость работ по настоящему договору составляет 2 792 615 руб. 38 коп., НДС не облагается».

06.07.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт   о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 2 327 500 руб., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 2 327 500 руб. и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом истцом выставлен счет № 16 от 06.07.2023. Ответчик обязан оплатить вышеуказанный счет не позднее 25.07.2023.

23.08.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 464 115 руб. 38 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 464 115 руб. 38 коп. и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом выставлен счет № 23-1 от 23.08.2023. Ответчик обязан произвести окончательный не позднее 25.07.2023.

05.05.2023 между ООО «Шаркс» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО3, с одной стороны, и ИП ФИО4 (далее – подрядчик), с другой стороны, заключен договор субподряда № 05-05/2023, в соответствии с п. 1.1. которого истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию ответчика выполнить работы по монтажу гранита на объекте здравоохранения (ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 5) по адресу: 

<

...>, а ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. договора стоимость вышеуказанных работ составляет 2 235 539 руб. 12 коп., НДС не облагается. Заказчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от подрядчика счета на аванс. Окончательный расчет с субподрядчиком производится по факту выполненных работ, в течение 15 рабочих дней с даты подписания генподрядчиком акта приемки-передачи работ, акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением договора. Расчеты с субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 05.05.2023; окончание работ – 10.09.2023.

05.09.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение к договору субподряда № 05-05/2023 от 05.05.2023, в соответствии с п. 1 которого стоимость работ составляет 1 555 240 руб. 51 коп., НДС не облагается».

19.10.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 1 555 240 руб. 51 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 1 555 240 руб. 51 коп. и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документов истцом выставлен счет № 7 от 31.10.2023. Ответчик обязан произвести окончательный расчет не позднее 10.11.2023.

06.05.2023 между ООО «Шаркс» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО3, с одной стороны, и ИП ФИО4 (далее – подрядчик), с другой стороны, заключен договор субподряда № 06-05/2023, в соответствии с п. 1.1. которого истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию ответчика выполнить работы по монтажу гранита на объекте здравоохранения (ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 2) по адресу: 

<

...>, стр. 1, а ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. договора стоимость вышеуказанных работ составляет 2 089 288 руб. 90 коп., НДС не облагается. Генподрядчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от подрядчика счета на аванс. Окончательный расчет с субподрядчиком производится по факту выполненных работ, в течение 15 рабочих дней с даты подписания генподрядчиком акта приемки-передачи работ, акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением договора. Расчеты с субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 06.05.2023; окончание работ – 01.07.2023.

16.08.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение к договору субподряда № 05-05/2023 от 05.05.2023, в соответствии с п. 1 которого работы осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 06.05.2023; окончание работ – 25.09.2023.

06.09.2023 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение к договору субподряда № 06-05/2023 от 06.05.2023, в соответствии с п. 1 которого стоимость работ по настоящему договору составляет 1 571 178 руб. 50 коп., НДС не облагается.

19.10.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 1 537 849 руб., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 1 537 849 руб., счет-фактура.

На основании вышеуказанных документов истцом выставлен счет № 8 от 31.10.2023. Ответчик обязан произвести окончательный расчет не позднее 10.11.2023.

01.08.2023 между ООО «Шаркс» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО3, с одной стороны, и ИП ФИО4 (далее – подрядчик), с другой стороны, заключен договор субподряда № 01-08/2023, в соответствии с п. 1.1. которого истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию ответчика выполнить работы по монтажу потолков металлосайдингом на объекте здравоохранения (ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 5) по адресу: 

<

...>, а ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. договора стоимость вышеуказанных работ составляет 565 829 руб. 90 коп., НДС не облагается. Генподрядчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от подрядчика счета на аванс. Окончательный расчет с субподрядчиком производится по факту выполненных работ, в течение 15 рабочих дней с даты подписания генподрядчиком акта приемки-передачи работ, акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением договора. Расчеты с субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 01.08.2023; окончание работ – 30.08.2023.

21.08.2023 истцом и ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 565 829 руб. 90 коп., справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 565 829 руб. 90 коп. и счет-фактура.

На основании вышеуказанных документов истцом выставлен счет № 21-4 от 21.08.2023. Ответчик обязан произвести окончательный расчет не позднее 11.09.2023.

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания задолженностей, суд первой инстанции руководствовался ст. 309, 310, 702, 708, 709, 711, 720, 740, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».

Доводы апелляционной жалобы о том, что в распоряжении ответчика отсутствует большинство оригиналов актов выполненных работ, подписание этих актов не осуществлялось генеральным директором ООО «Шаркс», а объем заявленных поставок не соответствует фактически выполненным работам, коллегия отклоняет ввиду следующего.

 Ответчиком было заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы со ссылкой на фальсификацию истцом подписи от имени ответчика на актах выполненных работ, дополнительных соглашений к договорам подряда, справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Применительно к ст. 64, 71, 82, 86, 161 АПК РФ, постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" судом истцу было предложено исключить спорные доказательства из доказательственной базы. Истец отказался исключить указанные в иске акты и соглашения из числа доказательств. 

АПК РФ не обязывает суд в любом случае при решении вопроса о принятии мер по проверке заявления о фальсификации доказательства назначать экспертизу, в случае если в материалах дела имеются иные доказательства, подтверждающие либо опровергающие обстоятельства о фальсификации доказательства, суд для проверки достоверности заявления о фальсификации вправе принять другие меры, в том числе суд может исследовать оспариваемое доказательство в сравнении с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Таких доказательств в подтверждение поданного заявления ответчиком не представлено.

Ответчик не обеспечил явку генерального директора ООО «Шаркс», свободные образцы почерка не представил, доказательства уважительной причины неявки не представл, денежные средства на депозитный счёт не внес, подлинность печати ООО «Шаркс» не оспорил, ввиду чего суд первой инстанции правомерно отказал в исключении спорных доказательств из числа доказательств, представленных в материалы дела, придя к выводу о необоснованности такого заявления.

Ответчиком в нарушение требований ст. 65 АПК РФ не представлено доказательств, подтверждающих направление в адрес истца мотивированных возражений на акты выполненных работ, а также объективных и достоверных доказательств, подтверждающих исполнение истцом работ в меньшем объеме, чем это указано в актах.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату. Кроме того, ответчик не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ.

В силу изложенного суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела и конкретных обстоятельствах, доводы лиц, участвующих в деле правильно оценены, выводы сделаны при правильном применении норм действующего законодательства.

Удовлетворяя исковые требования в части процентов, суд первой инстанции руководствовался ст. 395 ГК РФ. 

Доводы апелляционной жалобы в части необоснованного отказа в снижении неустойки применительно к ст. 333 ГК РФ апелляционный суд отклоняет как несостоятельные и не основанные на законодательстве, поскольку в настоящем споре истец просил взыскать не договорную неустойку (ст. 330 ГК РФ), а проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), что прямо следует из текста искового заявления и расчета санкций. При этом к размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (пункт 6 статьи 395 ГК РФ, абзац 4 пункта 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Из материалов дела видно, что размер процентов определен истцом в соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ (применительно к действовавшим в периоды просрочки ставкам). Следовательно, материалы дела не содержат каких-либо доказательств несоразмерности начисленных процентов, применения ставки больше, чем установлено пунктом 1 статьи 395 ГК РФ.

Поскольку в материалы дела не представлено доказательств уплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. 00 коп. относятся на ООО "Шаркс" и подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2024 по делу №А40-31587/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

            Взыскать с ООО "Шаркс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3 000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                         А.Б. Семёнова

 

Судьи                                                                                                 Е.Е. Кузнецова

 

В.И. Тетюк