Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-4632/2020

г. Петрозаводск

28 ноября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2020 года.  

Полный текст решения изготовлен   28 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Ильющенко О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Моисеенко М.Б. (до перерыва), секретарем Турковой И.С.  (после перерыва), рассмотрел в  судебном заседании с участием до перерыва от истца: Бережного В.А. (доверенность от 03.02.2020), от ответчика: Макаровой В.В. (доверенность от 28.05.2020) -   дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ПромМонтажАвтоматика» (ОГРН: 1127453012785; ИНН: 7453249119) к казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» (ОГРН: 1021000521123; ИНН: 1001041315) о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта № 34аэф-18/2018-П от 14.12.2018.

Явку своего представителя в судебное заседание третье лицо, государственное унитарное предприятие  Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго», не обеспечило.

Суд установил следующее.

По результатам электронного аукциона между КУ РК «УКС РК» (заказчик) и ООО «ПромМонтажАвтоматика» (подрядчик) заключен государственный контракт № 34аэф-18/2018-П от 14.12.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция котельной в пос. Кварцитный Прионежского района Республики Карелия (кадастровый номер 10:22:0010301:99) на 3 МВт с заменой оборудования и ликвидацией мазутного хозяйства» (далее – контракт).

Пунктом 3.1 контракта установлено, что начало выполнения работ – со дня, следующего после дня заключения контракта, окончание работ – не позднее 31.07.2019; работы выполняются согласно календарному плану (приложение № 2 к контракту).

Согласно пунктам 8.3, 8.4 контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,  а также в случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий контракта, в частности, нарушения подрядчиком сроков, установленных в разделах 3 и 5 контракта, более чем на 14 дней.

Календарным планом (приложение № 2 к контракту) определено, что выполнение работ по комплексному обследованию объекта, инженерным изысканиям и разработке документации стадии СП выполняется не позднее 4-х месяцев со дня заключения контракта; техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости – не позднее 6-ти месяцев со дня заключения государственного контракта; разработка документации стадии РД – не позднее 31.07.2019.

Уведомлением от 23.12.2019 № 3344 КУ РК «УКС РК» сообщило ООО «ПромМонтажАвтоматика» о непредставлении подрядчиком документации в порядке и объеме, предусмотренных контрактом, об отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства объекта; о принятом заказчиком на основании статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пунктов 8.4 и 8.4.1 контракта решении о расторжении контракта в одностороннем порядке; предложило возвратить перечисленный заказчиком авансовый платеж.

В иске истец ссылается на несогласие с указанным решением; указывает, что предусмотренные контрактом работы выполнены подрядчиком частично; завершению проекта и прохождению государственный экспертизы препятствует непредоставление заказчиком всей необходимой разрешительной документации; право заказчика на односторонний отказ от исполнения контракта не возникло в связи с нарушением им пункта 5.2.1 контракта; подрядчик неоднократно запрашивал у заказчика необходимую документацию,  уведомил его о приостановлении выполнения работ; заказчик сообщил о невозможности предоставления документации до конца 2019 года; дальнейшее производство работ стало невозможным вследствие действий заказчика; проверкой УФАС России по Республике Карелия не было установлено недобросовестного поведения подрядчика, решением от 17.02.2020 отказано во внесении ООО «ПромМонтажАвтоматика» в реестр недобросовестных поставщиков; поскольку законные основания для отказа от исполнения контракта у КУ РК «УКС РК» отсутствовали, просит признать его недействительным.

В отзыве и пояснениях ответчик с требованием не согласен; считает, что подрядчик имел возможность выполнить первый этап работ с использованием фактически представленных исходных данных, заказчик оказывал содействие подрядчику в получении необходимой документации, подрядчик имел право напрямую обратиться к застройщику, ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», по вопросу предоставления исходно-разрешительной документации; поскольку в установленный контрактом срок результата работ подрядчик заказчику не представил,  оспариваемый отказ от исполнения контракта принят на законных основаниях.

В пояснениях истец с доводами ответчика не согласен, поддерживает требование.

В отношении предъявленного требования суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с положениями статьи 450 ГК РФ расторжение договора возможно по соглашению сторон, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или договором, а также в одностороннем внесудебном порядке в случае, когда такое право предоставлено Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно пункту 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Отношения, связанные с размещением государственного заказа и заключением государственных контрактов, регулируются Законом 44-ФЗ, часть 8 статьи 95 которого устанавливает, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу части 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

КУ РК «УКС РК» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта на основании пунктов 8.4, 8.4.1 контракта в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, установленных контрактом.

ООО «ПромМонтажАвтоматика», не оспаривая факт нарушения установленных контрактом сроков выполнения работ, заявляет о невыполнении заказчиком своих обязательств, что послужило  причиной их нарушения.

В силу положений пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно статье 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Пунктом 5.2.1 контракта установлена обязанность заказчика передать подрядчику до начала работ всю необходимую исходно-разрешительную документацию.

Согласно пункту 12 технического задания (приложение № 1 к контракту) в перечень исходных данных включены: правоустанавливающие документы, выписка из ЕГРН на здание и земельный участок; градостроительный план земельного участка; технический план здания; технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения или договора с ресурсоснабжающими организациями.

В отношении доводов ответчика о том, что по условиям данного пункта технических условий указанные исходные данные предоставляются застройщиком - ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», суд отмечает, что  застройщик стороной контракта не является и не несет по его условиям обязанностей по отношению к подрядчику, обязанность по предоставлению подрядчику исходно-разрешительной документации принял на себя именно заказчик (пункт 5.2.1 контракта).

Обязанность заказчика (в том числе технического заказчика) передать исходные данные следует также из положений 759 ГК РФ, части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, КУ РК «УКС РК» было обязано передать истцу исходные данные для выполнения работ, предусмотренных контрактом.

Письмами от 20.12.2018 № 956, от 19.03.2019 № 1045, от 04.06.2019 № 1129, от 08.08.2019 № 1211, от 10.09.2019 № 1259, от 08.11.2019 № 1342  ООО «ПромМонтажАвтоматика» сообщило КУ РК «УКС РК» о непредоставлении заказчиком исходно-разрешительной документации, в том числе: градостроительного плана земельного участка, договора аренды земельного участка, свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения или договора с ресурсоснабжающими организациями.      

Письмом от 12.02.2019 № 995 истец направил ответчику предварительные проектные решения (ситуационный план, принципиальная схема, план расположения оборудования, план навеса) по результатам выполненного обследования объекта проектирования.

Письмами от 01.04.2019 № 1060, от 16.04.2019 № 1079 ООО «ПромМонтажАвтоматика» уведомило КУ РК «УКС РК» о приостановлении проектно-изыскательских работ на основании пункта 5.1.7 контракта и пункта 1 статьи 716 ГК РФ в связи с невозможностью выполнения проектной документации, проведения государственной экспертизы по причине непредставления заказчиком указанной выше документации, а также о невозможности «захода в АУ РК «Карелгосэкспетиза»», как предлагает заказчик письмом от 11.04.2019 № 815, без градостроительного плана и разрешительной документации на земельные участки (что повлечет отрицательное заключение и невозможность корректировки проектной документации), о продолжении работы после получения необходимой документации.

Согласно подпункту «б» пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждено постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) проектная документация должна содержать, в том числе, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;  технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования.

Указанные документы должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме (пункт 11 названного Положения).

В силу подпункта «г» пункта  13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (утверждено постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145) для проведения государственной экспертизы представляется проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации.

Как поясняет истец, по настоянию заказчика ООО «ПромМонтажАвтоматика» приступило к выполнению работ без требуемых исходных данных, разработав  документацию без технических условий, градостроительного плана и разрешительной документации на земельные участки по условно принятым решениям, по границам замещения объекта и по сетям инженерно-технического обеспечения.

Письмом от 07.05.2019 № 1088 ООО «ПромМонтажАвтоматика» направило КУ РК «УКС РК» подготовленные разделы проектной документации, указав на необходимость их корректировки после получения исходно-разрешительной документации.

Из пояснений истца следует, что без технических условий и градостроительного плана земельного участка можно выполнить только инженерные изыскания и обследование, что было выполнено подрядчиком, в отсутствие указанных документов невозможно определить параметры проектируемых объектов (площадь объектов, этажность, площади озеленений, проездов и т.д.), точки подключения к сетям энергоснабжения; в зависимости от полученных исходных данных все выполненные истцом разделы проектной документации, возможно, подлежали изменению (объяснительная записка главного инженера проекта ООО «ПромМонтажАвтоматика» от 09.09.2020).    

Доказательства передачи  КУ РК «УКС РК» подрядчику указанной выше документации в материалах дела отсутствуют.

При этом письмами от 11.04.2019 № 815, от 29.11.2019 № 3093 КУ РК «УКС РК» сообщило ООО «ПромМонтажАвтоматика» об отсутствии градостроительного плана и разрешительной документации на земельный участок, а также о невозможности предоставить ее подрядчику до конца текущего года.

В судебном заседании представитель ответчика указал, что на сегодняшний день данная документация КУ РК «УКС РК» так и не получена.

Как разъяснено в пункте 10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, при несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика, поскольку подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с пунктом 3 статьи 405, пунктом 1 статьи 406 ГК РФ и пунктом 9 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. При таких обстоятельствах срок выполнения работ продлевается на период, соответствующий просрочке кредитора-заказчика.

Материалами дела подтверждается, что на момент принятия 23.12.2019 решения о расторжении контракта в одностороннем порядке КУ РК «УКС РК» не передало истцу указанную выше исходно-разрешительную документацию, без которой не возможна подготовка проектной документации в полном объеме и прохождение государственной экспертизы, следовательно, право на односторонний отказ от исполнения контракта по основаниям, указанным в уведомлении от 23.12.2019 № 3344, у ответчика не возникло.

Принимая во внимание изложенное, требование истца является обоснованным и подлежит удовлетворению. Судебные расходы суд относит на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить.

Признать недействительным решение казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» о расторжении в одностороннем порядке государственного контракта № 34аэф-18/2018-П от 14.12.2018.

2. Взыскать с казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПромМонтажАвтоматика» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

3. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>) через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Ильющенко О.В.