АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д. 74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-5507/2024

г. Тюмень

20 мая 2024 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело, возбужденное по иску  

Администрации Голышмановского городского округа (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 21.06.2019, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Арбонит» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 08.09.2016, ИНН: 

<

***>)  

об обязании устранить ущерб 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Арбонит» в течение месяца с даты  вступления решения в законную силу устранить ущерб, причиненный муниципальному имуществу,  расположенному по адресу: 

<

...>, путем выполнения строительно-монтажных работ, отраженных в дефектной ведомости № 1 от  17.07.2023, а именно произвести:  

1. Демонтаж пластмассового кабель-канала с последующей заменой - 100 м.  2. Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором – 948,65 м.  

3. Просушка потолков кабинетов и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей  потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски 35% - 410,60  м2.  

4. Просушка стен кабинетов и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен,  ранее окрашенных водоэмульсионной, с расчисткой старой краски свыше 10% до 35% - 1076,64 м2.  

5. Просушка полов в кабинетах 410,6 м2 и окрашивание масляной краской ранее окрашенных  полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% - 284,90 м2.  

6. Разборка в кабинетах покрытий полом из линолеума и релина – 125,70 м2.  

7. Просушка потолков в коридорах и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей  потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски 35% - 238,6  м2.  

8. Просушка стен коридоров и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен,  ранее окрашенных водоэмульсионной, с расчисткой старой краски свыше 10% до 35%. – 429,60 м2.  

9. Просушка полов в коридорах и окрашивание масляной краской ранее окрашенных полов без  подготовки с расчисткой старой краски до 10% - 238,6 м2.  

10. Просушка потолка танцзала и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей  потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски 35% - 151,30  м2.  

11. Просушка стен танцзала и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен  танцзала, ранее окрашенных водоэмульсионной, с расчисткой старой краски свыше 10% до 35% - 156  м2.  

12. Просушка полов в танцзале и окрашивание масляной краской ранее окрашенных полов без  подготовки с расчисткой старой краски до 10% - 151,30м2.  

13. Просушка потолка кинозала и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей  потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски 35% - 98,40  м2.  

14. Просушка стен кинозала и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен,  

ранее окрашенных водоэмульсионной, с расчисткой старой краски свыше 10% до 35% - 378,50 м2. 

15. Просушка полов в кинозале и окрашивание масляной краской ранее окрашенных полов в без  

подготовки с расчисткой старой краски до 10% - 196,08 м2. 16. Смена акустических плит и подвесных потолков в кинозале – 203,10 м2. 17. Демонтаж и устройство деревянного покрытия пола (сцена) в кинозале – 105,45 м2. 

18. Окрашивание покрытий из досок (сцена) кинозала быстросохнущим паркетным лаком типа  

ЭП-2146 – 105,45 м2. 19. По завершении работ произвести очистку помещений и вывоз строительного мусора. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арбонит» в доход федерального бюджета  

6000 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со  

дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области. 

 Судья Михалева Е.В.