Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-86604/23-131-901

г. Москва

23 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 23 апреля 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Жбанковой Ю.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончаровым М.А.,

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОМ" 

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКВТОРМЕТ" 

о взыскании 966 110 руб. 24 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО1 по доверенности от 29.12.2023 № 961 

от ответчика: не явился, извещён 

         

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОМ"  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКВТОРМЕТ", с учетом принятого в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения, о взыскании 494 031 руб. 31 коп. денежных средств по договору № ТЛ/261/20 поставки металлолома, образованного от демонтажа (ЭДО) от 09.01.2020, договору на выполнение работ по демонтажу ТМЦ № ТЛ/268/20 от 09.01.2020.

            Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства по адресу государственной регистрации в заседание не явился. Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Через канцелярию суда посредством электронной почты от ответчика поступило ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, представил пояснения в порядке ст. 81 АПК РФ, против применения ст. 333 ГК РФ возражал.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, выслушав в судебном заседании полномочного  представителя истца, который поддержал свою позицию по делу, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, Между ООО «ТрансЛом» (далее - Истец) и ООО «Хаквтормет» (далее -Ответчик) заключены Договор № ТЛ/261/20 поставки металлолома, образованного от демонтажа (ЭДО) от 09.01.2020 и Договор на выполнение работ по демонтажу ТМЦ № ТЛ/268/20 от 09.01.2020.

ООО «Хаквтормет» нарушены условия Договора № ТЛ/261/20 поставки металлолома, образованного от демонтажа (ЭДО) от 09.01.2020.

В соответствии с условиями Договора № ТЛ/261/20 поставки металлолома, образованного от демонтажа (ЭДО) от 09.01.2020 (далее -Договор) Поставщик (ООО «ТрансЛом») обязуется на основании Спецификации поставить, а Покупатель (ООО «Хаквтормет») принять и оплатить Товар.

Согласно п. 2.2 Договора, согласование Спецификации осуществляется посредством электронного документооборота (ЭДО) через удостоверяющий центр, Поставщик направляет Покупателю в электронно-цифровой форме заполненную Спецификацию на поставку Товара, Покупатель в течение пяти рабочих дней с момента получения Спецификации обязан ее рассмотреть и в случае согласия, подписать ее квалифицированной электронной подписью и направить Поставщику.

Оплата за Товар осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке 100% предоплаты стоимости поставляемой партии Товара без учета НДС, согласованной в Спецификации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета на предоплату (п. 3.1 Договора).

В силу п. 4.2 Покупатель обязан оплатить Товар, за свой счет обеспечить своевременное принятие и транспортирование Товара, в момент получения Товара на складе Поставщика (Грузоотправителя) оформить приемосдаточный акт (ПСА) и передать его на подписание Поставщик.

Пунктом 5.8 и 5.9 Договора Сторонами согласован следующий порядок оформления, предоставления и обмена документами:

Товарная накладная (ТН) оформляется Поставщиком на дату отгрузки Товара, ПСА оформляется Покупателем в момент поставки Товара;

Покупатель обязан в день поставки Товара передать Поставщику по электронной почте сканированную копию ПСА на поставленный Товар, а также оригинал ПСА в двух экземплярах, в течение одного рабочего дня со дня поставки;

Поставщик в течение трех рабочих дней с момента получения по электронной почте копии ПСА обязан предоставить Покупателю на поставленный Товар оригинал ТН в двух экземплярах.

Во исполнение условий Договора Сторонами подписаны Спецификации на поставку Товара в сентябре 2022: № КРС-00056 на сумму 1 476 901,90 рублей и № КРС-00057 на сумму 499 570,86 рублей.

29.08.2022 Поставщик выставил в адрес Покупателя счет на предоплату № КР082900003 от 29.08.2022, срок внесения предоплаты истек 02.09.2022.

Поставщик исполнил свои обязательства в полном объёме, Товар был поставлен Покупателю в соответствии с условиями Спецификации, однако, Покупателем при исполнении своих обязательств нарушены условия Договора, а именно.

Покупателем не оплачен поставленный Поставщиком Товар.

Факт поставки Товара подтверждается Товарной накладной № КР091900015 от 19.09.2022, Приемо-сдаточным актом КР091900013 от 19.09.2022 на сумму 642 596,00 рублей, Товарной накладной № КР093000047 от 30.09.2022, Приемо-сдаточным актом КР093000023 от 30.09.2022 на сумму 363 622,08 рублей.

В силу положений ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар полностью непосредственно до или после передачи ему продавцом товара.

Однако, поставленный Товар был оплачен частично: внесена предоплата в размере 234 139,15 рублей, частичная оплата 300 000,00 рублей, а всего -534 139,15 рублей.

По состоянию на 11.01.2023 сумма задолженности Покупателя перед Поставщиком составляет 472 078,93 рублей.

Покупателем нарушен срок внесения предоплаты.

В случае нарушения сроков оплаты Товара или несоблюдения иных сроков расчётов, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки п. 8.1 Договора).

В силу п. 3.1 Договора на основании счета на предоплату № КР082900003 от 29.08.2022 Покупатель обязан внести денежные средства в срок не позднее 01.09.2022, однако обязательства по внесению предоплаты исполнены частично в размере 234 139,15 рублей.

В связи с несоблюдением срока внесения предоплаты подлежит начислению неустойка из расчета: неоплаченная в срок сумма * 0,1% * количество дней просрочки

По состоянию на 11.01.2023 сумма начисленной неустойки составляет 104 265,31 рублей.

Покупателем нарушен срок предоставления и/или подписаниядокументов, предусмотренных Договором.

В силу п.п. 5.8.2 и 5.9.1 Договора Покупатель обязан предоставить в адрес Поставщика сканированную копию ПСА на поставленный Товар, а также оригинал ПСА в двух экземплярах, в течение одного рабочего дня со дня поставки.

19.09.2022 состоялась поставка Товара в адрес Покупателя, что подтверждается Товарной накладной № КР091900015 от 19.09.2022, Приемосдаточным актом КР091900013 от 19.09.2022 на сумму 642 596,00 рублей.

Однако, в нарушение п.п. 5.8.2 и 5.9.1 Договора Покупатель не направил в адрес Поставщика ПСА в срок не позднее 20.09.2022.

30.09.2022 состоялась поставка Товара в адрес Покупателя, что подтверждается Товарной накладной № КР093000047 от 30.09.2022, Приемосдаточным актом КР093000023 от 30.09.2022 на сумму 363 622,00 рублей.

Однако, в нарушение п.п. 5.8.2 и 5.9.1 Договора Покупатель не направил в адрес Поставщика ПСА в срок не позднее 03.10.2022.

В силу п. 8.4 Договора в случае нарушения Покупателем сроков предоставления и/или подписания любого документа или предоставления информационных данных, которые предусмотрены Договором, Поставщик вправе требований от Покупателя уплаты штрафа в размере 20 000,00 рублей за каждый случай нарушения сроков предоставления и/или подписания.

Независимо от предъявления Покупателю требования об уплате штрафа, установленного   п.   8.4.   Договора,   Поставщик   вправе   потребовать   от

Покупателя уплаты штрафной пени в размере 1 ООО (Одной тысячи) рублей за каждый день нарушения Покупателем срока предоставления и/или подписания любого документа или предоставления информационных данных, которые предусмотрены Договором (п. 8.4 Договора).

По состоянию на 11.01.2023 сумма штрафных санкций за нарушение сроков предоставления и/или подписания документов составляет 253 000,00 рублей, включая:

начисление за нарушение срока подписания и предоставления Приемосдаточного акта КР091900013 от 19.09.2022 штрафа в размере 20 000,00 рублей, штрафных пеней в размере 113 000,00 рублей из расчета 113 дней просрочки * 1 000,00 рублей;

начисление за нарушение срока подписания и предоставления Приемосдаточного акта КР093000023 от 30.09.2022 штрафа в размере 20 000,00 рублей, штрафных пеней в размере 100 000,00 рублей из расчета 100 дней просрочки * 1 000,00 рублей.

ООО «Хаквтормет» нарушены условия Договора на выполнение работ по демонтажу ТМЦ № ТЛ/268/20 от 09.01.2020.

В соответствии с условиями Договора на выполнение работ по демонтажу ТМЦ № ТЛ/268/20 от 09.01.2020 (далее - Договор) Исполнитель (ООО «Хаквтормет») осуществляет демонтаж ТМЦ и оказывает услуги по хранению МПИ и металлолома.

На основании п. 3.3.1 Договора срок выполнения работ по демонтажу ТМЦ устанавливается с момента подписания Акта приема-передачи объектов основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД», и если иное не установлено в Задании Заказчика, составляет 10 (десять) календарных дней в случае выполнения работ на территории Исполнителя/субисполнителя.

Согласно п. 3.4 Договора в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ по демонтажу ТМЦ Исполнитель передает Заказчику, в том числе, оригиналы следующих документов: акт приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД», акт выполненных работ, счет на оплату, счет-фактуру.

Во исполнение условий Договора ООО «ТрансЛом» передало в адрес ООО «Хаквтормет» ТМЦ для проведения демонтажа и разделки на территории Исполнителя ст. Абакан, однако ООО «Хаквтормет» выполнило работы по Договору с нарушением сроков, что подтверждается следующим.

1) На основании Задания Заказчика на выполнение работ № КР093000001 от 01.09.2022 со ст. Абакан ООО «ТрансЛом» в адрес ООО «Хаквтормет» был передан для демонтажа и разделки электропоезд ЭР9ПК, инв. номер 19003, что подтверждается Актом приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР090100015 от 01.09.2022.

Соответственно, разделка и демонтаж должны быть проведены по 11.09.2022 включительно, однако, работы выполнены только 30.09.2022, что подтверждается Актом о выполненных работах (оказанных услугах) № КР093000025 от 30.09.2022, Актом приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР093000001 от 30.09.2022.

Просрочка срока выполнения работ составила 19 календарных дней.

Срок предоставления оригиналов акта приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД», акта выполненных работ, счета на оплату, счет-фактуры истек 05.10.2022, однако, по состоянию на 11.01.2023 оригиналы документов до сих пор не представлены.

2) На основании Задания Заказчика на выполнение работ № КР091900002 от 01.09.2022 со ст. Абакан ООО «ТрансЛом» в адрес ООО «Хаквтормет» был передан для демонтажа и разделки электропоезд ЭР9ПК, инв. номер 18006, что подтверждается Актом приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР090100009 от 01.09.2022.

Соответственно, разделка и демонтаж должны быть проведены по 11.01.2022 включительно, однако, работы выполнены только 19.09.2022, что подтверждается Актом о выполненных работах (оказанных услугах) № КР091900015 от 19.09.2022, Актом приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР091900002 от 19.09.2022.

Просрочка срока выполнения работ составила 9 календарных дней.

Срок предоставления оригиналов акта приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД», акта выполненных работ, счета на оплату, счет-фактуры истек 22.09.2022, однако, по состоянию на 11.01.2023 оригиналы документов до сих пор не представлены.

В соответствии с п. 6.3 Договора в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, которые предусмотрены Договором, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 000,00 рублей.

Независимо от предъявления Исполнителю требования об уплате штрафа, установленного настоящим пунктом Договора, Заказчик в праве потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день нарушения сроков выполнения работ по Договору.

За нарушение сроков демонтажа и разделки электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 19003, подлежат начислению штрафные санкции в общем размере 10 789,47 рублей из расчета:

- 10 000,00 рублей - штраф за нарушение сроков выполнения работ;

-  789,47 рублей - пени за нарушение сроков выполнения работ.

За нарушение сроков демонтажа и разделки электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 18006, подлежат начислению штрафные санкции в общем размере 10 476,53 рублей из расчета:

10 000,00 рублей - штраф за нарушение сроков выполнения работ;

476,53 рублей - пени за нарушение сроков выполнения работ.

На основании п. 6.4 Договора, в случае нарушения Исполнителем сроков предоставления и/или подписания любого документа или предоставления информационных данных, которые предусмотрены Договором, Заказчик в праве требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения сроков.

Независимо от предъявления Исполнителю требования об уплате штрафа, установленного настоящим пунктом Договора, Заказчик в праве потребовать от Исполнителя уплаты штрафной пени в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый день нарушения Исполнителем срока предоставления и/или подписания любого документа или предоставления информационных данных, которые предусмотрены договором.

За нарушение сроков предоставление оригиналов документов по проведенному демонтажу и разделке электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 19003, подлежат начислению штрафные санкции в общем размере 54 500,00 рублей из расчета:

5 000,00 рублей - штраф за нарушение сроков предоставление оригиналов документов;

49 500,00 рублей (500руб. * 99 дней) - пени за нарушение сроков предоставление оригиналов документов.

За нарушение сроков демонтажа и разделки электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 18006, подлежат начислению штрафные санкции в общем размере 115 500,00 рублей из расчета:

5 000,00 рублей - штраф за нарушение сроков предоставление оригиналов документов;

56 000,00 рублей (500руб. * 112 дней) - пени за нарушение сроков предоставление оригиналов документов.

Во исполнение претензионного порядка, предусмотренного заключенными договорами, Истец направил в адрес Ответчика Предарбитражную претензию от 18.01.2023 № 442-08, которая осталась без ответа.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Договор № ТЛ/261/20 поставки металлолома, образованного от демонтажа (ЭДО), от 09.01.2020.

Неустойка за нарушение сроков поставленного товара. Расчет неустойки: Сумма к оплате: 1 976 472,76руб. Оплачено в срок: 234 139,15руб.

Сумма долга, руб.

Начало периода начисления неустойки

Конец периода начисления неустойки

Кол-во дней просрочки

Оплата

Ставка

Неустойка,

руб.

 

Дата

Сумма

 

1 742 333,61

02.09.2022

30.09.2022

28

 

0,10%

48 785,34

772 078,93

01.10.2022

27.10.2022

26

 

0,10%

20 074,05

 

27.10.2022

300 000,00

 

472 078,93

28.10.2022

11.01.2023

75

 

0,10%

35 405,92

ИТОГО

104 265,31

Основания для начисления неустойки.

Пункт 3.1 Договора: оплата за Товар осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке 100% предоплаты стоимости поставляемой партии Товара без учета НДС, согласованной в Спецификации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета на предоплату.

Пункт 8.1 Договора: в случае нарушения сроков оплаты Товара или несоблюдения иных сроков расчётов, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Сторонами подписаны Спецификации на поставку Товара в сентябре 2022: № КРС-00056 на сумму 1 476 901,90 рублей и № КРС-00057 на сумму 499 570,86 рублей.

29.08.2022 Поставщик выставил в адрес Покупателя счет на предоплату № КР082900003 от 29.08.2022, в который включена сумма к оплате в соответствии со спецификациями № КРС-00056 и № КРС-00057, срок внесения предоплаты по 01.09.2022.

Ответчиком произведена частичная предоплата в размере 234 139,15 рублей, в связи с неполным внесением предоплаты подлежит начислению неустойка на сумму неуплаченной в срок предоплаты в размере 1 742 333,61 рублей (1 476 901,90 рублей + 499 570,86 рублей - 234 139,15 рублей).

В силу п.3.6 Договора, в случае нарушения срока внесения предоплаты или внесения неполной предоплаты Поставщик (Истец) вправе по своему выбору поставить Товар на сумму поступившей предоплаты с любой разбивкой по ассортименту, приостановить исполнение своих обязательств по Договору без дополнительных уведомлений, перенести или отменить поставку Товара с исполнения, либо отгрузить Товар по цене на момент отгрузки Товара.

В связи с неполной предоплатой ООО «ТрансЛом» поставило ООО «Хаквтормет» товар на общую сумму 1 006 218,08 рублей, что подтверждается Товарной накладной №

КР091900015 от 19.09.2022, Приемо-сдаточным актом КР091900013 от 19.09.2022 на сумму 642 596,00 рублей, Товарной накладной № КР093000047 от 30.09.2022, Приемосдаточным актом КР093000023 от 30.09.2022 на сумму 363 622,08 рублей.

Истец в соответствии с п. 3.6 Договора воспользовался правом на отмену полной поставки Товара в связи с отсутствием оплаты, соответственно, с 01.10.2022 ООО «Хаквтормет» обязано произвести оплату только поставленного товара в соответствии с первичной документацией.

Неустойка за нарушение сроков поставленного товара начисляется с 01.10.2022 на сумму 772 078,93 рублей (1 006 218,08 рублей - сумма предоплаты 234 139,15 рублей).

По состоянию на 11.01.2023 поставленный Товар был оплачен частично: внесена предоплата в размере 234 139,15 рублей, частичная оплата 300 000,00 рублей, а всего -534 139,15 рублей, сумма долга составляла 472 078,93 рублей (в ходе рассмотрения настоящего дела оплачена в полном объеме).

Нарушение срока предоставления и/или подписания документов, предусмотренных Договором.

Расчет штрафной пени:

Наименование документа

Начало периода начисления штрафной пени

Конец периода начисления штрафной пени

Кол-во дней просрочки

Ставка

Штрафная пеня, руб.

Приемо-сдаточный акт КР091900013 от 19.09.2022

21.09.2022

11.01.2023

113

1 000,00

113 000,00

Приемо-сдаточный акт КР093000023 от 30.09.2022

04.10.2022

11.01.2023

100

1 000,00

100 000,00

ИТОГО

213 000,00

Расчет штрафа:

единовременный штраф в размере 20 000,00 рублей за непредоставление Приемосдаточного акта КР091900013 от 19.09.2022;

единовременный штраф в размере 20 000,00 рублей за непредоставление Приемосдаточного акта КР093000023 от 30.09.2022.

ИТОГО: 40 000,00 рублей.

Основания для начисления штрафной пени и штрафа.

Пункты 5.8.2 и 5.9.1 Договора: Покупатель обязан предоставить в адрес Поставщика сканированную копию ПСА на поставленный Товар, а также оригинал ПСА в двух экземплярах, в течение одного рабочего дня со дня поставки.

Пункт 8.4 Договора: в случае нарушения Покупателем сроков предоставления и/или подписания любого документа или предоставления информационных данных, которые предусмотрены Договором, Поставщик вправе требований от Покупателя уплаты штрафа в размере 20 000,00 рублей за каждый случай нарушения сроков предоставления и/или подписания.

Пункт 8.5 Договора: независимо от предъявления Покупателю требования об уплате штрафа, установленного п. 8.4. Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафной пени в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за каждый день нарушения Покупателем срока предоставления и/или подписания любого документа или предоставления информационных данных, которые предусмотрены Договором.

19.09.2022 состоялась поставка Товара в адрес Покупателя, что подтверждается Товарной накладной № КР091900015 от 19.09.2022, Приемо-сдаточным актом КР091900013 от 19.09.2022 на сумму 642 596,00 рублей.

Однако, в нарушение п.п. 5.8.2 и 5.9.1 Договора Покупатель не направил в адрес Поставщика ПСА в срок не позднее 20.09.2022.

30.09.2022 состоялась поставка Товара в адрес Покупателя, что подтверждается Товарной накладной № КР093000047 от 30.09.2022, Приемо-сдаточным актом КР093000023 от 30.09.2022 на сумму 363 622,00 рублей.

Однако, в нарушение п.п. 5.8.2 и 5.9.1 Договора Покупатель не направил в адрес Поставщика ПСА в срок не позднее 03.10.2022.

Договор на выполнение работ по демонтажу ТМЦ № ТЛ/268/20 от 09.01.2020.

Нарушение сроков выполнения работ.

Расчет пеней за нарушение сроков выполнения работ:

Наименование ТМЦ

Стоимость работ, руб.

Начало периода начисления штрафной пени

Конец периода начисления штрафной пени

Кол-во дней просрочки

Ставка

Пени, руб.

электропоезд ЭР9ПК, инв. номер 19003

41 551,20

12.09.2022

30.09.2022

19

0,1%

789,47

электропоезд ЭР9ПК, инв. Номер 18006

52 947,60

12.09.2022

19.09.2022

8

0,1%

476,53

ИТОГО

1 266,00

Расчет штрафа за нарушение сроков выполнения работ:

- единовременный штраф в размере 10 000,00 рублей за нарушение сроков разделки электропоезд ЭР9ПК, инв. номер 19003;

- единовременный штраф в размере 10 000,00 рублей за нарушение сроков разделки электропоезд ЭР9ПК, инв. номер 18006;

ИТОГО: 20 000,00 рублей.

Основания для начисления штрафной пени и штрафа.

Пункт 3.3.1 Договора: срок выполнения работ по демонтажу ТМЦ устанавливается с момента подписания Акта приема-передачи объектов основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД», и, если иное не установлено в Задании Заказчика, составляет 10 (десять) календарных дней в случае выполнения работ на территории Исполнителя/субисполнителя.

Пункт 3.4 Договора: в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ по демонтажу ТМЦ Исполнитель передает Заказчику, в том числе, оригиналы следующих документов: акт приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД», акт выполненных работ, счет на оплату, счет-фактуру.

Пункт 6.3 Договора: в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, которые предусмотрены Договором, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 000,00 рублей.

Независимо от предъявления Исполнителю требования об уплате штрафа, установленного настоящим пунктом Договора, Заказчик в праве потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день нарушения сроков выполнения работ по Договору

ООО «ТрансЛом» передало в адрес ООО «Хаквтормет» ТМЦ для проведения демонтажа и разделки на территории Исполнителя ст. Абакан, однако ООО «Хаквтормет» выполнило работы по Договору с нарушением сроков, что подтверждается следующим.

1)           На основании Задания Заказчика на выполнение работ № КР093000001 от 01.09.2022 со ст. Абакан ООО «ТрансЛом» в адрес ООО «Хаквтормет» был передан для демонтажа и разделки электропоезд ЭР9ПК, инв. номер 19003, что подтверждается Актом приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР090100015 от 01.09.2022.

Соответственно, разделка и демонтаж должны быть проведены по 11.09.2022 включительно, однако, работы выполнены только 30.09.2022, что подтверждается Актом о выполненных работах (оказанных услугах) № КР093000025 от 30.09.2022, Актом приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР093000001 от 30.09.2022.

Просрочка срока выполнения работ составила 19 календарных дней.

2)           На основании Задания Заказчика на выполнение работ № КР091900002 от 01.09.2022 со ст. Абакан ООО «ТрансЛом» в адрес ООО «Хаквтормет» был передан для демонтажа и разделки электропоезд ЭР9ПК, инв. номер 18006, что подтверждается Актом приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР090100009 от 01.09.2022.

Соответственно, разделка и демонтаж должны быть проведены по 11.01.2022 включительно, однако, работы выполнены только 19.09.2022, что подтверждается Актом о выполненных работах (оказанных услугах) № КР091900015 от 19.09.2022, Актом приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР091900002 от 19.09.2022.

Просрочка срока выполнения работ составила 8 календарных дней.

4. Нарушение срока предоставления и/или подписания документов, предусмотренных Договором.

Расчет штрафной пени:

Наименование документа

Начало периода начисления штрафной пени

Конец периода начисления штрафной пени

Кол-во дней просрочки

Ставка, руб.

Штрафная пеня, руб.

Оригиналы документов по проведенному демонтажу и разделке электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 19003

05.10.2022

11.01.2023

99

500,00

49 500,00

Оригиналы документов по проведенному демонтажу и разделке электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 18006

22.09.2022

11.01.2023

112

500,00

56 000,00

 

ИТОГО

105 500,00

Расчет штрафа:

единовременный штраф в размере 5 000,00 рублей за непредоставление оригиналов документов по проведенному демонтажу и разделке электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 19003;

единовременный штраф в размере 5 000,00 рублей за непредоставление оригиналов документов по проведенному демонтажу и разделке электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 18006.

ИТОГО: 10 000,00 рублей.

Основания для начисления штрафной пени и штрафа.

Пункт 3.4 Договора: в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ по демонтажу ТМЦ Исполнитель передает Заказчику, в том числе, оригиналы следующих документов: акт приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД», акт выполненных работ, счет на оплату, счет-фактуру.

Пункт 6.4 Договора: в случае нарушения Исполнителем сроков предоставления и/или подписания любого документа или предоставления информационных данных, которые предусмотрены Договором, Заказчик в праве требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения сроков.

Независимо от предъявления Исполнителю требования об уплате штрафа, установленного настоящим пунктом Договора, Заказчик в праве потребовать от Исполнителя уплаты штрафной пени в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый день нарушения Исполнителем срока предоставления и/или подписания любого документа или предоставления информационных данных, которые предусмотрены договором.

Работы по демонтажу и разделке электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 19003 были выполнены 30.09.2022, что подтверждается Актом о выполненных работах (оказанных услугах) № КР093000025 от 30.09.2022, Актом приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР093000001 от 30.09.2022.

Срок предоставления оригиналов акта приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД», акта выполненных работ, счета на оплату, счет-фактуры истек 05.10.2022, однако, по состоянию на 11.01.2023 оригиналы документов не были не представлены.

Работы по демонтажу и разделке электропоезда ЭР9ПК, инв. номер 18006 были выполнены 19.09.2022, что подтверждается Актом о выполненных работах (оказанных услугах) № КР091900015 от 19.09.2022, Актом приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД» № КР091900002 от 19.09.2022.

Срок предоставления оригиналов акта приема-передачи объектов основных средства и материальных ценностей ОАО «РЖД», акта выполненных работ, счета на оплату, счет-фактуры истек 22.09.2022, однако, по состоянию на 11.01.2023 оригиналы документов не были не представлены.

Расчет суммы неустойки (пени) и штрафа проверен судом, обоснован и подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Как следует из п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку по заявлению должника о таком уменьшении.

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление N 7) даны разъяснения применения положений ст. 333 ГК РФ. Так, в п. 72 постановления N 7 указано, что заявление ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции. Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика (п. 73).

Как следует из материалов дела, ответчик при рассмотрении дела в отзыве на исковое заявление просил уменьшить заявленную истцом сумму неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

Наличие в материалах дела заявления ответчика об уменьшении неустойки истцом не оспаривается.

Ходатайство ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ суд считает подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Вместе с тем, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2 Определения от 21.12.2000 N 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой ущерба. 

Таким образом, суд считает необходимым применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер неустойки (пени) до суммы 298 000 руб., учитывая конкретные обстоятельства дела и принимая во внимание то, что заявленная неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств. 

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина  по иску относится на ответчика, поскольку оплаты была после подачи иска. Согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 г. № 6 при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения.            

На основании ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 314, 330, 331, 333, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 159, 167-171, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКВТОРМЕТ" (адрес: 655015, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 30.06.2003) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОМ" (адрес: 105005, 

<

...>, ЭТ/КОМН 4/2, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.12.2007) сумму денежных средств в размере 368 000 руб., из них 298 000 руб.  неустойка (пени), 70 000 руб. штраф, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 322 руб. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.     

 

            Судья                                                                                              Ю.В.Жбанкова