93/2022-136871(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-3794/2022

15 ноября 2022 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел  в открытом судебном заседании материалы дела по иску  

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Континенталь»  

к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик  строительно-монтажное управление «Строй Инвест»  

о взыскании задолженности по договору подряда № 013-20 от 01.08.2020 в размере 4 999  988 руб. 99 коп., неустойку в размере 932 648 руб. 94 коп., рассчитанную по 07.04.2022,  продолжая начисление неустойки с 08.04.2022 по день фактической оплаты  задолженности,  

и по встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик  строительно-монтажное управление «Строй Инвест»  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь»  

о взыскании неустойки за нарушение срока окончания работ по договору подряда № 01320 от 01.08.2020 в размере 2 221 822 руб. 10 коп., а также расходов по оплате  государственной пошлины.  

третье лицо: ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ-СПБ», ООО «АльфаСтройТрест- 411».  

В судебном заседании участвуют представители: от истца по первоначальному иску: ФИО2 по доверенности от 26.11.2021, 

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 по доверенности от 18.06.2021,  от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 132, 167-170, 176, 177, 180  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Континенталь» о привлечении к участию в деле в качестве  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора  ООО «Газпром инвестгазификация», Государственную инспекцию строительного  надзора Курской области, Автономное учреждение Курской области «Спортивная школа  зимних видов спорта «Арена» Администрацию Суджанского района Курской области по  делу № А35-3794/2022 отказать.  

По основному иску: 

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Континенталь» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная  

компания «Континенталь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 5 438 900 руб. 62  коп., в том числе задолженность по договору подряда № 013-20 от 01.08.2020 в размере  4 999 988 руб. 99 коп., неустойку в размере 438 911 руб. 63 коп. за период с 30.09.2020 по  14.01.2022.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  14 059 руб. 20 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Континенталь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 7 934 руб. 00 коп.  

По встречном иску: 

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест»  удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Континенталь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  5 573 968 руб. 83 коп., в том числе штраф за нарушение срока окончания работ по  договору подряда № 013-20 от 01.08.2020 в размере 2 221 822 руб. 10 коп., штраф за  отказ от устранения недостатков в размере 1 481 214 руб. 73 коп., расходы на устранение  недостатков выполненных работ в размере 1 870 932 руб. 00 коп., а также судебные  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 34 109 руб. 00 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Континенталь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 16 761 руб. 00 коп.  

В результате зачета взысканных сумм по первоначальному и встречному искам: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Континенталь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  задолженность в размере 135 068 руб. 21 коп., а также судебные расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 34 109 руб. 00 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  14 059 руб. 20 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Континенталь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 28 305 руб., уплаченную по платежному поручению   № 143 от 13.05.2022.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий  месяца со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Беседина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.03.2022 5:46:00

Кому выдана Беседина Анастасия Юрьевна